АРБИТРАЖНЫЙ СУД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

156961, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2 

http://kostroma.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

/ в соответствии со ст. 176 АПК РФ/ 

Р Е З О Л Ю Т И В Н А Я Ч А С Т Ь 

Р Е Ш Е Н И Я

 

 «28» апреля 2017 г. по результатам рассмотрения дела № А31-1202/2017 

по заявлению заявление Общества с ограниченной ответственностью  «Управляющая компания Жилстрой», г. Кострома (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью «Композит» г.  Кострома (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), об обязании безвозмездно  выполнить комплекс работ по устранению дефектов многоквартирного дома № 34А  по шоссе Кинешемское города Костромы,  

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно  предмета спора Общество с ограниченной ответственностью «ОФЦ-групп»  

Суд первой инстанции в составе председательствующего: судьи Паниной  С.Л.  

(фамилия, инициалы) 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 167-171, 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Композит» г.  Кострома (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) безвозмездно выполнить  комплекс работ по устранению дефектов многоквартирного дома № 34А по шоссе  Кинешемское города Костромы, а именно:  

- выполнить работы по демонтажу существующего 1 и 2 слоя кровельного  покрытия;  

- выполнить работы по демонтажу существующей цементной стяжки крыши;  

- выполнить новый уклонообразующий слой стяжки, для обеспечения беспрепятственного водоотвода к чашам ливневой канализации; 

- выполнить двухслойное кровельное покрытие из рулонных кровельных  материалов  

техноэласт ЭКП, ЭПП; 

- выполнить примыкание кровли к парапету, канализационным вытяжкам,  машинным отделениям, всем вертикальным поверхностям конструкции в два слоя с  соблюдением нормативной технологии;  

- выполнить работы по демонтажу существующего покрытия чаш ливневой  канализации;  

- выполнить двухслойное покрытие из рулонных кровельных материалов  техноэласт ЭКП, ЭПП на чашах ливневой канализации  

- установить защитные решетки на чаши ливневой канализации; 

- закрепить решетки на чашах ливневой канализации;  

- установить на канализационных вытяжках зонтики из оцинкованной стали;  - закрепить металлическое покрытие парапетов;  

- демонтировать металлические конструкции - лестницы, установленные непосредственно на кровельное покрытие; 

- выполнить работы по монтажу металлических лестниц с соблюдением  нормативной технологии, исключающей разрушения кровельного покрытия;  

- выполнить работы по ремонту отмостки со стороны главного фасада дома;  

- выполнить работы по устранению причин затопления подвального  помещения подъездов № 3-4;  

- выполнить работы по устранению следов затопления подвального  помещения подъездов № 3-4, а именно удалить песчаный слой и выполнить новую  песчаную подсыпку в местах затопления;  

- выполнить работы по устранению недостатков в установке окон ПВХ в  квартире Зв 162 - неплотность прилегания створок, нарушения в устройстве  оконных откосов;  

- восстановить работу вентиляции, устранить промерзание вентиляционных  шахт в квартирах №№ 15,70,77,94,95,113,140,141,144,160,164;  

- выполнить утепление наружных стен квартир №№ 15, 70, 94,  95,140,144,160,164;  

- выполнить работы по восстановлению штукатурки на подпорной стенке со  стороны главного фасада.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Композит» г.  Кострома (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), в пользу Общества с  ограниченной ответственностью «Управляющая компания Жилстрой», г. Кострома  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Кострома (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) 6 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй  арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия, а со дня  вступления решения в законную силу – в кассационном порядке в Арбитражный  суд Волго-Вятского округа течение двух месяцев при условии, что оно было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Костромской области.  

 Судья С.Л. Панина