РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-272619/22-110-2057

г. Москва

23 мая 2023 г.

Резолютивная часть решения объявлена 03 мая 2023 года

Решение в полном объеме изготовлено 23 мая 2023 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Милкиной К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "СМУ - 305" (119313, ГОРОД МОСКВА, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 95, ЭТ ЦОКОЛЬ ПОМ X ОФИС 24, ОГРН: 1027700499837) к обществу с ограниченной ответственностью   "НАЦИОНАЛЬНОЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" (119331, ГОРОД МОСКВА, ВЕРНАДСКОГО ПРОСПЕКТ, ДОМ 29, ЭТ/ПОМ/КОМ 3/1/23, ОГРН: 1127746411132) о взыскании 2 575 248,53 рублей,

 

при участии:

от истца – не явился,

от ответчика- не явился, 

 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "СМУ - 305" обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью   "НАЦИОНАЛЬНОЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" о взыскании 2 575 284,53 руб. неосновательного обогащения по договору подряда №8/С от 13.01.2022.

Стороны, извещенные надлежащим образом о времени и месте проведения предварительного судебного заседания, а также о рассмотрении спора по существу в случае их неявки и в отсутствие заявленных возражений против завершения предварительного судебного заседания и открытия судебного заседания в I инстанции, в заседание не явились, возражений против открытия судебного заседания в I инстанции непосредственно после завершения предварительного судебного заседания не заявили. С учетом своевременного размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, суд   рассмотрел спор в их отсутствие на основании ст.ст.121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, п.5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011г. №12 «О некоторых вопросах применения АПК РФ в редакции Федерального закона от 27.07.2010 №228-ФЗ «О внесении изменений в АПК РФ».

Исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам:

Как усматривается из материалов дела, 13.01.2022 между ООО «СМУ-305» (далее – Субподрядчик, Истец)  и  ООО «НГО» (далее – Подрядчик, Ответчик)  был заключен договор подряда № 8/С (далее также – Договор), в  соответствии с которым Субподрядчик обязался выполнить монтаж магистральных сетей электроснабжения  и демонтажные работы в помещениях хирургического корпуса ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА «РЖД-МЕДИЦИНА» ИМЕНИ Н.А. СЕМАШКО», в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложением № 1 (Сметный расчёт № 1), составленным в объеме, указанном Подрядчиком на основании ВЕДОМОСТИ ОБЪЕМОВ РАБОТ, предоставленной Подрядчиком, и являющимися неотъемлемой его частью, а Подрядчик обязуется создать Субподрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

Работы осуществлялись по адресу: Москва, ул. Ставропольская, 23, к. 1,  стр. 1 на объекте Подрядчика.

Цена  договора составляет 9 023 501,59 (Девять миллионов двадцать три тысячи пятьсот один)  рубль  59 копеек, в том числе НДС 20%, что составляет 1 479 262 рубля 56 копеек.

05.05.2022 г. между Подрядчиком  и Субподрядчиком заключено дополнительное соглашение № 1 к Договору (далее – Соглашение к договору) в  соответствии с которым Субподрядчик обязался  выполнить дополнительные работы по монтажу кабелей заземления и монтажу ВРУ в хирургическом корпусе ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА «РЖД-МЕДИЦИНА» ИМЕНИ Н.А. СЕМАШКО» по адресу: Москва, ул. Ставропольская, д. 23, к. 1, сооружение 1, а Подрядчик обязался принять выполненные работы и оплатить обусловленную Соглашением цену.

Стоимость работ по Соглашению к Договору составляет 1 304 583,91 (Один миллион триста четыре тысячи пятьсот восемьдесят три) рубля 91 копейка, в т.ч. НДС 20% - 217 430,65 рублей.

Согласно   п. 3.1 Договора срок выполнения работ – 50 (Пятьдесят) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта приема - передачи  помещений для производства монтажных работ, при условии перечисления Подрядчиком аванса указанного в  п. 4.2.1 настоящего Договора  и предоставления Заказчиком проектной документации.

В соответствии с п. 4.2.1. Подрядчик в течение 5 (Пяти) дней  с даты подписания настоящего Договора    перечисляет на   расчетный   счет   Субподрядчика авансовый  платеж в размере 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% – 500 000 рублей 00 копеек.

Согласно п. 4.3 оплата считается выполненной с момента зачисления средств на расчетный счет Субподрядчика.

Авансовый платеж зачислен  на расчетный счет Субподрядчика 20.01.2022 г., что подтверждается платежным поручением № 2 от 18.01.2022

На 04.07.2022 г. Истцом сданы выполненные работы, общая стоимость которых составляет  9 150 536,19 (Девять миллионов сто пятьдесят тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей 19 копеек,  что подтверждается Актами о приемке выполненных  работ (КС-2):

- № 1 от 07.02.2022 г.  на сумму 3 751 872,44 руб.;

- № 2 от 11.02.2022 г. на сумму 1 593 216,66 руб.;

- № 3 от 23.05.2022 г. на сумму 1 096 580,96 руб.;

- № 4 от 06.06.2022 на сумму 812 677,62 руб.;

- № 5 от 04.07.2022 на сумму 617 185,75 руб.;

- № 1 от 23.05.2022 г. на сумму 183 691,01 руб. (Соглашение к договору);

- № 2 от 06.06.2022 г. на сумму 839 837,53 руб.  (Соглашение к договору);

-№ 03 от  04.07.2022 на сумму 255 474,22 руб. (Соглашение к договору);

(из них подписаны Подрядчиком Акты о приемке выполненных работ по договору на сумму 8 277 876,22 (Восемь миллионов двести семьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей 22 копейки.

Согласно п. 2.2.2 Договора Подрядчик обязуется принять, оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.

Согласно п. 4.2.2 Договора  оплата за фактически выполненные Работы осуществляется Подрядчиком ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта(-ов) о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки(-ок) о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с приложением  счета-фактуры на основании счета, выставленного Субподрядчиком.

На 07.12.2022 Ответчик оплатил выполненные работы  в размере 6 575 251,66 (Шесть миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч двести пятьдесят один) рубль 66 копеек, что подтверждается платежными поручениями №№: 2 от 18.01.2022 г, 36 от 01.03.2022 г, , 37  от 02.03.2022 г., 122 от 05.05.2022 г., 142 от 24.05.2022 г., 161 от 02.06.2022 г.,  205 от 21.06.2022 г.

На основании п. 2.1.5 Договора Субподрядчик имеет право на приостановку производства работ в случае задержки Подрядчиком финансирования по договору более, чем на 5 (Пять) дней.

Истец нарочно направлял Ответчику Акты о приемке выполненных  работ КС-2 № 5 от 04.07.2022 на сумму 617 185,75 руб. и  № 03 от  04.07.2022 на сумму 255 474,22 руб.  с приложениями (письмо исх. № 661 от 05.07.2022 г.). Письмо было вручено 05.07.2022, о чем имеется отметка в получении. Ответчик  не предоставил обоснованного отказа от подписания Актов о приемке выполненных работ (форма КС–2) № 5 от 04.07.2022 на сумму 617 185,75 руб. и  № 03 от  04.07.2022 на сумму 255 474,22 руб.

В соответствии с 5.4. Договора, в  случае, если Подрядчик по истечении 3  (трех) рабочих дней не передает Субподрядчику оформленную документацию и к выполненным работам не будут предъявлены обоснованные письменные претензии, то эти Работы будут считаться принятыми, а Акт  о приемке выполненных работ (форма КС–2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС–3) считается подписанными Подрядчиком.

Письмом  исх. № 1172 от 13.10.2022 Истец просил  Ответчика об оплате выполненных работ.

От принятия Акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС–2) № 5 от 04.07.2022 на сумму 617 185,75 руб. и  № 03 от  04.07.2022 на сумму 255 474,22 руб. и оплаты работ, предусмотренных договором Подрядчик  отказался, следовательно, задолженность в пользу истца составляет 2 575 284,53 (Два миллиона пятьсот семьдесят пять тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 53 копейки (задолженность по оплате выполненных работ, предусмотренных договором, но не оплаченных Ответчиком).

В силу ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с п. 1 ст. 781 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

При указанных обстоятельствах иск подлежит удовлетворению.

На основании  изложенного, руководствуясь ст.ст.   110, 123,156, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью   "НАЦИОНАЛЬНОЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" (  ОГРН: 1127746411132)  в пользу общества с ограниченной ответственностью "СМУ - 305" (ОГРН: 1027700499837)сумму неосновательного обогащения в размере  2 575 284  руб.  53  коп., 35 876  руб.   в возмещение расходов по госпошлине.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

 

 

Судья:

А.В. Мищенко