Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-60738/2019

23 августа 2019 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  22 июля 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  23 августа 2019 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сурков А. А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного засдания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "ДЕТСКИЙ САД №40 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" (адрес:  Россия 188309, Гатчинский район, город Гатчина, Ленинградская область, улица Слепнева 16, ОГРН: 1134705000671);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ ТЕХНОЛОГИЯ" (адрес:  Россия 192177, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, пр-кт ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ 11/А/3-Н, ОГРН:  1167847297353);

о взыскании

при участии

- от истца: ФИО2 (заведующий, по выписке), ФИО3 (по устному поручению)

- от ответчика: не явился, извещен

установил:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "ДЕТСКИЙ САД №40 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" (далее – учреждение) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее – Арбитражный суд) с иском к обществу с ограниченной ответственностью "СТРОЙ ТЕХНОЛОГИЯ"  (далее – Общество) о взыскании  по контракту от 09.08.2018 № 0145300008918000198 (далее – Контракт): 1 215 678,92 руб. штрафа за просрочку выполнения работ, 320 331,39 руб. пеней.

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание своих представителей не направил, что в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ)  не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Арбитражный суд, изучив и оценив представленные в дело доказательства в соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ, установил следующее.

Учреждение (заказчик) и Общество (подрядчик) заключили Контракт.

Срок выполнения работ в соответствии с пунктом 2 Контракта: срок начала работ – с даты заключения контракта, срок выполнения работ – до 15.12.2018.

Уведомлениями от 01.11.2018 №149, от 16.11.2018 №159, от 17.11.2018 №169 Учреждение известило Общество об отставании от графика, просило принять меры для соблюдения сроков по Контракту.

Уведомлением от 25.12.2018 № 173 Контракт расторгнут заказчиком в одностороннем порядке.

Учреждение направило Обществу требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) от 06.02.2019 №10.

Поскольку Общество оставило названное требование (претензию) без удовлетворения, Учреждение  обратилось в арбитражный суд с указанным иском.

В силу статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Согласно статье 702 ГК РФ (по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы; по согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В силу статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается в обоснование своих требований и возражений.

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с пунктом 7.10.1 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных  контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы: 5 процентов цены контракта.

В силу пункта 7.7 и 7.8 Контракта в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, подрядчик уплачивает неустойку (штрафы, пени), начисляемые за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере 1/300  действующей на день уплаты ставки рефинансирования.

Факт невыполнения ответчиком работ по Договору подтверждается представленными истцом и исследованными судом доказательствами.

Проверив представленный истцом расчет штрафа и  пеней, суд, признал его верным, таким образом, требование о взыскании штрафа и пеней надлежит удовлетворить.

В силу пункта 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Каких-либо возражений относительно заявленных требований ответчик не представил.

В силу закрепленного в части 2 статьи 9 АПК РФ принципа состязательности арбитражного судопроизводства, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

В соответствии с пунктом 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙ ТЕХНОЛОГИЯ" в пользу Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "ДЕТСКИЙ САД №40 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" 1 536 010,31 руб. штрафа, 28 360 руб. в возмещение расходов на уплату государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Сурков А. А.