АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации

 

МОТИВИРОВАННОЕ 

РЕШЕНИЕ

Дело №А60-16203/2019

15 июля 2019 года

г. Екатеринбург

 

Судья Арбитражного суда Свердловской области О.И. Вакалюк  рассмотрел дело №А60-16203/2019 по исковому заявлению Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) (далее – Министерство, истец)

к обществу с ограниченной ответственностью «Форвест» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) (ООО «Форвест», ответчик)

о взыскании неустойки по договору  аренды лесного участка № 63 от 10.04.2008, начисленной в связи с нарушениями договорных условий в сумме 40290 руб. 00 коп.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства без вызова сторон после истечения сроков, установленных судом для представления доказательств и иных документов в соответствии с главой 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В части извещения: от истца уведомление, от ответчика возвратный конверт с отметкой Почты России об истечении срока хранения.

Лица, участвующие в деле, о принятии искового заявления, возбуждении производства по делу и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства извещены арбитражным судом путем размещения информации в карточке дела в Картотеке арбитражных дел.

Отводов суду не заявлено.

Судом 19.06.2019 путем подписания резолютивной части вынесено решение.  В материалах дела имеется уведомление от ответчика о получении.

  10.07.2019 конкурсный управляющий ООО «Форвест»   обратился   в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о составлении мотивированного решения, с ходатайством о восстановлении пропущенного срока на составление мотивированного решения.

Рассмотрев ходатайство конкурсного управляющего о восстановлении пропущенного срока на составление мотивированного решения, суд счел необходимым удовлетворить данное ходатайство.   

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Форвест» с требованием о взыскании неустойки по договору  аренды лесного участка № 63 от 10.04.2008, начисленной в связи с нарушениями договорных условий в сумме 40290 руб. 00 коп.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд 

 

установил:

Между Министерством природных ресурсов Свердловской области (Арендодатель) и ООО «Форвест» (Арендатор) заключен договор аренды лесного участка № 63 от 10.04.2008 (далее - Договор), по условиям которого, Арендодатель обязался предоставить Арендатору во временное пользование лесной участок, и в соответствии с условиями договора аренды ООО «Форвест» принял лесной участок общей площадью 14401,0 га.

В соответствии с п.21 Договора, договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Свердловской области и действует 49 лет.

В п.12 Договора перечислены обязательства арендатора, в том числе в п.п. ж) предусмотрена обязанность Арендатора осуществлять за свой счет санитарнооздоровительные мероприятия, лесовосстановление и уход за лесом на лесном участке на условиях, в объемах и сроки, указанные в проекте освоения лесов и приложении №6 к Договору. 

Пунктом 13 Договора предусмотрено, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных Договором, стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

Пунктом 14 Договора предусмотрено, что за нарушение других условий Договора Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размерах, согласно приложению 7 к Договору. В приложении № 6/7 к Договору установлены объемы и сроки исполнения работ по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению на арендуемом лесном участке. 

Согласно приложению № 7/3 к Договору установлена неустойка за нарушение условий Договора. 

Согласно приложению № 6/7 к Договору, ответчик обязан ежегодно производить на арендуемом участке работы по подготовке почвы под культуры будущего года в объёме 8,0 га.

Как указывает истец, в 2018 году объем работ по подготовке почвы под культуры будущего года ответчиком не были выполнены в полном объеме. Акты приемки выполненных работ по подготовке почвы под культуры будущего года отсутствуют. Таким образом, невыполненный объем работ по подготовке почвы под культуры будущего года составил 8,0 га.  

Согласно приложению № 7/3 к Договору неустойка за невыполнение работ по подготовке почвы под культуры будущего года составляет 2000 руб. 00 коп. за 1 га.

В связи с невыполнением данных работ истцом в отношении ответчика начислена неустойка в сумме 16000 руб. 00 коп. (8 га * 2000 руб. 00 коп. = 16000 руб. 00 коп.).

В соответствии с приложением № 6/7 к Договору, ответчик обязан ежегодно производить на арендуемом участке работы по прочистке и обновлению противопожарных минерализованных полос в объеме 20 км.   

Согласно приложению № 7/3 к Договору неустойка за невыполнение работ по прочистке и обновлению противопожарных минерализованных полос составляет 1400 руб. 00 коп. за 1 км.

Как указывает истец, в 2018 году объем работ по прочистке и обновлению противопожарных минерализованных полос не были выполнены ответчиком в полном объеме. Согласно акту приемки выполненных работ №112 от 29.10.2018 объем работ по прочистке и обновлению противопожарных минерализованных полос в Билимбаевском участковом лесничестве составил 2,65 км. Иные акты приемки выполненных работ по прочистке и обновлению противопожарных минерализованных полос отсутствуют. Таким образом, невыполненный объем работ по прочистке и обновлению противопожарных минерализованных полос составил 17,35 км.

В связи с невыполнением данных работ истцом в отношении ответчика начислена неустойка в сумме 24290 руб. 00 коп. (17,35 км * 1400 руб. 00 коп. = 24290 руб. 00 коп.).

Общий размер неустойки по договору аренды лесного участка № 63 от 10.04.2008 составил 40290 руб. 00 коп. (16000 руб. 00 коп. + 24290 руб. 00 коп.). 

Истцом в адрес ответчика направлено уведомление на внесение в федеральный бюджет штрафных санкций за нарушение договорных условий №1 от 28.02.2019 с приложением расчета неустоек, где было предложено добровольно оплатить неустойку в сумме 40290 руб. 00 коп., в течении 10 дней после получения претензионного письма. Уведомление было направлено на юридический адрес ООО «Форвест», уведомление получено ответчиком 14.03.19 (представлено в материалы дела).

Поскольку претензия была оставлена без удовлетворения, истец обратился в Арбитражный суд Свердловской области с настоящим исковым заявлением.

Согласно части 8 статьи 29 Лесного кодекса Российской Федерации (далее - ЛК РФ) граждане, юридические лица осуществляют заготовку древесины на основании договоров аренды лесных участков.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1 ЛК РФ одним из основных принципов лесного законодательства является воспроизводство лесов, улучшение их качества, а также повышение продуктивности лесов.

Части 1, 2 и 5 статьи 12 ЛК РФ определяют, что освоение лесов осуществляется в целях обеспечения их многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования, а также развития лесной промышленности. Освоение лесов осуществляется с соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими полезных функций. При освоении лесов на основе комплексного подхода осуществляются: организация использования лесов; создание и эксплуатация объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры; проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов; проведение мероприятий по охране, использованию объектов животного мира, водных объектов.

Согласно части 5 статьи 17 ЛК РФ осуществление сплошных рубок на лесных участках, предоставленных для заготовки древесины, допускается только при условии воспроизводства лесов на указанных лесных участках.

Статьей 62 ЛК РФ предусмотрено, что лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или комбинированного восстановления лесов. На лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины, лесовосстановление осуществляется арендаторами этих лесных участков. Правила лесовосстановления устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Согласно статье 88 ЛК РФ лица, которым лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду, составляют проект освоения лесов в соответствии со статьей 12 ЛК РФ. 

В соответствии с Правилами лесовосстановления, утв. приказом Минприроды России от 29.06.2016 №375,  естественное восстановление лесов осуществляется за счет мер содействия лесовосстановлению: путем сохранения подроста лесных древесных пород при проведении рубок лесных насаждений, минерализации почвы, огораживании и т.п.

Лесовосстановление проводится на вырубках, гарях, рединах, прогалинах, иных не покрытых лесной растительностью или пригодных для лесовосстановления землях.

В целях лесовосстановления обеспечивается ежегодный учет площадей вырубок, гарей, редин, прогалин, иных не покрытых лесной растительностью или пригодных для лесовосстановления земель, при котором в зависимости от состояния на них подроста и молодняка определяются способы лесовосстановления, при этом отдельно учитываются площади лесных участков, подлежащие естественному лесовосстановлению, искусственному лесовосстановлению, комбинированному лесовосстановлению.

Учет земель, требующих лесовосстановления, производится по данным государственного лесного реестра, материалам лесоустройства, материалам специальных обследований и при отводе лесосек.

Согласно части 2 статьи 55, части 4 статьи 61 ЛК РФ, приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 29.02.2012 №69 «Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки» проект освоения лесов определяет объем соответствующих лесовосстановительных мероприятий и утверждается на основании материалов лесоустройства.

Пункт 1 статьи 329 ГК РФ предусматривает, что исполнение обязательств может обеспечиваться, в том числе неустойкой.

Пункт 1 статьи 330 и статья 331 ГК РФ устанавливают, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.

Ответчик в соответствии с условиями Договора, принял на себя обязательства использовать лесной участок по назначению в соответствии с лесным законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Договором. За нарушение условий договора ответчик принял на себя обязательства по возмещению причиненной неустойки.

 Как следует из материалов дела, ответчиком в нарушение приложения       № 6/7 к Договору не были выполнены работы по подготовке почвы под культуры будущего года, не были выполнены работы по прочистке и обновлению противопожарных минерализованных полос.

Учитывая, что ответчиком не представлено доказательств внесения предъявленной суммы неустойки, расчет не оспорен (ст. 65 АПК РФ),  требование о взыскании 40290 руб. 00 коп. подлежит удовлетворению судом.

В соответствии с ч. 3 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина по иску в размере 2000 руб. 00 коп. взыскивается с ответчика в доход федерального бюджета, поскольку истец освобожден от уплаты государственной пошлины в силу подп. 1.1 п. 1 ст. 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации.

на основании ст. 329, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 110, 167-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

 

РЕШИЛ:

1.  Исковые требования удовлетворить.

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Форвест» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку по договору  аренды лесного участка № 63 от 10.04.2008, начисленную в связи с нарушениями договорных условий в сумме 40290 (сорок тысяч двести девяносто) руб. 00 коп.

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Форвест» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 2000 (две тысячи) руб. 00 коп. государственной пошлины.

4. По заявлению лица, участвующего в данном деле, может быть составлено мотивированное решение. Заявление о составлении мотивированного решения может быть подано в течение пяти дней со дня размещения данной резолютивной части на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет».

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления.

5. Решение по настоящему делу подлежит немедленному исполнению. Указанное решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. 

В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы.

В случае подачи апелляционной жалобы, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

6. Исполнительный лист выдается взыскателю только по его ходатайству независимо от подачи в суд заявления о составлении мотивированного решения или подачи апелляционной жалобы (абзац 2 пункта 46 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации  от 18 апреля 2017 г. № 10 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве»).

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел». 

Выдача исполнительных листов производится не позднее пяти дней со дня вступления в законную силу судебного акта.

По заявлению взыскателя дата выдачи исполнительного листа (копии судебного акта) может быть определена (изменена) в соответствующем заявлении, в том числе посредством внесения соответствующей информации через сервис «Горячая линия по вопросам выдачи копий судебных актов и исполнительных листов» на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» либо по телефону Горячей линии 371-42-50.

В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении. 

 

 

Судья                                                       О.И. Вакалюк