Именем Российской Федерации

                                                         

Р Е Ш Е Н И Е

г. Москва

09.01.2019г.                         Дело № А40-172719/18-151-1298

Резолютивная часть решения оглашена 26.12.2018г.

Решение изготовлено в полном  объеме 09.01.2019г.

Арбитражный суд города Москвы в составе

Судьи Щербаковой И.Э.

при ведении протокола секретарем судебного  заседания ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  - ПАО «МОЭСК» (ИНН 

<

***>)

к ответчику -  ООО «СМК «Стройкомплекс-3» (ИНН 

<

***>)

о взыскании 51 549 374 рублей

при участии:

 от истца–  согласно протокола. 

от ответчика –  согласно протокола.   

УСТАНОВИЛ:

Иск  предъявлен  о взыскании 51 549 374 рублей неустойки по договорам подряда:  № 45-С/2013 от 12.07.2013г,  № 271К6-С-2015 от 28.08.2015г., № 183К1-С-2015. от 27.04.2015г, № 53К4-П-2016 от 15.04.2016г, № 4-С/2014 от 15.01.2014г, № 77-С-2014 от 24.12.2014г, № 227К1-П-2015 от 14.08.2015г., № 194К2-С-2015  от 31.07.2015г. 

Истец исковые требования поддержал, представил судебные акты. 

Ответчик,  надлежаще извещенный о времени и месте рассмотрения дела в порядке ст.ст. 121 -123 АПК РФ, в судебное заседание не явился,  отзыва не представил. 

Дело рассматривается в порядке ст. 156 АПК РФ.  

Рассмотрев материалы дела,  заслушав представителя истца, обозрев представленные по делу документы, суд установил, что:

  12.07.2013г. между истцом (заказчик)  и ответчиком (подрядчик) был заключен договор  строительного подряда № 45-С/2013

В соответствии с п. 2.1 Договора стоимость работ составляет 23 726 780,00 рублей. Согласно п. 3.1 Договора днем окончания работ является 31.12.2013 года. По состоянию на 05.06.2018 г. работы по Договору не выполнены.

На основании п. 9.2 Договора за несоблюдение сроков выполнения работ, установленных Графиком производства этапов работ (в том числе промежуточных по каждому этапу), Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1 % от Цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

Сумма неустойки рассчитывается следующим образом: 23 726 780,00 руб. * 0,1% * 1 618 дней (с 01.01.2014г. по 05.06.2018г.) = 38 389 930,00 руб.

Таким образом, сумма неустойки по Договору составляет 38 389 930,00 руб.

08.09.2017г. в адрес Ответчика была направлена претензия с предложением оплатынеустойки, однако до настоящего времени какие-либо денежные средства от Ответчика поуказанной претензии не поступали.

28.08.2015г. между ПАО «МОЭСК» и ООО «СМК «Стройкомплекс-3» был заключен договор строительного подряда № 271К6-С-2015.

В соответствии с п. 2.1 Договора стоимость работ составляет 1 112 144,76 рублей. Согласно п. 3.1 Договора днем окончания работ является 30.09.2015 года. По состоянию на 05.06.2018 г. работы по Договору не выполнены.

На основании п. 8.2 Договора за несоблюдение сроков выполнения работ, установленных Графиком производства этапов работ (в том числе промежуточных по каждому этапу), Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1 % от Цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

Сумма неустойки рассчитывается следующим образом: 1 112 144,76 руб. * 0,1% * 980 дней (с 01.10.2015г. по 05.06.2018г.) = 1 089 901,00 руб. Таким образом, сумма неустойки по Договору составляет 1 089 901,00 руб.

08.09.2017г. в адрес Ответчика была направлена претензия с предложением оплаты неустойки, однако до настоящего времени какие-либо денежные средства от Ответчика по указанной претензии не поступали.

24.07.2015г. между ПАО «МОЭСК» и ООО «СМК «Стройкомплекс-3» был заключен договор строительного подряда № 183К1-С-2015.

В соответствии с п. 2.1 Договора стоимость работ составляет 2 482 867,23 рубля. Согласно п. 3.1 Договора днем окончания работ является 30.09.2015 года. По состоянию на 05.06.2018 г. работы по Договору не выполнены.

На основании п. 9.2 Договора за несоблюдение сроков выполнения работ, установленных Графиком производства этапов работ (в том числе промежуточных по каждому этапу), Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0.1 % от Цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

Сумма неустойки рассчитывается следующим образом: 2 482 867,23 руб. * 0,1% * 980 дней (с 01.10.2015г. по 05.06.2018г.) = 2 433 209,00 руб.

Таким образом, сумма неустойки по Договору составляет 2 433 209,00 руб.

08.09.2017г. в адрес Ответчика была направлена претензия с предложением оплаты неустойки, однако до настоящего времени какие-либо денежные средства от Ответчика по указанной претензии не поступали.

15.04.2016г. между ПАО «МОЭСК» и ООО «СМК «Стройкомплекс-3» был заключен договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ № 53К4-П-2016.

В соответствии с п. 3.1 Договора стоимость работ составляет 1 150 428,41 руб.

Согласно п. 4.1 Договора днем окончания работ является 31.01.2017 года.

По состоянию на 05.06.2018 г. работы по Договору выполнены частично на сумму 65 302,38 руб.

На основании п. 5.4 Договора за несоблюдение сроков сдачи разработанной документации (в том числе промежуточных по каждому этапу) в установленные указанным графиком сроки Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от Цены Договора за каждый день просрочки до даты фактического исполнения обязательства.

Сумма неустойки рассчитывается следующим образом: (1 150 428,41 руб. - 65 302,38 руб.) * 0,1% * 491 день (с 01.02.2017г. по 05.06.2018г.) = 532 796,00 руб.

Таким образом, сумма неустойки по Договору составляет 532 796,00 руб.

26.01.2018г. в адрес Ответчика была направлена претензия с предложением оплаты неустойки, однако до настоящего времени какие-либо денежные средства от Ответчика по указанной претензии не поступали.

15.01.2014г. между ПАО «МОЭСК» и ООО «СМК «Стройкомплекс-3» был заключен договор строительного подряда № 4-С/2014.

В соответствии с п. 2.1 Договора стоимость работ составляет 4 476 416,14 руб. Согласно п. 3.1 Договора днем окончания работ является 31.03.2014 года. По состоянию на 05.06.2018 г. работы по Договору не выполнены.

На основании п. 9.2 Договора за несоблюдение сроков выполнения работ установленных Графиком производства этапов работ (в том числе промежуточных по каждому этапу). Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0.1 % от Цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

Сумма неустойки рассчитывается следующим образом: 4 476 416,14 руб. * 0,1% * 1 528 дней (с 01.04.2014г. по 05.06.2018г.) = 6 839 963,00 руб.

Таким образом, сумма неустойки по Договору составляет 6 839 963,00 руб.

В адрес Ответчика была направлена претензия с предложением оплаты неустойки, однако до настоящего времени какие-либо денежные средства от Ответчика по указанной претензии не поступали.

24.12.2014г. между ПАО «МОЭСК» и ООО «СМК «Стройкомплекс-3» был заключен договор строительного подряда № 77-С-2014.

В соответствии с п. 2.1 Договора стоимость работ составляет 794 598,93 руб.

Согласно п. 3.1 Договора днем окончания работ является 31.12.2014 года.

По состоянию на 05.06.2018 г. работы по Договору выполнены частично на сумму 333 828,45 руб.

На основании п. 8.2 Договора за несоблюдение сроков выполнения работ, установленных Графиком производства этапов работ (в том числе промежуточных по каждому этапу), Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0.1 % от Цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

Сумма неустойки рассчитывается следующим образом: (794 598,93 руб. - 333 828,45 руб.) * 0,1% * 1 253 дня (с 01.01.2015г. по 05.06.2018г.) = 577 345,00 руб.

Таким образом, сумма неустойки по Договору составляет 577 345,00 руб.

В адрес Ответчика была направлена претензия с предложением оплаты неустойки, однако до настоящего времени какие-либо денежные средства от Ответчика по указанной претензии не поступали.

14.08.2015г. между ПАО «МОЭСК» и ООО «СМК «Стройкомплекс-3» был заключен договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ № 227К1-П-2015.

В соответствии с п. 3.5 Договора стоимость работ составляет 1 042 989.29 руб.

Согласно п. 4.5 Договора днем окончания работ является 31.12.2015 года.

По состоянию на 05.06.2018 г. работы по Договору выполнены частично на сумму 256 885,21 руб.

На основании п. 5.4 Договора за несоблюдение сроков сдачи разработанной документации (в том числе промежуточных по каждому этапу) в установленные указанным графиком сроки Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0.1% от Цены Договора за каждый день просрочки до даты фактического исполнения обязательства.

Сумма неустойки рассчитывается следующим образом:

(1 042 989,29 руб. - 256 885,21 руб.) * 0.1% * 888 дней (с 01.01.2016г. по 05.06.2018г.) = 698 060,00 руб.

Таким образом, сумма неустойки по Договору составляет 698 060,00 руб.

В адрес Ответчика была направлена претензия с предложением оплаты неустойки, оставленная последним без ответа и удовлетворения. 

31.07.2015г. между ПАО «МОЭСК» и ООО «СМК «Стройкомплекс-3» был заключен договор строительного подряда № 194К2-С-2015.

В соответствии с п. 2.1 Договора стоимость работ составляет 2 012 566,38 руб. Согласно п. 3.1 Договора днем окончания работ является 31.01.2017 года. По состоянию на 05.06.2018 г. работы по Договору не выполнены.

На основании п. 8.2 Договора за несоблюдение сроков выполнения работ, установленных Графиком производства этапов работ (в том числе промежуточных по каждому этапу), Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1 % от Цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

Сумма неустойки рассчитывается следующим образом:

2 012 566,38 руб. * 0,1% * 491 день (с 01.02.2017г. по 05.06.2018г.) =?988 170,00 руб.

Таким образом, сумма неустойки по Договору составляет 988 170,00 pyfyb

В адрес Ответчика была направлена претензия с предложением Оплаты неустойки, оставленная последним без ответа и удовлетворения. 

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ч. 1 ст. 330 Гражданского кодекса РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан указывать причинение ему убытков.

Согласно расчету истца общая сумма неустойки по всем договорам составляет 51 549 374,00 руб. Расчет неустойки судом проверен и признан  правильным. 

Ответчик иск не оспорил.

В силу положений ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иные доказательства, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Учитывая изложенное, исковые требования истца судом признаны обоснованными, документально подтвержденными и подлежат удовлетворению в полном объеме.

Расходы по госпошлине суд относит на ответчика в порядке ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 8, 12, 307, 310, 314,  330,702 ГК РФ,  ст. ст. 65, 70, 102, 110, 121-123, 156, 167-171, 180, 319   АПК  РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО «СМК «Стройкомплекс-3» (ИНН 

<

***>) в пользу ПАО «МОЭСК» (ИНН 

<

***>) 51 549  374 руб. неустойки,  200 000  руб. госпошлины. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд.

СУДЬЯ                                                                       И.Э. Щербакова