9_1856327  

 Арбитражный суд Сахалинской области 

Коммунистический проспект, дом 28, Южно-Сахалинск, 693024, 

www.sakhalin.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А59- 2916/2024

11 февраля 2025 года

город Южно-Сахалинск

 

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Портновой О. А., при ведении протокола судебного заседания секретарем Косенковой О. А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску администрации муниципального образования городской округ «Долинский» Сахалинской области Российской Федерации (ОГРН 1036502600221, ИНН 6503000456) к обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Рыбоводстрой» (ОГРН 1026500545830, ИНН 6501067536) о возложении обязанности по устранению недостатков в рамках муниципальных контрактов, о взыскании 20 000 рублей штрафа,  

Третье лицо – ООО «Жилсеровис-1», в отсутствие участвующих в деле лиц, 

Руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

изменить наименование истца на Администрацию муниципального образования Долинский муниципальный округ Сахалинской области.  

Иск удовлетворить частично. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Рыбоводстрой» в течение тридцати дней с даты вступления настоящего решения в законную силу устранить следующие гарантийные недостатки:  

по муниципальному контракту от 19.12.2022 года № 0161300006322000498 в квартире 42 жилого дома № 15 по адресу: 

<

...> провести мероприятия по устранению причин продувания окон во всей квартире,  

по муниципальному контракту от 19.12.2022 года № 0161300006322000507 в квартире 15 жилого дома № 15 по адресу: 

<

...> провести мероприятия по устранению причин протекания балкона,  

по муниципальному контракту от 19.12.2022 года № 0161300006322000520 в квартире 14 жилого дома № 15 по адресу: 

<

...> провести мероприятия по замене бачка унитаза; мероприятия по устранению причин продувания окон во всей квартире; мероприятия по устранению причин ненадлежащей работе вентиляции на кухне и комнате; провести мероприятия по устранению почернений сены в ванной комнате размерами 1 м. х 1 м.; мероприятия по  

устранению причин похолодания стены в комнате смежной с ванной; мероприятия по устранению причин капания воды в шахте канализации на кухне и в ванной.  

по муниципальному контракту от 19.12.2022 года № 0161300006322000567 в квартире 9 жилого дома № 15-б по адресу: 

<

...> провести мероприятия по устранению причин продувания окон во всей квартире; мероприятия по устранению дефекта оконной рамы.  

Взыскать с общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Рыбоводстрой» в пользу Администрации муниципального образования Долинский муниципальный округ Сахалинской области 20 000 (двадцать тысяч) рублей штрафа за неисполнение гарантийных обязательств по муниципальным контрактам от 19.12.2022 года № 0161300006322000498, № 0161300006322000507, № 0161300006322000520, № 0161300006322000567.  

В остальной части в удовлетворении иска отказать. 

Взыскать с общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Рыбоводстрой» в федеральный бюджет 6 800 (шесть тысяч восемьсот) рублей государственной пошлины.  

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Сахалинской области.  

Решение сторонам не направлять. 

Судья О.А. Портнова