Арбитражный суд Волгоградской области 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

город Волгоград Дело № А12-46990/2019  «24» августа 2020 года  

Судья Арбитражного суда Волгоградской области Бударина Е.С.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шаповаловым Д.В., 

рассмотрев в судебном заседании материалы дела по исковому заявлению общества с  ограниченной ответственностью «АС-Инжиниринг» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП  316344300119781, ИНН 

<

***>)  

о взыскании неустойки и штрафа, 

и встречному исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 316344300119781, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью «АС-Инжиниринг» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании задолженности, 

с участием третьего лица - администрации Белогорского сельского поселения  Кумылженского муниципального района Волгоградской области  

при участии в судебном заседании: 

от истца (по первоначальному иску) – ФИО2, представитель по доверенности № 1  от 01.06.2020,  

от ответчика (по первоначальному иску) – ФИО1, лично, паспорт, ФИО3,  представитель по доверенности от 20.01.2020,  

от третьего лица – не явился, извещен надлежащим образом 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

Первоначальные исковые требования удовлетворить в части.  

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в пользу  общества с ограниченной ответственностью «АС-Инжиниринг» неустойку по договору  

 № 1305 от 13.05.2019 за нарушение сроков выполнения работ более чем на 10  календарных дней за период с 07.07.2019 по 10.09.2019 в размере 204 085 руб. 53 коп.,  штраф по договору № 1305 от 13.05.2019 за нарушение сроков выполнения работ более  чем на 15 календарных дней в размере 92 766 руб. 15 коп., а всего – 296 851 руб. 68 коп., а  также судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 7 228 руб. 53 коп.  

В удовлетворении остальной части первоначальных исковых требований отказать.  

Встречные исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АС-Инжиниринг» в  

пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 задолженность по  

договору № 1305 от 13.05.2019 в размере 309 220 руб. 50 коп. 

Окончательно в порядке зачета взаимных требований взыскать с общества с  

ограниченной ответственностью «АС-Инжиниринг» в пользу индивидуального  

предпринимателя ФИО1 денежные средства в размере 5 140 руб. 29  

коп. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АС-Инжиниринг» в доход  

федерального бюджета государственную пошлину в размере 9 184 руб. 

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в  

течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Волгоградской области. 

Судья Е.С. Бударина