АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 600025, г. Владимир, Октябрьский проспект, 14 тел. (4922) 32-29-10, факс (4922) 42-32-13 http://vladimir.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

 

г. Владимир Дело № А11-9788/2018  "23" ноября 2018 года  

Резолютивная часть решения оглашена 16.11.2018. Решение в полном объеме изготовлено 23.11.2018 

В судебном заседании 13.11.2018 по делу № А11-9788/2018 в порядке статьи 163  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв  до 16.11.2018.  

Арбитражный суд Владимирской области в составе судьи Кузьминой С.Г.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая  компания Центра и Приволжья" (603950, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  лице филиала "Владимирэнерго" (600016, 

<

...>) к обществу с ограниченной ответственностью  "ВладСтройКомплект" (600007, 

<

...> Октября, д. 68А, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) о расторжении договора технологического  присоединения от 04.05.2016 № 0079тп-16У, взыскании задолженности и  неустойки в общей сумме 2 582 830 руб. 73 коп.,  

при участии представителей от ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в лице филиала "Владимирэнерго" - 

ФИО2, по доверенности от 01.06.2018 № 171 сроком действия по  01.06.2019,  

от ООО "ВладСтройКомплект" – не явились, извещены надлежащим образом, установил. 

Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная  сетевая компания Центра и Приволжья" в лице филиала "Владимирэнерго" (далее –  ПАО "МРСК Центра и Приволжья", истец) обратилось в арбитражный суд с  исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью  "ВладСтройКомплект" (далее – ООО "ВладСтройКомплект", ответчик) о  расторжении договора технологического присоединения от 04.05.2016  

 № 0079тп-16У; о взыскании задолженности за фактически понесенные затраты,  связанные с исполнением договора технологического присоединения сетевой  организацией в размере 1 372 033 руб. 90 коп.; законной неустойки в размере  

1 210 796 руб. 83 коп., начисленной за период с 29.11.2016 по 17.04.2018, с  последующим ее начислением с 18.04.2018 до момента расторжения договора в  судебном порядке, исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ на момент  заключения договора (11 %).  

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленное требование.  

Ответчик письменный отзыв на исковое заявление в материалы дела не  представил, по существу требования не оспорил.  

В судебном заседании 13.11.2018 по делу № А11-9788/2018 в порядке статьи  163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлен  перерыв до 16.11.2018.  

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации дело рассмотрено по имеющимся в нем доказательствам в  отсутствие представителя ответчика, надлежащим образом извещенного о месте и  времени проведения судебного заседания.  

Заслушав пояснения представителя истца, изучив материалы дела,  арбитражный суд установил нижеследующее.  

Как следует из материалов дела, между ПАО "МРСК Центра и Приволжья"  (сетевая организация) и обществом с ограниченной ответственностью  "ВладСтройКомплект" (заявитель) заключен договор об осуществлении  технологического присоединения к электрическим сетям от 04.05.2016  

 № 0079тп-16У, в соответствии с которым сетевая организация принимает на себя  обязательства по осуществлению технологического присоединения  энергопринимающих устройств заявителя (далее – технологическое  

присоединение) линейное ответвление от опоры 6 кВ до КТП-6/0,4 кВ, в том числе  по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их  проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению  энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в  случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами  принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих  устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:  

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 213 (кВт); категория надежности - третья; 

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется  технологическое присоединение 6 (кВ);  

максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих  устройств 0 кВт.  

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в  соответствии с условиями настоящего договора (пункт 1 договора).  

Согласно пункту 2 договора технологическое присоединение необходимо для  электроснабжения объекта: три многоквартирных жилых дома, расположенных  (которые будут располагаться): Суздальский район, с. Суромна,  

к.н. 33:05:110401:1728. 

Технические условия являются неотъемлемой частью договора и приведены в  приложении (пункт 4 договора).  

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению  составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора (пункт 5 договора).  

В соответствии с пунктом 12 Технических условий к договору срок их  действия составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении  технологического присоединения. Дата заключения договора: 04.05.2016. Срок  технических условий (приложение № 1 к договору) истек 04.05.2018.  

В соответствии с пунктом 8 договора заявитель обязуется надлежащим  образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по  выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому  присоединению в пределах границ участка, на котором расположены  

присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в  технических условиях; после выполнения мероприятий по технологическому  присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных  техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении  технических условий; принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых  энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа  исполнительной власти по технологическому надзору; получить разрешение  уполномоченного федерального органа исполнительной власти по  технологическому надзору на допуск в эксплуатацию присоединенных объектов;  после осуществления сетевой организацией фактического присоединения  энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического  приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт разграничения балансовой  принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной  ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения либо  представить мотивированный отказ от подписания в течение 5 рабочих дней со дня  получения указанных актов от сетевой организации; надлежащим образом  исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате  расходов на технологическое присоединение; уведомить сетевую организацию о  направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом  присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых  применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая  использование 2 и более источников электроснабжения.  

В силу пункта 10 договора размер платы за технологическое присоединение  определяется в соответствии с постановлениями департамента цен и тарифов  администрации Владимирской области от 15.12.2015 № 51/1 и составляет  

1 556 894 руб. 47 коп., в том числе НДС 18% в сумме 237 492 руб. 38 коп. 

Во исполнение условий договора ПАО "МРСК Центра и Приволжья"  выполнило мероприятия по техническим условиям к договору от 04.05.2016  

 № 0079тп-16У об осуществлении технологического присоединения к  электрическим сетям ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в лице филиала  "Владимирэнерго" принадлежащего ООО "ВладСтройКомплект" объекта - три  многоквартирных жилых дома, расположенных (которые будут располагаться):  

Суздальский район, с. Суромна, к.н. 33:05:110401:1728, с максимальной  мощностью 213 кВт.  

Уведомлением от 22.11.2016 № 08-15/6345 ПАО "МРСК Центра и  Приволжья" предложило ООО "ВладСтройКомплект" в установленный срок  выполнить свои обязательства по договору и уведомить о выполнении.  Уведомление получено ООО "ВладСтройКомплект" 28.11.2016.  

Неисполнение ответчиком обязательств по договору об осуществлении  технологического присоединения к электрическим сетям от 04.05.2016  

 № 0079тп-16У в установленный срок послужило основанием для обращения ПАО  "МРСК Центра и Приволжья" в арбитражный суд с настоящим иском.  

Оценив в совокупности имеющиеся в материалах дела документы,  арбитражный суд считает исковое заявление ПАО "МРСК Центра и Приволжья"  подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.  

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации  обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с  условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при  отсутствии таких условий и требований в соответствии с обычаями делового  оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ  от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не  допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.  

Из материалов дела следует, что ответчик существенно нарушил условия  договора (не внес плату за технологическое присоединение, в сроки,  установленные договором, не выполнил свои обязательства, указанные в  технических условиях).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской  Федерации изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон,  если иное не предусмотрено названным Кодексом, другими законами или  договором.  

В силу пункта 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации по  требованию одной из сторон договор может быть расторгнут по решению суда при  существенном нарушении договора другой стороной, а также в случаях,  предусмотренных Кодексом, другими законами или договором.  

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое  влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается  того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.  

В соответствии со статьей 452 Гражданского кодекса Российской Федерации  соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же  форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев  делового оборота не вытекает иное.  

Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено  стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение  изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в  предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в  тридцатидневный срок.  

Досудебный претензионный порядок расторжения договора истцом соблюден.  

Нормы, регламентирующие порядок заключения и исполнения договора об  осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств  потребителей электрической энергии содержатся в статье 26 Федерального закона  

от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее – Закон об  электроэнергетике) и Правилах технологического присоединения  энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по  производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,  принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям,  утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от  27.12.2004 № 861 (далее – Правила присоединения № 861).  

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к  электрическим сетям представляет собой комплекс мероприятий и осуществляется  на основании возмездного договора, заключаемого сетевой организацией с  обратившимся к ней лицом (заявителем). По условиям этого договора сетевая  организация обязана реализовать мероприятия, необходимые для осуществления  такого технологического присоединения (в том числе разработать технические  условия), а заявитель обязан помимо прочего внести плату за технологическое  присоединение (пункт 4 статьи 23.1, пункт 2 статьи 23.2, пункт 1 статьи 26 Закона  

об электроэнергетике, подпункт "е" пункта 16, пункты 16 (2), 16 (4), 17, 18 Правил  присоединения № 861).  

В силу пунктов 3, 6, 16, 18 Правил присоединения № 861 сетевая организация  обязана выполнить мероприятия по технологическому присоединению в  отношении любого обратившегося к ней лица в соответствии с заключенным  договором.  

В договоре устанавливаются, среди прочего, такие существенные условия, как  перечень подлежащих выполнению мероприятий, определяемый в технических  условиях, положения об ответственности сторон, размер платы за технологическое  присоединение.  

Договор от 04.05.2016 № 0079тп-16У включает в себя существенные условия  договора технологического присоединения.  

Как установлено судом, ответчиком не исполнены принятые по договору  обязательства - не выполнены возложенные на него мероприятия в соответствии с  техническими условиями, а также не внесена плата за технологическое  присоединение.  

Оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии со  статьями 65 и 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в  том числе договор, переписку сторон, суд пришел к выводу о наличии  совокупности обстоятельств, предусмотренных статьей 450 Гражданского кодекса  Российской Федерации, в связи с чем требование истца о расторжении договора об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям  

от 04.05.2016 № 0079тп-16У подлежит удовлетворению.  

Во исполнение вышеуказанных технических условий между ПАО "МРСК  Центра и Приволжья" и обществом с ограниченной ответственностью  "ЭнергоСтройИнжиниринг" был заключен договор подряда от 06.07.2016  

 № 0716-14 ТПС, согласно которому была произведена разработка рабочей  документации и выполнение работ по строительству пункта секционирования 6 кВ  на ВЛ-6кВ, ф. 

<

***> ПС "Боголюбово" в с. Суромна, Суздальского района для  технологического присоединения новых потребителей.  

В соответствии с пунктом 6.1 договора подряда от 06.07.2016 № 0716-14 ТПС  стоимость работ по договору составляет 1 372 033 руб. 90 коп., кроме того НДС  

246 966 руб. 10 коп., всего с НДС стоимость работ по договору составляет  

1 619 000 руб. 

Взаимные обязательства сторон по договору подряда выполнены в полном  объеме, что подтверждается актами сдачи-приемки.  

Таким образом, фактически понесенные затраты ПАО "МРСК Центра и  Приволжья" в лице филиала "Владимирэнерго" при выполнении обязательств по  договору составили: 1 372 033 руб. 90 коп. (затраты по договору подряда).  

До настоящего времени ответчиком не исполнены обязательства по договору,  в том числе в части выполнения мероприятий по технологическому  присоединению. Доказательства оплаты задолженности в сумме 1 372 033 руб. 90  коп. за фактически понесенные затраты, связанные с исполнением договора об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям не  представлены.  

В силу пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации  исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием  вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком,  обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или  договором.  

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации  неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором  денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае  просрочки исполнения.  

В соответствии с подпунктом в) пункта 16 " Правила присоединения № 861 и  пунктом 17 договора от 04.05.2016 № 0079тп-16У в случае нарушения одной из  сторон договора сроков осуществления мероприятий по технологическому  присоединению она обязана уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней с  даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014  ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,  установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за  технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки;  

Истец предъявил требование о взыскании неустойки в сумме 

1 210 796 руб. 83 коп. за период 29.11.2016 по 17.04.2018, с последующим ее  начислением с 18.04.2018 до момента расторжения договора в судебном порядке,  исходя из ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации на  момент заключения договора (11 %).  

Расчет неустойки судом проверен, признан арифметически верным, не  противоречащим требованиям действующего законодательства. Доказательства  оплаты неустойки в добровольном порядке ответчиком суду не представлены.  

При указанных обстоятельствах требование истца о взыскании с ответчика  задолженности в сумме 1 372 033 руб. 90 коп. за фактически понесенные затраты,  связанные с исполнением договора об осуществлении технологического  присоединения к электрическим сетям, неустойки в сумме 1 210 796 руб. 83 коп., с  последующим начислением с 18.04.2018 по день фактической оплаты долга,  подлежит удовлетворению.  

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации с ответчика в пользу истца подлежит взысканию  государственная пошлина в общей сумме 41 914 руб., уплаченная последним в  доход федерального бюджета согласно платежным поручениям от 03.07.2018  

 № 82759, от 07.08.2018 № 97348. 

Руководствуясь статьями 4, 65, 71, 104, 110, 167-171, 180, 319 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

1. Расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к  электрическим сетям от 04.05.2016 № 0079тп-16У, заключенный между публичным  акционерным обществом "Межрегиональная распределительная сетевая компания  Центра и Приволжья" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) и обществом с  ограниченной ответственностью "ВладСтройКомплект" (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>).  

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  "ВладСтройКомплект" (600007, 

<

...> Октября, д. 68А, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу публичного акционерного общества  "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья"  

(603950, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33,  ОГРН 1075260020043, ИНН 5260200603) в лице филиала "Владимирэнерго"  (600016, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 106) задолженность в сумме  

1 372 033 руб. 90 коп. за фактически понесенные затраты, связанные с  исполнением договора технологического присоединения; законную неустойку в  сумме 1 210 796 руб. 83 коп. за период с 29.11.2016 по 17.04.2018, с последующим  ее начислением с 18.04.2018 до момента расторжения договора, исходя из ставки  рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на  дату заключения договора; расходы по уплате государственной пошлины в размере  

41 914 руб. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.  

3. Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд (г. Владимир) через Арбитражный суд Владимирской области в течение  месяца со дня его принятия.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд  Волго-Вятского округа (г. Нижний Новгород) в срок, не превышающий двух  месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта, при  условии, что оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде  апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья С.Г. Кузьмина