Арбитражный суд Челябинской области

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А76-12857/2023

05 ноября 2024 года

г. Челябинск

 

Резолютивная часть решения объявлена 28 октября 2024 года.

Решение в полном объеме изготовлено 05 ноября 2024 года.

Судья Арбитражного суда Челябинской области Гордеева Н.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Рубцовой М.Д. рассмотрев в открытом судебном заседании  дело по исковому заявлению Органа местного самоуправления «Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа», ОГРН 

<

***>, г. Златоуст, к обществу с ограниченной ответственностью «Златоустгазстрой», ОГРН 

<

***>, г. Златоуст, о взыскании убытков в размере 111 523 руб. 20 коп., об обязании произвести ремонтные работы, при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: акционерное общество «Газпром газораспределение Челябинск», ОГРН: 

<

***>; общество с ограниченной ответственностью «Уральская газовая служба-Финанс», ОГРН: 

<

***>

при участии в судебном заседании представителя: 

от ответчика: ФИО1, на основании доверенности от 09.01.2024г., личность удостоверена паспортом, представлен диплом;  

 

УСТАНОВИЛ:

Орган местного самоуправления «Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа» (далее - истец, комитет) обратился в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Златоустгазстрой» (далее – общество, ООО «Златоустгазстрой») о взыскании убытков по оплаченному ремонту ГРПШ 8 по ул. Керамическая, 34, в размере 55 806 руб., убытков по оплаченному ремонту ГРПШ 10 по ул. ФИО2 в размере 55 717 руб. 20 коп., всего 111 523 руб. 20 коп., а также требованием обязать ООО  «Златоустгазстрой» произвести ремонтные работы на объекте: ГРП высокого давления в районе АГНКС группы коттеджей (пос. Красная горка). Местонахождение: Челябинская обл., г. Златоуст, в районе АГНКС группы коттеджей (пос. Красная горка). Нежилое здание, литер А, этажность 1. Реестровый номер: 42840 (договор №121 от 29.04.2021 г.), а именно:

-  Ремонт  штукатурки  внутренних   стен   по   камню  цементным   раствором,   площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм;

-  Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм;

-  Окрашивание водоэмульсионными  составами  поверхностей стен,  ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%;

-  Ремонт штукатурки потолков побетону цементным раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 10 мм;

-  Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм;

-  Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%;

-  Разборка покрытий полов: цементных;

-  Армирование стяжки сеткой кладочной 100x100x5 мм;

-  Устройство цементной стяжки толщиной 50 мм;

-  Шлифовка поверхности полов;

-  Покрытие полов лаком кремнеорганическим КО-174 на 2 слоя;

-  Демонтаж металлических дверных блоков размер 2,1x1,0 м;

-  Монтаж металлических дверей противопожарных размер 2,1x1,0 м;

-  Снятие металлических решеток для замена оконных блоков;

-  Демонтаж деревянных оконных блоков размером 2,1x2,4 м;

-  Монтаж легкосбрасываемых конструкций окон размером 2,1x2,4 м;

-  Смена отливов из оцинкованной стали;

-  Штукатурка оконных откосов;

-Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей откосов, ранее окрашенных:»» масляной краской, с расчисткой старой краски до 10%;

-  Установка металлических решеток;

-  Разборка покрытия кровли из рубероида;

-  Устройство цементно-песчанной стяжки толщиной 30 мм;

-  Огрунтовка основания кровли праймером битумным;

-  Устройство покрытий кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя (Унифлекс);

-  Смена карнизных свесов шириной 700 мм;

-  Разборка бетонной отмостки;

-  Разборка грунта вручную на глубину 0,15 м по периметру;

-  Устройство щебеночного основания толщиной 150 мм по периметру;

-  Армирование стяжки сеткой кладочной 100x100x5 мм;

-  Устройство бетонной отмостки толщиной 150 мм из бетона класса В15;

-  Демонтаж газового котла;

-  Разборка трубопроводов отопления и газоснабжения диаметром 89 мм;

-  Демонтаж кранов шаровых диаметром 80 мм;

-  Монтаж котла газового теплопроизводительность 18 кВт;

-  Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения диаметром 89 мм;

-  Установка кранов шаровых диаметром 80 мм;

-  Прокладка дымоходов диаметром 180 мм;

-  Маслянная окраска трубопроводов диаметром 89 мм.

 

Обязать ООО «Златоустгазстрой» произвести ремонтные работы на объекте: Подземный газопровод высокого давления к АРП. Местонахождение: Челябинская обл., г. Златоуст, подземный газопровод высокого давления к АРП, протяженностью 172 м., заложение подземное. Реестровый номер: 41796 (договор №68 от 20.01.2017 г.), а именно:

-  Демонтаж чугунного канализационного люка колодца;

-  Разборка бетонной горловины люка колодца;

-  Демонтаж железобетонной плиты перекрытия колодца размером 2,2x2,2 м;

-  Очистка газового колодца от грязи и ила;

-  Монтаж плиты перекрытия колодца ПП20-2;

-  Монтаж опорного кольца КО-6;

-  Монтаж люка;

-  Разработка грунта вручную по периметру колодца диаметром 2,2 м на глубину 0,15 м, ширина отмостки 0,5 м;

-  Устройство щебеночной подготовки по периметру колодца диаметром 2,2 м на глубину 0,15 м, ширина 0,5 м;

-  Устройство бетонной отмостки из бетона класса В15 толщиной 150 мм по периметру колодца, ширина отмостки 0,5 м;                                                              

-  Разработка грунта в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 мЗ на глубину 2,2 м, длина траншеи 15,0 м, группа грунтов 3;

- Устройство щебеночного основания по дну траншеи из щебня фр.40-70 толщиной 0,55 м;

-  Сверление отверстий в трубе д. 159x4,5 м для перфорации по всей длине трубы;

-  Монтаж дренажной трубы д. 159 мм;

-  Сверление отверстий диаметром 160 мм в стенке колодца толщиной 100 мм под дренажную трубу;

-  Герметизация ввода в колодец дренажной трубы;

-  Засыпка щебнем фр.40-70 мм траншеи по все длине на толщину 0,5 м;

-  Засыпка щебнем фр.20-40 мм траншеи по все длине на толщину 0,3 м;

-  Обратная засыпка траншеи грунтом механизированным способом;

-  Уплотнение грунта пневматическими трамбовками;

-  Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 м3;  

-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза;

-  Планировка площадей механизированным способом;

- Разработка грунта в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 м3  на глубину 3,0 м, группа грунтов 3 (котлован размер по низу 1,0x1,0 м, по верху 4,0x4,0 м);

- Засыпка щебнем фр.40-70 мм котлована толщину 1,85 м;

-  Засыпка щебнем фр.20-40 мм котлована на толщину 0,3 м;

-  Обратная засыпка котлована грунтом механизированным способом;

-  Уплотнение грунта пневматическими трамбовками;

-  Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,25;

-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза;

-  Планировка площадей механизированным способом.

Обязать ООО «Златоустгазстрой» произвести ремонтные работы на объекте: Подземный газопровод среднего давления по ул. Машиностроителей, пос. 40 лет Октября. Местонахождение: Челябинская обл., г. Златоуст, подземный газопровод среднего давления по ул. Машиностроителей, в пос. 40 лет Октября, протяженность 730 м. Заложение подземное. Реестровый номер: 41795 (договор №68 от 20.01.2017 г.), а именно:

-      Разработка грунта экскаватором ковшом вместимостью 0,25 мЗ, группа грунтов 3 на глубину 2,2 м, длина 3,0 м, с двух сторон газового колодца (приямки под установку фитингов системы "Стоп-система");

-  Доработка грунта вручную в приямках, группа грунтов 3;

-  Очистка участков газопровода д.219 мм от изоляции с двух сторон газового колодца;

-  Монтаж фитинга д.219 мм для монтажа "Стоп-системы";

-  Монтаж фитинга д. 159 мм для монтажа "Стоп-системы";

-  Монтаж фитинга д.32 мм для монтажа "Стоп-системы";

-  Контрольная опрессовка фитингов "Стоп-системы";

-  монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода 200 мм;

-  подъем давления при испытании воздухом газопровода среднего давления (до 0,ЗМПа), условный диаметр газопровода 200 мм (д.219 мм длиной 0,5 м -4 участка, д.219 мм длиной 0,2 м - 2 участка);

-  выдержка под давлением до 0,6 Мпа при испытании на прочность и герметичность газопровода, условным диаметром 200 мм;

-  Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 219 мм, толщина стенки до 5 мм;

-       Монтаж системы по двухстороннему перекрытию газопровода под давлением по технологии "СтопТрон" с байпасной линией;

-                 Контрольная опрессовка трубопровода байпасной линии д. 100 мм;

-                  монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода 100 мм;

-                 подъем давления при испытании воздухом газопровода среднего давления (до 0,ЗМПа),4к условный диаметр газопровода 100 мм;

-                  выдержка под давлением до 0,6 Мпа при испытании на прочность и герметичность газопровода, условным диаметром 100 мм;

- Перекрытие действующего газопровода при помощи оборудования технологии "СтопТрон";

- Демонтаж газовой задвижки д.200 мм в газовом колодце;

- Демонтаж компенсатора д.200 мм в газовом колодце;

- Демонтаж участка газопровода д.219 мм;

- Монтаж отводов стальных д.219 мм;

- Монтаж участка газопровода д.219 мм (в земле -8,0 м, надземная прокладка -3,0 м);

- Монтаж крана шарового д.200 мм в надземном исполнении;

 - Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент газопровода д.219 мм;

 -Монтаж футляра д.325 мм длиной 1,0 м в местах выхода газопровода из земли;              - Заделка битумом и каболкой концов футляра д.325 мм;

-  Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент футляра д.325 мм;

-  Контрольная опрессовка смонтированного участка газопровода д.219 мм;

-   монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода 200 мм;

-   подъем давления при испытании воздухом газопровода среднего давления (до О.ЗМПа), | условный диаметр газопровода 200 мм;

-   выдержка под давлением до 0,6 Мпа при испытании на прочность и герметичность газопровода, условным диаметром 200 мм;

-  Демонтаж оборудования системы по двухстороннему перекрытию газопровода под давлением по технологии "СтопТрон" с байпасной линией;

-  Монтаж заглушек на фитинги д.219 мм;

-  Монтаж заглушек на фитинги д. 159 мм;

-  Монтаж заглушек на фитинги д.32 мм;

-  Продувка газом смонтированного участка газопровода д.219 мм;

-  Огрунтовка газопровода д.219 мм грунтом ГФ-021 на 1 раз;

-  Окраска газопровода д.219 мм эмалью ПФ-115 желтой на 2 раза;

-  Засыпка приямков песком (в местах выхода газопровода из земли);

-  Демонтаж плиты перекрытия газового колодца;

-  Засыпка вручную грунтом колодца (2,5*2,3*2,0 );

-  Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 мЗ;

-  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза;

-  Бурение ям на глубину 1 м под фундаменты стоек ограждения;

-  Устройство фундаментов-столбов под стойки ограждения;

-  Монтаж ограждения из сетчатых панелей;                                                                    '

-  Огрунтовка ограждения грунтом ГФ-021 на 1 раз;

-  Окраска газопровода д.219 мм эмалью ПФ-115 желтой на 2 раза.

 

Обязать ООО «Златоустгазстрой» произвести ремонтные работы на объекте: Газовые сети (среднего давления) квартала Орловский. Местонахождение: 

<

...> протяженностью 2815 м., заложение надземное. Реестровый номер: 29189 (договор №66 от 21.11.2016 г.), а именно:

-  Очистка газопровода д.108 мм от краски в местах врезки фитингов (д.108 мм длиной 0,5 м -2 участка, д.108 мм длиной 0,2 м - 2 участка);

-  Врезка фитинга д.108 мм для монтажа "Стоп-системы";

-  Врезка фитинга д.32 мм для монтажа "Стоп-системы";

-  Контрольная опрессовка фитингов "Стоп-системы";

-  монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода 100 мм;

-  подъем давления при испытании воздухом газопровода среднего давления (до 0,ЗМПа), условный диаметр газопровода 100 мм (д.108 мм длиной 0,5 м -2 участка, д.108 мм длиной 0,2 м - 2 участка);

-  выдержка под давлением до 0,6 Мпа при испытании на прочность и герметичность газопровода, условным диаметром 100 мм;

-  Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 108 мм, толщина стенки до 5 мм;

-  Монтаж системы по двухстороннему перекрытию газопровода под давлением по технологии "СтопТрон" с байпасной линией;

-            Контрольная опрессовка трубопровода байпасной линии д.50 мм;

-  монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода 50 мм;

-  подъем давления при испытании воздухом газопровода среднего давления (до 0,3 МПа), условный диаметр газопровода 50 мм;

-  выдержка под давлением до 0,6 Мпа при испытании на прочность и герметичность газопровода, условным диаметром 50 мм;

-  Перекрытие действующего газопровода при помощи оборудования технологии "СтопТрон»

-  Демонтаж поврежденного участка газопровода д.108 мм;

-  Монтаж участка газопровода д.108 мм;

-  Контрольная опрессовка смонтированного участка газопровода д.108 мм;

монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода 100 мм;

 - подъем давления при испытании воздухом газопровода среднего давления (до 0,ЗМПа),

условный диаметр газопровода 100 мм;

-      выдержка под давлением до 0,6 Мпа при испытании на прочность и герметичностьгазопровода, условным диаметром 100 мм;

-Рентгенографический контроль трубопровода через одну стенку, диаметр трубопровода: 108 мм, толщина стенки до 5 мм;

-      Демонтаж оборудования системы по двухстороннему перекрытию газопровода под давлением по технологии "СтопТрон" с байпасной линией;

-  Монтаж заглушек на фитинги д. 159 мм;

-  Монтаж заглушек на фитинги д. 32 мм;

-  Продувка газом смонтированного участка газопровода д. 108 мм;

-  Огрунтовка газопровода д. 108 мм грунтом ГФ-021 на 1 раз;

-  Окраска газопровода д. 108 мм эмалью ПФ-115 желтой на 2 раза.

Обязать ООО «Златоустгазстрой» произвести ремонтные работы на объекте: Газораспределительная сеть. Газоснабжение №1. Местонахождение: Челябинская обл., г. Златоуст, газораспределительная сеть, газоснабжение №1, протяженность 30 м., заложение подземное, диаметр 108 м.м. материал: сеть. Реестровый номер: 36982 (договор №66 от 21.11.2016 г.), а именно:

-  Отключение станции ЭХЗ;

-  Оповещение потребителей о прекращении подачи газа;                

   - Закрыть краны на вводах;

-  Закрытие задвижек д. 100 мм с установкой заглушек (в газовом колодце);

-  Освобождение газопровода от газа с продувкой воздухом, диаметром 57 мм., диаметром 76 мм., диаметром 89 мм., диаметром 108 мм., диаметром 159 мм.;

-  Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 мЗ, группа грунтов 3;

-  Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3;

-  Засыпка вручную приямков песком строительным;

-  Обратная засыпка приямков механизированным способом;

-  Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 мЗ;

-  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза;

-  Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2;

-  Очистка участка подземного газопровода диаметром 108 мм в месте врезки (длина участка 0,5 м) с двух строи;

-  Обрезка, демонтаж подземного участка газопровода диаметром 108 мм;

-  Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА с последующим демонтажом по окончании работ;

-       Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE;

-       Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков сваренных между собой полиэтиленовых трубопроводов диаметром: 200 мм (труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR11, размером 200x18,2 мм);

-Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при автоматическом управлении процессом сварки диаметром трубопровода 200 мм;

-      Протаскивание в футляр труб диаметром: 110 мм (труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR11, размером 110x10,0 мм);

-  Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при автоматическом W управлении процессом сварки диаметром трубопровода 100 мм;

-  Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" SDR 11 110х10,0/СТ108;

-  Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 200 мм;

-  Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода в ковере;

-  Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм;

-  Установка столбиков сигнальных опознавательных;                                                     

-  Контрольная опрессовка смонтированного участка газопровода;

-  очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 100 мм;

- монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода 100 мм;

- подъем давления при испытании воздухом газопровода низкого давления (до 0,ЗМПа), условный диаметр газопровода 100 мм;

- выдержка под давлением до 0,6 Мпа при испытании на прочность и герметичность газопровода, условным диаметром 100 мм;

- Демонтаж станции ЭХЗ;

- Контрольная опрессовка участка наружного газопровода;

-  монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода 150 мм;

-  подъем давления при испытании воздухом газопровода низкого давления (до О.ЗМПа), диаметр газопровода 57 мм

-  подъем давления при испытании воздухом газопровода низкого давления (до 0,ЗМПа), диаметр газопровода 76 мм;

-  подъем давления при испытании воздухом газопровода низкого давления (до О.ЗМПа), диаметр газопровода 89 мм;

-  подъем давления при испытании воздухом газопровода низкого давления (до О.ЗМПа),  диаметр газопровода 108 мм;

-  подъем давления при испытании воздухом газопровода низкого давления (до О.ЗМПа), диаметр газопровода 159 мм;

-  выдержка под давлением до 0,6 Мпа при испытании на прочность и герметичность газопровода;

-  Повторный пуск многоквартирных домов;

-  монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм;

-  подъем давления при испытании воздухом газопровода низкого давления (до 0,ЗМПа), условный диаметр газопровода до 50 мм;

-  выдержка под давлением до 0,6 Мпа при испытании на прочность и герметичность газопровода;

-  Повторный пуск жилых домов частного сектора;

-  монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм;

-  подъем давления при испытании воздухом газопровода низкого давления (до О.ЗМПа), условный диаметр газопровода до 50 мм;

-  выдержка под давлением до 0,6 Мпа при испытании на прочность и герметичность газопровода;

-  Повторный пуск нежилых зданий;

-  монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм;

-  подъем давления при испытании воздухом газопровода низкого давления (до О.ЗМПа), условный диаметр газопровода до 50 мм;

-  выдержка под давлением до 0,6 Мпа при испытании на прочность и герметичность газопровода.

Обязать    ООО    «Златоустгазстрой»    произвести    ремонтные    работы   на    объекте: Газораспределительная сеть. Местонахождение: Челябинская обл., г. Златоуст, газоснабжение жилых домов 

<

...> протяженность 1 306 м., заложение надземное, диаметр (м.м.)  108*89*76*57, материал сталь. Реестровый номер:  3690^ (договор №66 от 21.11.2016 г.), а именно:

-  Копание ям вручную размером 0,5x0,5x1,0 м под фундамент опор;

-  Устройство щебеночного основания толщиной 50 мм фундаментов опор

-      Устройство фундаментов под опоры из бетона класса В12.5 (серия Нормаль Нг-011), объем  фундамента 0,245 мЗ;

                 - Замена опор, диаметр опор 76 мм, Н=2,2 м (серия Нормаль Нг-011), вес 1 опоры 24,018 кг;

-  Огрунтовка опор грунтом ГФ-021 на 1 раз;

-  Окраска опор эмалью ПФ-115 на 2 раза;

-  Правка положения опор газопровода, диаметр опор 76 мм, Н=2,2 м серия нормаль Нг-011;

-  Усиление сваркой основания опор газопровода (фасонки, труба);

-  Замена хомутов из круга диаметром 14 мм, длина хомута 408 мм;

-  Копание ям вручную размером 0,5x0,5x1,0 м под фундамент опор;

-  Устройство щебеночного основания толщиной 50 мм фундаментов опор;

-  Устройство фундаментов под опоры из бетона класса В12,5 (серия Нормаль Нг-011), объем 1 фундамента 0,245 мЗ.

Обязать 000 «Златоустгазстрой» произвести ремонтные работы на объекте: Газораспределительная сеть. Местонахождение: Челябинская обл., г. Златоуст, газораспределительная сеть. Газоснабжение жилых домов по ул. Дачная, ГРП 2. Реестровый номер: 37000 (договор №66 от 21.11.2016 г.), а именно:

-  Демонтаж железобетонной плиты перекрытия колодца размером 2,5x2,3 м;

-  Очистка газового колодца от грязи и ила;

-  Монтаж плиты перекрытия колодца ПО-4 (размер 2300x1500x200 мм);

-  Монтаж деревянной крышки-щита размером 1,0x1,0м;

- Разработка грунта вручную по периметру колодца размером 2,30x3,00 м на глубину 0,15 м,  ширина отмостки 0,5 м;

-  Устройство щебеночной подготовки по периметру колодца размером 2,30x3,00м на глубину 0,15 м, ширина 0,5 м;

-  Устройство бетонной отмостки из бетона класса В15 толщиной 200 мм по периметру колодца, ширина отмостки 0,5 м;

-  Разработка грунта в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 мЗ на глубину 2,2 м, длина траншеи 15,0 м, группа грунтов 3;

-  Устройство щебеночного основания по дну траншеи из щебня фр.40-70 толщиной 0,30 м;

-  Сверление отверстий в трубе д. 159x4,5 м для перфорации по всей длине трубы;

-  Монтаж дренажной трубы д. 159 мм;

-  Сверление отверстий диаметром 160 мм в стенке колодца толщиной 100 мм под дренажную трубу;

-  Герметизация ввода в колодец дренажной трубы;

-  Засыпка щебнем фр.40-70 мм траншеи по все длине на толщину 0,5 м;

-  Обратная засыпка траншеи грунтом механизированным способом;

-  Уплотнение грунта пневматическими трамбовками;

-  Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 м3;

-  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне *   карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза;

-  Планировка площадей механизированным способом;

-  Разработка грунта в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 мЗ на глубину 3,0 м, группа грунтов 3 (котлован размер по низу 1,0x1,0 м, по верху 4,0x4,0 м);

-  Засыпка щебнем фр.40-70 мм котлована толщину 1,85 м;

-  Засыпка щебнем фр.20-40 мм котлована на толщину 0,3 м;

-  Обратная засыпка котлована грунтом механизированным способом;

-  Уплотнение грунта пневматическими трамбовками;

-  Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 мЗ;

-  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза;

-  Планировка площадей механизированным способом.

         Обязать ООО «Златоустгазстрой» произвести ремонтные работы на объекте: Газовые сети (наружные). Местонахождение: Челябинская обл., г. Златоуст, газовые сети (наружные) жилых домов по ул. Аносова, Средняя Ветлужская, Верхняя Ветлужская, Малая Ветлужская, 3-я Тесьминская, 4-я Тесьминская. Реестровый номер: 29185 (договор №66 от 21.11.2016 г.), а именно:

-Закрытие задвижки д. 100 мм и установка заглушки (газопровод низкого давления);

-  Очистка газопровода д.89 мм от краски в местах врезки фитингов (д.89 мм длиной 0,5 м - 1 участок, д.89 мм длиной 0,2 м -1 участок);

-  Врезка фитинга д.89 мм для монтажа "Стоп-системы";                                                 ^

-  Врезка фитинга д.32 мм для монтажа "Стоп-системы";

-  Контрольная опрессовка фитингов "Стоп-системы";

-  монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода 80 мм;

-  подъем давления при испытании воздухом газопровода среднего давления (до 0,ЗМПа), условный диаметр газопровода 80 мм (д.80 мм длиной 0,5 м -1 участок, д.80 мм длиной 0,2 м - 1 участок);

-  выдержка под давлением до 0,6 Мпа при испытании на прочность и герметичность газопровода, условным диаметром 80 мм;

-  Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 89 мм, толщина стенки до 5 мм;

-  Монтаж системы по перекрытию газопровода под давлением по технологии "СтопТрон";

-  Перекрытие действующего газопровода при помощи оборудования технологии "СтопТрон";

-  Демонтаж задвижки д.50 мм (газопровод среднего давления);

-  Монтаж крана шарового фланцевого д.50 мм;

-  Замена ИФС д.50 мм;

-  Замена задвижки д. 100 мм (газопровод низкого давления);

-  Замена пункта редуцирования газа (ГРПШ-13-1Н-У1);

-  Пусконаладочные работы пункта редуцирования газа (ГРПШ-13-1Н-У1).

Обязать ООО «Златоустгазстрой» произвести ремонтные работы на объекте: Объект: Газопровод - закольцовка среднего давления от ул. Береговая Ветлужская до ул. Миасская. Местонахождение: 

<

...> до точки врезки в существующий газопровод по ул. Миасская, протяженность трассы 5319 м., протяженность трубопровода 5474. Реестровый номер: 40953 (договор №66 от 21.11.2016 г.), а именно:

-  Правка положения опор газопровода, диаметр опор 108 мм, Н=2,2 м серия нормаль Нг-011;

-  Усиление сваркой основания опор газопровода (фасонки, труба);

-  Замена хомутов из круга диаметром 14 мм, длина хомута 408 мм;

-  Разработка грунта вручную на глубину 150 мм по периметру фундамента на ширину 300 мм, размер фундамента 500x500 мм;

-  Устройство щебеночного основания на толщину 150 мм по периметру фундамента на ширину 300 мм, размер фундамента 500x500 мм;

-  Обетонирование фундамента бетоном класса В15 по периметру на ширину 300 мм, высота 300 мм.

Требуемые работы (согласно дефектной ведомости № 8):

-  Демонтаж станции катодной защиты;

-  Демонтаж кабеля;

-  Устройство бетонной подготовки из бетона класса В15 под постамент станции;           

-  Отсыпка щебнем по периметру станции;

-  Монтаж преобразователя для катодной защиты ПКЗ-АР-Е2-Т-Т-У1 с постаментом;

-  Замена бокса модульного КМПн 2/4;

-  Замена автоматического выключателя 2 полюсного 32 А;

-  Монтаж трубы гофрированной диаметром 50 мм "ДКС";

-  Затягивание кабеля ВВГ 3x4 в гофротрубу диаметром 50 мм;

-  Огрунтовка грунтом ГФ-021 на 1 слой полосы заземления, стойки СКИП;

-  Окраска эмалью ПФ-115 на 2 слоя полосы заземления, стойки СКИП;

-Наклейка знаков безопасности

Обязать ООО «Златоустгазстрой» произвести ремонтные работы на объекте: Газовые сети.   Местонахождение:   

<

...>   Мебельная,   Трудовая. Спортивная, протяженность 2337 м., заложение наземное. Реестровый номер: 23202 (договор №66 с^р21.11.2016 г.), а именно:

-  Копание ям вручную размером 0,5x0,5x1,0 м под фундамент опор;

-  Устройство щебеночного основания толщиной 50 мм фундаментов опор;

-  Устройство фундаментов под опоры из бетона класса В12.5 (серия Нормаль Нг-011), объем 1 фундамента 0,245 мЗ;

-  Замена опор, диаметр опор 76 мм, Н=2,2 м (серия Нормаль Нг-011), вес 1 опоры 24,018 кг;

-Огрунтовка опор грунтом ГФ-021 на 1 раз;

-  Окраска опор эмалью ПФ-115 на 2 раза;

-  Правка положения опор газопровода, диаметр опор 76 мм, Н=2,2 м серия нормаль Нг-011;

-  Усиление сваркой основания опор газопровода (фасонки, труба);

-  Замена хомутов из круга диаметром 14 мм, длина хомута 408 мм;

-  Копание ям вручную размером 0,5x0,5x1,0 м под фундамент опор;

-  Устройство щебеночного основания толщиной 50 мм фундаментов опор;

-  Устройство фундаментов под опоры из бетона класса В12.5 (серия Нормаль Нг-011), объем 1 фундамента 0,245 м3.

          В обоснование исковых требований истец указывает, что в период владения ответчиком сетями газоснабжения на праве аренды, арендатором не выполнялись должным образом обязанности по проведению текущего и капитального ремонта объектов газоснабжения, что также было отражено в актах приема передачи сетей при расторжении договоров аренды. Неисполнение данных обязанностей привело к аварийной ситуации, которую устранял истец, что повлекло расходование бюджетных средств. 

Ответчик представил отзыв, письменные пояснения, в соответствии с которыми возражал против заявленных требований, указывал на отсутствие обязанности возмещения убытков, а также на выполнение текущего и капитального ремонта в период владения сетями. 

 Определениями суда от 16.06.2023 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, относительно предмета спора привлечены: акционерное общество «Газпром газораспределение Челябинск», ОГРН: 

<

***>; (т. 2 л.д. 39),  общество с ограниченной ответственностью «Уральская газовая служба-Финанс», ОГРН: 

<

***> (т. 2 л.д. 34). 

Истцом представлен отказ от исковых требований в части обязания ответчика проведения ремонтных работ (т. 4 л.д. 99-104). 

Судом в порядке ст. 49, 150 АПК РФ принят частичный отказ истца от исковых требований. 

        Заслушав доводы истца, возражения ответчика, исследовав представленные в материалы дела доказательства, арбитражный суд установил следующие обстоятельства. 

         Как следует из искового заявления и материалов дела, между Органом местного самоуправления Комитетом по управлению имуществом Златоустовского городского округа и ООО «Златоустгазстрой» были заключены договоры аренды на муниципальные объекты газоснабжения: № 66 от 21.11.2016, № 68 от 20.01.2017, № 121 от 29.04.2021. 

   В соответствии с условиями договоров, Арендодатель» передал в пользование «Арендатору» муниципальные сети газоснабжения.

      Договорами аренды установлены следующие обязанности арендатора:

-    производить своевременно и качественно аварийный, текущий, капитальный ремонт и реконструкцию Объектов без компенсации затрат арендодателем и нести расходы на содержание (договор №66 п.3.2.4; договор №121 п.3.2.6; договор №68 п.3.2.4);

-если Объекты в результате действий арендатора или непринятия им необходимых своевременных мер придут в аварийное либо опасное для жизнедеятельности состояние, арендатор в установленном арендодателем порядке восстанавливает его своими силами за счет своих средств или возмещает ущерб, нанесенный арендодателю, в том числе упущенную выгоду (пункт 3.2.5. договора № 66);

-согласовывать с заместителем главы округа по инфраструктуре и представить арендодателю план работы по реконструкции и капитальному ремонту Объектов (далее-плана работ) за 1 месяц до начала календарного года по форме указанной по тексту договора (п. 3.2.6. договора № 66);

-предоставлять арендодателю отчет об исполнении плана работ в течение 1 месяца по истечении отчетного года. В отчете надлежит подробно указать характер ремонтных работ по конкретным объектам с привязкой к реестровым номерам, адресам по установленной форме, приложить сметы, калькуляции на основные виды работ (п. 3.2.7 договора № 66);

-обеспечить техническое обслуживание с целью поддержания газопроводов, оборудования в работоспособном и исправном состоянии (п. 3.2.8. договора);

-содержать Объекты и прилегающую территорию в надлежащем санитарном и техническом состоянии и в соответствии с действующими правилами благоустройства территории ЗГО» (дог. №66 п.3.2.9; дог. №121 п.3.2.5; дог. №68 п.3.2.6).

На сегодняшний день вышеуказанные договора расторгнуты. 

Все объекты переданы в ОМС «КУИ ЗГО» 16 сентября 2022 года по актам приемки — передачи имущества из аренды. 

В момент передачи имущества было установлено, что некоторые объекты находятся в неудовлетворительном состоянии, о чем указано в самих актах передачи подписанных и арендатором и арендодателем (т. 1 л.д. 42, 45, 47,  49,  51, 53, 56, 67, 69, 75, 77).  

Согласно акта приемки — передачи к договору № 66, санитарно — техническое состояние объектов п.п.21, 27, 32, 100, 131, 201, 247 — неудовлетворительное.

В соответствии с актом приемки — передачи к договору № 68, санитарно — техническое состояние объектов п.п. 54  неудовлетворительное.

Согласно акта приемки — передачи к договору № 121 санитарно — техническое состояние объекта п.п.1 —неудовлетворительное.

Неисполнение ООО «Златоустгазстрой» обязанностей по договору № 66 от 21.11.2016 г., повлекли аварийную ситуацию с утечкой газа, для устранения которой Комитет был вынужден привлечь третье лицо — филиал АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Златоусте для проведения ремонтных работ на объектах газоснабжения, а именно: ГРПШ № 10 по улице ФИО2 и ГРПШ № 8 по ул. Керамическая, 34. 

После получения обратно из аренды объектов газоснабжения, Комитетом совместно с АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Златоусте и главным инженером ООО  «УГС», были произведены акты обследования на ГРПШ № 10 по улице ФИО2 и ГРПШ № 8 по улице  Керамическая, 34, из которых следует, что аварийная ситуация возникла по причине не исполнения арендатором ООО  «Златоустгазстрой» своих обязанностей по надлежащему содержанию и ремонту арендуемых объектов газоснабжения.

В соответствии с актом обследования ГРПШ № 10 по улице ФИО2 от 16.11.2022, комиссией в составе представителя ОМС «Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа», специалистом по управлению и распоряжению муниципальным имуществом отдела имущественных отношений, АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Златоусте, ООО «УГС», обследовано ГРПШ № 10 по улице ФИО2, находящегося в аренде ООО «Златоустгазстрой» с 21.11.2016 по 16.09.2022.

В результате обследования выявлены следующие нарушения:

-отслоение лакокрасочного покрытия корпуса ГРПШ, требуется окраска корпуса ГРПШ;

-отсутствует надпись «Огнеопасно газ»;

-отсутствует актуальная режимная карта ГРПШ и схема оборудования ГРПШ;

-истек срок поверки манометра (на установленном манометре срок поверки -2018г.);

-не выполнена своевременная замена крана шарового д. 20 на входе в ГРПШ;

-отсутствие технического обслуживания регулятора газа;

-отсутствие технического обслуживания фильтрующего элемента. 

Несвоевременное устранение последних перечисленных трех пунктов повлекли аварийную ситуацию с утечкой газа, для устранения которой собственнику пришлось привлечь третье лицо-филиал АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Златоусте, что повлекло расходование бюджетных средств в размере 55 717 руб. 20 коп. 

Вывод комиссии: аварийная ситуация возникла по причине не исполнения арендатором ООО «Златоустгазстрой» своих обязанностей по надлежащему содержанию и ремонту арендуемых объектов газоснабжения (т. 1 л.д. 78). 

Комиссией также составлен Акт обследования ГРПШ № 8 от 16.11.2022 (т. 1 л.д. 90), которым установлено:

  -отслоение лакокрасочного покрытия корпуса ГРПШ, требуется окраска корпуса ГРПШ;

-отсутствует надпись «Огнеопасно газ»;

-отсутствует актуальная режимная карта ГРПШ и схема оборудования ГРПШ;

- истек срок поверки манометра (на установленном манометре срок поверки -2018г.);

- не осуществлена своевременная замена основного клапана с сильфонной камерой РДНК-У;

-не проведены своевременные работы по устранению деформации сильфоновой камеры;

-отсутствие технического обслуживания регулятора давления газа;

 -отсутствие технического обслуживания фильтрующего элемента. 

Несвоевременное устранение последних перечисленных трех пунктов повлекли аварийную ситуацию с утечкой газа, для устранения которой собственнику пришлось привлечь третье лицо-филиал АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Златоусте, что повлекло расходование бюджетных средств в размере 55 806 руб. 

Вывод комиссии: аварийная ситуация возникла по причине не исполнения арендатором ООО «Златоустгазстрой» своих обязанностей по надлежащему содержанию и ремонту арендуемых объектов газоснабжения (т. 1 л.д. 90). 

Так же АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Златоусте, были составлены локальные сметы и дефектные ведомости.

Неисполнение ООО «Златоустгазстрой» обязанностей по договору № 66 от 21.11.2016 г., повлекло аварийную ситуацию с утечкой газа, для устранения которой Комитет был вынужден привлечь третье лицо — филиал АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Златоусте для проведения ремонтных работ на объектах газоснабжения, а именно: ГРПШ № 10 по улице ФИО2 и ГРПШ № 8 по ул. Керамическая, 34. 

Данная ситуация повлекла расходование бюджетных средств.

Согласно платежному поручению №130229 от 30.12.2022 г. был оплачен ремонт ГРПШ №8 по ул. Керамическая, 34 в размере 55 806 руб.00 коп., так же был оплачен ремонт ГРПШ №10 по улице ФИО2, платежное поручение №130230 от 30.12.2022 г. в размере 55 717 руб.20 коп.

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. В силу статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий. 

В силу ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений.

Согласно ст. 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением обязательства, в соответствии с правилами, предусмотренными ст. 15 ГК РФ.

В силу ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере (пункт 1).

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) (пункт 2).

Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

По смыслу ст. 15 и 393 ГК РФ, кредитор представляет доказательства, подтверждающие наличие у него убытков, а также обосновывающие с разумной степенью достоверности их размер и причинную связь между неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником и названными убытками. Должник вправе предъявить возражения относительно размера причиненных кредитору убытков, и представить доказательства, что кредитор мог уменьшить такие убытки, но не принял для этого разумных мер (ст. 404 ГК РФ).

При установлении причинной связи между нарушением обязательства и убытками необходимо учитывать, в частности, то, к каким последствиям в обычных условиях гражданского оборота могло привести подобное нарушение. Если возникновение убытков, возмещения которых требует кредитор, является обычным последствием допущенного должником нарушения обязательства, то наличие причинной связи между нарушением и доказанными кредитором убытками предполагается.

Должник, опровергающий доводы кредитора относительно причинной связи между своим поведением и убытками кредитора, не лишен возможности представить доказательства существования иной причины возникновения этих убытков.

Вина должника в нарушении обязательства предполагается, пока не доказано обратное. Отсутствие вины в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства доказывается должником (п. 2 ст. 401 ГК РФ).

Из материалов дела, условий договоров аренды следует, что ответчик в период использования сетей газоснабжения, являющихся, в том числе источником повышенной опасности, должен был проводить работы по капитальному и текущему ремонту данных сетей. 

Эксплуатация сетей осуществлялась ответчиком на протяжении пяти лет.

В материалы дела представлено уведомление истцом ответчика  о комиссионном обследовании сетей 16.11.2022 на предмет их неудовлетворительного состояния (т. 2 л.д. 16).

ООО «Златоустгазстрой» представило ответ на уведомление (т. 2 л.д. 17), в котором просит уточнить свой правовой статус ввиду передачи сетей новому арендатору ООО «УГС-Финанс». 

Истец представил ответ (т. 2 л.д. 18), которым указывает, что на комиссионное обследование ответчик приглашается как бывший арендатор. 

Ответчик представил ответ на письмо, которым указал, что бремя содержания лежит на собственнике, соответственно право на осмотр в любое время, выход бывшего арендатора на обследование газопроводов не обоснован (т. 2 л.д. 79).

Ответчик возражает против исковых требований, указывая, что текущие и капитальные ремонты проводились в соответствии с условиями договоров аренды, в подтверждение чего представлены планы капительного ремонта, отчеты о выполнении капитальных ремонтов. 

Определением суда от 24.01.2024 сторонам разъяснялось право на проведение судебной экспертизы. 

Ходатайство о проведении по делу судебной экспертизы, в том числе по определению качества проведения текущего и капительного ремонта от сторон не поступало. 

Согласно акта приемки — передачи из аренды от 19.06.2022 г., некоторые объекты находятся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, а именно газовые сети, указанные в исковом заявлении под пунктами: 6, 12,10, 8, 7, 9, 11.

Данное обстоятельство ответчиком не оспаривалось. 

Необходимость проведения ремонтов на газовых сетях по ул.Керамическая и ФИО2 возникла  в июле 2022 года, когда сети еще не были переданы ООО «УГС Финанс» о чем было направлено письмо №5437/АДМ от 29.07.2022 г. (т. 3 л.д. 91), где указано об уклонении ответчика от выполнения ремонта,  а также необходимости произведения срочного ремонта комитетом  за свой счет.

Кроме того, в материалы дела представлено письмо от АО «Газпром газораспределение Челябинск, что заявки в аварийно - диспетчерскую службу поступили 20.06.2022 г. в 13 ч. 31 мин. с адреса: ул. Керамическая, д. 83 (запах газа на улице) и 28.07.2022 г. в 07 ч. 55 мин. с адреса: ул. ФИО2, д. 93 (запах газа у ГРПШ) (т. 3 л.д.109), также представлено письмо МКУ «Гражданская защита ЗГО» (т. 3 л.д. 110). 

В связи с тем, что могла возникнуть аварийная ситуация и граждане могли остаться на длительный период без газа АО «Газпром газораспределение» своими силами временно устранили данную аварию.

Из материалов дела следует, что Комитет неоднократно обращался к ответчику с требованием произвести ремонтные работы, однако Ответчик уклонялся от выполнения своих обязательств.

Кроме того, Комитет уведомлял ответчика о том, что 16 ноября 2022 года состоится комиссионное обследование сетей газопровода, однако ответчик отказался присутствовать на данном обследовании.

Актами обследования от 16.11.2022 года произведенные по адресам: 

<

...> комиссия пришла к выводу о том, что аварийная ситуация возникла по причине не исполнения арендатором ООО «Златоустгазстрой» своих обязанностей по надлежащему содержанию и ремонту арендуемых объектов газоснабжения.

Учитывая   недопустимость    оставления   особо    опасных    объектов    (газопроводов)    без обслуживания, аварийного ремонта и содержания, угрозы жизнью и здоровью граждан, возникшей в результате неисправного состояния газоснабжения, а также в связи с бездействием эксплуатирующей организации ОМС «КУИ ЗГО» правомерно было принято решение о проведении аварийного ремонта своими силами.

19 декабря 2022 года был заключен муниципальный контракт, согласно которому, подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту ГРПШ № 8 по ул. Керамическая 34, согласно локального сметного расчета № 314, в соответствии с ведомостью материалов, а заказчик принять и оплатить указанные работы.

23 декабря 2022 года был заключен муниципальный контракт, согласно которому, подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту ГРПШ № 10 по ул. ФИО2, согласно локального сметного расчета № 231, в соответствии с ведомостью материалов, а заказчик принять и оплатить указанные работы.

27 декабря 2022 года сторонами был составлен акт о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат. Платежными поручениями от 30.12.2022 г. данные работы оплачены Комитетом.

На основании вышеизложенного, принимая во внимание, что спорные газовые сети находились в аренде у ответчика с 2016 года, он должен был производить качественное техническое обслуживание и своевременный ремонт. Аварийная ситуация возникла в период владения ответчиком сетями газоснабжения и до передачи их новому арендатору, ненадлежащее состояние сетей  подтверждается актами обследования от 16.11.2022 г., доказательств проведения качественных ремонтов, содержания  газовых сетей, учитывая акты приема передачи с указанием на их неудовлетворительное состояние, ответчиком в материалы дела не представлено, на стороне ответчика лежит обязанность возмещения убытков истца по проведению ремонта на сетях для устранения аварийных ситуаций. 

На основании вышеизложенного, исковые требования подлежат удовлетворению. 

Размер государственной пошлины по делу составляет 4 346 руб. 

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

При подаче искового заявления истец освобожден от оплаты государственной пошлины, соответственно государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика  в доход федерального бюджета. 

Руководствуясь ст. ст. 110, 167–171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Принять отказ Органа местного самоуправления «Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа» от исковых требований в части: 

            Обязать ООО  «Златоустгазстрой» произвести ремонтные работы на объекте: ГРП высокого давления в районе АГНКС группы коттеджей (пос. Красная горка). Местонахождение: Челябинская обл., г. Златоуст, в районе АГНКС группы коттеджей (пос. Красная горка). Нежилое здание, литер А, этажность 1. Реестровый номер: 42840 (договор №121 от 29.04.2021 г.), а именно:

-  Ремонт  штукатурки  внутренних   стен   по   камню  цементным   раствором,   площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм;

-  Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм;

-  Окрашивание водоэмульсионными  составами  поверхностей стен,  ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%;

-  Ремонт штукатурки потолков побетону цементным раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 10 мм;

-  Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм;

-  Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%;

-  Разборка покрытий полов: цементных;

-  Армирование стяжки сеткой кладочной 100x100x5 мм;

-  Устройство цементной стяжки толщиной 50 мм;

-  Шлифовка поверхности полов;

-  Покрытие полов лаком кремнеорганическим КО-174 на 2 слоя;

-  Демонтаж металлических дверных блоков размер 2,1x1,0 м;

-  Монтаж металлических дверей противопожарных размер 2,1x1,0 м;

-  Снятие металлических решеток для замена оконных блоков;

-  Демонтаж деревянных оконных блоков размером 2,1x2,4 м;

-  Монтаж легкосбрасываемых конструкций окон размером 2,1x2,4 м;

-  Смена отливов из оцинкованной стали;

-  Штукатурка оконных откосов;

-Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей откосов, ранее окрашенных:»» масляной краской, с расчисткой старой краски до 10%;

-  Установка металлических решеток;

-  Разборка покрытия кровли из рубероида;

-  Устройство цементно-песчанной стяжки толщиной 30 мм;

-  Огрунтовка основания кровли праймером битумным;

-  Устройство покрытий кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя (Унифлекс);

-  Смена карнизных свесов шириной 700 мм;

-  Разборка бетонной отмостки;

-  Разборка грунта вручную на глубину 0,15 м по периметру;

-  Устройство щебеночного основания толщиной 150 мм по периметру;

-  Армирование стяжки сеткой кладочной 100x100x5 мм;

-  Устройство бетонной отмостки толщиной 150 мм из бетона класса В15;

-  Демонтаж газового котла;

-  Разборка трубопроводов отопления и газоснабжения диаметром 89 мм;

-  Демонтаж кранов шаровых диаметром 80 мм;

-  Монтаж котла газового теплопроизводительность 18 кВт;

-  Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения диаметром 89 мм;

-  Установка кранов шаровых диаметром 80 мм;

-  Прокладка дымоходов диаметром 180 мм;

-  Маслянная окраска трубопроводов диаметром 89 мм.

 

Обязать ООО «Златоустгазстрой» произвести ремонтные работы на объекте: Подземный газопровод высокого давления к АРП. Местонахождение: Челябинская обл., г. Златоуст, подземный газопровод высокого давления к АРП, протяженностью 172 м., заложение подземное. Реестровый номер: 41796 (договор №68 от 20.01.2017 г.), а именно:

-  Демонтаж чугунного канализационного люка колодца;

-  Разборка бетонной горловины люка колодца;

-  Демонтаж железобетонной плиты перекрытия колодца размером 2,2x2,2 м;

-  Очистка газового колодца от грязи и ила;

-  Монтаж плиты перекрытия колодца ПП20-2;

-  Монтаж опорного кольца КО-6;

-  Монтаж люка;

-  Разработка грунта вручную по периметру колодца диаметром 2,2 м на глубину 0,15 м, ширина отмостки 0,5 м;

-  Устройство щебеночной подготовки по периметру колодца диаметром 2,2 м на глубину 0,15 м, ширина 0,5 м;

-  Устройство бетонной отмостки из бетона класса В15 толщиной 150 мм по периметру колодца, ширина отмостки 0,5 м;                                                              

-  Разработка грунта в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 мЗ на глубину 2,2 м, длина траншеи 15,0 м, группа грунтов 3;

- Устройство щебеночного основания по дну траншеи из щебня фр.40-70 толщиной 0,55 м;

-  Сверление отверстий в трубе д. 159x4,5 м для перфорации по всей длине трубы;

-  Монтаж дренажной трубы д. 159 мм;

-  Сверление отверстий диаметром 160 мм в стенке колодца толщиной 100 мм под дренажную трубу;

-  Герметизация ввода в колодец дренажной трубы;

-  Засыпка щебнем фр.40-70 мм траншеи по все длине на толщину 0,5 м;

-  Засыпка щебнем фр.20-40 мм траншеи по все длине на толщину 0,3 м;

-  Обратная засыпка траншеи грунтом механизированным способом;

-  Уплотнение грунта пневматическими трамбовками;

-  Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 м3;  

-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза;

-  Планировка площадей механизированным способом;

- Разработка грунта в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 м3  на глубину 3,0 м, группа грунтов 3 (котлован размер по низу 1,0x1,0 м, по верху 4,0x4,0 м);

- Засыпка щебнем фр.40-70 мм котлована толщину 1,85 м;

-  Засыпка щебнем фр.20-40 мм котлована на толщину 0,3 м;

-  Обратная засыпка котлована грунтом механизированным способом;

-  Уплотнение грунта пневматическими трамбовками;

-  Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,25;

-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза;

-  Планировка площадей механизированным способом.

Обязать ООО «Златоустгазстрой» произвести ремонтные работы на объекте: Подземный газопровод среднего давления по ул. Машиностроителей, пос. 40 лет Октября. Местонахождение: Челябинская обл., г. Златоуст, подземный газопровод среднего давления по ул. Машиностроителей, в пос. 40 лет Октября, протяженность 730 м. Заложение подземное. Реестровый номер: 41795 (договор №68 от 20.01.2017 г.), а именно:

-      Разработка грунта экскаватором ковшом вместимостью 0,25 мЗ, группа грунтов 3 на глубину 2,2 м, длина 3,0 м, с двух сторон газового колодца (приямки под установку фитингов системы "Стоп-система");

-  Доработка грунта вручную в приямках, группа грунтов 3;

-  Очистка участков газопровода д.219 мм от изоляции с двух сторон газового колодца;

-  Монтаж фитинга д.219 мм для монтажа "Стоп-системы";

-  Монтаж фитинга д. 159 мм для монтажа "Стоп-системы";

-  Монтаж фитинга д.32 мм для монтажа "Стоп-системы";

-  Контрольная опрессовка фитингов "Стоп-системы";

-  монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода 200 мм;

-  подъем давления при испытании воздухом газопровода среднего давления (до 0,ЗМПа), условный диаметр газопровода 200 мм (д.219 мм длиной 0,5 м -4 участка, д.219 мм длиной 0,2 м - 2 участка);

-  выдержка под давлением до 0,6 Мпа при испытании на прочность и герметичность газопровода, условным диаметром 200 мм;

-  Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 219 мм, толщина стенки до 5 мм;

-       Монтаж системы по двухстороннему перекрытию газопровода под давлением по технологии "СтопТрон" с байпасной линией;

-                 Контрольная опрессовка трубопровода байпасной линии д. 100 мм;

-                  монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода 100 мм;

-                 подъем давления при испытании воздухом газопровода среднего давления (до 0,ЗМПа),4к условный диаметр газопровода 100 мм;

-                  выдержка под давлением до 0,6 Мпа при испытании на прочность и герметичность газопровода, условным диаметром 100 мм;

- Перекрытие действующего газопровода при помощи оборудования технологии "СтопТрон";

- Демонтаж газовой задвижки д.200 мм в газовом колодце;

- Демонтаж компенсатора д.200 мм в газовом колодце;

- Демонтаж участка газопровода д.219 мм;

- Монтаж отводов стальных д.219 мм;

- Монтаж участка газопровода д.219 мм (в земле -8,0 м, надземная прокладка -3,0 м);

- Монтаж крана шарового д.200 мм в надземном исполнении;

 - Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент газопровода д.219 мм;

 -Монтаж футляра д.325 мм длиной 1,0 м в местах выхода газопровода из земли;              - Заделка битумом и каболкой концов футляра д.325 мм;

-  Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент футляра д.325 мм;

-  Контрольная опрессовка смонтированного участка газопровода д.219 мм;

-   монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода 200 мм;

-   подъем давления при испытании воздухом газопровода среднего давления (до О.ЗМПа), | условный диаметр газопровода 200 мм;

-   выдержка под давлением до 0,6 Мпа при испытании на прочность и герметичность газопровода, условным диаметром 200 мм;

-  Демонтаж оборудования системы по двухстороннему перекрытию газопровода под давлением по технологии "СтопТрон" с байпасной линией;

-  Монтаж заглушек на фитинги д.219 мм;

-  Монтаж заглушек на фитинги д. 159 мм;

-  Монтаж заглушек на фитинги д.32 мм;

-  Продувка газом смонтированного участка газопровода д.219 мм;

-  Огрунтовка газопровода д.219 мм грунтом ГФ-021 на 1 раз;

-  Окраска газопровода д.219 мм эмалью ПФ-115 желтой на 2 раза;

-  Засыпка приямков песком (в местах выхода газопровода из земли);

-  Демонтаж плиты перекрытия газового колодца;

-  Засыпка вручную грунтом колодца (2,5*2,3*2,0 );

-  Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 мЗ;

-  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза;

-  Бурение ям на глубину 1 м под фундаменты стоек ограждения;

-  Устройство фундаментов-столбов под стойки ограждения;

-  Монтаж ограждения из сетчатых панелей;                                                                    '

-  Огрунтовка ограждения грунтом ГФ-021 на 1 раз;

-  Окраска газопровода д.219 мм эмалью ПФ-115 желтой на 2 раза.

 

Обязать ООО «Златоустгазстрой» произвести ремонтные работы на объекте: Газовые сети (среднего давления) квартала Орловский. Местонахождение: 

<

...> протяженностью 2815 м., заложение надземное. Реестровый номер: 29189 (договор №66 от 21.11.2016 г.), а именно:

-  Очистка газопровода д.108 мм от краски в местах врезки фитингов (д.108 мм длиной 0,5 м -2 участка, д.108 мм длиной 0,2 м - 2 участка);

-  Врезка фитинга д.108 мм для монтажа "Стоп-системы";

-  Врезка фитинга д.32 мм для монтажа "Стоп-системы";

-  Контрольная опрессовка фитингов "Стоп-системы";

-  монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода 100 мм;

-  подъем давления при испытании воздухом газопровода среднего давления (до 0,ЗМПа), условный диаметр газопровода 100 мм (д.108 мм длиной 0,5 м -2 участка, д.108 мм длиной 0,2 м - 2 участка);

-  выдержка под давлением до 0,6 Мпа при испытании на прочность и герметичность газопровода, условным диаметром 100 мм;

-  Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 108 мм, толщина стенки до 5 мм;

-  Монтаж системы по двухстороннему перекрытию газопровода под давлением по технологии "СтопТрон" с байпасной линией;

-            Контрольная опрессовка трубопровода байпасной линии д.50 мм;

-  монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода 50 мм;

-  подъем давления при испытании воздухом газопровода среднего давления (до 0,3 МПа), условный диаметр газопровода 50 мм;

-  выдержка под давлением до 0,6 Мпа при испытании на прочность и герметичность газопровода, условным диаметром 50 мм;

-  Перекрытие действующего газопровода при помощи оборудования технологии "СтопТрон»

-  Демонтаж поврежденного участка газопровода д.108 мм;

-  Монтаж участка газопровода д.108 мм;

-  Контрольная опрессовка смонтированного участка газопровода д.108 мм;

монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода 100 мм;

 - подъем давления при испытании воздухом газопровода среднего давления (до 0,ЗМПа),

условный диаметр газопровода 100 мм;

-      выдержка под давлением до 0,6 Мпа при испытании на прочность и герметичностьгазопровода, условным диаметром 100 мм;

-Рентгенографический контроль трубопровода через одну стенку, диаметр трубопровода: 108 мм, толщина стенки до 5 мм;

-      Демонтаж оборудования системы по двухстороннему перекрытию газопровода под давлением по технологии "СтопТрон" с байпасной линией;

-  Монтаж заглушек на фитинги д. 159 мм;

-  Монтаж заглушек на фитинги д. 32 мм;

-  Продувка газом смонтированного участка газопровода д. 108 мм;

-  Огрунтовка газопровода д. 108 мм грунтом ГФ-021 на 1 раз;

-  Окраска газопровода д. 108 мм эмалью ПФ-115 желтой на 2 раза.

Обязать ООО «Златоустгазстрой» произвести ремонтные работы на объекте: Газораспределительная сеть. Газоснабжение №1. Местонахождение: Челябинская обл., г. Златоуст, газораспределительная сеть, газоснабжение №1, протяженность 30 м., заложение подземное, диаметр 108 м.м. материал: сеть. Реестровый номер: 36982 (договор №66 от 21.11.2016 г.), а именно:

-  Отключение станции ЭХЗ;

-  Оповещение потребителей о прекращении подачи газа;                

   - Закрыть краны на вводах;

-  Закрытие задвижек д. 100 мм с установкой заглушек (в газовом колодце);

-  Освобождение газопровода от газа с продувкой воздухом, диаметром 57 мм., диаметром 76 мм., диаметром 89 мм., диаметром 108 мм., диаметром 159 мм.;

-  Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 мЗ, группа грунтов 3;

-  Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3;

-  Засыпка вручную приямков песком строительным;

-  Обратная засыпка приямков механизированным способом;

-  Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 мЗ;

-  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза;

-  Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2;

-  Очистка участка подземного газопровода диаметром 108 мм в месте врезки (длина участка 0,5 м) с двух строи;

-  Обрезка, демонтаж подземного участка газопровода диаметром 108 мм;

-  Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА с последующим демонтажом по окончании работ;

-       Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE;

-       Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков сваренных между собой полиэтиленовых трубопроводов диаметром: 200 мм (труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR11, размером 200x18,2 мм);

-Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при автоматическом управлении процессом сварки диаметром трубопровода 200 мм;

-      Протаскивание в футляр труб диаметром: 110 мм (труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR11, размером 110x10,0 мм);

-  Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при автоматическом W управлении процессом сварки диаметром трубопровода 100 мм;

-  Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" SDR 11 110х10,0/СТ108;

-  Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 200 мм;

-  Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода в ковере;

-  Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм;

-  Установка столбиков сигнальных опознавательных;                                                     

-  Контрольная опрессовка смонтированного участка газопровода;

-  очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 100 мм;

- монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода 100 мм;

- подъем давления при испытании воздухом газопровода низкого давления (до 0,ЗМПа), условный диаметр газопровода 100 мм;

- выдержка под давлением до 0,6 Мпа при испытании на прочность и герметичность газопровода, условным диаметром 100 мм;

- Демонтаж станции ЭХЗ;

- Контрольная опрессовка участка наружного газопровода;

-  монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода 150 мм;

-  подъем давления при испытании воздухом газопровода низкого давления (до О.ЗМПа), диаметр газопровода 57 мм

-  подъем давления при испытании воздухом газопровода низкого давления (до 0,ЗМПа), диаметр газопровода 76 мм;

-  подъем давления при испытании воздухом газопровода низкого давления (до О.ЗМПа), диаметр газопровода 89 мм;

-  подъем давления при испытании воздухом газопровода низкого давления (до О.ЗМПа),  диаметр газопровода 108 мм;

-  подъем давления при испытании воздухом газопровода низкого давления (до О.ЗМПа), диаметр газопровода 159 мм;

-  выдержка под давлением до 0,6 Мпа при испытании на прочность и герметичность газопровода;

-  Повторный пуск многоквартирных домов;

-  монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм;

-  подъем давления при испытании воздухом газопровода низкого давления (до 0,ЗМПа), условный диаметр газопровода до 50 мм;

-  выдержка под давлением до 0,6 Мпа при испытании на прочность и герметичность газопровода;

-  Повторный пуск жилых домов частного сектора;

-  монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм;

-  подъем давления при испытании воздухом газопровода низкого давления (до О.ЗМПа), условный диаметр газопровода до 50 мм;

-  выдержка под давлением до 0,6 Мпа при испытании на прочность и герметичность газопровода;

-  Повторный пуск нежилых зданий;

-  монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм;

-  подъем давления при испытании воздухом газопровода низкого давления (до О.ЗМПа), условный диаметр газопровода до 50 мм;

-  выдержка под давлением до 0,6 Мпа при испытании на прочность и герметичность газопровода.

Обязать    ООО    «Златоустгазстрой»    произвести    ремонтные    работы   на    объекте: Газораспределительная сеть. Местонахождение: Челябинская обл., г. Златоуст, газоснабжение жилых домов 

<

...> протяженность 1 306 м., заложение надземное, диаметр (м.м.)  108*89*76*57, материал сталь. Реестровый номер:  3690^ (договор №66 от 21.11.2016 г.), а именно:

-  Копание ям вручную размером 0,5x0,5x1,0 м под фундамент опор;

-  Устройство щебеночного основания толщиной 50 мм фундаментов опор

-      Устройство фундаментов под опоры из бетона класса В12.5 (серия Нормаль Нг-011), объем  фундамента 0,245 мЗ;

                 - Замена опор, диаметр опор 76 мм, Н=2,2 м (серия Нормаль Нг-011), вес 1 опоры 24,018 кг;

-  Огрунтовка опор грунтом ГФ-021 на 1 раз;

-  Окраска опор эмалью ПФ-115 на 2 раза;

-  Правка положения опор газопровода, диаметр опор 76 мм, Н=2,2 м серия нормаль Нг-011;

-  Усиление сваркой основания опор газопровода (фасонки, труба);

-  Замена хомутов из круга диаметром 14 мм, длина хомута 408 мм;

-  Копание ям вручную размером 0,5x0,5x1,0 м под фундамент опор;

-  Устройство щебеночного основания толщиной 50 мм фундаментов опор;

-  Устройство фундаментов под опоры из бетона класса В12,5 (серия Нормаль Нг-011), объем 1 фундамента 0,245 мЗ.

Обязать 000 «Златоустгазстрой» произвести ремонтные работы на объекте: Газораспределительная сеть. Местонахождение: Челябинская обл., г. Златоуст, газораспределительная сеть. Газоснабжение жилых домов по ул. Дачная, ГРП 2. Реестровый номер: 37000 (договор №66 от 21.11.2016 г.), а именно:

-  Демонтаж железобетонной плиты перекрытия колодца размером 2,5x2,3 м;

-  Очистка газового колодца от грязи и ила;

-  Монтаж плиты перекрытия колодца ПО-4 (размер 2300x1500x200 мм);

-  Монтаж деревянной крышки-щита размером 1,0x1,0м;

- Разработка грунта вручную по периметру колодца размером 2,30x3,00 м на глубину 0,15 м,  ширина отмостки 0,5 м;

-  Устройство щебеночной подготовки по периметру колодца размером 2,30x3,00м на глубину 0,15 м, ширина 0,5 м;

-  Устройство бетонной отмостки из бетона класса В15 толщиной 200 мм по периметру колодца, ширина отмостки 0,5 м;

-  Разработка грунта в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 мЗ на глубину 2,2 м, длина траншеи 15,0 м, группа грунтов 3;

-  Устройство щебеночного основания по дну траншеи из щебня фр.40-70 толщиной 0,30 м;

-  Сверление отверстий в трубе д. 159x4,5 м для перфорации по всей длине трубы;

-  Монтаж дренажной трубы д. 159 мм;

-  Сверление отверстий диаметром 160 мм в стенке колодца толщиной 100 мм под дренажную трубу;

-  Герметизация ввода в колодец дренажной трубы;

-  Засыпка щебнем фр.40-70 мм траншеи по все длине на толщину 0,5 м;

-  Обратная засыпка траншеи грунтом механизированным способом;

-  Уплотнение грунта пневматическими трамбовками;

-  Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 м3;

-  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза;

-  Планировка площадей механизированным способом;

-  Разработка грунта в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 мЗ на глубину 3,0 м, группа грунтов 3 (котлован размер по низу 1,0x1,0 м, по верху 4,0x4,0 м);

-  Засыпка щебнем фр.40-70 мм котлована толщину 1,85 м;

-  Засыпка щебнем фр.20-40 мм котлована на толщину 0,3 м;

-  Обратная засыпка котлована грунтом механизированным способом;

-  Уплотнение грунта пневматическими трамбовками;

-  Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 мЗ;

-  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза;

-  Планировка площадей механизированным способом.

         Обязать ООО «Златоустгазстрой» произвести ремонтные работы на объекте: Газовые сети (наружные). Местонахождение: Челябинская обл., г. Златоуст, газовые сети (наружные) жилых домов по ул. Аносова, Средняя Ветлужская, Верхняя Ветлужская, Малая Ветлужская, 3-я Тесьминская, 4-я Тесьминская. Реестровый номер: 29185 (договор №66 от 21.11.2016 г.), а именно:

-Закрытие задвижки д. 100 мм и установка заглушки (газопровод низкого давления);

-  Очистка газопровода д.89 мм от краски в местах врезки фитингов (д.89 мм длиной 0,5 м - 1 участок, д.89 мм длиной 0,2 м -1 участок);

-  Врезка фитинга д.89 мм для монтажа "Стоп-системы";                                                 ^

-  Врезка фитинга д.32 мм для монтажа "Стоп-системы";

-  Контрольная опрессовка фитингов "Стоп-системы";

-  монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода 80 мм;

-  подъем давления при испытании воздухом газопровода среднего давления (до 0,ЗМПа), условный диаметр газопровода 80 мм (д.80 мм длиной 0,5 м -1 участок, д.80 мм длиной 0,2 м - 1 участок);

-  выдержка под давлением до 0,6 Мпа при испытании на прочность и герметичность газопровода, условным диаметром 80 мм;

-  Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 89 мм, толщина стенки до 5 мм;

-  Монтаж системы по перекрытию газопровода под давлением по технологии "СтопТрон";

-  Перекрытие действующего газопровода при помощи оборудования технологии "СтопТрон";

-  Демонтаж задвижки д.50 мм (газопровод среднего давления);

-  Монтаж крана шарового фланцевого д.50 мм;

-  Замена ИФС д.50 мм;

-  Замена задвижки д. 100 мм (газопровод низкого давления);

-  Замена пункта редуцирования газа (ГРПШ-13-1Н-У1);

-  Пусконаладочные работы пункта редуцирования газа (ГРПШ-13-1Н-У1).

Обязать ООО «Златоустгазстрой» произвести ремонтные работы на объекте: Объект: Газопровод - закольцовка среднего давления от ул. Береговая Ветлужская до ул. Миасская. Местонахождение: 

<

...> до точки врезки всуществующий газопровод по ул. Миасская, протяженность трассы 5319 м., протяженность трубопровода 5474. Реестровый номер: 40953 (договор №66 от 21.11.2016 г.), а именно:

-  Правка положения опор газопровода, диаметр опор 108 мм, Н=2,2 м серия нормаль Нг-011;

-  Усиление сваркой основания опор газопровода (фасонки, труба);

-  Замена хомутов из круга диаметром 14 мм, длина хомута 408 мм;

-  Разработка грунта вручную на глубину 150 мм по периметру фундамента на ширину 300 мм, размер фундамента 500x500 мм;

-  Устройство щебеночного основания на толщину 150 мм по периметру фундамента на ширину 300 мм, размер фундамента 500x500 мм;

-  Обетонирование фундамента бетоном класса В15 по периметру на ширину 300 мм, высота 300 мм.

Требуемые работы (согласно дефектной ведомости № 8):

-  Демонтаж станции катодной защиты;

-  Демонтаж кабеля;

-  Устройство бетонной подготовки из бетона класса В15 под постамент станции;           

-  Отсыпка щебнем по периметру станции;

-  Монтаж преобразователя для катодной защиты ПКЗ-АР-Е2-Т-Т-У1 с постаментом;

-  Замена бокса модульного КМПн 2/4;

-  Замена автоматического выключателя 2 полюсного 32 А;

-  Монтаж трубы гофрированной диаметром 50 мм "ДКС";

-  Затягивание кабеля ВВГ 3x4 в гофротрубу диаметром 50 мм;

-  Огрунтовка грунтом ГФ-021 на 1 слой полосы заземления, стойки СКИП;

-  Окраска эмалью ПФ-115 на 2 слоя полосы заземления, стойки СКИП;

-Наклейка знаков безопасности

Обязать ООО «Златоустгазстрой» произвести ремонтные работы на объекте: Газовые сети.   Местонахождение:   

<

...>   Мебельная,   Трудовая. Спортивная, протяженность 2337 м., заложение наземное. Реестровый номер: 23202 (договор №66 с^р21.11.2016 г.), а именно:

-  Копание ям вручную размером 0,5x0,5x1,0 м под фундамент опор;

-  Устройство щебеночного основания толщиной 50 мм фундаментов опор;

-  Устройство фундаментов под опоры из бетона класса В12.5 (серия Нормаль Нг-011), объем 1 фундамента 0,245 мЗ;

-  Замена опор, диаметр опор 76 мм, Н=2,2 м (серия Нормаль Нг-011), вес 1 опоры 24,018 кг;

-Огрунтовка опор грунтом ГФ-021 на 1 раз;

-  Окраска опор эмалью ПФ-115 на 2 раза;

-  Правка положения опор газопровода, диаметр опор 76 мм, Н=2,2 м серия нормаль Нг-011;

-  Усиление сваркой основания опор газопровода (фасонки, труба);

-  Замена хомутов из круга диаметром 14 мм, длина хомута 408 мм;

-  Копание ям вручную размером 0,5x0,5x1,0 м под фундамент опор;

-  Устройство щебеночного основания толщиной 50 мм фундаментов опор;

-  Устройство фундаментов под опоры из бетона класса В12.5 (серия Нормаль Нг-011), объем 1 фундамента 0,245 м3.

Производство по делу в данной части прекратить. 

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Златоустгазстрой»  в пользу Органа местного самоуправления «Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа» убытки по оплаченному ремонту  в размере 111 523 руб. 20 коп. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Златоустгазстрой»  в доход федерального бюджета сумму государственной пошлины в размере 4 346 руб. 

         Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Судья                                                                                        Н.В. Гордеева                 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru