РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № А40-17710/19-110-168

26 сентября 2019 года

город Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 09 сентября 2019 года 

Решение в полном объеме изготовлено 26 сентября 2019 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Ермоловой В.В.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску федерального государственного унитарного предприятия "РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ" (129515, Москва город, улица Академика Королева, дом 13, строение 1, , ОГРН: 1027739456084) к обществу с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АЛЬПСТРОЙ" (344023 Ростовская область город Ростов-на-Дону улица Страны Советов 3 , ОГРН: 1066167030170) о взыскании 13 738 162,05 руб.,

при участии: 

от истца – Игнатова  А.В. по дов.  от  22.12.2017 №01-12/633, 

от ответчика- Мироненко  Н.С. по дов.  от  09.01.2019 №2

УСТАНОВИЛ:

федеральное государственное унитарное предприятие "РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ" обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АЛЬПСТРОЙ" о взыскании 13 738 162,05 руб. неустойки за просрочку исполнения обязательств по Договору №ДТР-336-14 от 12.09.2014.

Ответчик иск не признал по основаниям,  изложенным в отзыве. 

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам:

Как усматривается из материалов дела, между ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС, Заказчик) и ООО «СК Альпстрой» (Подрядчик) 12.09.2014 был заключен договор № ДТР-336-14 на выполнение полного комплекса работ по строительству сети цифрового наземного телевизионного вещания Пермского края (IV этап).

По условиям п. 1.1. Договора Подрядчик обязуется выполнить полный комплекс работ, включая строительные работы в отношении новых объектов сети (далее - Объекты), осуществить поставку, монтаж и пуско-наладку оборудования, а также выполнить технические условия для подключения объектов Сети к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с условиями договора, провести предварительные испытания оборудования Сети (далее - Работы), своевременно сдать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их стоимость, обусловленную Приложением № 1 к Договору и Сметной документацией за счет средств федерального бюджета, выделяемого в виде субсидий на капитальные вложения.

В Договор входит один этап - IV, в который входит строительство 19 объектов.

Порядок приемки оборудования и работ прописан в п. 4.8.- 4.20. Договора (в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 28.04.2012).

Пункт 4.8. Договора предусматривает, что передача Оборудования Подрядчиком и приемка его Заказчиком осуществляются по товарной накладной (форма ТОРГ-12), на основании которой оформляется Акт сдачи-приемки Оборудования по форме Приложения № 4 к Договору.

В соответствии с п. 4.9. Договора Работы принимаются по каждому Объекту отдельно, приемка работ осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией. Для приемки выполненных Работ по каждому объекту, а также для осуществления расчетов Подрядчик за пять дней до приемки выполненных Работ уведомляет в письменной форме Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ, предъявляет Заказчику выполненные Работы, а также предоставляет Заказчику полностью оформленные акты о приемке выполненных Работ (форма № КС-2) справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), а также оформленный на их основании Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме Приложения № 4.

Акты сдачи-приемки выполненных работ/оборудования, составленные на основании КС-2, являются основанием для оплаты выполненных работ.

Срок сдачи IV этапа определен Договором пообъектно (в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 25.11.2015): по 1 объекту - май 2016 года, по 2 объектам - июнь 2016 года, по 1 объекту - июль 2016 года, по 2 объектам - сентябрь 2016 года, по 1 объекту -октябрь 2016 года, по 12 объектам - ноябрь 2016 года.

Работы по объектам окончательно сданы Ответчиком 27.11.2017, т.е. с просрочкой.

В соответствии с пунктом 7.3. Договора (в редакции Дополнительного соглашения № 3 от 19.05.2016) при нарушении Подрядчиком сроков поставки Оборудования, сдачи отдельных этапов Работ, установленных Перечнем и стоимостью объектов строительства сети цифрового наземного телевизионного вещания Пермского края (VI этап), включая объекты связи (Приложение № 1 к Договору), Заказчик вправе требовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере 0,1 % от стоимости невыполненных работ, указанных в Графике платежей (Приложение № 2 к Договору), за каждый день просрочки.

Сумма неустойки за просрочку выполнения Работ составляет 13 738 162,05 руб.

На основании изложенного, истец обратился с настоящим иском в суд.

Ответчик, оспаривая исковые требования указал, что по условиям договора № ДТР-336-14 от 12.09.2014  весь процесс по строительству сети цифрового наземного телевизионного вещания (далее СЦНТВ) был разделен на 5 этапов, включающих в себя поставку, монтаж, и пуско-наладку оборудования где по итогу проводилось необходимое предварительное испытания оборудования. Для обеспечения строительных работ Истец предоставлял Ответчику проектно-сметную документацию (техническая документация) в которой была оговорена стоимость и вид работ по каждому этапу строительства. Однако Истец не учел тот факт, что за шестилетний период ведения строительства, на множестве объектов, Ответчику неоднократно приходилось превышать цену, изначально указанную в смете, а также нести необходимые дополнительные расходы, связанные с проведением работ и мероприятий без которых дальнейшее ведение строительства, было бы невозможным. По каждым работам неучтенных технической документацией Ответчик направлял в адрес Истца соответствующее уведомление, содержащее сумму понесенных убытков.

Как пояснил ответчик, помимо договора № ДТР-336-14 от 12.09.2014 г. где строительство велось на территории Пермского края, между Истцом и Ответчиком также были заключены ряд других договоров подрядного характера на ведение аналогичных строительных работ по возведению СЦНТВ в других регионах, а именно в Свердловской области и Республики Башкортостан. Также между Ответчиком и Истцом имеются спорные отношения как в вопросе взыскания убытков (в пользу первого) так и взыскания неустойки (в пользу второго). Все строительные работы в трех регионах велись в один временной период и как следствие финансирование и фактическое ведение строительства в разных регионах зависели друг от друга, что выражалось в просрочке исполнения работ, поставки необходимых материалов и оборудования, а также расходах, превышающих смету.

За период ведения работ, со стороны ФГУП «РТРС» (Заказчика) были допущены нарушения в части исполнение договора № ДТР-336-14 от 12.09.2014 г, а именно:

несвоевременная передача строительной площадки (П. 5.2.2. договора)

несвоевременная передача технических условий для подключения к ВЭС (п.5.2.3 договора)

несвоевременная передача проектной документации (п. 5.2.4. договора).

Таким образом, Подрядчик не мог приступить к работам своевременно, вследствие чего подрядчик начал осуществлять фактическое исполнение работ сильно позже от оговоренного договором срока.

Помимо прочего, имели место быть неблагоприятные погодные условия, наступление которых приводило к невозможности выполнения работ в перечисленные дни по следующим причинам:

осадки, приводящие подъездные пути в непригодное для использования строительной техникой состояние;

запрет выполнения монтажных работ на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающих видимость в пределах фронта работ в соответствии с п.278 Правил по охране труда в строительстве (Приказ от 1 июня 2015 года N 336н);

Температура окружающей среды ниже минус 35° С или ниже минус 30° С в сочетании с ветром, приводящим к невозможности выполнения работ из-за опасности обморожения открытых частей тела.

В соответствии с п.5.3.2 Договора, Подрядчик вправе увеличить сроки выполнения работ в случае несвоевременного предоставления Заказчиком необходимого объема исходных данных. Следует учесть, что прямой запрет выполнения работ в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, а также отсутствие возможности использования строительной техники из-за непригодности подъездных путей, устройство которых не предусмотрено Договором (о чем Подрядчик неоднократно извещал Заказчика), является  достаточным основанием для переноса даты завершения строительства на срок наличия таких условий в период выполнения работ. 

Кроме того, между Заказчиком и Подрядчиком 24.05.2017 г.  Подписан график  сдачи объектов строительства СЦНТВ Пермского края (IV этап) приемочной комиссии в рамках реализации Договора № ДТР-336-14 от 12.09.2014 г. по 15 пятнадцати) объектам 

Таким образом,  оснований для привлечения к ответственности  в силу ст.ст. 401,406  ГК РФ не имеется.

При указанных обстоятельствах иск удовлетворению не подлежит. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 156, 169-170 АПК РФ,  

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

Судья:               А.В. Мищенко