АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-17423/19

г. Уфа

17 октября 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 09.10.2019

Полный текст решения изготовлен 17.10.2019

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Юсеевой И. Р., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  Симоновой Е.А., рассмотрев дело по иску

ООО "ЗСМИК" (ИНН 0266023479, ОГРН 1040203380337)

к ООО "ССМУ" (ИНН 0266031007, ОГРН 1080266001144)

О  взыскании  11 815 659 руб.19 коп.

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО2 по доверенности от 1.02.2019, ФИО3 по доверенности от 12.09.2019

от ответчика -  ФИО4 (приказ)

Общество с ограниченной ответственностью "Завод строительных материалов и конструкций" /далее - истец, ООО "ЗСМИК"/ обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированное строительное монтажное управление» /далее – ответчик, ООО "ССМУ"/ о взыскании задолженности по договору субподряда № 114/16-КС(З) от 29.07.2016 г. и договору поставки № 29-УМТО/С-16 от 25.04.2016 г. в размере 748 528 176 руб. 74 коп., стоимости неиспользованных и невозвращенных материалов и оборудования по договорам субподряда № 114/16-КС(3), № 29/16-КС(3) , № 71/16-КС(3) в размере 453 287 482 руб. 45 коп.

Истец в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил исковые требования, просил взыскать с ответчика задолженность в размере 8 528 176 руб. 74 коп., стоимость неиспользованных и невозвращенных материалов и оборудования в размере 3 055 617 руб. 65 коп.

Судом уточнение принято в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, дело рассмотрено по уточненным исковым требованиям.

От ответчика поступил отзыв, в котором общество не согласилось с исковыми требованиями, заявило, что имеет  встречные требования по оплате выполненных работ, считает необходимым проведение сверки взаимных расчетов.

От истца поступило возражение на отзыв ответчика, в котором общество не согласилось доводами ответчика, сообщило, что ООО "ССМУ" с заявлением о зачете встречных однородных требований не обращался.

Представитель истца уточненные исковые требования поддержал.

Представитель ответчика свою позицию по делу изложил.

Исследовав обстоятельства и материалы дела, при участии представителей  истца и ответчика, суд

УСТАНОВИЛ:

Между истцом (далее – поставщик)  и ответчиком (далее – покупатель) был заключен договор поставки № 29-УМТО/С-16 от 25.04.2016 г. (т. 1, л. д. 17-18), согласно которому поставщик обязуется поставить, а покупатель - принять и оплатить продукцию в количестве и ассортименте согласно принятым поставщиком заказам покупателя.

На основании п. 1.3 договора поставки  № 29-УМТО/С-16 наименование продукции, количество, цена оговариваются в накладных или в дополнительном соглашении, которые являются неотъемлемой частью договора.

Исходя из п. 1.5.договора поставки  № 29-УМТО/С-16 поставка продукции осуществляется на основании договора субподряда 29/1 б-КС (3) от 22 марта 2016 г.

Дополнительным соглашением № 2 от 04.12.2017 г. (т. 1, л. д. 20) к договору поставки  № 29-УМТО/С-16 стороны согласовали п. 8.1 договора в следующей редакции: настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31 декабря 2017 г.

Согласно ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе как существенные или необходимые для договоров данного вида. В силу ст. 455 Гражданского кодекса Российской Федерации условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара. 

Анализ представленного в материалы дела договора и  приложений к нему, позволяет сделать вывод, что сторонами согласованы существенные условия договора, позволяющие определить наименование и количество поставляемой продукции, таким образом, имеется соглашение сторон о предмете обязательства, договор является заключенным, признаков ничтожности не содержит. 

Таким образом, к правоотношениям сторон из представленного договора поставки подлежат применению правила о поставке товаров. 

Согласно статье 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Статьей 510 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что доставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки их транспортом, предусмотренным договором поставки, и на определенных в договоре условиях. В случаях, когда в договоре не определено, каким видом транспорта или на каких условиях осуществляется доставка, право выбора вида транспорта или определения условий доставки товаров принадлежит поставщику, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, существа обязательства или обычаев делового оборота.

В силу пункта 1 статьи 458 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено договором купли-продажи, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент вручения товара покупателю или указанному им лицу, если договором предусмотрена обязанность продавца по доставке товара.

На основании статьи 516 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями (пункт 1).

Если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществляется получателем (плательщиком) и последний неосновательно отказался от оплаты либо не оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя (пункт 2 статьи 516 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Между истцом (далее – подрядчик) и ответчиком (далее – субподрядчик)   заключен договор субподряда № 114/16-КС(З) от 29.07.2016 г. (т. 1, л. д. 31-37), согласно которому  субподрядчик обязуется выполнить работы в рамках проекта «Бактериологическая лаборатория установки очистки сульфидно-щелочных стоков НПЗ и завода Мономер» на объектах ОАО «Газпром нефтехим Салават» Республика Башкортостан г. Салават, а подрядчик обязуется принять и оплатить результаты работ в порядке и на условиях, установленных в настоящем договоре.

Работы выполняются по каждой отдельной заявке (Приложение №1 к настоящему договору), согласованной сторонами, с приложенной к ней проектно-сметной документацией.

Работы по настоящему договору являются субподрядными и выполняются в рамках договора № 6-3-2011 от 03.08.2011 г. между АО «СНХРС» и ООО «ЗСМиК».

В силу п. 1.2 договора субподряда № 114/16-КС(З)  сроки выполнения работ по договору:

- начало: с момент подписания договора:

-окончание: 31.12.2016 г.

На основании п. 6.1 договора субподряда № 114/16-КС(З) ориентировочная стоимость работ с учетом материалов и оборудования составляет 50 000 000 руб., которая состоит  из:

42 372 881,36 руб. (Сорок два миллиона триста семьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят один рубль 36 копеек) - сумма без НДС:

7 627 118,64 руб. (Семь миллионов шестьсот двадцать семь тысяч сто восемнадцать рублей 64 копейки ) - сумма НДС (18%).

Согласно п. 6.6.договора субподряда № 114/16-КС(З) субподрядчик производит оплату подрядчику за оказание услуг, связанных с выполнением обязанностей по данному договору (генподрядный процент) в размере 5% от принятых к оплате выполненных объемов работ бет учета стоимости материалов и оборудовании поставки подрядчика по договору купли-продажи (не применяется к «прочим» фактическим затратам субподрядчика, командировочные расходы, проживание, перебазировка кранов, перевозка рабочих и т.д. и т.п.), в течение 100 (ста) календарных дней  с момента выставления счет-фактуры. Оплата генподрядного процента может быть также произведена зачетом встречных однородных требований по оплате за выполненный объём работ.

Дополнительным соглашением № 9 от 17.07.2018 г. (т. 1, л. д. 64-65) к договору субподряда № 114/16-КС(З) стороны продлили срок действия договора до 31.07.2018 г., а в части расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Дополнительным соглашением № 1 от 14.12.2016 г. (т. 1, л. д. 48-49) к договора субподряда № 114/16-КС(З) стороны согласовали следующее: материал и оборудование, переданные на давальческой основе субподрядчику, остаются в собственности подрядчика. Давальческий материал и оборудование для выполнения строительно-монтажных работ передается субподрядчику на основании накладной формы № М-15 «Накладная на отпуск материалов на сторону» (Приложение №9) с пометкой «Давальческие материалы» и/или акта о приеме-передачи оборудования в монтаж форма ОС-15 (Приложение №8) с пометкой «Давальческие материалы» только для использования в рамках настоящего договора.

Выдача давальческого материала и оборудования производится со складов заказчика / генподрядчика / подрядчика по доверенности / обменной доверенности формы М-2 (Приложение №11).

Субподрядчик обязуется использовать предоставленные подрядчиком давальческие материалы и оборудование экономно и расчетливо, после окончания работ представить подрядчику отчет о расходовании материалов по форме согласно Приложению № 10 к настоящему договору.

Субподрядчик обязан включать в акты КС-2 количество использованного давальческого материала, без указания стоимости. К актам КС-2 субподрядчик обязан прилагать отчет о расходовании материала (приложение №10 к договору), который является неотъемлемой частью акта КС-2. Не предоставление отчета о расходовании давальческого материала и оборудования, является мотивированным отказом приемки работ выполненных субподрядчиком (п. 5.2.2 соглашения).

В силу п. 5.5 дополнительного соглашения № 1  субподрядчик обязан выкупить по рыночной стоимости, но не ниже цены при передаче, и кроме того 18% НДС, неиспользованные материалы и не возвращенные в течение 30 календарных дней от даты окончания действия договора.

Между сторонами был заключен договор субподряда № 29/16-КС(З) от 22.03.2016 г. (т. 1, л. д. 80-86), согласно которому субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы в рамках проекта № 57-6-12-000-АС6 «Комплекс каталитического крекинга мощностью 1095 тыс. г/год НПЗ» МЦК на объектах ОАО «Газпром нефтехим Салават», а подрядчик обязуется принять и оплатить результаты работ в порядке и на условиях, установленных в настоящем договоре.

Работы выполняются по каждой отдельной Заявке (Приложение №1 к настоящему договору), согласованной сторонами, с приложенной к ней проектно-сметной документацией.

Работы по настоящему договору являются субподрядными и выполняются в рамках договора № 6-2-2011 от 03.08.2011 г. между ОАО «СНХРС» и ООО «ЗСМиК».

На основании п. 1.2. договора субподряда № 29/16-КС(З) сроки выполнения работ по договору:

-начало: с момента подписания договора;

-окончание: 30.06.2016 г.

В силу п. 6.1 договора субподряда № 29/16-КС(З)  ориентировочная стоимость работ составляет 7 665 387,38 руб. (Семь миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч триста восемьдесят семь рублен 38 копеек), которая состоит из:

6 496 091,00 руб. (Шесть миллионов четыреста девяносто шесть тысяч девяносто один рубль 00 копеек)- сумма без НДС:

1 169 296,38 руб. (Один миллион сто шестьдесят девять тысяч двести девяносто шесть рублей 38 копеек) - сумма 11ДС (18%).

Дополнительным соглашением № 11 от 29.12.2018 г. (т. 1, л. д. 125) к договору  субподряда № 29/16-КС(З) стороны продлили срок действия договора до 31.03.2019 г., а в части расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.

 Дополнительным соглашением № 10 от 30.03.2018 г. (т. 1, л. д. 119-121) к договору  субподряда № 29/16-КС(З) стороны согласовали следующее: материал и оборудование, переданные на давальческой основе субподрядчику, остаются в собственности подрядчика. Давальческий материал и оборудование для выполнения строительно-монтажных работ передается субподрядчику на основании накладной формы № М-15 «Накладная на отпуск материалов на сторону» (Приложение №9) с пометкой «Давальческие материалы» и/или акта о приеме-передачи оборудования в монтаж форма ОС-15 (Приложение №8) с пометкой «Давальческие материалы» только для использования в рамках настоящего договора.

Выдача давальческого материала и оборудования производится со складов заказчика / генподрядчика / подрядчика по доверенности / обменной доверенности формы М-2 (Приложение №11).

Субподрядчик обязуется использовать предоставленные подрядчиком давальческие материалы и оборудование экономно и расчетливо, после окончания работ представить подрядчику отчет о расходовании материалов по форме согласно Приложению № 10 к настоящему договору.

Субподрядчик обязан включать в акты КС-2 количество использованного давальческого материала, без указания стоимости. К актам КС-2 субподрядчик обязан прилагать отчет о расходовании материала (приложение №10 к договору), который является неотъемлемой частью акта КС-2. Не предоставление отчета о расходовании давальческого материала и оборудования, является мотивированным отказом приемки работ выполненных субподрядчиком (п. 5.2.2 соглашения).

В силу п. 5.5 дополнительного соглашения № 10  субподрядчик обязан выкупить по рыночной стоимости, но не ниже цены при передаче, и кроме того 18% НДС, неиспользованные материалы и не возвращенные в течение 30 календарных дней от даты окончания действия договора.

Между сторонами заключен договор субподряда № 71/16-КС(З) от 22.04.2016 г. (т. 1, л. д. 126-132), согласно которому субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы в рамках проекта № 26-1-1-16-1127 ««Техническое перевооружение. Монтаж узла дозировании реагентов» завод Мономер, цех № 56, об. 1127» на объектах ОАО «Газпром нефтехим Салават». а подрядчик обязуется принять п оплатить результаты работ в порядке и на условиях, установленных в настоящем договоре.

Работы выполняются по каждой отдельной Заявке (Приложение № 1 к настоящему договору), согласованной сторонами, с приложенной к ней проектно-сметной документацией.

Работы но настоящему договору являются субподрядными и выполняются в рамках договора № 10-4-2011 от 03.08.2011 г. между ОАО «СНХРС» и ООО «ЗСМиК».

В силу п. 1.2 договора субподряда № 71/16-КС(З) сроки выполнения работ по договору:

-начало: с момента подписания договора;

-окончание: 30.09.2016 г.

На основании п. 6.1 договора субподряда № 71/16-КС(З)  ориентировочная стоимость работ составляет 2 468 914,00 руб. (Два миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч девятьсот четырнадцать рублей 00 копеек), которая состоит из: 2 092 300,00 руб. (Два миллиона девяносто две тысячи триста рублей 00 копеек) сумма без НДС: 376 614,00 руб. (Триста семьдесят шесть тысяч шестьсот четырнадцать рублей 00 копеек) - сумма НДС (18%).

Дополнительным соглашением № 4 от 19.03.2018 г. (т. 1, л. д. 159-161) к договору  субподряда № 71/16-КС(З) стороны согласовали следующее: материал и оборудование, переданные на давальческой основе субподрядчику, остаются в собственности подрядчика. Давальческий материал и оборудование для выполнения строительно-монтажных работ передается субподрядчику на основании накладной формы № М-15 «Накладная на отпуск материалов на сторону» (Приложение №9) с пометкой «Давальческие материалы» и/или акта о приеме-передачи оборудования в монтаж форма ОС-15 (Приложение №8) с пометкой «Давальческие материалы» только для использования в рамках настоящего договора.

Выдача давальческого материала и оборудования производится со складов заказчика / генподрядчика / подрядчика по доверенности / обменной доверенности формы М-2 (Приложение №11).

Субподрядчик обязуется использовать предоставленные подрядчиком давальческие материалы и оборудование экономно и расчетливо, после окончания работ представить подрядчику отчет о расходовании материалов по форме согласно Приложению № 10 к настоящему договору.

Субподрядчик обязан включать в акты КС-2 количество использованного давальческого материала, без указания стоимости. К актам КС-2 субподрядчик обязан прилагать отчет о расходовании материала (приложение №10 к договору), который является неотъемлемой частью акта КС-2. Не предоставление отчета о расходовании давальческого материала и оборудования, является мотивированным отказом приемки работ выполненных субподрядчиком (п. 5.2.2 соглашения).

В силу п. 5.5 дополнительного соглашения № 10  субподрядчик обязан выкупить по рыночной стоимости, но не ниже цены при передаче, и кроме того 18% НДС, неиспользованные материалы и не возвращенные в течение 30 календарных дней от даты окончания действия договора.

Дополнительным соглашением № 6 от 29.12.2018 г. (т. 2, л. д. 44) к договору  субподряда № 71/16-КС(З) стороны продлили действие договора до 31.03.2019 г., а в части расчетов до полного исполнения сторонами обязательств.

Правоотношения сторон подлежат регулированию нормами Гражданского кодекса Российской Федерации о договорах подряда.

В соответствии с пунктом 1 статьи 706 ГК РФ по договору субподряда одна сторона (субподрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (генподрячик) определенную работу и сдать ее результат, а генподрядчик обязуется принять результат работы и оплатить ее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Согласно пункту 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В соответствии со ст. 709 Кодекса в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с п. 3 ст. 424 Кодекса.

В силу пункта 1 статьи 706 Гражданского кодекса Российской Федерации если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

Исследуемые договора содержат все существенные условия, оснований для признания их незаключенным либо ничтожными не имеется.

В силу ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, требованиями закона и иных правовых актов, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Во исполнение принятых на себя обязательств по договору поставки № 29-УМТО/С-16  от 25.04.2016 г. истец поставил ответчику продукцию на общую сумму 8 442 302 руб. 60 коп., что подтверждается счетами-фактур и товарными накладными: № 1537  от 26.06.2016 г., № 2032 от 05.08.2016 г. (т. 1, л. д. 21-25).

Ответчиком частично оплачена поставленная продукция в размере 1 012 207 руб. 36 коп. платежным поручением № 10 от 01.03.2019 г. (т. 1, л.27), в размере 5 180 106 руб. 81 коп. платежным поручением № 84 от 21.03.2017 г. (т. 1, л. д. 29).

На момент подачи иска задолженность ответчика перед истцом  за поставку продукции составила 8 442 302 руб. 60 коп.

Согласно п. 6.6 договора субподряда № 114/16-КС(З) от 29.07.2016 г. ответчик выплачивает ситцу генподрядный процент в размере 5% от принятых к оплате объемов работ без учета стоимости материалов и оборудования поставки.

Генподрядный процент по следующим счетам-фактурам: № 3717 от 31.03.2018 (акт № 30-138 от 31.03.2018), № 4431 от 30.04.2018 (акт № 30-153 от 30.04.2018), № 8975 от 31.08.2018 (акт № 30-462 от 31.08.2018), № 5807 от 31.05.2018 (акт № 30-231 от 31.05.2018), № 4600 от 30.04.2018 (акт № 30-169 от 30.04.2018) (т. 1, л. д. 67-76), - составил 85 874 руб. 14 коп.

Генподрядный процент частично оплачен ответчиком платежным поручением № 3 от 01.03.2019 г. (т. 1, л. д. 77) в размере 40 881 руб. 28 коп.

На момент подачи иска задолженность по оплате генподрядного процента у ответчика составила  85 874 руб. 14 коп.

По договорам субподряда истцом ответчику был передан давальческий материал и оборудование, что подтверждается накладными по форме М-15 (т. 2, л. д. 50-180, т. 3, л. д. 1-105):

-  по договору субподряда № 114/16-КС(3) от 29.07.2016 г. накладными № 54 от 18.01.2017, № 353/1 от 03.03.2017, № 1094 от 12.04.2017, № 55 от 12.04.2017, № 845 от 02.05.2017, № 964 от 03.05.2017, № 2459 от 15.06.2017, № 1700 от 11.08.2017, № 1717 от 11.07.2017, № 3351 от 31.07.2017, № 1845 от 07.07.2017, № 1927 от 10.08.2017, № 1947 от 17.08.2017, № 1989 от 16.08.2017, № 3907 от 29.08.2017, № 1010 от 22.05.2017, № 4058 от 06.09.2017, № 3884 от 27.09.2017, № 4702/1 от 05.10.2017, № 4718/1 от 09.10.2017, № 4713/1 от 09.10.2017, № 3984 от 04.10.2017, № 4967/1 от 20.10.2017, № 4277 от 25.10.2017, № 4255 от 15.09.2017, № 4983 от 06.10.2017, № 5719 от 30.11.2017, № 5738 от 07.12.2017, № 5739 от 07.12.2017, № 5924/1 от 07.12.2017, № 5950/1 от 12.12.2017, № 6094 от 02.11.2017, № 6238 от 27.12.2017, № 6244 от 27.12.2017, № 6253 от 11.12.2017, № 6257 от 04.12.2017 г., 04.12.2017,№ 6258 от 04.12.2017, № 179/1 от 18.01.2018, № 1489/1 от 14.03.2018, № 1484/1 от 15.03.2017 г., 15.03.2017,№ 33 от 07.02.2018, № 1483/1 от 04.04.2018, № 6210 от 11.12.2017, № 5591 от 01.10.2017, № 6135 от 01.11.2017, № 6144 от 01.11.2017.

- по договору субподряда № 29/16-КС(3) от 22.03.2016 г. накладными № 1680/1 от 20.03.2018, № 274 от 28.01.2018, № 275 от 28.01.2018, № 276 от 28.01.2018, № 6020/1 от 13.12.2017, № 1125 от 06.06.2017, № 3404 от 10.08.2017, № 3406 от 10.08.2017, № 3412 от 10.08.2017, № 3413 от 10.08.2017, № 3414 от 10.08.2017, № 3415 от 10.08.2017, № 1584 от 03.07.2017, № 707 от 16.03.2017, № 6320 от 28.12.2017, № 4217 от 06.12.2016, № 335/1 от 09.02.2017, № 336 от 09.02.2017, № 339 от 09.02.2017, № 340/1 от 09.02.2017, № 341 от 09.02.2017, № 338/1 от 09.02.2017, № 337 от 09.02.2017, № 705 от 17.03.2017.

- по договору субподряда № 71/16-КС(3) от 22.04.2016 г.  накладными № 394 от 17.03.2017, № 400 от 18.03.2017, № 429 от 22.03.2017, № 665 от 22.03.2017, № 666 от 22.03.2017, № 331 от 15.03.2017, № 339 от 13.03.2017, № 4226 от 07.12.2016, № 386 от 15.03.2017, № 982 от 18.04.2017, № 1657 от 20.07.2017, № 1659 от 20.07.2017, № 897 от 13.04.2017, № 900 от 18.04.2017, № 903 от 18.04.2017, № 904 от 24.04.2017, № 909 от 18.04.2017, № 910 от 18.04.2017, № 947 от 12.05.2017, № 1835 от 07.08.2017, №2166 от 04.09.2017, № 2233 от 09.06.2017, № 2240 от 06.09.2017, № 2293 от 08.09.2017, № 4079 от 13.09.2017, № 6219/1 от 22.12.2017, № 2462 от 07.09.2017, № 5103/1 от 30.10.2017, № 6406 от 30.11.2017, №5811 от 30.10.2017, №5812 от 31.10.2017, №212 от 20.04.2018, №132 от 30.03.2018, № 6145 от 01.11.2017, № 6147 от 01.11.2017, № 6137 от 01.11.2017, №6138 от 01.11.2017, №6139 от 01.11.2017, №6140 от 01.11.2017, № 6141 от 23.11.2017, № 6133 от 01.11.2017, № 6134 от 01.11.2017, № 6480 от 01.11.2017, № 1925/1 от 04.04.2018, № 6489 от 01.11.2017 г., 01.11.2017,№ 6490 от 01.11.2017, № 398/1 от 07.02.2018, № 6148 от 02.11.2017.

В силу п. 5.2.2 договоров субподряда № 71/16-КС(3), № 29/16-КС(3), № 114/16-КС(3) ответчик обязан представлять истцу отчет об использованных материалах.

Ответчиком данное обязательство не исполнено, отчеты не предоставлены, неиспользованные материалы не возвращены, их стоимость не оплачена.

На момент подачи иска у ответчика образовалась задолженность по оплате стоимости неиспользованных и невозвращенных материалов и оборудования в размере 453 287 482 руб. 45 коп.

В соответствии с положениями ст. 713 ГК РФ подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика неиспользованного материала.

Согласно ст. 714 ГК РФ подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных заказчиком материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда.

Сторонами была произведена сверка взаимных расчетов, представлен акт сверки за период с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. (т. 6, л. д. 52-54), подписанный сторонами.

Истцом также представлена ведомость по партиям переданных товаров (т. 6, л. д. 47-57), согласно которому задолженность по оплате стоимости неиспользованных и невозвращенных материалов и оборудования составила 3 055 617 руб. 65 коп.

На основании указанных документов истец уточнил исковые требования, просил взыскать  с ответчика задолженность в размере 8 528 176 руб. 74 коп., стоимость неиспользованных и невозвращенных материалов и оборудования в размере 3 055 617 руб. 65 коп.

Согласно ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

При оценке представленных в деле доказательств, суд руководствуется также положениями ч. 3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований и возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. 

Согласно ч.ч. 1, 2 ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. 

Стороны, согласно ст.ст. 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пользуются равными процессуальными правами на предоставление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе в части непредставления доказательств в обоснование своей правовой позиции.

Сумма задолженности по уточненным исковым требованиям по договору субподряда № 114/16-КС(З) от 29.07.2016 г. и договору поставки № 29-УМТО/С-16 от 25.04.2016 г. и  уточненная сумма задолженности по оплате стоимости неиспользованных и невозвращенных материалов и оборудования по договорам субподряда № 114/16-КС(3), № 29/16-КС(3) , № 71/16-КС(3)  ответчиком не оспорена, конррасчет не представлен.

Ответчиком доказательств оплаты заявленных истцом требований не представлено.

Принимая во внимание требования приведенных норм материального и процессуального права, учитывая конкретные обстоятельства по делу, суд пришел к выводу, что требования истца о взыскании задолженности и стоимости материалов подлежат удовлетворению.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на ответчика в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые  требования  Общества с ограниченной ответственностью  «Завод строительных материалов и конструкций»  удовлетворить.

         Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  «Специализированное строительное монтажное управление»  в пользу Общества с ограниченной ответственностью  «Завод строительных материалов и конструкций»  задолженность в размере 8 528 176 руб.74 коп., стоимость материалов 3 055 617 руб.65 коп., судебные расходы по государственной пошлине 80 920 руб.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя. 

Возвратить истцу излишне уплаченную государственную пошлину в размере 1 159 руб. 03 коп. по платежному поручению №19911 от 24 марта 2019 года.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья И.Р. Юсеева