АРБИТРАЖНЫЙ СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

МОТИВИРОВАННОЕ 

РЕШЕНИЕ

Дело № А43-38618/2025

город Нижний Новгород 	 13 февраля 2026 года

Дата принятия решения в виде резолютивной части 04 февраля 2026 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе судьи Годухина Артема Евгеньевича (шифр 59-739у), рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску акционерного общества "Тандер" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>), город Краснодар,

к ответчику: публичному акционерному обществу "Россети Центр и Приволжье" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>), город Нижний Новгород,

о взыскании 95 873 рублей 86 копеек неустойки,

без вызова сторон,

установил:

Акционерное общество "Тандер" обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением о взыскании с публичного акционерного общества "Россети Центр и Приволжье" 95 873 рублей 86 копеек неустойки за нарушение срока технологического присоединения к электрическим сетям здания, расположенного по адресу: 

<

...>, в рамках договора № 371033504.

Определением суда от 08.12.2025 исковое заявление принято к производству и назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Сторонам предоставлено время для направления доказательств и отзыва на исковое заявление в соответствии с частью 2 статьи 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Стороны надлежащим образом уведомлены о рассмотрении спора в упрощенном порядке, о чем свидетельствуют почтовые уведомления о вручении.

Ответчиком представлен отзыв, в котором поясняется, что монтаж не был выполнен в срок по причине сложности выполнения монтажа приборов учёта, ввиду ограничения площадей для установки приборов учёта, а также необходимостью выполнения данных работ с отключением трансформаторной подстанции, от которой присоединено много объектов коммерции, в том числе магазин "Магнит". Уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям от 13.10.2025 № 371033504 было выложено в личный кабинет Заявителя 13.10.2025. Таким образом, по расчёту ответчика просрочка выполнения работ составила 306 дней: с 11.12.2024 по 12.10.2025; размер неустойки составит 95 561 рубль 57 копеек (124 917 рублей 08 копеек x 306 дней x 0,25% = 95 561 рубль 57 копеек).

Все поступившие документы опубликованы на сайте Арбитражного суда Нижегородской области в информационно – телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Картотека арбитражных дел" и приобщены к материалам дела.

На основании статей 226, 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в порядке упрощенного производства без вызова сторон по имеющимся в деле доказательствам.

04.02.2026 принято решение в виде резолютивной части согласно части 1 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Исковые требования удовлетворены полностью.

09 февраля 2026 года ответчик обратился в суд с заявлением о составлении мотивированного судебного акта.

В соответствии с частью 2 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом изготовлено мотивированное решение.

Как следует из материалов дела, 16 мая 2024 года в связи с увеличением объёма максимальной мощности электроснабжения, АО "Тандер" обратилось к ПАО "Россети Центр и Приволжье" через личный кабинет заявителя с заявкой на технологическое присоединение к электрическим сетям здания, расположенного по адресу: 

<

...>. Заявляемая категория надёжности энергопринимающих устройств: III, максимальная мощность энергопринимающих устройств (присоединяемых и ранее присоединённых) составляет 80 кВт при напряжении 0,4 кВ.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" был выставлен счёт № 37103504 от 31.05.2024 на оплату технологического присоединения на сумму 124 917 рублей 08 копеек и условия договора № 37103504 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Как следует из пункта 12 договора, датой исполнения обязательства истца по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчётный счёт сетевой организации.

Платёжным поручением № 231522 от 10.06.2024 АО "Тандер" перечислил ПАО "Россети Центр и Приволжье" плату по договору в полном объёме.

В соответствии с пунктом 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев с момента заключения договора. При этом договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счёта на оплату техприсоединения (пункт 21 договора). Таким образом, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединения истёк 10.12.2024.

Пунктом 17 договора определена неустойка за нарушение сроков исполнения обязательств по договору в размере 0,25% от общего размера платы за каждый день просрочки, но не более, чем за 1 год просрочки, за исключением случаев нарушения выполнения технических условий Заявителем.

Как указывает АО "Тандер", уведомление об обеспечении сетевой организации возможности присоединения к электрическим сетям составлено ПАО "Россети Центр и Приволжье" 13.10.2025 и 14.10.2025 размещено в личном кабинете АО "Тандер".

По расчёту АО "Тандер" размер неустойки составил 95 873 рубля 86 копеек за 307 дней просрочки исполнения обязательств.

АО "Тандер" обращался к ПАО "Россети Центр и Приволжье" с претензионным письмом № 2171 от 24.11.2025, однако ответа на него не получил.

Указанные обстоятельства явились основанием для обращения акционерного общества "Тандер" в Арбитражный суд Нижегородской области с настоящим иском.

Исследовав материалы дела, суд находит предъявленные требования подлежащими удовлетворению в силу следующего.

В соответствии с частью 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Закон об электроэнергетике) технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти (абзац 3 части 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике).

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, регламентирован Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила № 861, Правила технологического присоединения).

Действие Правил № 861 распространяется на случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие Схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств (пункт 2 Правил технологического присоединения).

Истец относится к заявителю, определенному в п. 12(1) Правил № 861, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ.

Наличие заключенного заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2)- 13(5) и 14 Правил № 861, договора подтверждается документом об оплате такими заявителями счета, предусмотренного пунктом 103 Правил № 861 (пункт 104 Правил № 861).

Согласно пункта 103 Правил № 861 Договор между сетевой организацией и заявителем, указанным в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, заключается с использованием личного кабинета заявителя.

Действие договора между сетевой организацией и заявителем, указанным в пунктах 12(1), 13(2) -13(5) и 14 настоящих Правил, не ставится в зависимость от факта составления договора, подписанного сторонами в письменной форме.

Наличие договора между сетевой организацией и заявителем, указанным в пункте 12( 1) настоящих Правил, подтверждается документом об оплате (полностью или в установленных настоящими Правилами случаях частично) заявителем сетевой организации выставленного ею и размещенного в личном кабинете заявителя счета на оплату технологического присоединения по договору, предусмотренному пунктом 105 настоящих Правил. Документ об оплате должен содержать наименование и платежные реквизиты сетевой организации, а также реквизиты счета на оплату технологического присоединения.

Абзацем шестым пункта 105 Правил № 861 разъяснено, что размещенные в личном кабинете заявителя условия типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и технические условия признаются офертой, а оплата заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору - акцептом договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и технических условий. В случае несогласия с размещенными сетевой организацией в личном кабинете заявителя документами, предусмотренными абзацами вторым - четвертым настоящего пункта, и (или) несоответствия их

Правилам № 861 заявитель вправе в течение 5 рабочих дней со дня размещения сетевой организацией таких документов направить сетевой организации мотивированный отказ от заключения договора с предложением об изменении размещенных документов и требованием о приведении их в соответствие с названными Правилами.

В отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, сетевая организация в течение одного рабочего дня после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями составляет уведомление об обеспечении возможности присоединения к электрическим сетям по форме, предусмотренной приложением № 1(1) к настоящим Правилам, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, и размещает его на своем официальном сайте (в том числе посредством переадресации на официальный сайт, обеспечивающий возможность направлять заявку и прилагаемые документы) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или едином портале (абзац второй пункта 19 Правил № 861).

В соответствии с подпунктом "б" пункта 16 Правил № 861 срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора, не может превышать 6 месяцев.

Однако обязательства по технологическому подключению в срок Ответчиком не исполнены, предусмотренные п.110 Правил № 861 документы в "личном кабинете" заявителя своевременно не размещены.

Установленные Правилами № 861 сроки для осуществления технологического присоединения являются пресекательными и обязательными для соблюдения сетевыми организациями, что направлено на обеспечение законных интересов заинтересованных лиц как более слабой стороны в рассматриваемых правоотношениях (определение Верховного Суда РФ от 12.02.2019 № 301-АД18-24932).

У сетевой организации не имеется правовых оснований для изменения императивных условий и сроков технологического присоединения, поскольку соответствующая сфера ответственности сетевой организации не относится к диспозитивной, напротив, установление законом гарантий и, в частности, сроков технологического присоединения, направлено на ограничение свободы усмотрения профессиональных субъектов в пользу слабой стороны (потребителя услуг).

Пунктом 17 договора определена неустойка за нарушение сроков исполнения обязательств по договору в размере 0,25% от общего размера платы за каждый день просрочки, но не более, чем за 1 год просрочки, за исключением случаев нарушения выполнения технических условий Заявителем.

В абз. 3 пп. "в" п. 16 Правил № 861 установлено положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе:

-обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в п. п. 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном абз. 3 пп. "в" п. 16 Правил порядке, за год просрочки.

Уведомление об обеспечении сетевой организации возможности присоединения к электрическим сетям составлено Ответчиком только 13.10.2025 и 14.10.2025 размещено в «личном кабинете» заявителя (Истца). Данный факт подтверждается скриншотом из личного кабинета АО "Тандер".

Таким образом, просрочка Ответчика по исполнению обязательства технологического присоединения составила 307 дней (период с 11.12.2024 по 13.10.2025), в связи с чем размер неустойки составляет 95 873 рубля 86 копеек (расчет неустойки: 124 917,08 * 307 х 0.25%).

В данном случае 13.10.2025 также включается в период просрочки. В связи с чем контррасчет пени со стороны ответчика не применяется судом.

На основании изложенного требование истца о взыскании с ответчика неустойки подлежит удовлетворению в заявленном размере.

Расходы по госпошлине в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180-182, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с публичного акционерного общества "Россети Центр и Приволжье" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>), город Нижний Новгород, в пользу акционерного общества "Тандер" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>), 

<

...> 873 рублей 86 копеек неустойки, а также 10 000 рублей государственной пошлины.

Исполнительный лист выдаётся по заявлению взыскателя.

В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение вступает в законную силу по истечении пятнадцатидневного срока, установленного для подачи апелляционной жалобы.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд (г. Владимир) в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, в соответствии со статьями 229 (часть 4), 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение арбитражного суда первой инстанции, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в соответствии со статьями 273, 275, 276, 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Жалобы (в том числе в электронном виде) подаются через Арбитражный суд Нижегородской области.

Судья А.Е. Годухин