АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024 http: //www.Orenburg.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А47-6584/2022

г. Оренбург

13 июня 2024 года

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи  Лебедянцевой А. А., при ведении протокола секретарем судебного заседания  Бурка Т.Ф., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по  исковому заявлению  

непубличного акционерного общества  «ОРЕНБУРГОБЛГРАЖДАНСТРОЙ», ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>, Оренбургская область, Саракташский р-н, п. Саракташ,  

к администрации муниципального образования Оренбургский район  Оренбургской области, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>,  Оренбургская область, г. Оренбург,  

третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно  предмета спора:  

1. Министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного  хозяйства и транспорта Оренбургской области, ИНН: 

<

***>, ОГРН:  

<

***>, 460015, г. Оренбург,  

2. Государственное бюджетное учреждение "Управление капитального  строительства Оренбургской области", ИНН: 

<

***>, ОГРН:  

<

***>, г. Оренбург,  

о взыскании 91 383 971 руб. 43 коп., по встречному исковому заявлению 

администрации муниципального образования Оренбургский район  Оренбургской области, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>,  Оренбургская область, г. Оренбург  

к непубличному акционерному обществу  «ОРЕНБУРГОБЛГРАЖДАНСТРОЙ», ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>, Оренбургская область, Саракташский р-н, п. Саракташ,  

о признании недействительными КС-2 на сумму 91 383 971 руб. 43 коп.,  обязании направить в адрес истца КС-2 и КС-3 на сумму 25 353 449 руб.  

10 коп., взыскании штрафа в размере 1 100 508 руб. 70 коп., об обязании  устранить некачественно выполненные работы,  

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 176 АПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

Первоначальные исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с администрации муниципального образования Оренбургский  район Оренбургской области в пользу непубличного акционерного общества  «ОРЕНБУРГОБЛГРАЖДАНСТРОЙ» 91 127 985 руб. 93 коп., а также расходы  по оплате государственной пошлины в размере 199 440 руб., расходы по оплате  судебной экспертизы в размере 1 075 руб. 20 коп.  

В удовлетворении оставшейся части первоначальных исковых требований  отказать.  

Встречные исковые требования администрации муниципального  образования Оренбургский район Оренбургской области удовлетворить  частично.  

Обязать непубличное акционерное общество  «ОРЕНБУРГОБЛГРАЖДАНСТРОЙ» устранить некачественно выполненные  работы, выполнить работы согласно проектной документации согласно  перечню, указанному в просительной части встречного искового заявления от  26.10.2022:  

1. Вертикальная планировка: 

1.2 Организация рельефа выполнить в соответствии с отметками плана  организации рельефа проекта 120.2020-ГП, лист 8. Завершить вертикальную  планировку, расстилку растительного грунта в соответствии с проектом;  

2. Озеленение: 

2.1. Работы по озеленению выполнить по завершенной планировке грунта;  

2.2. Не прижившийся посадочный материал обновить. 3. Дороги и покрытия: 

3.1 Резиновое покрытие игровых площадок выполнить по огрунтованному  и по очищенному от грязи бетонному основанию, согласно проектного  решения, лист № 10 120.2020 ГП.  

3.2 Покрытие пандусов для МГН очистить от строительного раствора. 

3.3 Уменьшить расстояние между земельным участком и первой (нижней)  ступенью входной группы входа в здание по оси «Ж».  

4. Отделочные работы: 4.1. На окрашенных стенах и потолках помещений устранить недостатки. 

4.2. Улучшенную окраску стен и потолков выполнить с соблюдением  требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».  Окраска стен и потолков выполнить по составу работ ГЭСН-2001-15  «Отделочные работы».  

Таблица с общестроительными дефектами 

 № помещения 

Название помещения 

Дефекты 

1 этаж 

47 

С/у МГН 

Затереть швы в напольной и настенной  плитке.  

48 

С/у медкабинета 

Затереть швы в напольной и настенной  плитке.  

58-75 

Пищеблок 

Переложить плитку, уложенную не под  наклоном из-за которой нарушен слив воды в  желоба.  

Заменить потолочные плиты на потолке  имеющие дефекты в виде выбоин. Сделать  над холодильными камера потолок  "Армстронг".  

Зашкурить стены и заделать вертикальные  трещины.  

Затереть швы между настенной и напольной  плиткой.  

Заменить потолочные плиты имеющие  залитые участки.  

Выровнять потолок "Армстронг". 

2 этаж 

10 

Буфетная 

Затереть швы в напольной и настенной плитке.  На стенах участками переложить плитку на  

участках, где имеется не состыковка швов.  

22 

Туалетная 

Затереть швы в напольной и настенной плитке.  Переложить плитку на участках, где имеется не  состыковка швов.  

25 

С/у 

Затереть швы в напольной и настенной плитке.  Переложить плитку на участках, где имеется не  состыковка швов.  

26 

Кладовая уборочного  инвентаря  

Затереть швы в напольной и настенной плитке.  Переложить плитку на участках, где имеется не  состыковка швов.  

27 

С/у. Душ 

Затереть швы в напольной и настенной плитке.  Переложить плитку на участках, где имеется не  состыковка швов.  

46 

С/у 

Затереть швы между плиткой. Переложить  плитку на участках, где имеется не состыковка  

швов. 

47 

Тамбур С/у 

Затереть швы между плиткой. Заменить на  потолке повреждённые или неровно обрезанные  

потолочные плитки. 

48 

Комната гигиены 

Затереть швы между плиткой. Переложить  плитку на участках где имеется не состыковка  

швов. 

51 

Душ 

Затереть швы между плиткой. Переложить  плитку на участках где имеется не состыковка  

швов. 

12 

Зал музыкальных занятий 

По оси 5 заделать на стене вертикальные 

трещины и исправить отделку на участках замачивания стен. 

Взыскать с непубличного акционерного общества  

«ОРЕНБУРГОБЛГРАЖДАНСТРОЙ» в пользу администрации муниципального  образования Оренбургский район Оренбургской области судебные расходы по  проведению судебной экспертизы в размере 96 000 руб.  

Взыскать с непубличного акционерного общества  «ОРЕНБУРГОБЛГРАЖДАНСТРОЙ» в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 6 000 руб.  

В удовлетворении оставшейся части встречных исковых требований  отказать.  

Исполнительный лист выдать взыскателю в порядке ст.ст. 319, 320 АПК  РФ.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства  в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его  принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд  Оренбургской области.  

Судья А.А. Лебедянцева