АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ резолютивная часть 

г. Воронеж Дело № А14-11273/2019 «14» сентября 2020 г. 

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Семенова Г.В.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи  Анисичкиной С.В.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с  ограниченной ответственностью Управляющая компания «МИР», г. Воронеж  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской  области, г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

третье лицо-1: ООО «ЭГП» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

третье лицо-2: МКУ ГО г. Воронеж «Городская дирекция единого заказчика  жилищно-коммунального хозяйства» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>),  

об обязании устранить недостатки 

Руководствуясь статьями 65, 102, 110, 167-170, 174, 176, 180, 181 АПК  РФ, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Обязать Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  Воронежской области, г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  с момента вступления решения суда в законную силу до окончания 2021 года  устранить недостатки в работах по капитальному ремонту кровли дома № 92  по ул. Карла Маркса в г. Воронеже и привести их в соответствии с  требованиями строительных норм и правил, а именно:  

- заменить изношенные стропильные ноги из брусьев (локальный  сметный расчет № 1 от 20 августа 2015 г. раздел 1 п. 10), заменить отдельные  части мауэрлатов с осмолкой и оборачиванием толью (локальный сметный  расчет № 1 от 20 августа 2015 г. п. 12);  

- выполнить высоту подъема кровли на примыканиях высотой не  менее 250 мм, выполнить соединение листов на примыканиях двойным  фальцем с использованием кляммеров;  

- увеличить свес кровли со стороны внутреннего фасада здания до  значений, позволяющих соответствовать свесу кровли его функциональному  назначению;  

- соединение листов по кровле выполнить двойным фальцем с  использованием кляммеров (стоячий фальц – вдоль ската кровли, лежачий –  поперек);  

- выполнить соединение водоизоляционного ковра с воронкой в  порядке пункта 9.8 СП 17.13330.2011;  

- установить снегозадерживающие устройства; 

- установить теплоизоляцию и обогрев на приемные патрубки и  водостоки;  

- установить систему кабельного противообледенения. 

Взыскать с Фонда капитального ремонта многоквартирных домов  Воронежской области, г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  в пользу общества с ограниченной ответственностью Управляющая  компания «МИР», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  6 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины и 112 739 руб.  расходов на оплату судебной экспертизы.  

На основании пункта 3 статьи 174 Арбитражного процессуального  кодекса РФ общество с ограниченной ответственностью Управляющая  компания «МИР», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  вправе осуществить соответствующие действия за счет Фонда капитального  ремонта многоквартирных домов Воронежской области, г. Воронеж  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) со взысканием с него необходимых  расходов в случае, если Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  Воронежской области, г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  не исполнит решение в течение установленного срока.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия  в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд и в течение двух месяцев  со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Центрального округа  путем подачи жалобы через арбитражный суд, принявший решение.  

Судья Г.В. Семенов