АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г.Краснодар                                                                                          Дело № А32-4147/2022

Резолютивная часть решения вынесена     14.06.2022

Полный текст судебного акта изготовлен    05.07.2022

 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи С.А. Баганиной, при ведении протокола   судебного заседания помощником судьи О.В. Мысак, рассмотрев в судебном заседании дело по иску ООО «Оникс» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, 353902, 

<

...>) к МКУ «УЖКХ города» МО г. Новороссийска (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, 353900, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, НОВОРОССИЙСК ГОРОД, РУБИНА УЛИЦА, ДОМ 25) о взыскании 66 321,53 рублей неустойки, а также 2 653 рублей расходов по уплате госпошлины, при участии представителя ответчика ФИО1 по доверенности, 

УСТАНОВИЛ:

ООО «Оникс» обратился в суд с иском к МКУ «УЖКХ города» МО г. Новороссийска  о взыскании 66 321,53 рублей неустойки, а также 2 653 рублей расходов по уплате госпошлины.

В настоящем заседании представитель истца не явился, направил ходатайство об уточнении требований и просит взыскать 61 692,06 руб. пени за период с  31.07.2021 по 07.12.2021. От  ответчика поступил отзыв на исковое заявление, в котором он заявил об отсутствии долга, который уплачен платежным поручением от 07.12.2021, об отсутствии просрочки, поскольку   акт подписан 03.12.2021,  срок оплаты составляет 15 рабочих дней с даты акта. 

Дело рассматривается по правилам ст.156 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, между ООО «Оникс» и МКУ «УЖКХ города» МО г. Новороссийска заключен муниципальный контракту № 180/06-21 от 15.06.2021 г., на выполнение работ «Устройство модульного туалета в районе набережной Адмирала ФИО2 47-49» (далее – контракт) на сумму 1 870 644 ,72 руб.  

В соответствии с п. 3.1 срок выполнения работ осуществляется в срок: с даты заключения контракта в течение 45 календарных дней (до 30.07.2021). 

Пунктом 3.5. муниципального контракта № 180/06-21 от 15.06.2021, предусмотрено, что оплата выполненных работ производится не позднее 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ.

15.07.2021 ООО «Оникс» и МКУ «УЖКХ города» МО г. Новороссийска были подписаны акт о приемке выполненных работ форма КС-2, справка о стоимости выполненных работ форма КС-3, акт приемки законченного строительством объекта форма № КС-11 и акт приемки законченного строительством объекта приёмочной комиссии Форма № КС-14.

Следовательно, пятнадцатидневный срок оплаты выполненных работ истек 30.07.2021 . МКУ «УЖКХ города» МО г. Новороссийска произвело оплату только 07.12.2021 г.

Предъявленные в претензии требования удовлетворены не были. Уклонение ответчика от исполнения требования явилось основанием для обращения с иском  в суд.

Возражая против удовлетворения  требований, ответчик в отзыве пояснил, что  действительно между МКУ «УЖКХ города» и ООО «ОНИКС» заключен муниципальный контракт № 180/06-21 от 15 июня 2021 года. Со стороны подрядной организации ООО «ОНИКС» исполнительная документация в связи с неоднократным внесением изменений, поступала в адрес заказчика несколько раз, а именно 19 июля 2021 года №22-02-03/1179 (Приложение №1), 13 октября 2021 года №22-02-03/1752 (Приложение №2),  8 ноября 2021 года №22-02-04/1878 (Приложение №3). После внесения всех корректировок и изменений ООО «ОНИКС» исполнительная документация проходила проверку в МКУ «УЖКХ города», а также специалистами МБУ «УТНиЦ».

Акты подписаны заказчиком 3 декабря 2021 года, что подтверждается листом 19 (КС-2 №1), а оплачены 7 декабря 2021 года, что подтверждается платежным поручением №1155. В соответствии с п. 3.5   контракта, срок  оплаты выполненных работ производится не позднее 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ – не нарушен.. Работы по муниципальному контракту № 180/06-21 от 15 июня 2021 года «Устройство модульного туалета в районе набережной Адмирала ФИО2 47-49» выполнены в полном объеме, установленном муниципальным контрактом, а также в полном объеме оплачены со стороны Заказчика. 

Учитывая вышеизложенное, претензионные требования не удовлетворены и не подлежат оплате, так как со стороны заказчика отсутствует просрочка исполнения обязательств. Просит исковые требования ООО «ОНИКС» оставить без удовлетворения в полном объеме.

Исследовав  и оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам ст.71 АПК РФ, суд признал требования подлежащими удовлетворению на основании следующего. 

Правоотношения сторон  по контракту регулируются положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Статья 309, 310  ГК РФ предусматривает, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 763 ГК РФ подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд. По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Истцом заявлено требование о взыскании   61 692,06 руб. пени за период с  31.07.2021 по 07.12.2021.

В соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

В соответствии с ч. 6 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (:подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня; начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня Истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой Действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы. 

Судом установлено, что письмом от 15.07.2021 истец вручил заказчику исполнительную документацию и результат работ. 19.07.2021 заказчик получил результат работ. Данное обстоятельство ответчик не оспаривает, так как представил в дело копию такого письма с отметкой о получении. Последующие сопроводительными письмами подрядчик повторно передавал экземпляры документации с требованиями  об оплате.

В экземпляре  истца дата от имени заказчика «03.12.2021» отсутствует. Акт, датированный 15.07.2021, подписан заказчиком с проставлением печати учреждения без измнения даты. Как и в экземпляре ответчика, в экземпляре истца имеется надпись «Объемы выполненных работ подтверждаю. Гл.спец.МБУ УТНиЦ».  Следует вывод, что акт от 15.07.2021 подписан заказчиком без замечаний, дата приемки работ -15.07.2021.

В п.8.3 проведение приемочных мероприятий осуществляется в сроки, предусмотренные п.8.2. В силу п.8.2 заказчик подписывает акт в течение  5 рабочих дней с даты предоставления подрядчиком  документов.

В силу ст.191 ГК РФ течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.

С учетом примененных норм следует вывод,  что получив акт 19.07.2021 в срок по 26.07.2021, заказчик должен был провести приемочные мероприятия. Поскольку подрядчик не предоставил доказательств вручения акта ранее 19.07.2021 следует вывод, что акт считать подписанным 26.07.2021.

По условиям п.3.5 оплата выполненных работ производится не позднее 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке работ.

С учетом ст.191 ГК РФ  срок оплаты истек 16.08.0221. С 17.08.2021 по 07.12.2021 допущена просрочка.  Сумма пени 2 057 545 х 113дн х 7,5%/300 =58125,65 руб.   В остальной части требования отказать.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны пропорционально удовлетворенным требованиям. 

Истцом уплачено 2 653 рублей расходов по уплате госпошлины 

пропорционально удовлетворенным требованиям возмещению подлежит 2 468 рублей расходов по уплате госпошлины. 

 

Руководствуясь  статьями 49 65, 70,   106, 110, 156, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с МКУ «УЖКХ города» МО г. Новороссийска (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, 353900, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, НОВОРОССИЙСК ГОРОД, РУБИНА УЛИЦА, ДОМ 25) в пользу  ООО «Оникс»  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, 353902, 

<

...>)   58125,65   руб пени за период с  17.08.2021 по 07.12.2021, а также 2 468 рублей расходов по уплате госпошлины.

В остальной части иска отказать

Выдать истцу справку на возврат из федерального бюджета 185 руб госпошлины, уплаченной платежным поручением №17 от 24.01.2022.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, а также в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу через суд,  вынесший решение.

 

Судья      С.А. Баганина