ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-45386/2019

Дело № А40-42981/19

г. Москва

16 сентября 2019 года

Резолютивная часть постановления объявлена 11 сентября 2019 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 16 сентября 2019 года 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

Председательствующего судьи: Титовой И.А.,

Судей: Гончарова В.Я., Бодровой Е.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО "ТСМ" на решение Арбитражного суда г.Москвы от 02.07.2019 по делу №А40-42981/19, по иску ООО "ФИЛЛЭКСПРЕСС" (ОГРН 

<

***>) к ответчику ООО "ТСМ" (ОГРН 

<

***>) о взыскании 777 351,75 руб.

при участии в судебном заседании: 

от истца: ФИО2 по доверенности от 10.09.2019,  ФИО3 (гендиректор)

от ответчика: ФИО4 по доверенности от 29.08.2018

У С Т А Н О В И Л:

ООО «Филлэкспресс» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО «ТСМ» о взыскании суммы основного долга в размере 766 500 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ за период с 07.12.2018 г. по 11.02.2019 г. включительно в размере 10 851,75 руб.; просит дальнейшее взыскание процентов производить путем начисления на сумму долга, начиная с 12.02.2019 г. по день ее фактической оплаты с применением ключевой ставки ЦБ РФ, действующей в соответствующие периоды.

Решением от 02.07.2019 с ООО "ТСМ" (ОГРН 

<

***>) в пользу ООО "ФИЛЛЭКСПРЕСС" (ОГРН 

<

***>) взыскано 766 500руб. – задолженности, 10 851,75руб. – процентов, дальнейшее взыскание процентов производить путем начисления на сумму долга начиная с 12.02.2019г. по день ее фактической оплаты с применением ключевой ставки ЦБ РФ, действующей в соответствующие периоды и 18 330руб. – государственной пошлины.

Не согласившись с принятым решением ООО "ТСМ", обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить по доводам, изложенным в ней.

Лица, участвующие в деле, в судебном заседании поддержали свои правовые позиции по спору. 

Рассмотрев дело в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив материалы дела, заслушав представителей сторон по делу, суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены или изменения решения арбитражного суда, принятого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Как усматривается из материалов дела и верно установлено судом первой инстанции, между ООО «Филлэкспресс» (субподрядчик) и ООО «ТСМ» (подрядчик) заключен договор от 13.08.2018 г. № 013/07, согласно п. 1.1 которого, субподрядчик обязуется по заданию подрядчика выполнить покраску фасада на объекте, расположенном по адресу: 

<

...>, а подрядчик обязуется принять Работу в порядке и на условиях, определенных настоящим договором и уплатить обусловленную договором цену.

В соответствии с п. 3.2 договора, общая стоимость договорных работ составляет 1 533 000 руб.

Согласно п. 3.3.3. договора окончательный расчет в размере 766 500 руб. производится подрядчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания двумя сторонами акта сдачи-приемки работ (КС-2, КС-3) и получения от субподрядчика соответствующего счета, счета-фактуры.

В соответствии с п. 5.2 договора, подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней принять договорные работы (подписать акт о приемке выполненных работ) или предоставить письменный мотивированный отказ от приемки результата договорных работ с указанием недостатков, возникших по вине субподрядчика.

Так, в адрес ответчика были направлены: акт о приемки выполненных работ КС-2 № 1 от 14.11.2018 г., справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 от 14.11.2018 г., счет № 10 от 04.12.2018 г., счет-фактура № 6 от 04.12.2018 г.

Согласно п. 5.2 договора, срок принятия подрядчиком выполненных субподрядчиком работ либо предоставления письменного мотивированного отказа от приемки результата договорных работ - 5 (пять) рабочих дней.

Документы вручены ответчику нарочно 22.11.2018 г., срок письменного мотивированного отказа 29.11.2018 г.

Ответчик указал, что письмом исх. № 25.1 от 25.11.2018 г. отказал в подписании представленных документов.Данное письмо вручено нарочно истцу 04.12.2018 г., что подтверждается надписью истца на самом письме, соответственно указанная дата не свидетельствует о своевременности направления отказа от подписания документов.

Суд апелляционной инстанции считает, что данное письмо не является мотивированным отказом приемке выполненных работ, фактически не перечислены недостатки и виновные действия истца. Определить стоимость некачественно выполненных работ не представляется возможным. Экспертизы по объему, качеству и стоимости не заявлялось.

Таким образом, письменного, мотивированного, обоснованного отказа от приемки выполненных работ ответчиком выражено не было, ввиду чего документы были подписаны в одностороннем порядке истцом, а работы считаются выполненными надлежащим образом и принятыми ответчиком.

В силу пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона обязуется выполнить по заданию другой стороны определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Досудебный порядок разрешения спора сторонами соблюден.

В соответствии в п. 4 ст. 753 ГК РФ при отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, когда мотивы отказа от подписания признаны им обоснованными.

Односторонний акт приемки результата работ является доказательством исполнения подрядчиком обязательства по договору и при отказе заказчика от оплаты на суд возлагается обязанность рассмотреть доводы заказчика, обосновывающие его отказ от подписания акта приемки результата работ (п. 14 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 г. № 51).

В соответствии с правовой позицией, изложенной Верховным Судом Российской Федерацией в Определении от 18.12.2015 г. № 614-ПЭК15 по делу № А40-46471/2014, Определении от 30.07.2015 г. № 305-ЭС15-3990 по делу № А40-46471/2014, акты выполненных работ, хотя и являются наиболее распространенными в гражданском обороте документами, фиксирующими выполнение подрядчиком работ, в то же время не являются единственным средством доказывания соответствующих обстоятельств.

Выполнение работ истцом подтверждается материалами дела, надлежащими и допустимыми доказательствами, представленными истцом.

С учетом изложенного, с ответчика подлежит взысканию в пользу истца сумма основного долга в размере 766 500 руб.

Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Доводы ответчика, изложенные в отзыве на исковое заявления, являются несостоятельными, поскольку не соответствуют нормам права, подлежащим применению при рассмотрении настоящего спора и фактическим обстоятельствам, имеющим значение для дела.

Требование истца о взыскании долга в сумме 766 500 руб. - законное, обоснованное, соответствует условиям договора, заключенного сторонами, подтверждено имеющимися в деле документами, представленными истцом, не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению.

Пунктом 1 статьи 395 ГК РФ предусмотрена ответственность за неисполнение денежного обязательства, в соответствии с которой, за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Требование истца о взыскании процентов за период с 07.12.2018 г. по 11.02.2019 г. включительно в размере 10 851,75 руб. – законное, обоснованное, соответствует условиям договора, заключенного сторонами, подтверждено имеющимися в деле документами, представленными истцом, не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению в соответствии с представленным истцом расчетом.

Требование истца о дальнейшем взыскании процентов производить путем начисления на сумму долга, начиная с 12.02.2019 г. по день ее фактической оплаты с применением ключевой ставки ЦБ РФ, действующей в соответствующие периоды, также подлежит удовлетворению, поскольку в соответствии с п. 3 ст. 395 ГК РФ, проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок, в соответствии с п. 48 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.

С учетом изложенного, суд первой инстанции сделал верный вывод, что заявленные требования подлежат полному удовлетворению.

Довод апелляционной жалобы, о необоснованном отказе в привлечении третьего лица, также не может быть принят апелляционным судом в связи со следующим.

В силу положений пункта 1 статьи 51 АПК РФ третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон.

Из содержания приведенных норм права следует, что третье лицо без самостоятельных требований - это предполагаемый участник материально-правового отношения, связанного по объекту и составу с тем, какое является предметом разбирательства в арбитражном суде. Основанием для вступления (привлечения) в дело третьего лица является возможность предъявления иска к третьему лицу или возникновения права на иск у третьего лица, обусловленная взаимосвязанностью основного спорного правоотношения между стороной и третьим лицом, а также то обстоятельство, что принятый по делу судебный акт может повлиять на права и обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, по отношению к одной из сторон.

Целью участия третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования, является предотвращение неблагоприятных для них последствий.

Однако как усматривается из материалов дела ответчиком не доказано, что решение по данному делу если этот судебный акт может повлиять на права или обязанности ООО «Ситрас» по отношению к одной из сторон.

Апелляционная коллегия также учитывает, что ответчиком ходатайство о проведении экспертизы не заявлялось.

Доводы апелляционной жалобы проверены апелляционным судом и отклонены, поскольку противоречат фактическим обстоятельствам дела, основаны на неправильном толковании норм действующего законодательства и не могут повлиять на законность и обоснованность принятого решения суда первой инстанции.

Судом первой инстанции дана надлежащая оценка всем имеющимся в деле доказательствам, оснований для отмены судебного акта не имеется.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием для отмены обжалуемого решения, судом первой инстанции не допущено.

руководствуясь ст. ст. 176, 266, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 02.07.2019 по делу № А40-42981/19 оставить без изменения, апелляционную жалобу  - без удовлетворения. 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа. 

Председательствующий судья:  И.А. Титова 

Судьи:  Е.В. Бодрова 

 В.Я. Гончаров 

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.