Арбитражный суд Московской области

107053, проспект Академика Сахарова, д. д.18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А41-39818/2020

г. Москва

19 октября 2020 года.

Резолютивная часть решения объявлена 14 октября 2020 года.

Мотивированное решение изготовлено 19 октября 2020 года.

Судья Арбитражного суда Московской области Машин П.И.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-39818/2020 по иску ООО "МАСТЕРСТРОЙ" (ОГРН 1177746208144) к ООО "ОКС" (ОГРН 1105009000689) о взыскании задолженности по договору подряда, 

при участии в судебном заседании:

согласно протоколу,

УСТАНОВИЛ:

ООО "МАСТЕРСТРОЙ" обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к ООО "ОКС" о взыскании 1 317 083 руб. 58 коп. задолженности по договорам подряда № МС-1С/2018 от 23.04.2018, № МС-2С/2018 от 23.04.2018, № МС-3С/2018 от 30.04.2018, № МС-4С/2018 от 23.05.2018, № МС-5С/2018 от 02.07.2018, № МС-6С/2018 от 02.07.2018.

При этом истец обосновывает исковые требования неисполнением ответчиком своих обязательств по оплате выполненных ООО "МАСТЕРСТРОЙ" работ по спорным договорам подряда.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы искового заявления в полном объёме, а представитель ответчика против удовлетворения заявленных требований в полном объеме возражал, полагая доводы истца в части взыскания с ООО "ОКС" 317 083 руб. 58 коп. необоснованными.

Рассмотрев материалы искового заявления ООО "МАСТЕРСТРОЙ", исследовав и оценив совокупность имеющихся в материалах дела доказательств, выслушав представителей сторон, суд полагает, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению в связи со следующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации арбитражный суд осуществляет защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав.

Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном названным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов.

В силу статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации основанием для оплаты выполненных работ является факт принятия результата работ, доказательством передачи результата работ является акт приема-передачи или иной приравненный к нему документ.

Как следует из материалов дела, 23.04.2018 между ООО «МастерСтрой» (подрядчик) и ООО «ОКС» (заказчик) заключен Договор подряда № МС-1С/2018 на выполнение комплекса работ по устройству кровли на объекте ДОУ на 360 мест при осуществлении Комплексной жилой застройки с объектами инфраструктуры по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковекое, д. Мисайлово и 

<

...> этап строительства, микрорайон 1, квартал 1 (далее – Договор № МС-1С/2018).

По условиям Договора № МС-1С/2018 (п.2.1 договора) заказчик (ответчик) поручает и оплачивает, подрядчик (истец) принимает на себя обязательства на выполнение комплекса работ по устройству кровли (далее - «Работы») на объекте ДОУ на 360 мест при осуществлении Комплексной жилой застройки с объектами инфраструктуры по адресу: Московская область. Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковекое. д. Мисайлово и 

<

...> этап строительства, микрорайон I, квартал 1 (далее - «Объект»).

Ответчик принял на себя обязательства по приемке выполненных работ в порядке, определенном Договором (п.9.3 договора), а также по оплате надлежаще выполненных истцом и принятых ответчиком работ, на условиях, в порядке и сроки Договором (п.4.1 договора).

Согласно п.4.1. Договора № МС-1С/2018, стоимость работ определена на основании расчета сметной стоимости строительно-монтажных работ и составляет 638 000, 00 (шестьсот тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек (Приложение № 2 к Договору).

Согласно п.9.3.1. Договора № МС-1С/2018, сдача-приемка выполненных работ производится в следующем порядке: подрядчик передает заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) по работам, выполненным в отчетном месяце, акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), накопительную ведомость, счет-фактуру и необходимую исполнительную документацию, в том числе журнал учета выполненных работ по форме № КС-6а в 3-х экземплярах, а также паспорта и сертификаты на материалы, акты на скрытые работы, выполненные в отчетном периоде и оформленные в соответствии с РД-11-02-2006.

Согласно п.9.3.2. Договора № МС-1С/2018, заказчик в течение 7 рабочих дней проверяет, уточняет и подписывает Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), Акт о приемке выпиленных работ (форма № КС-2). Заказчик имеет право не принимать на проверку указанные акт и справку до предоставления подрядчиком исполнительной документации, необходимой для их подписания.

Согласно п.5.1 Договора № МС-1С/2018, заказчик в срок не позднее 10 рабочих дней с даты подписания Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) производит оплату выполненных работ на основании выставленного счета с зачетом суммы аванса.

Также, 23.04.2018 между ООО «МастерСтрон» (подрядчик) и ООО «ОКС» (заказчик) заключен Договор подряда № МС-2С/2018 на выполнение комплекса отделочных работ ДОУ №1 при осуществлении: «Комплексной жилой застройки с объектами инфраструктуры» по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, д. Мисайлово и 

<

...> этап строительства (далее – Договор № МС-2С/2018).

По условиям Договора № МС-2С/2018 (п.2.1 договора) заказчик (ответчик) поручает и оплачивает, подрядчик (истец) принимает на себя обязательства на выполнение комплекса отделочных работ (далее-«Работы») ДОУ №1 на 360 мест при осуществлении Комплексной жилой застройки с объектами инфраструктуры по адресу: Московская область. Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, д. Мисайлово и 

<

...> этап строительства (далее - «Объект»).

Ответчик принял на себя обязательства по приемке выполненных работ в порядке, определенном Договором (п.9.3 договора), а также по оплате надлежаще выполненных истцом и принятых ответчиком работ, на условиях, в порядке и сроки Договором (п.4.1 договора).

Согласно п.4.1. Договора № МС-2С/2018, стоимость работ определена на основании расчета сметной стоимости строительно-монтажных работ и составляет 1 925 363, 00 (один миллион девятьсот двадцать пять тысяч триста шестьдесят три) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 18% (Приложение № 2 к Договору).

Согласно п.9.3.1. Договора № МС-2С/2018, сдача-приемка выполненных работ производится в следующем порядке: подрядчик передает заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) по работам, выполненным в отчетном месяце, акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), накопительную ведомость, счет-фактуру и необходимую исполнительную документацию, в том числе журнал учета выполненных работ по форме № КС-6а в 3-х экземплярах, а также паспорта и сертификаты на материалы, акты на скрытые работы, выполненные в отчетном периоде и оформленные в соответствии с РД-11-02-2006.

Согласно п.9.3.2. Договора № МС-2С/2018, заказчик в течение 7 рабочих дней проверяет, уточняет и подписывает Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), Акт о приемке выпиленных работ (форма № КС-2). Заказчик имеет право не принимать на проверку указанные акт и справку до предоставления подрядчиком исполнительной документации, необходимой для их подписания.

Согласно п.5.1 Договора № МС-2С/2018, заказчик в срок не позднее 10 рабочих дней с даты подписания Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) производит оплату выполненных работ на основании выставленного счета с зачетом суммы аванса.

30.04.2018 между ООО «МастерСтрой» (подрядчик) и ООО «ОКС» (заказчик) заключен Договор подряда № МС-3С/2018 на выполнение комплекса отделочных работ в Технических помещениях ДОУ на 360 мест при осуществлении Комплексной жилой застройки с объектами инфраструктуры по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, д. Мисайлово и 

<

...> этап строительства: микрорайон 1, квартал 1 (далее – Договор № МС-3С/2018).

По условиям Договора № МС-3С/2018 (п.2.1 договора) заказчик (ответчик) поручает и оплачивает, подрядчик (истец) принимает на себя обязательства на выполнение комплекса отделочных работ (далее - «Работы») в спец помещениях ДОУ на 360 мест при осуществлении Комплексной жилой застройки с объектами инфраструктуры по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоко-вское, д. Мисайлово и 

<

...> этап строительства: микрорайон 1, квартал 1 (далее - «Объект»).

Ответчик принял на себя обязательства по приемке выполненных работ в порядке, определенном Договором (п.9.3 договора), а также по оплате надлежаще выполненных истцом и принятых ответчиком работ, на условиях, в порядке и сроки Договором (п.4.1 договора).

Согласно п.4.1. Договора № МС-3С/2018, стоимость работ определена на основании расчета сметной стоимости строительно-монтажных работ и составляет 71 461, 50 (семьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят одни) рубль 50 копеек, в т.ч. НДС 18% (Приложение № 2 к Договору).

Согласно п.9.3.1. Договора № МС-3С/2018, сдача-приемка выполненных работ производится в следующем порядке: подрядчик передает заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) по работам, выполненным в отчетном месяце, акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), накопительную ведомость, счет-фактуру и необходимую исполнительную документацию, в том числе журнал учета выполненных работ по форме № КС-6а в 3-х экземплярах, а также паспорта и сертификаты на материалы, акты на скрытые работы, выполненные в отчетном периоде и оформленные в соответствии с РД-11-02-2006.

Согласно п.9.3.2. Договора № МС-3С/2018, заказчик в течение 7 рабочих дней проверяет, уточняет и подписывает Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), Акт о приемке выпиленных работ (форма № КС-2). Заказчик имеет право не принимать на проверку указанные акт и справку до предоставления подрядчиком исполнительной документации, необходимой для их подписания.

Согласно п.5.1 Договора № МС-3С/2018, заказчик в срок не позднее 10 рабочих дней с даты подписания Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) производит оплату выполненных работ на основании выставленного счета с зачетом суммы аванса.

23.05.2018 между ООО «МастерСтрой» (подрядчик) и ООО «ОКС» (заказчик) заключен Договор подряда № МС-4С/2018 на выполнение комплекса отделочных работ в местах общего пользования (МОП) в ДОУ на 360 мест (ДОУ №1) при выполнении «Комплексной жилой застройки с объектами инфраструктуры» по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, д. Мисайлово и 

<

...> этап строительства (далее – Договор № МС-4С/2018).

По условиям Договора № МС-4С/2018 (п.2.1 договора) заказчик (ответчик) поручает и оплачивает, подрядчик (истец) принимает на себя обязательства на выполнение комплекса отделочных работ (далее - «Работы») в местах общего пользования (МОП) в ДОУ на 360 мест (ДОУ № 1) при выполнении «Комплексной жилой застройки с объектами инфраструктуры» по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, д. Мисайлово и 

<

...> этап строительства (далее - «Объект»).

Ответчик принял на себя обязательства по приемке выполненных работ в порядке, определенном Договором (п.9.3 договора), а также по оплате надлежаще выполненных истцом и принятых ответчиком работ, на условиях, в порядке и сроки Договором (п.4.1 договора).

Согласно п.4.1. Договора № МС-4С/2018, стоимость работ определена на основании расчета сметной стоимости строительно-монтажных работ и составляет 536 162, 00 (пятьсот тридцать шесть тысяч сто шестьдесят два) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 81 787, 42 (восемьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят семь) рублей 42 копейки (Приложение № 2 к Договору).

Согласно п.9.3.1. Договора № МС-4С/2018, сдача-приемка выполненных работ производится в следующем порядке: подрядчик передает заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) по работам, выполненным в отчетном месяце, акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), накопительную ведомость, счет-фактуру и необходимую исполнительную документацию, в том числе журнал учета выполненных работ по форме № КС-6а в 3-х экземплярах, а также паспорта и сертификаты на материалы, акты на скрытые работы, выполненные в отчетном периоде и оформленные в соответствии с РД-11-02-2006.

Согласно п.9.3.2. Договора № МС-4С/2018, заказчик в течение 7 рабочих дней проверяет, уточняет и подписывает Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), Акт о приемке выпиленных работ (форма № КС-2). Заказчик имеет право не принимать на проверку указанные акт и справку до предоставления подрядчиком исполнительной документации, необходимой для их подписания.

Согласно п.5.1 Договора № МС-4С/2018, заказчик в срок не позднее 10 рабочих дней с даты подписания Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) производит оплату выполненных работ на основании выставленного счета с зачетом суммы аванса.

02.07.2018 между ООО «МастерСтрой» (подрядчик) и ООО «ОКС» (заказчик) заключен Договор подряда № МС-5С/2018 на выполнение комплекса отделочных работ в местах общего пользования (МОП) в ДОУ на 360 мест (ДОУ №1) при осуществлении «Комплексной жилой застройки с объектами инфраструктуры» по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, д. Мисайлово и 

<

...> этап строительства (далее – Договор № МС-5С/2018).

По условиям Договора № МС-5С/2018 (п.2.1 договора) заказчик (ответчик) поручает и оплачивает, подрядчик (истец) принимает на себя обязательства по выполнению комплекса отделочных работ (далее - «Работы») в местах общего пользования (МОП) в ДОУ на 360 мест (ДОУ № 1) при выполнении Комплексной жилой застройки с объектами инфраструктуры по адресу: Московская область. Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, д. Мисайлово и 

<

...> этап строительства (далее - «Объект»).

Ответчик принял на себя обязательства по приемке выполненных работ в порядке, определенном Договором (п.9.3 договора), а также по оплате надлежаще выполненных истцом и принятых ответчиком работ, на условиях, в порядке и сроки Договором (п.4.1 договора).

Согласно п.4.1. Договора № МС-5С/2018, стоимость работ определена на основании расчета сметной стоимости строительно-монтажных работ и составляет 494 450, 00 (четыреста девяносто четыре тысячи четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 75 424, 58 (семьдесят пять тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 58 копейки (Приложение № 2 к Договору).

Согласно п.9.3.1. Договора № МС-5С/2018, сдача-приемка выполненных работ производится в следующем порядке: подрядчик передает заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) по работам, выполненным в отчетном месяце, акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), накопительную ведомость, счет-фактуру и необходимую исполнительную документацию, в том числе журнал учета выполненных работ по форме № КС-6а в 3-х экземплярах, а также паспорта и сертификаты на материалы, акты на скрытые работы, выполненные в отчетном периоде и оформленные в соответствии с РД-11-02-2006.

Согласно п.9.3.2. Договора № МС-5С/2018, заказчик в течение 7 рабочих дней проверяет, уточняет и подписывает Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), Акт о приемке выпиленных работ (форма № КС-2). Заказчик имеет право не принимать на проверку указанные акт и справку до предоставления подрядчиком исполнительной документации, необходимой для их подписания.

Согласно п.5.1 Договора № МС-5С/2018, заказчик в срок не позднее 10 рабочих дней с даты подписания Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) производит оплату выполненных работ на основании выставленного счета с зачетом суммы аванса.

02.07.2018 между ООО «МастерСтрой» (подрядчик) и ООО «ОКС» (заказчик) был заключен Договор подряда № МС-6С/2018 на выполнение комплекса отделочных работ ДОУ № 1 на 360 мест при осуществлении «Комплексной жилой застройки с объектами инфраструктуры» по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, д. Мисайлово и 

<

...> этап строительства (далее – Договор № МС-6С/2018).

По условиям Договора № МС-6С/2018 (п.2.1 договора) заказчик (ответчик) поручает и оплачивает, подрядчик (истец) принимает на себя обязательства по выполнению комплекса отделочных работ (далее - «Работы») в ДОУ № 1 на 360 мест при осуществлении Комплексной жилой застройки с объектами инфраструктуры по адресу: Московская область. Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, д. Мисайлово и 

<

...> этап строительства (далее - «Объект»).

Ответчик принял на себя обязательства по приемке выполненных работ в порядке, определенном Договором (п.9.3 договора), а также по оплате надлежаще выполненных истцом и принятых ответчиком работ, на условиях, в порядке и сроки Договором (п.4.1 договора).

Согласно п.4.1. Договора № МС-6С/2018, стоимость работ определена на основании расчета сметной стоимости строительно-монтажных работ и составляет 2 676 235, 00 (два миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч двести тридцать пять) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 408 239, 24 (четыреста восемь тысяч двести тридцать девять) рублей 24 копейки (Приложение № 2 к Договору).

Согласно п.9.3.1. Договора № МС-6С/2018, сдача-приемка выполненных работ производится в следующем порядке: подрядчик передает заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) по работам, выполненным в отчетном месяце, акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), накопительную ведомость, счет-фактуру и необходимую исполнительную документацию, в том числе журнал учета выполненных работ по форме № КС-6а в 3-х экземплярах, а также паспорта и сертификаты на материалы, акты на скрытые работы, выполненные в отчетном периоде и оформленные в соответствии с РД-11-02-2006.

Согласно п.9.3.2. Договора № МС-6С/2018, заказчик в течение 7 рабочих дней проверяет, уточняет и подписывает Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), Акт о приемке выпиленных работ (форма № КС-2). Заказчик имеет право не принимать на проверку указанные акт и справку до предоставления подрядчиком исполнительной документации, необходимой для их подписания.

Согласно п.5.1 Договора № МС-6С/2018, заказчик в срок не позднее 10 рабочих дней с даты подписания Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) производит оплату выполненных работ на основании выставленного счета с зачетом суммы аванса.

Судом установлено, что во исполнение спорных договоров подряда истцом по заданию ответчика были выполнены работы на общую сумму 6 341 671,50 руб., что подтверждается представленными в материалы дела Актами по форме КС-2 и Справками по форме КС-3 (т.3, л.д. 14-25), подписанными представителями сторон и скрепленными печатями организаций, а ответчик в нарушение условий договора оплату выполненных работ в полном объеме не произвел, в результате чего у него образовалась задолженность в общем размере 1 317 083 руб. 58 коп.

Судом также установлено, что спорные договоры содержат условие о резервировании заказчиком денежных средств в размере 5% от стоимости принятых заказчиком работ за отчетный период для формирования гарантийного удержания. Выплата гарантийного удержания производится на основании выставленного подрядчиком счета по истечении 4 месяцев с даты подписания акта приемки кровли, акта испытания кровли методом пролива воды, а также итогового акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с условиями п. 9.3.8 договора. Срок платежа – 10 банковских дней с даты предоставления подрядчиком соответствующего счета (п. 9.4.1-9.4.2 дополнительных соглашений № 1 к договору № МС-1С/2018, № 1 к договору № МС-2С/2018, №1 к договору № МС-3С/2018, № 1 к договору № МС-4С/2018, п. 9.4.1-9.4.2 договоров №МС-5С/2018 от 02.07.2018, № МС-6/С2018 от 02.07.2018).

Направленная истцом в адрес ответчика претензия от 09.06.2020 с требованием погасить задолженность по спорным договорам оставлена последним без удовлетворения.

Мотивируя свои требования, истец сослался на нарушение ответчиком своих обязательств по оплате выполненных работ по договорам № МС-1С/2018 от 23.04.2018, № МС-2С/2018 от 23.04.2018, № МС-3С/2018 от 30.04.2018, № МС-4С/2018 от 23.05.2018, № МС-5С/2018 от 02.07.2018, № МС-6С/2018 от 02.07.2018.

В силу положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, при том, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно пункту 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Из положений статей 702, 740, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что основанием для возникновения у заказчика денежного обязательства по оплате работ по договору является совокупность следующих обстоятельств: выполнение работ и передача их результата заказчику.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате обусловленных договором работ является сдача работ заказчику путем подписания акта выполненных работ (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 №51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» (далее - информационное письмо №51).

В силу пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

В соответствии с пунктом 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

Арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу (статья 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (статья 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Поскольку в материалы дела не представлено доказательств направления счетов на оплату, составление актов приемки кровли, актов испытания кровли методом пролива воды, а также Итоговых Актов сдачи-приемки результатов работ, в установленном договорами порядке (п. 9.4.1-9.4.2 дополнительных соглашений № 1 к договору № МС-1С/2018, № 1 к договору № МС-2С/2018, №1 к договору № МС-3С/2018, № 1 к договору № МС-4С/2018, п. 9.4.1-9.4.2 договоров №МС-5С/2018 от 02.07.2018, № МС-6/С2018 от 02.07.2018), требования истца подлежат частичному удовлетворению, с учетом права ответчика на удержание 317 083,58 руб. согласно вышеуказанным пунктам договоров.

Сторонами договоров согласованы размер гарантийного удержания и порядок его выплаты по каждому договору в момент их заключения. При заключении договоров подрядчиком не было заявлено разногласий к условиям договоров в данной части. 

Таким образом, в соответствии с положениями статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны добровольно согласовали указанный порядок расчета по договорам.

Доказательств выполнения подрядчиком положений п. 9.4.1-9.4.2 дополнительных соглашений № 1 к договору № МС-1С/2018, № 1 к договору № МС-2С/2018, №1 к договору № МС-3С/2018, № 1 к договору № МС-4С/2018, п. 9.4.1-9.4.2 договоров №МС-5С/2018 от 02.07.2018, № МС-6/С2018 от 02.07.2018 в материалы дела не представлено, обязательство по оплате 317 083,58 руб. у заказчиком не наступило.

Принимая во внимание указанные обстоятельства дела, суд полагает, что исковые требования подлежат удовлетворению в указанном объеме.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "ОКС" (ОГРН 

<

***>) в пользу ООО "МАСТЕРСТРОЙ" (ОГРН 

<

***>) 1 000 000 руб. 00 коп. задолженности по договорам подряда №№ МС-1С/2018 от 23.04.2018, МС-2С/2018 от 23.04.2018, МС-3С/2018 от 30.04.2018, МС-4С/2018 от 23.05.2018, МС-5С/2018 от 02.07.2018, МС-6С/2018 от 02.07.2018, а также 19870 руб. 00 коп. расходов по оплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Десятый арбитражный апелляционный суд, вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия если не подана апелляционная жалоба.

Судья                                 П.И. Машин