Арбитражный суд Сахалинской области Коммунистический проспект, дом 28, Южно-Сахалинск, 693024, www.sakhalin.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-4893/2025

06 октября 2025 года

город Южно-Сахалинск

 

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Кучкиной С.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем Шильчиковой А.В., с использованием средств аудиозаписи, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

Администрации муниципального образования Долинский муниципальный округ Сахалинской области (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Де Ал Возрождение» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

об обязании устранить недостатки работ по муниципальным контрактам № 0161300006323000626 от 09.08.2023, № 0161300006323000628 от 09.08.2023, № 0161300006323000635 от 09.08.2023, № 0161300006323000636 от 09.08.2023, № 0161300006323000643 от 09.08.2023, № 0161300006323000645 от 09.08.2023, № 0161300006323000650 от 09.08.2023, № 0161300006323000651 от 09.08.2023, № 0161300006323000655 от 09.08.2023, № 0161300006323000827 от 11.12.2023,  

о взыскании штрафа в общем размере 55 000 руб., 

Руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Де Ал Возрождение» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в течение тридцати дней с даты вступления решения в законную силу устранить недостатки, выявленных по результатам выполненных работ по контрактам:  

1.1. По муниципальному контракту от 09 августа 2023 года № 0161300006323000626, а именно в жилом доме № 1а/9 по адресу: 

<

...> провести:  

- мероприятия по устранению плесени в комнате на 2 этаже; - мероприятия по замене дорожного полотна, ведущего к дому. 

1.2. По муниципальному контракту от 09 августа 2023 года № 0161300006323000628, а именно в жилом доме № 1а/3 по адресу: 

<

...> провести:  

- мероприятия по устранению плесени в углу комнаты на 1 этаже; - мероприятия по устранению плесени под натяжным потолком на 2 этаже. 

1.3. По муниципальному контракту от 09 августа 2023 года № 0161300006323000635, а именно в жилом доме № 18/7 по адресу: 

<

...> провести:  

 - мероприятия по устранению имеющегося технического отверстия на 2 этаже в потолке в санузле;  

- мероприятия по устранению течи воды с технического отверстия на 2 этаже в потолке в санузле.  

1.4. По муниципальному контракту от 09 августа 2023 года № 0161300006323000636, а именно в жилом доме № 18/6 по адресу: 

<

...> провести:  

- мероприятия по установке петли на дверь в дом и замене погнутых боковых креплений.  

1.5. По муниципальному контракту от 09 августа 2023 года № 0161300006323000643, а именно в жилом доме № 1/8 по адресу: 

<

...> провести:  

- мероприятия по выявлению и устранению причин отсутствующего освещения с улицы.  

1.6. По муниципальному контракту от 09 августа 2023 года № 0161300006323000645, а именно в жилом доме № 1/7 по адресу: 

<

...> провести:  

- мероприятия по выявлению и устранению причин неработоспособности  

водостока. 

1.7. По муниципальному контракту от 09 августа 2023 года №  

0161300006323000650, а именно в жилом доме № 1/4 по адресу: Российская Федерация,  

<

...> провести: 

- мероприятия по выявлению и устранению причин неработоспособности  

водостока. 

1.8. По муниципальному контракту от 09 августа 2023 года №  

0161300006323000651, а именно в жилом доме № 9б/1 по адресу: Российская Федерация,  

<

...> провести: - мероприятия по выявлению и устранению течи в бойлерной возле счётчика. 

1.9. По муниципальному контракту от 09 августа 2023 года №  

0161300006323000655, а именно в жилом доме № 9а/2 по адресу: Российская Федерация,  

<

...> провести: 

- мероприятия по выявлению и устранению плесени на стенах в комнате,  

выходящей на восток; 

- мероприятия по выявлению и устранении причин затекания воды в дом по  

отмостке. 

1.10. По муниципальному контракту от 11 августа 2023 года №  

0161300006323000827, а именно в жилом доме № 9/2 по адресу: Российская Федерация,  

<

...> провести: 

- мероприятия по установке водостока над входной дверью; - мероприятия по  

замене дорожного полотна, ведущего к входной двери; 

- мероприятия по укреплению отмостки с южной стороны дома; - мероприятия по  

устранению окалин, имеющихся на кафеле в ванной комнате; - мероприятия по установке полотенцесушителя; - мероприятия по замене межкомнатной двери; - мероприятия по замене наличников; 

- мероприятия по выявлению и устранения причин затекания воды на окно, в  

комнату, с улицы; 

- мероприятия по выявлению и устранению причины слабого напора горячей воды. Взыскать с к общества с ограниченной ответственностью «Де Ал Возрождение»  

(ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу администрации муниципального  

образования Долинский муниципальный округ штрафы в размере 55 000 рублей. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Де Ал Возрождение» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 60 000 рублей.  

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Сахалинской области.  

Судья С.В. Кучкина