Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-47793/2021

17 августа 2021 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  06 августа 2021 года.

Полный текст решения изготовлен  17 августа 2021 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сурков А. А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "ГПС-ОСНОВА" (адрес:  Россия 188670, пос. Романовка, Ленинградская обл., Всеволожский р-н., здание Центральной Ремонтной Мастерской ком.309, ОГРН: 1114703004877);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "ИНЖЕНЕРНЫЕТЕПЛОСИСТЕМЫ" (адрес:  Россия 188642, Всеволожск, Ленинградская обл., Всеволожский р-н., ул. Пожвинская 4а/пом.3-н/оф.101, ОГРН: 1204700002077);

о взыскании,

при участии

- от истца: ФИО2 (доверенность от 15.09.2020),

- от ответчика: не явился, извещен,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "ГПС-ОСНОВА" (далее – Общество "ГПС-ОСНОВА") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ИНЖЕНЕРНЫЕТЕПЛОСИСТЕМЫ" (далее – Общество "ИНЖЕНЕРНЫЕТЕПЛОСИСТЕМЫ") о взыскании по договору от 25.02.2020 № 01/02-22 (далее – Договор): 7 524 515,52 руб. неосновательного обогащения, 2 400 320,45 руб. неустойки за просрочку выполнения работ за период с 16.06.2020 по 30.04.2021 года, 12 369,07 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.05.2021 по 12.05.2021, а также проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на основании статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму неосновательного обогащения за период с 13.05.2021 по дату возврата неосновательного обогащения.

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание своих представителей не направил, что в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ)  не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Изучив материалы дела, арбитражный суд установил, что между сторонами заключен Договор.

В соответствии с пунктом 3.1. договора работы выполняются в период с 01.03.2020 по 15.06.2020

Платежными поручениями № 496 от 20.04.2020, № 549 от 30.04.2020, № 566 от 06.05.2020, № 621 от 21.05.2020, № 758 от 09.06.2020 заказчик перечислил подрядчику 9 000 000 руб. аванса.

Сторонами подписаны справка о стоимости работ формы КС-3 и акт приемки выполненных работ формы КС-2 от 31.05.2020 на 1 475 484 руб. 48 коп.

В исковом заявлении истец указал, что прочие работы подрядчиком не выполнены и заказчику в соответствии с условиями договора не сданы.

Поскольку работы не были выполнены в установленный срок, в претензии от 06.04.2021 заказчик уведомил подрядчика об одностороннем отказе от Договора и потребовал возврата аванса, а также уплаты неустойки за просрочку выполнения работ.

В связи с тем, что названная претензия была оставлена без удовлетворения, Общество "ГПС-ОСНОВА" обратилось в арбитражный суд с указанным иском.

В силу статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Согласно статье 702 ГК РФ (по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу статьи 711 ГК РФ сдача результата работ заказчику является основанием для возникновения у него обязательства по оплате принятых работ.

Пунктом 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат).

Пунктом 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» разъяснено, что основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата  работ  заказчику.

В соответствии с пунктом 1 статьи 450.1 ГК РФ предоставленное названным Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено названным Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В соответствии с частью 2 статьи 715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Воспользовавшись указанным правом, истец отказался от договора, такой отказ в установленном порядке не спорен.

В соответствии с пунктом 4 статьи 453 ГК РФ в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60 Гражданского кодекса Российской Федерации), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 названного Кодекса.

Факт перечисления истцом ответчику денежных средств подтверждается материалами дела.

Надлежащие доказательства выполнения работ по договору, либо возврата перечисленных денежных средств в материалы дела не представлены.

При указанных обстоятельствах, требование о взыскании 7 524 515,52 руб. неосвоенного аванса надлежит удовлетворить в полном объеме.

Истцом также заявлено требование о взыскании 2 400 320,45 руб. неустойки за просрочку выполнения работ за период с 16.06.2020 по 30.04.2021.

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Пунктом 8.2 договора предусмотрена ответственность подрядчика за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных договором, в виде неустойки в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки исполнения обязательств до даты его фактического исполнения.

Материалами дела подтверждается нарушение ответчиком обязательств по договору в части сроков выполнения работ, в связи, с чем у истца возникло право на взыскание неустойки.

Проверив начисленную сумму неустойки, суд признал её обоснованной, подлежащей взысканию.

Таким образом, требование о взыскании неустойки также надлежит удовлетворить.

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании 12 369,07 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.05.2021 по 12.05.2021, а также проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на основании статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму неосновательного обогащения за период с 13.05.2021 по дату возврата неосновательного обогащения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 395 ГК РФ в случае неправомерного удержания денежных средств подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

Проценты за пользование чужими денежными средствами взымаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок (пункт 3 ст. 395 ГК РФ).

Судом проверен представленный истцом расчет процентов и признан математически верным.

Таким образом, требование о взыскании процентов надлежит удовлетворить.

В соответствии с пунктом 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ИНЖЕНЕРНЫЕТЕПЛОСИСТЕМЫ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ГПС-ОСНОВА" 7 524 515,52 руб. неосновательного обогащения, 2 400 320,45 руб. неустойки, 12 369,07 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 12.05.2021, а также проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на основании статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму неосновательного обогащения за период с 13.05.2021 по дату возврата неосновательного обогащения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ИНЖЕНЕРНЫЕТЕПЛОСИСТЕМЫ" в доход федерального бюджета 72 686 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Сурков А. А.