41/2017-146162(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А13-17455/2017

город Вологда

12 декабря 2017 года

 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Вологодской области  

р е ш и л:

внести изменения в муниципальный контракт на выполнение работ по  

объекту «Парк Победы. Благоустройство территории» № К17-17 от 01.09.2017  

следующего содержания: 1) пункт 1.4 изложить в следующей редакции: «1.4. Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ: с даты заключения контракта. Срок завершения работ: 25 декабря 2017 года включительно.», 2) пункт 12.1 изложить в следующей редакции: 

«12.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты заключения и  

действует до 31 декабря 2017 года включительно.». 

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  

апелляционный суд в месячный срок с момента его принятия через  

Арбитражный суд Вологодской области. 

Судья Т.Б. Виноградова