АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  улица А.Невского, дом 29/11, г. Симферополь, Республика Крым, 295000  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А83-23010/2021

г. Симферополь

10 августа 2023 года

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Гайворонского В.И., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании исковое заявление ГКУ РК «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым» к ООО «Уфанефтемаш», при участии в деле  в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно  предмета спора, ФИО2, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 1  «УЛЫБКА» ГОРОДА БАХЧИСАРАЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, о взыскании  

При участии: от истца – ФИО3, представитель по доверенности № 5-ОД от 11.01.2022;  от ответчика – не явился; 

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Крым,  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

 Обязать ООО «УФАНЕФТЕМАШ» (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>) в  течение 15 (пятнадцати) дней в момента вступления в законную силу решения по  настоящему делу исполнить принятые на себя гарантийные обязательства по  государственному контракту от 29.10.2018 № 077/132, за свой счет устранить недостатки  (дефекты) на объекте «Строительство дошкольной образовательной организации на 260  мест 

<

...>», расположенном по адресу: 

<

...>, путем выполнения следующих работ:  

-устранить многочисленные трещины по наружной отделке на стенах здания - 20 м.п.; 

 -протечку кровли в помещениях (по плану № 208 и группы № 10);  

 -устранить отслоение плитки на цоколе здания в количестве - 12 кв. м.;  

 -устранить обширную коррозию металлических ящиков для поливочных кранов на  фасаде здания - 3 шт.;  

 -восстановить травяное покрытие на 13 детских игровых и спортивных площадках; 

 -устранить дефекты МАФов отшелушивания краски, расслоения поверхности,  растрескивания имеют многочисленные дефекты;  

 -устранить протечки витражных окон в игровых комнатах групп: № 4. № 5, № 6, №  7, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13;  

 -устранить дефекты вытяжной вентиляции, выявленные в процессе эксплуатации. 

 Взыскать с ООО «УФАНЕФТЕМАШ» (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>) в  доход Федерального бюджета госпошлину в сумме 6 000,00 руб.  

 Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если  не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня  принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.  

 Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в  порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный  суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения  (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в  Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение  двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом  апелляционной инстанции.  

 Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть  получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Судья В.И. Гайворонский