АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

http://www.tatarstan.arbitr.ru

тел. (843) 533-50-00

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Казань                                                                                                        Дело № А65-5808/2023 

Дата принятия решения –  26 апреля 2023 года.

Дата объявления резолютивной части –  19 апреля 2023 года.

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Галеевой Ю.Н., при ведении протокола помощником судьи Шакуровой Л.Ф.,  по иску Общества с ограниченной ответственностью СК "Восток" СД, г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "Аманат", г.Волжск, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 16 713 809 руб. 08 коп. задолженности, 389 460 руб. 82 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами

с участием:

от истца  – ФИО1, по доверенности от 28.02.2023г., 

от ответчика – не явился, извещен

установил:

Истец - Общество с ограниченной ответственностью СК "Восток" СД, г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) - обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к ответчику – Обществу с ограниченной ответственностью "Аманат", г.Волжск, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 16 713 809 руб. 08 коп. задолженности, 483 355 руб. 82 коп. процентов.

           Ответчик в судебное заседание не явился, извещен, ранее направил письменный отзыв, в котором задолженность не оспорил, просил провести сальдирование на сумму неустойки в размере 93 895 руб. за нарушение срока выполнения работ. Согласно п. 4.1 договора подряда № 153-Р.4 от 05.08.2022 года срок окончания выполнения работ: 15.09.2022. Работы по договору были выполнены - 10.10.2022 года, то есть с нарушением срока выполнения работ на 25 дней. Согласно п. 11.1 договора подряда №153-Р.4 от 05.08.2022 года в случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных Договором, Подрядчик, по требованию Заказчика, уплачивает пеню в размере: первые 10 дней просрочки -0,05% от Цены Договора за каждый календарный день просрочки; последующие дни просрочки -0,1 % от Цены Договора за каждый календарный день просрочки. Следовательно, истец обязан уплатить ответчику пеню в размере 93 895 рублей (4 694 760 х 0,05% х 10 дней + 4 694 760 х 0,1% х 15 дней).

Истец в судебном заседании с учетом доводов ответчика о сальдировании, требование  в части процентов уменьшил на сумму 93 895 руб. (то есть до  389 460 руб. 82 коп.). Истец требование в части взыскания задолженности поддержал. 

Ходатайство об уменьшении исковых требований принято судом.

В соответствии с ч. 4 ст. 137 АПК РФ, если в предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия и ими не были заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции.

Возражений о рассмотрении дела по существу от   сторон  не поступило.

С согласия истца, при отсутствии возражений ответчика, суд в соответствии с  ч. 4 ст. 137 АПК РФ и п. 27 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда №65 от 20.12.2006г., завершил предварительное судебное заседание и продолжил рассмотрение дела по существу. 

Суд, руководствуясь ч.3 ст. 156 АПК РФ определил рассмотреть дело без участия ответчика.

Исследовав материалы дела, суд находит правовые основания для удовлетворения исковых требований, исходя из следующего.

Спор рассмотрен Арбитражным судом Республики Татарстан на основании п.13.1 договоров.

Как следует из материалов дела, 7.07.2022г. между ООО СК "Восток" СД (истец, подрядчик) и ООО «Аманат» (ответчик, заказчик) заключен договор подряда №210-Р.3.

Согласно п.1.1 Договора, Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить общестроительные работы на объекте: «Жилой дом № 3, расположенный в жилом комплексе «Радужный - 2» Зеленодольского муниципального района РТ, по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район» (далее по тексту - Объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ в соответствии с условиями Договора.

 Согласно п.2.1, договора общая стоимость работ по Договору (Цена Договора) определяется в соответствии с Калькуляцией выполняемых работ (Приложение № 1 к Договору) и составляет 13 133 064 рубля 41 копейка (в том числе НДС 20%). Установленная цена является твердой и окончательной и изменению не подлежит. Цена (стоимость) работ может быть изменена только по соглашению Сторон, что подтверждается подписанным обеими Сторонами дополнительным соглашением к Договору.

 Согласно п.3.1 договора оплата по Договору осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный Счет  Подрядчика промежуточными платежами ежемесячно в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня  подписания Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Оплата производится при условии направления Подрядчиком оригиналов счета на оплату не позднее, чем за один банковский день до срока оплаты Заказчиком) и счета-фактуры.

Согласно п.4.1 договора начало выполнения работ- 7.07.2022, срок окончания работ – 30.09.022г. 

Факт выполнения работ подтверждается подписанными сторонами актами по форме №№ КС-2, КС-3 от 21.07.2022 на сумму 3 090 153,83 рублей; от 10.08.2022 на сумму 3 448 947,76 рублей; от 30.08.2022 на сумму 3 237 544,07 рублей; от 30.09.2022 на сумму 3 356 418,75 рублей. Итого на 13 133 064 руб. 41 коп. 

Оплата работ по Договору произведена частично на общую сумму 4 400 000 рублей, что подтверждается Соглашением о зачете требований от 27.12.2022 года, Договором купли продажи автомобиля №136 от 27.12.2022 года, Актом приема-передачи автомобиля от 27.12.2022 года.

Задолженность ответчика по спорному договору составляет 8 733 064 руб. 41 коп.

Также 7.07.2022г.  между ООО СК «Восток» (истец, подрядчик) и ООО «Аманат» (ответчик, заказчик) был заключен договор подряда № 211-Р.4

Согласно п.1.1 договора заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить общестроительные работы на объекте: «Жилой дом № 4, расположенный в жилом комплексе «Радужный - 2» Зеленодольского муниципального района РТ, по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район» (далее по тексту - Объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ в соответствии с условиями Договора.

Согласно п.2.1 договора общая стоимость работ по Договору (Цена Договора) определяется в соответствии с Калькуляцией выполняемых работ (Приложение № 1 к Договору) и составляет 3 102 158 рублей 03 копейки (в том числе НДС 20%). Установленная цена является твердой и окончательной и изменению не подлежит. Цена (стоимость) работ может быть изменена только по соглашению Сторон, что подтверждается подписанным обеими Сторонами дополнительным соглашением к Договору.

Согласно п.3.1 договора Оплата по Договору осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный Счет  Подрядчика промежуточными платежами ежемесячно в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня  подписания Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Оплата производится при условии направления Подрядчиком оригиналов счета на оплату не позднее, чем за один банковский день до срока оплаты Заказчиком) и счета-фактуры.

Срок окончания выполнения работ: 30.09.2022 (пункт 4.1. Договора №211-Р.4).

Выполнение работ подтверждается подписанными сторонами актами по форме №№ КС-2, КС-3 от 30.09.2022 на сумму 3 102 158,03 рублей.

Оплата работ по Договору №211-Р.4 не произведена. 

Размер задолженности составил 3 102 158,03 рублей.

Кроме того, 7.07.2022г. между ООО СК «Восток» СД (истец, подрядчик) и ООО «Аманат» (ответчик, заказчик) был заключен договор подряда № 212-Р. предметом которого, согласно п.1.1, является выполнение Истцом общестроительных работ на объекте: «Жилой дом №5, расположенный в жилом комплексе «Радужный-2» Зеленодольского муниципального района РТ, по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, согласно Приложению к договору №1.

Согласно п.2.1 договора общая стоимость работ по Договору (Цена Договора) определяется в соответствии с Калькуляцией выполняемых работ (Приложение № 1 к Договору) и составляет 3 734 656 рублей 64 копейки (в том числе НДС 20%). Установленная цена является твердой и окончательной и изменению не подлежит. Цена (стоимость) работ может быть изменена только по соглашению Сторон, что подтверждается подписанным обеими Сторонами дополнительным соглашением к Договору.

Согласно п.3.1 договора оплата по Договору осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный Счет  Подрядчика промежуточными платежами ежемесячно в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня  подписания Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Оплата производится при условии направления Подрядчиком оригиналов счета на оплату не позднее, чем за один банковский день до срока оплаты Заказчиком) и счета-фактуры.

Согласно п.4.1 договора срок окончания выполнения работ: 30.09.2022.

Выполнение работ подтверждается подписанными сторонами актами по форме №№ КС-2, КС-3 от 30.09.2022 на сумму 3 734 656,64 рублей.

Оплата работ по Договору №212-Р.5 произведена частично на общую сумму 1 900 000 рублей, что подтверждается Соглашением о зачете требований от 27.12.2022 года, Договором купли продажи автомобиля от 27.12.2022 года, Актом приема-передачи автомобиля от 27.12.2022 года.

Размер задолженности составил 1 834 656,64 руб.

Также сторонами 5.08.2022г.  был заключен договор подряда № 153-Р.4,  предметом которого, согласно п.1.1 которого,  является выполнение Истцом общестроительных работ на объекте: «Жилой дом №4, расположенный в жилом комплексе «Радужный-2» Зеленодольского муниципального района РТ», адрес: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, с. Осиново, Осиновское сельское поселение, кадастровый номер земельного участка 16:20:080803:3797, согласно Приложению к договору №1.

 Согласно п.2.1 договора общая стоимость работ по договору подряда №153-Р.4 составляет 4 694 760  рублей (в том числе НДС 20%) (п. 2.1 Договора №212-Р.5, с учетом Дополнительного соглашения №1 от 21.12.2022).

Согласно п.3.1 договора оплата выполненных работ производится заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика промежуточными платежами ежемесячно в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня подписания Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) (п. 3.1 Договора №153-Р.4).

Согласно п.4.1 договора, срок окончания выполнения работ: 15.09.2022.

Выполнение работ подтверждается подписанными сторонами актами по форме №№ КС-2, КС-3 от 03.10.2022 на сумму 1 617 000 рублей; от 10.10.2022 на сумму 3 077 760 рублей. Итого 4 694 760 руб. 

С учетом частичной оплаты, размер задолженности по спорному договору составил 3 043 930,00 рублей.

Размер общей задолженности составил 16 713 809 руб. 08 коп., что также подтверждается подписанными сторонами актами сверок. 

            Претензия истца  в полном объеме не удовлетворена, в связи с чем, истец обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии со ст.307, 309 ГК РФ стороны должны исполнять свои обязательства надлежащим образом, исходя из требований закона и условий обязательства.

В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

  Согласно положениям ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

  Ответчиком в материалы дела не представлены доказательства отсутствия задолженности перед истцом, либо наличия ее в ином размере.

           Согласно ч. 1 ст. 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. 

           В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

           Согласно п. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Учитывая, что задолженность ответчика перед истцом подтверждается документально,  в том числе подписанными сторонами актами КС-2, КС-3, требование истца о взыскании 16 713 809 руб. 08 коп. долга, в силу ст. ст. 307, 309, 702 ГК РФ, подлежит удовлетворению.

Истцом также заявлено требование о взыскании 389 460 руб. 82 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.11.2022 по 01.03.2023г. 

Согласно статье 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. 

Факт просрочки подтверждается материалами дела, расчет процентов проверен судом.

Требование истца о взыскании процентов по ст. 395 ГК РФ, начисленных на сумму долга, за период 01.11.2022 по 01.03.2023г. исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, в сумме 389 460 руб. 82 коп. является правомерным и также подлежит удовлетворению судом. 

Расходы по уплате госпошлины согласно ст. 110 АПК РФ относятся на ответчика.

 

руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169, 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

 

Р Е Ш И Л :

Иск удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Аманат", г.Волжск, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью СК "Восток" СД, г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 16 713 809 руб. 08 коп. задолженности, 389 460 руб. 82 коп. процентов и 108 516 руб. госпошлины.

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью СК "Восток" СД, г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) справку на возврат из бюджета 470 руб. уплаченной госпошлины. 

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

 

Председательствующий судья                                                                      Ю.Н. Галеева