АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ул. Орджоникидзе, д. 49а, г. Сыктывкар, 167982

8(8212) 300-800, 300-810, http://komi.arbitr.ru, е-mail: info@komi.arbitr.ru   

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А29-15773/2018

22 января 2019 года

г. Сыктывкар

 

Резолютивная часть решения изготовлена 15 января 2019 года, полный текст решения изготовлен 22 января 2019 года.

 

Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи  Кирьянова Д.А.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Игнатовой Л.В.,

рассмотрев в судебном заседании дело 

по иску Управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Таможенно Транспортный Терминал» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

о  взыскании неустойки, 

без участия представителей сторон 

 

установил:

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Управление, истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Коми с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью «Таможенно Транспортный Терминал» (далее –                         ООО «ТТТ», ответчик) о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по V и VI этапам контакта № 0307300001817000502-0176476-01 от 04.10.2017 за период с 19.12.2017 по 13.04.2018 в размере 1 778 892 руб. 23 коп. (том 8 л.д. 4-5).

Ответчик в отзыве на исковое заявление № 13/12 от 10.12.2018 (том 1 л.д. 146-147) просит суд произвести расчет пени в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом)» и уменьшить размер пени до 124 396 руб. 55 коп. (контррасчет иска (том 8 л.д. 11-12).

Стороны, надлежащим образом извещенные о дате, времени и месте проведения судебного заседания, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили.

При таких обстоятельствах суд, руководствуясь положениями статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассматривает спор в отсутствие представителей сторон по имеющимся в материалах дела доказательствам.

Изучив материалы дела, оценив доводы и позиции сторон, суд установил следующие фактические обстоятельства.

Как следует из материалов дела, по результатам электронного аукциона № 0307300001817000502, извещение о проведении которого было размещено в Единой информационной системе в сфере закупок 21.08.2017 года (том 8 л.д. 16), 04.10.2017 между Управлением (заказчик) и ООО «ТТТ» (исполнитель) был заключен контакт № 0307300001817000502-0176476-01 (том 1 л.д. 42-48), по условиям которого исполнитель обязуется выполнить работы по ремонту муниципального жилого фонда в г. Воркута Республики Коми, и сдать результат работ заказчику, а заказчик  обязуется принять результат работ и оплатить его в установленном контрактом порядке. Состав и объем работ определяется техническим заданием (Приложение №1) и локально-сметным расчетом (Приложение №2), которые являются неотъемлемыми частями контракта (пункт 1.1. контракта).

Стоимость работ по контракту составляет 29 850 000 руб. и включает в себя все необходимые расходы, вывоз мусора, транспортные и иные расходы исполнителя, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе затраты исполнителя на приобретение материалов, командировочные расходы, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, оплачиваемых исполнителем за полное выполнение своих обязательств по контракту (пункт 2.1. контракта).

В силу пункта 2.2. контракта цена является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения контракта, за исключением случаев, установленных контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 3.1. контакта исполнитель приступает к выполнению работ с момента подписания контракта. 

Согласно пункту 3.2. контакта работы должны быть закончены в срок в соответствии с этапами:

I этап - г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 20 корпус 1,                  кв. 21, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 20 корпус 1, кв. 39,                  г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 20 корпус 3, кв. 16, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 20 корпус 3, кв. 66, г. Воркута,                           пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 20 корпус 3, кв. 83, г. Воркута,                          пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 20 корпус 5, кв. 19, г. Воркута,                         пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 20 корпус 5, кв. 33, г. Воркута,                        пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 20 корпус 5, кв. 38, г. Воркута,                       пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 20 корпус 5, кв. 50, г. Воркута,                        пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 20 корпус 5, кв. 57, г. Воркута,                        пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 20 корпус 5, кв. 61, г. Воркута,                         пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 20 корпус 5, кв. 69, г. Воркута,                       пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 22 корпус 1, кв. 88, г. Воркута,                      пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 22 корпус 3, кв. 8, г. Воркута,                       пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 22 корпус 3, кв. 24 - в срок до 31.10.2017,

II этап -  г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 24 корпус 1,                  кв. 14, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 24 корпус 1, кв. 16,                 г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 24 корпус 1, кв. 21, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 24 корпус 1, кв. 71, г. Воркута,                           пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 24 корпус 1, кв. 76, г. Воркута,                         пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 24 корпус 1, кв. 79, г. Воркута,                       пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 24 корпус 1, кв. 83, г. Воркута,                         пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 24 корпус 1, кв. 84, г. Воркута,                        пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 24 корпус 3, кв. 16, г. Воркута,                        пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 24 корпус 3, кв. 30, г. Воркута,                         пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 24 корпус 3, кв. 48, г. Воркута,                       пгт. Воргашор, ул. Катаева, д. 53 кв. 1, г. Воркута, пгт. Воргашор,                          ул. Катаева, д. 53 кв. 13, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Катаева, д. 59 кв. 15, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Катаева, д. 59 кв. 17, г. Воркута,                             пгт. Воргашор, ул. Катаева, д. 59 кв. 18, г. Воркута, пгт. Воргашор,                        ул. Катаева, д. 59 кв. 202, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Катаева, д. 59 кв. 210 – в срок  до 15.11.2017,

III этап - г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Воргашорская, д. 2 корпус 1,              кв. 19, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Воргашорская, д. 2 корпус 1, кв. 27,                  г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Воргашорская, д. 2 корпус 1, кв. 37, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Воргашорская, д. 2 корпус 1, кв. 48, г. Воркута,                       пгт. Воргашор, ул. Воргашорская, д. 2 корпус 2, кв. 2, г. Воркута,                       пгт. Воргашор, ул. Воргашорская, д. 2 корпус А, кв. 9, г. Воркута,                       пгт. Воргашор, ул. Воргашорская, д. 2 корпус Б, кв. 24, г. Воркута,                       пгт. Воргашор, ул. Воргашорская, д. 2 корпус Б, кв. 33, г. Воркута,                        пгт. Воргашор, ул. Воргашорская, д. 2 корпус Б, кв. 37, г. Воркута,                      пгт. Воргашор, ул. Воргашорская, д. 2 корпус Б, кв. 78, г. Воркута,                        пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 5  кв. 37, г. Воркута, пгт. Воргашор,                   ул. Энтузиастов, д. 5 кв. 60,  г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 5 корпус А кв. 41, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 7 кв. 4,                     г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 7 кв. 7,  г. Воркута,                         пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 7 кв. 11,  г. Воркута, пгт. Воргашор,                  ул. Энтузиастов, д. 7 кв. 19,  г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 7 кв. 20 – в срок до 30.11.2017,

IV этап -  г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 9 кв. 60,                      г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 9 кв. 102, г. Воркута,                       пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 11 корпус 4, кв. 7, г. Воркута,                         пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 13 корпус 4, кв. 17, г. Воркута,                       пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 13 корпус 4, кв. 45, г. Воркута,                        пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 15 корпус 2, кв. 14, г. Воркута,                       пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 15 корпус 3, кв. 47 – в срок до 10.12.2017,

V этап - г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 6 кв. 10,                        г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 8 корпус 1, кв. 2, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 16 кв. 5, г. Воркута, пгт. Воргашор,                     ул. Энтузиастов, д. 16 кв. 51, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов,                д. 16 кв. 53, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 16 кв. 61,                        г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 16 кв. 80, г. Воркута,                       пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 17 корпус А, кв. 20, г. Воркута,                        пгт. Воргашор, ул. Есенина, д. 5 кв. 18, г. Воркута, пгт. Воргашор,                       ул. Есенина, д. 5 кв. 22 – в срок до 17.12.2017,

VI этап - г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Катаева, д. 43 кв. 26, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Катаева, д. 43 кв. 31, г. Воркута, пгт. Воргашор,                        ул. Катаева, д. 43 кв. 37, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Катаева, д. 43 кв. 54, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Катаева, д. 43 кв. 59, г. Воркута,                              пгт. Воргашор, ул. Катаева, д. 43 кв. 85, г. Воркута, пгт. Воргашор,                         ул. Катаева, д. 43 кв. 86, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Воргашорская, д. 6  кв. 29, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Воргашорская, д. 6  кв. 47, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Воргашорская, д. 6  кв. 50, г. Воркута, пгт. Воргашор,                  ул. Воргашорская, д. 8  кв. 46, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Воргашорская, д. 8  кв. 50 – в срок до 20.12.2017.

В силу пункта 4.4.1. контракта исполнитель обязан выполнить все работы, перечисленные в пункте 1.1. данного контракта в объемах и в сроки, предусмотренные контрактом и сдать выполненные работы заказчику в установленный контрактом срок. 

Сдача результатов выполненных работ (этапа работ) исполнителем и принятие их заказчиком осуществляется путем подписания сторонами актов о приемке выполненных работ (этапа работ) (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по контракту (пункт 7.1. контракта). 

Согласно пункту 7.8. контракта работы (этап работ) считаются выполненными со дня подписания акта о приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по контракту.

В соответствии с пунктом 8.3. контракта в случае просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных исполнителем и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С, 

где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Как указывает истец, ответчиком были нарушены сроки выполнения работ по V и VI этапам контракта, акты о приемки выполненных работ по V этапу контракта подписаны 13.04.2018 (том 7 л.д. 53-98, 113-161), акты о приемке выполненных работ по VI этапу контракта подписаны 30.03.2018 (том 4 л.д. 51-95, том 5 л.д. 24-90).

За нарушение сроков выполнения работ по V и VI этапам контракта истец начислил ответчику пени в общем размере 1 778 892 руб. 23 коп., из них 776 651 руб. 94 коп. - пени за период с 19.12.2017 по 13.04.2018 за нарушение сроков выполнения работ по V этапу контракта,                         1 002 240 руб. 29 коп. – пени за период с 21.12.2017 по 30.03.2018 за нарушение сроков выполнения работ по VI этапу контракта (уточненный расчет пени том 8 л.д. 7-8).

Не урегулирование спора в претензионном порядке послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим исковым заявлением.

В рассматриваемом случае, контракт № 0307300001817000502-0176476-01 от 04.10.2017 заключен в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и по своей правовой природе является договором подряда, отношения по которому регулируются главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

Часть 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии со статьей 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

Как установлено пунктом 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения работ.

Согласно части 1 статьи 329, части 2 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения, при этом по требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Частью 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В силу части 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Согласно пункту 6 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом (далее также - Правила), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 (далее – Правила № 1063), пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле:

П = (Ц - В) х С,

где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

С = Сцб х ДП,

где:

Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

К= ДП / ДК х 100%,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

Аналогичный порядок начисления пени определен в пункте 8.3. контракта.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017    № 1042 утверждены Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом (далее – Правила № 1042), которые вступили в силу 09.09.2017.

В силу пункта 10 Правил № 1042 пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В пункте 3 Правил № 1042 отражено, что данные Правила применяются к отношениям, связанным с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, извещения об осуществлении которых размещены в Единой информационной системе в сфере закупок либо приглашения принять участие в которых направлены после 09.09.2017.

Согласно информации, размещенной в Единой информационной системе в сфере закупок, извещение о проведении электронного аукциона            № 0307300001817000502 на выполнение работ по ремонту муниципального жилищного фонда в г. Воркута Республики Коми было размещено 21.08.2017 (том 8 л.д. 16).

Таким образом, на момент размещения извещения (21.08.2017) действовали Правила № 1063, в связи с чем, ответственность подрядчика за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных контрактом, правомерно определена в соответствии с этими Правилами.

С учетом вышеизложенного, правовые основания для применения положений Правил № 1042 в рассматриваемом случае отсутствуют. 

В этой связи довод ответчика о необходимости применения к спорным правоотношениям положений Правил № 1042 подлежит отклонению.

По уточненному расчету истца (том 8 л.д. 7-8) общий размер пени за нарушение сроков выполнения работ по V и VI этапам контракта составляет 1 778 892 руб. 23 коп., из них 776 651 руб. 94 коп. - пени за период с 19.12.2017 по 13.04.2018 за нарушение сроков выполнения работ по V этапу контракта, 1 002 240 руб. 29 коп. – пени за период с 21.12.2017 по 30.03.2018 за нарушение сроков выполнения работ по VI этапу контракта.

Проверив расчет истца, суд установил, что истцом при расчете неверно применена ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации – 7, 75 процентов.

Работы по V и VI этапу контракта выполнены исполнителем (ответчиком) в полном объеме, что подтверждается актами о приемке выполненных работ, подписанными 13.04.2018 и 30.03.2018 соответственно. 

Судом установлено, что ответчик работы на сумму                                  2 879 688 руб. 32 коп. (V этап контракта) выполнил с просрочкой в 116 дня, а на сумму 4 310 710 руб. 92 коп. (VI этап контракта) с нарушением срока на 100 дней. 

Определенность в отношениях сторон по вопросу о размере неустойки, подлежащей уплате в связи с допущенной подрядчиком просрочкой выполнения работ по контракту, наступила в момент окончания исполнения таких обязательств (акты о приемке выполненных работ по V и VI этапу контракта подписаны 30.03.2018 и 13.04.2018), в связи с чем при расчете неустойки необходимо руководствоваться ставкой Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на день прекращения обязательства, в данном случае – 7, 25 процентов.

Данная позиция согласуется с правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определении № 302-ЭС18-10991 от 04.12.2018.

По расчету суда, общий размер неустойки за нарушение сроков выполнения работ по V и VI этапам контракта за период с 19.12.2017 по 13.04.2018 исходя из ставки рефинансирования 7, 25 процентов составит 1 664 124 руб. 99 коп., из них 726 545 руб. 36 коп. – пени за период с 19.12.2017 по 13.04.2018 за нарушение сроков выполнения работ по V этапу контракта, 937 579 руб. 63 коп. – пени за период с 21.12.2017 по 30.03.2018 за нарушение сроков выполнения работ по VI этапу контракта.

В указанной части требования истца о взыскании пени подлежат удовлетворению. 

В удовлетворении остальной части иска суд отказывает.

Расходы по оплате государственной пошлины в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации распределяются между сторонами с учетом результатов рассмотрения дела. В силу подпункта 1.1. пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации истец от уплаты государственной пошлины освобожден.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 176, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить частично.

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Таможенно Транспортный Терминал» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу Управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) неустойку в размере                   1 664 124 руб. 99 коп.

3. В удовлетворении остальной части иска отказать.

4. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Таможенно Транспортный Терминал» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 28 803 руб.

5. Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

6. Разъяснить, что решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд                    (г. Киров) с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики Коми в месячный срок со дня изготовления в полном объеме.

 

Судья                                                                    Д.А. Кирьянов