Арбитражный суд Республики Алтай  649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 4. Тел. (388-22) 4-77-10 (факс)  

http://www.my.arbitr.ru/ http://www.altai.arbitr.ru/ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А02-993/2020

город Горно-Алтайск

27 октября 2022 года

Арбитражный суд Республики Алтай в составе судьи Окуневой И. В., при ведении  протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в судебном  заседании (онлайн-заседание) дело по исковому заявлению Министерства регионального  развития Республики Алтай (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. В.И. Чаптынова,  д. 2, г. Горно-Алтайск, 

<

...>) к индивидуальному предпринимателю  ФИО2 (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Чуйская,  д. 34, с. Онгудай, р-н. Онгудайский, Республика Алтай) об обязании за счет собственных  средств устранить выявленные недостатки работ, выполненных по государственному  контракту № 2019/3369 в рамках гарантийного срока по адресу: Республика Алтай,  

<

...>, а именно:  

1. Осуществить инъектирование существующих трещин в отмостке шириной  раскрытия до 5 мм безусадочным цементным раствором, выполнение отсыпки вымытого  грунта, выполнение работ, препятствующих вымыванию грунта - организация водоотвода  для устранения трещины в отмостке шириной раскрытия до 5 мм, искривления  горизонтальных линий, а также для устранения отсутствия уклона и следов вымывания  частиц грунта талыми и ливневыми водами обнаруженными под конструкцией отмостки;  

2. Осуществить шпатлевание, покраску стен в целях устранения  сколов/трещин штукатурного слоя поверхностей внутренних стен;  

3. Осуществить демонтаж грунтового утеплителя, устройство  пароизоляции, утепление минераловатными утеплителями толщиной 150 мм для  устранения отсутствия теплоизоляции перекрытия;  

4. Осуществить устройство участка облицовки пола кафельной плиткой для устранения  

сопряжения элементов напольных покрытий линолеум- кафельная плитка; 

5. Осуществить регулировку оконного блока, замена уплотнителей для устранения  

промерзания оконного блока; 

6. Осуществить демонтаж имеющегося трубопровода, устройство нового трубопровода  

увеличенного до 150мм сечения, утепление для устранения неработоспособности  

системы вентиляции - повреждение трубопровода, недостаточная высота положения  

относительно конька здания; 

7. Устройство стальных оцинкованных фартуков в местах сопряжения в целях  

устранения отсутствия герметичности в местах проходов трубопроводов вентиляции  

сквозь кровлю; 

8. Осуществить устройство огнебиозащитной обработки деревянных  конструкций в целях устранения отсутствия огнебиозащитная обработка  стропильной системы;  

встречному исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Чуйская, д. 34, с.  Онгудай, р-н. Онгудайский, Респ. Алтай) к Министерство регионального развития  Республики Алтай (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. В.И.Чаптынова, д. 2, г.  Горно-Алтайск, 

<

...>) об обязании совершить действия по устранению  промерзания вентиляционного отверстия на крыше, устранению поражения грибком стен  на кухне, обработке всех деревянных конструкции крыши огнезащитным составом в  помещении, расположенном по адресу 

<

...>.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

решил:

полностью удовлетворить исковые требования Министерства регионального  развития Республики Алтай.  

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО2  (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>, с. Онгудай, район Онгудайский,  

<

...>) устранить выявленные недостатки работ, выполненных по  государственному контракту № 2019/3369 в рамках гарантийного срока по адресу:  Республика Алтай, 

<

...>, а именно:  

осуществить инъектирование существующих трещин в отмостке шириной  раскрытия до 5 мм безусадочным цементным раствором, выполнение отсыпки вымытого  грунта, выполнение работ, препятствующих вымыванию грунта - организация водоотвода  для устранения трещины в отмостке шириной раскрытия до 5 мм, искривления  горизонтальных линий, а также для устранения отсутствия уклона и следов вымывания  частиц грунта талыми и ливневыми водами обнаруженными под конструкцией отмостки;  

осуществить шпатлевание, покраску стен в целях устранения  сколов, трещин штукатурного слоя поверхностей внутренних стен;  

осуществить демонтаж грунтового утеплителя, устройство  пароизоляции, утепление минераловатными утеплителями толщиной 150 мм для  устранения отсутствия теплоизоляции перекрытия;  

осуществить устройство участка облицовки пола кафельной плиткой для  устранения сопряжения элементов напольных покрытий линолеум- кафельная плитка;  

осуществить регулировку оконного блока, замену уплотнителей для устранения  промерзания оконного блока;  

осуществить демонтаж имеющегося трубопровода, устройство нового  трубопровода увеличенного до 150мм сечения, утепление для устранения  неработоспособности системы вентиляции - повреждение трубопровода, недостаточная  высота положения относительно конька здания;  

устройство стальных оцинкованных фартуков в местах сопряжения в целях  устранения отсутствия герметичности в местах проходов трубопроводов вентиляции  сквозь кровлю;  

осуществить устройство огнебиозащитной обработки деревянных  конструкций в целях устранения отсутствия огнебиозащитной обработки  стропильной системы.  

Прекратить производство по встречному исковому заявлению индивидуального  предпринимателя ФИО2 к Министерству регионального развития  Республики Алтай.  

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в  доход федерального бюджета 6000 руб. государственной пошлины.  

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в  пользу Министерства регионального развития Республики Алтай 103 272 руб. судебных  издержек на уплату вознаграждения эксперту.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты изготовления  мотивированного решения в Седьмой Арбитражный апелляционный суд (г. Томск) с  подачей жалобы через Арбитражный суд Республики Алтай.  

Судья И.В. Окунева