АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

http://www.tatarstan.arbitr.ru

тел. (843) 533-50-00

      Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. КазаньДело №А65-11468/2019 

Дата принятия решения – 01 июля 2019 года 

Дата объявления резолютивной части – 24 июня 2019 года.

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Шариповой А.Э., при аудиопротоколировании и ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мусаевой И.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  Общества с ограниченной ответственностью "Мастерстрой", г.Набережные Челны (ОГРН 1131650011811; ИНН 1650266955) к Обществу с ограниченной ответственностью "КапиталСтрой", г.Казань, (ОГРН 1151690099439, ИНН 1660257741) о взыскании 3 814 677.45 рублей.

при участии:

от истца – ФИО1, представитель по доверенности от 01.01.2019 г.,

от ответчика – не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Мастерстрой", г.Набережные Челны (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) обратилось в Арбитражный суд Ресупблики Татарстан с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "КапиталСтрой", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 3 814 677.45 рублей долга.

От ответчика через канцелярию суда поступил отзыв на исковое заявление, которым ответчик  не согласился с заявленными требованиями, пояснил, что уведомления о завершении работ им не было получено,  в связи с чем считает не законным одностороннее подписание актов.  На требование об оплате результатов работ ответил мотивированным отказом, считает что истец не доказал факта наличия задолженности на стороне ответчика. 

 Ответчик надлежащим образом извещенный о времени и месте проведения предварительного судебного заседания, в судебное заседание не явился. В соответствии со статьей 136 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд определил провести судебное заседание в отсутствие ответчика.

Истец в судебном заседании исковые требования поддержал, пояснил, что на момент проведения судебного заседания на стороне ответчика имеется задолженность, которая не погашена. Работы были выполнены в полном объеме, ответчик уклоняется от приемки выполненных работ, выполненные работы не принял и не оплатил. Ходатайствовал о приобщении исполнительной документации, в подтверждение выполнения работ по договору. 

Суд в порядке ст. 159 Арбитражного процессуального кодекса приобщил представленные документы к материалам дела. 

Иных заявлений, ходатайств не поступило.

Арбитражный суд при отсутствии возражений сторон в порядке, предусмотренном статьей 137 Арбитражного процессуального кодекса РФ и согласно пункту 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 декабря 2006 г. №65 «О подготовке дела к судебному разбирательству», завершил предварительное судебное заседание и начал рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции.

Ответчик надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явился. В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ арбитражный  суд определил рассмотреть дело в отсутствие представителя ответчика.

Истец исковые требования поддержал по основаниям указанным в исковом заявлении, просил иск удовлетворить. 

Заявлений, ходатайств в арбитражный суд не поступило.

Как следует из искового заявления, истец на основании договора субподряда №1с/16 от 01.03.2016г. выполнил для ответчика работы на общую сумму 4 855 351,96 руб. (в т.ч. НДС) (в т.ч. НДС), что подтверждается актами приемки выполненных работ формы КС-2 и справками о стоимости выполненных работ формы КС-3. Выполнение работ было осуществлено в период с 2016 по 2018г., а сам результат работ фактически был передан подрядчику, который, в свою очередь, передал результат работ заказчику (ПАО «Таттелеком»). Результат работ эксплуатируется с 2016г. Ответчик платежными поручениями за период с 30.06.2016г. по 21.06.2017г. уплатил 1 040 674,51 руб. Письмом от 31.01.2019г. истец уведомил ответчика о необходимости организации приемки выполненных работ, направило в адрес «Капиталстрой» все необходимые для приемки результата работ документы, а на основании ч.2 ст.753 ГК РФ потребовало от ООО «Капиталстрой» организовать приемку результата работ в период с 14.02.2019г. по 22.02.2019г. по адресам места выполнения работ. Письмом от 22.02.2019г. истец потребовал оплатить результаты работ. Ответчик от приемки работ уклонился, выполненные работы не оплатил, что послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Исследовав материалы настоящего дела в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд находит правовые основания для  удовлетворения иска.

Как следует из материалов дела, между истцом (субподрядчик)  и ответчиком (подрядчик)  заключен договора субподряда №1с/16 от 01.03.2016г., по условиям которого  Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по строительству кабельной канализации, линейных сооружений связи, распределительных сетей (далее по тексту - Объект) для обеспечения технической возможности оказания услуг связи и сдать результат Подрядчику, а Подрядчик принять результат и оплатить его.

Работа считается выполненной Субподрядчиком после передачи Подрядчику надлежаще оформленной исполнительно-технической документации и подписания акта приема-сдачи работы Подрядчиком или его уполномоченным представителем (пункт 1.5 договора).

Разделом 3 договора стороны согласовали стоимость работ и порядок расчетов по договору, согласно которого  стоимость будет определяться из расчёта стоимости фактически выполненных работ согласно с формами №КС-2 и №КС-3 в соответствии с рабочими чертежами.

Пунктом 3.2 договора стороны предусмотрели, что  подрядчик не позднее 20 дней после подписания им актов приёмки выполненных работ по форме №КС-2 и справке о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 обязуется оплатить Субподрядчику 90% установленной стоимости работ выполненного этапа.

Окончательный расчёт за выполненные работы по объекту производится Подрядчиком не позднее 1-го месяца после завершения работ, устранения выявленных дефектов и подписания акта приёмки КС-14, оформленного в установленном порядке.

Субподрядчик ежемесячно в срок до 25 числа предоставляет: Для подписания оформленные акты приемки выполненных работ, за подписями начальника ЗУЭС, заместителя начальника ЗУЭС по капитальному строительству, начальника РУЭС, по формам КС-2 (Акт приёмки выполненных работ, означает унифицированная форма первичной бухгалтерской учётной документацией по форме КС-2, утверждённая Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. № 100, подтверждающий и фиксирующий выполнение Субподрядчиком определённого вида, объёма или части работ в соответствии с условиями договора. Подписание Подрядчиком данного акта по форме КС-2 не является частичной приёмкой комплекса работ, а свидетельствует лишь о том, что Подрядчик подтверждает и принимает к оплате указанный объём работ, выполненный Субподрядчиком) и справки об их стоимости по форме КС-3 ( по требованию Подрядчика, в двухдневный срок передает формы КС-2 в электронном виде). Указанные акты КС-2, КС-3 составляются исключительно в целях бухгалтерского, налогового учёта и осуществления расчётов между сторонами и не лишают Подрядчика права ссылаться в последующем на любые недостатки в выполненных Субподрядчиком работах;  Оформленные исполнительные схемы и чертежи на выполненный объем работ, необходимые акты на скрытые работы, а также, по требованию Подрядчика, первичные бухгалтерские документы на применённые материалы и оборудование.

Стороны предусмотрели обязательный претензионный порядок пунктом 9.2 договора, который предусматривает рассмотрение претензии в течении  30 дней. 

Дополнительным соглашением №1 к договору субподряда №1с/16 от 01.03.2016г. от 16.03.2016 стороны согласовали, титул объекта:  Строительство кабельной канализации, линий связи (ВОЛС), ДРС, ДРС КТВ до жилого дома по адресу: г.Н.Челны, Замелекесье, ж.д.22/02 и обусловили, что предварительная стоимость работ по настоящему дополнительному соглашению, составляет 1 110 354,27 руб.. Фактическая стоимость работ будет определяться формами № КС-2 и № КС-3 в соответствии с ПСД. Подрядчик не позднее 20 дней после подписания им актов приёмки выполненных работ по форме № КС-2 и справке о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 обязуется оплатить Субподрядчику 90% установленной стоимости работ. Окончательный расчёт за выполненные работы по объекту производится Подрядчиком не позднее 1-го месяца после завершения работ, устранения выявленных дефектов и подписания акта приёмки объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке.

Дополнительным соглашением №2 к договору субподряда №1с/16 от 01.03.2016г. от 16.03.2016 стороны согласовали, титул объекта:  Строительство кабельной канализации, линий связи (ВОЛС), ДРС, ДРС КТВ до жилого дома по адресу: 

<

...> очередь, блок 4, строящийся жилой дом и обусловили, что Предварительная стоимость работ по настоящему дополнительному соглашению, составляет 555 334,44 руб. (Пятьсот пятьдесят пять тысяч триста тридцать четыре рубля 44 копейки) , в том числе НДС 18 % - 84 712,03 руб. Фактическая стоимость работ будет определяться формами № КС-2 и № КС-3 в соответствии с ПСД.  Подрядчик не позднее 20 дней после подписания им актов приёмки выполненных работ по форме № КС-2 и справке о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 обязуется оплатить Субподрядчику 90% установленной стоимости работ. Окончательный расчёт за выполненные работы по объекту производится Подрядчиком не позднее 1-го месяца после завершения работ, устранения выявленных дефектов и подписания акта приёмки объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке.

Дополнительным соглашением №3 к договору субподряда №1с/16 от 01.03.2016г. от 16.03.2016 стороны согласовали, титул объекта:  Строительство кабельной канализации, линий связи (ВОЛС), ДРС, ДРС КТВ до жилого дома по адресу: г. Н.Челны, жилой дом 65/17  и обусловили, что предварительная стоимость работ по настоящему дополнительному соглашению, составляет 667 235,48 руб. (Шестьсот шестьдесят семь тысяч двести тридцать пять рублей 48 копеек) , в том числе НДС 18 % - 101 781,68 руб. Фактическая стоимость работ будет определяться формами № КС-2 и № КС-3 в соответствии с ПСД.    Подрядчик не позднее 20 дней после подписания им актов приёмки выполненных работ по форме № КС-2 и справке о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 обязуется оплатить Субподрядчику 90% установленной стоимости работ. Окончательный расчёт за выполненные работы по объекту производится Подрядчиком не позднее 1-го месяца после завершения работ, устранения выявленных дефектов и подписания акта приёмки объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке.

Дополнительным соглашением №4 к договору субподряда №1с/16 от 01.03.2016г. от 16.03.2016 стороны согласовали, титул объекта:  Строительство кабельной канализации, линий связи (ВОЛС), ДРС, ДРС КТВ до жилого дома по адресу: г. Н.Челны, жилой дом 65/18  и обусловили, что Предварительная стоимость работ по настоящему дополнительному соглашению, составляет 634 939,45 руб. (Шестьсот тридцать четыре тысячи девятьсот тридцать девять рублей 45 копеек) , в том числе НДС 18 % -96 855,17 руб. Фактическая стоимость работ будет определяться формами № КС-2 и № КС-3 в соответствии с ПСД. Подрядчик не позднее 20 дней после подписания им актов приёмки выполненных работ по форме № КС-2 и справке о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 обязуется оплатить Субподрядчику 90% установленной стоимости работ. Окончательный расчёт за выполненные работы по объекту производится Подрядчиком не позднее 1-го месяца после завершения работ, устранения выявленных дефектов и подписания акта приёмки объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке.

Дополнительным соглашением №5 к договору субподряда №1с/16 от 01.03.2016г. от 16.03.2016 стороны согласовали, титул объекта Строительство кабельной канализации, линий связи (ВОЛС), ДРС до ИП ФИО2 по адресу: г.Н.Челны, п. ГЭС, Д.9/05А стр."  и обусловили, что Предварительная стоимость работ по настоящему дополнительному соглашению, составляет 71 935,32 руб. (Семьдесят одна тысяча девятьсот тридцать пять рублей 32 копейки) , в том числе НДС 18 % - 10 973,19 руб. Фактическая стоимость работ будет определяться формами № КС-2 и № КС-3 в соответствии с ПСД. Подрядчик не позднее 20 дней после подписания им актов приёмки выполненных работ по форме № КС-2 и справке о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 обязуется оплатить Субподрядчику 90% установленной стоимости работ. Окончательный расчёт за выполненные работы по объекту производится Подрядчиком не позднее 1-го месяца после завершения работ, устранения выявленных дефектов и подписания акта приёмки объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке.

Дополнительным соглашением №6 к договору субподряда №1с/16 от 01.03.2016г. от 16.03.2016 стороны согласовали, титул объекта:  Строительство кабельной канализации, линий связи (ВОЛС), ДРС, ДРС КТВ до жилого дома по адресу: 

<

...> очередь, блок 7, строящийся жилой дом  и обусловили, что Предварительная стоимость работ по настоящему дополнительному соглашению, составляет 173 962,03 руб. (Сто семьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят два рубля 03 копейки) , в том числе НДС 18 % - 26 536,58 руб. Фактическая стоимость работ будет определяться формами № КС-2 и № КС-3 в соответствии с ПСД. Подрядчик не позднее 20 дней после подписания им актов приёмки выполненных работ по форме № КС-2 и справке о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 обязуется оплатить Субподрядчику 90% установленной стоимости работ. Окончательный расчёт за выполненные работы по объекту производится Подрядчиком не позднее 1-го месяца после завершения работ, устранения выявленных дефектов и подписания акта приёмки объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке.

Дополнительным соглашением №7 к договору субподряда №1с/16 от 01.03.2016г. от 16.03.2016 стороны согласовали, титул объекта:  Строительство кабельной канализации, линий связи (ВОЛС), ДРС, ДРС КТВ до жилого дома по адресу: г.Н.Челны, 

<

...>  и обусловили, что Предварительная стоимость работ по настоящему дополнительному соглашению, составляет 369 699,46 руб. (Триста шестьдесят девять тысяч шестьсот девяносто девять рублей 46 копеек) , в том числе НДС 18 % -56 394,83 руб. Фактическая стоимость работ будет определяться формами № КС-2 и № КС-3 в соответствии с псд. Подрядчик не позднее 20 дней после подписания им актов приёмки выполненных работ по форме № КС-2 и справке о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 обязуется оплатить Субподрядчику 90% установленной стоимости работ. Окончательный расчёт за выполненные работы по объекту производится Подрядчиком не позднее 1-го месяца после завершения работ, устранения выявленных дефектов и подписания акта приёмки объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке.

Дополнительным соглашением №8 к договору субподряда №1с/16 от 01.03.2016г. от 16.03.2016 стороны согласовали, титул объекта:  Строительство кабельной канализации, линий связи (ВОЛС), ДРС, ДРС КТВ до жилого дома по адресу: г.Н.Челны, ж.д. 51/04 А и обусловили, что предварительная стоимость работ по настоящему дополнительному соглашению, составляет 335 258,58 руб. (Триста тридцать пять тысяч двести пятьдесят восемь рублей 58 копеек) , в том числе НДС 18 % - 51 141,14 руб. Фактическая стоимость работ будет определяться формами № КС-2 и № КС-3 в соответствии с ПСД. Подрядчик не позднее 20 дней после подписания им актов приёмки выполненных работ по форме № КС-2 и справке о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 обязуется оплатить Субподрядчику 90% установленной стоимости работ. Окончательный расчёт за выполненные работы по объекту производится Подрядчиком не позднее 1-го месяца после завершения работ, устранения выявленных дефектов и подписания акта приёмки объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке.

Дополнительным соглашением №9 к договору субподряда №1с/16 от 01.03.2016г. от 16.03.2016 стороны согласовали, титул объекта:  Строительство кабельной канализации, линий связи (ВОЛС), ДРС, ДРС КТВ, абонентской сети до жилого дома по адресу: г.Н.Челны, Новый город, 21 микрорайон, блок Б  и обусловили, что Предварительная стоимость работ по настоящему дополнительному соглашению, составляет 986 773,72 руб. (Девятьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят три рубля 72 копейки) , в том числе НДС 18 % -150 524,81 руб. Фактическая стоимость работ будет определяться формами № КС-2 и № КС-3 в соответствии с ПСД. Подрядчик не позднее 20 дней после подписания им актов приёмки выполненных работ по форме № КС-2 и справке о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 обязуется оплатить Субподрядчику 90% установленной стоимости работ. Окончательный расчёт за выполненные работы по объекту производится Подрядчиком не позднее 1-го месяца после завершения работ, устранения выявленных дефектов и подписания акта приёмки объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке.

Дополнительным соглашением №10 к договору субподряда №1с/16 от 01.03.2016г. от 16.03.2016 стороны согласовали, титул объекта:  Строительство кабельной канализации, линий связи (BOJ1C), ДРС, ДРС КТВ   до жилого дома по адресу: г.Н.Челны, Замелекесье, 26 микрорайон (Сармановский тракт), д. 1  и обусловили, что Предварительная стоимость работ по настоящему дополнительному соглашению, составляет 576 568,96 руб. (Пятьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят восемь рублей 96 копеек) , в том числе НДС 18 % -87 951,20 руб. Фактическая стоимость работ будет определяться формами № КС-2 и № КС-3 в соответствии с псд. Подрядчик не позднее 20 дней после подписания им актов приёмки выполненных работ по форме № КС-2 и справке о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 обязуется оплатить Субподрядчику 90% установленной стоимости работ. Окончательный расчёт за выполненные работы по объекту производится Подрядчиком не позднее 1-го месяца после завершения работ, устранения выявленных дефектов и подписания акта приёмки объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке.

Дополнительным соглашением №12 к договору субподряда №1с/16 от 01.03.2016г. от 16.03.2016 стороны согласовали, титул объекта:  Строительство кабельной канализации, линий связи (ВОЛС), ДРС, ДРС КТВ, сети эфирного ТВ приема, абонентской сети до жилого дома по адресу: г.Н.Челны. Новый город, 21 микрорайон, блок В и обусловили, что Предварительная стоимость работ по настоящему дополнительному соглашению, составляет 795 545,26 руб. (Семьсот девяносто пять тысяч пятьсот сорок пять рублей 26 копеек), в том числе НДС 18 % - 121 354,36 руб. Фактическая стоимость работ будет определяться формами № КС-2 и № КС-3 в соответствии с ПСД. Подрядчик не позднее 20 дней после подписания им актов приёмки выполненных работ по форме № КС-2 и справке о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 обязуется оплатить Субподрядчику 90% установленной стоимости работ. Окончательный расчёт за выполненные работы по объекту производится Подрядчиком не позднее 1-го месяца после завершения работ, устранения выявленных дефектов и подписания акта приёмки объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке.

Дополнительным соглашением №13 к договору субподряда №1с/16 от 01.03.2016г. от 16.03.2016 стороны согласовали, титул объекта:  Строительство кабельной канализации, линии связи (ВОЛС) до ООО ТД «ЦентрЗапчасть» по адресу: г.Н.Челны, Мензелинский тр., д.66 и обусловили, что Предварительная стоимость работ по настоящему дополнительному соглашению, составляет 779 019,57 руб. (Семьсот семьдесят девять тысяч девятнадцать рублей 57 копеек) , в том числе НДС 18 % - 118 833,49 руб. Фактическая стоимость работ будет определяться формами № КС-2 и № КС-3 в соответствии с ПСД. Подрядчик не позднее 20 дней после подписания им актов приёмки выполненных работ по форме № КС-2 и справке о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 обязуется оплатить Субподрядчику 90% установленной стоимости работ. Окончательный расчёт за выполненные работы по объекту производится Подрядчиком не позднее 1-го месяца после завершения работ, устранения выявленных дефектов и подписания акта приёмки объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке.

Дополнительным соглашением №1 к договору субподряда №1с/16 от 01.03.2016г. от 16.03.2016 стороны согласовали, титул объекта:  строительство кабельной канализации, линий связи (BOJ1C), п. Замелекесьс. ж.д. 20/02  и обусловили, что Предварительная стоимость работ по настоящему дополнительному соглашению, составляет 774 918,45 руб. (Семьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот восемнадцать рублей 45 копеек) , в том числе НДС 18 % -1 18 207.90 р\б. Фактическая стоимость работ будет определяться формами № КС-2 и № КС-3 в соответствии с ПСД. Подрядчик не позднее 20 дней после подписания им актов приёмки выполненных работ по форме № КС-2 и справке о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 обязуется оплатить Субподрядчику 90% установленной стоимости работ. Окончательный расчёт за выполненные работы по объекту производится Подрядчиком не позднее 1-го месяца после завершения работ, устранения выявленных дефектов и подписания акта приёмки объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке.

Требованием о приемке и оплате результата работ по договору  № 1с/16 от 01.03.2016 от 31.01.2019  истец направил ответчику акты  приемки выполненных работ и справки о выполненных работах и затратах. Этим же письмом истец определил график приемки результата работ. Направление письма подтверждается чек ордером об отправке почтового отправления от 31.01.2019, описью вложений в почтовое отправление, отчетом об отслеживании оправления с почтовым идентификатором. 

Несмотря на почтовое уведомление, адресат за получением судебного акта в орган связи не явился. Ответчик не обеспечил надлежащее получение корреспонденции по адресу места регистрации и по адресу, указанному при подписании договора.

Как следует из разъяснений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, сформулированных в п. 1 Постановления Пленума от 30.07.2013 № 61 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица", при разрешении споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица, следует учитывать, что в силу подп. "в" п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" адрес постоянно действующего исполнительного органа юридического лица отражается в едином государственном реестре юридических лиц для целей осуществления связи с юридическим лицом. 

Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, поступивших по его адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а также риск отсутствия по этому адресу своего представителя, и такое юридическое лицо не вправе в отношениях с лицами, добросовестно полагавшимися на данные ЕГРЮЛ об адресе юридического лица, ссылаться на данные, не внесенные в указанный реестр, а также на недостоверность данных, содержащихся в нем (в том числе на ненадлежащее извещение в ходе рассмотрения дела судом, в рамках производства по делу об административном правонарушении и т.п.), за исключением случаев, когда соответствующие данные внесены в ЕГРЮЛ в результате неправомерных действий третьих лиц или иным путем помимо воли юридического лица.

Актами о неявке заказчика для приемки результата работ зафиксировано отсутствие представителя ответчика при сдаче выполненных работ заказчику. 

Актами  о приемке законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС 14 принято решение о выполнении работ в соответствии с проектом.

В подтверждение выполнения работ по дополнительному соглашению № 1 истец представил  Акт №  01/007/1  о приемке выполненных работ от  30.01.2019г. на сумму 179 158,24 руб.,  Акт №  01/007/2  о приемке выполненных работ от  30.01.2019г. на сумму 106 7145,35 руб.,  Акт №  01/007/3  о приемке выполненных работ от  30.01.2019г. на сумму 47 852,34  руб.,  Акт №  01/007/4  о приемке выполненных работ от  30.01.2019г. на сумму 121 495,78 руб.,  Акт №  01/007/5  о приемке выполненных работ от  30.01.2019г. на сумму 6 609,60 руб., Справку №01/007  о стоимости выполненных работ и затрат от 30.01.2019г. на сумму 461 831,30 руб.. 

В подтверждение выполнения работ по дополнительному соглашению №2  истец представил  Акт № 01/004/01 о приемке выполненных работ  от 30.01.2019г. на сумму 338 902,10 руб.,  Акт № 01/004/02 о приемке выполненных работ от 30.01.2019г. на сумму 67 648,87 руб.,  Акт № 01/004/03 о приемке выполненных работ от 30.01.2019г. на  сумму 22 858,69 руб.,  Справку  № 01/004 о стоимости выполненных  работ и затрат  от 30.01.2019г. на сумму 429 409,67 руб.. 

В подтверждение выполнения работ по дополнительному соглашению № 3 истец представил   Акт №  01/008/1  о приемке выполненных работ от  30.01.2019г. на сумму 125 397,05 руб.,  Акт №  01/008/2  о приемке выполненных работ от  30.01.2019г. на сумму 176 787,76 руб., Акт 01/008/3  о приемке выполненных работ от  30.01.2019г. на сумму 52 617,07  руб.,  Акт №  01/008/4  о приемке выполненных работ от  30.01.2019г. на сумму 30 183,98 руб.,  Акт №  01/008/5  о приемке выполненных работ от  30.01.2019г. на сумму 24 406,85 руб.,  Акт №  01/008/6  о приемке выполненных работ от  30.01.2019г. на сумму 8 262 руб., Справку № 01/008  о стоимости выполненных работ и затрат от 30.01.2019г.  на сумму  417 653,71 руб..

В подтверждение выполнения работ по дополнительному соглашению № 4  истец представил   Акт №  01/009/1  о приемке выполненных работ от  30.01.2019г. на сумму 131 075,02 руб.,  Акт №  01/009/2  о приемке выполненных работ от  30.01.2019г. на сумму 32 430,84 руб.,  Акт №  01/009/3  о приемке выполненных работ от  30.01.2019г. на сумму 102 157,91 руб.,  Акт №  01/009/4  о приемке выполненных работ от  30.01.2019г. на сумму 4 039,20 руб., Справку № 01/009  о стоимости выполненных работ и затрат от 30.01.2019г. на сумму 269 702,96 руб..

В подтверждение выполнения работ по дополнительному соглашению № 5 истец представил  Акт №  01/006/1  о приемке выполненных работ от  30.01.2019г. на сумму 39 796,81 руб.,  Акт №  01/006/2  о приемке выполненных работ от  30.01.2019г. на сумму 14 700,16 руб., Справка 01/006  о стоимости выполненных работ и затрат от 30.01.2019г. на сумму 54 496,97 руб..

В подтверждение выполнения работ по дополнительному соглашению № 6 истец представил  Акт №  01/005/1  о приемке выполненных работ от  30.01.2019г. на сумму 97 912,44 руб., Акт №  01/005/2  о приемке выполненных работ от  30.01.2019г. на сумму 45 386,82 руб.,  Акт №  01/005/3  о приемке выполненных работ от  30.01.2019г. на сумму 17 539,18  руб., Справку № 01/005  о стоимости выполненных работ и затрат от 30.01.2019г. на сумму 160 838,44 руб..

В подтверждение выполнения работ по дополнительному соглашению № 7 истец представил   Акт № 01/003/1 о приемке выполненных работ от 30.01.2019г. на сумму 78 924,48 руб., Акт № 01/003/2 о приемке выполненных работ от 30.01.2019г. на сумму 38 876,87 руб.,  Акт № 07/003/3 о приемке выполненных работ от 30.01.2019г. на сумму 15 883,81 руб.,  Акт 01/003/4 о приемке выполненных работ от 30.01.2019г. на сумму 50 841,34 руб., Акт № 01/003/5 о приемке выполненных работ  от 30.01.2019г. на сумму 58 728,98 руб.. Справку № 01/003 о стоимости выполненных работ и затрат от 30.01.2019г.  на сумму 243 255,48 руб., 

В подтверждение выполнения работ по дополнительному соглашению №8 истец представил   Акт №  01/002/1 о приемке выполненных работ от 30.01.2019г. на сумму 50 072,63 руб.,  Акт №  01/002/2 о приемке выполненных работ от 30.01.2019г. на сумму 96 955,85 руб.,   Акт №  01/002/3 о приемке выполненных работ от 30.01.2019г. на сумму 26 603,02 руб., Акт №  01/002/4 о приемке выполненных работ от 30.01.2019г. на сумму 2 847,96 руб.,  Акт №  01/002/5 о приемке выполненных работ от 30.01.2019г. 33 574,67 руб.,  Акт №  01/002/6 о приемке выполненных работ от 30.01.2019г. на сумму 3 672 руб..   Справку № 01/002 о стоимости выполненных работ и затрат от 30.01.2019г. на сумму 213 726,12 руб..

В подтверждение выполнения работ по дополнительному соглашению № 9 истец представил Акт №  01/011/1  о приемке выполненных работ от  30.01.2019г. на сумму 129 699 руб.,  Акт №  01/011/2  о приемке выполненных работ от  30.01.2019г. на сумму 122 643,56 руб., Акт №  01/011/3  о приемке выполненных работ от  30.01.2019г. на сумму 30 093,01 руб., Акт №  01/011/4  о приемке выполненных работ от  30.01.2019г. на сумму 191 943,59 руб., Акт №  01/011/5  о приемке выполненных работ от  30.01.2019г. на сумму 105 842,83 руб.,  Акт №  01/011/6  о приемке выполненных работ от  30.01.2019г. на сумму 16 691,75 руб.. Справку №  01/011  о стоимости выполненных работ и затрат от 30.01.2019г. на сумму 656 913,74 руб..

В подтверждение выполнения работ по дополнительному соглашению № 10 истец представил     Акт №  01/013/1  о приемке выполненных работ от  30.01.2019г. на сумму 218 312,50 руб.,  Акт №  01/013/2  о приемке выполненных работ от  30.01.2019г. на сумму 194 477,76 руб., Справку № 01/013  о стоимости выполненных работ и затрат от 30.01.2019г. на сумму 412 790,26 руб..

В подтверждение выполнения работ по дополнительному соглашению № 12 истец представил    Акт №  01/010/1 о приемке выполненных работ от  30.01.2019г. на сумму 85 128,54 руб.,  Акт №  01/010/2  о приемке выполненных работ от  30.01.2019г. на сумму 139 358,84 руб.,  Акт №  01/010/3 о приемке выполненных работ от  30.01.2019г. на сумму 29 302,10 руб.,  Акт №  01/010/4 о приемке выполненных работ от  30.01.2019г. на сумму 221 658,96 руб.. Справку № 01/010  о стоимости выполненных работ и затрат от 30.01.2019г. на сумму 475 448,45 руб..

В подтверждение выполнения работ по дополнительному соглашению № 13  истец представил   Акт №  01/001/1  о приемке выполненных работ от  09.01.2019г. на сумму 42 989,56 руб.,  Акт №  01/001/2  о приемке выполненных работ от  09.01.2019г. на сумму 239 623,15 руб.,  Акт №  01/001/3  о приемке выполненных работ от  09.01.2019г. на сумму 119 402,42 руб.,  Акт №  01/001/4  о приемке выполненных работ от  09.01.2019г. на сумму 98 982,54 руб., Справку 01/001  о стоимости выполненных работ и затрат от 09.01.2019г. на сумму 498 997,67 руб..

В подтверждение выполнения работ по дополнительному соглашению № 14 истец представил   Акт №  01/012/1  о приемке выполненных работ от  30.01.2019г. на сумму 213 409,78 руб., Акт №  01/012/2  о приемке выполненных работ от  30.01.2019г. на сумму 133 129,08 руб., Акт №  01/012/3  о приемке выполненных работ от  30.01.2019г. на сумму 46 578,19 руб.,  Акт №  01/012/4  о приемке выполненных работ от  30.01.2019г. на сумму 97 938,41 руб.,  Акт №  01/012/5  о приемке выполненных работ от  30.01.2019г. на сумму 69 231,64 руб.. Справку №01/012  о стоимости выполненных работ и затрат от 30.01.2019г.  560 287,09 руб..

Истцом ответчику выставлены Счет-фактуры выполненным работам на основании справок и выполненных работах и затратах по форме КС-3.

Требованием об оплате результата работ по договору №1с/16 от 01.03.2016 истец потребовал оплаты стоимости выполненных работ. 

Исковые требования мотивированы тем, что ответчик от приемки выполненных работ уклонился, обязательства по оплате стоимости выполненных работ не  осуществил, в полном объеме стоимость выполненных работ не оплатил.

Арбитражный суд на основании пункта 1 статьи 133, пункта 1 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса РФ с учетом обстоятельств, приведенных в обоснование иска, самостоятельно определяет характер спорного правоотношения, возникшего между сторонами по делу, а также нормы законодательства, подлежащие применению (аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 16 ноября 2010 года № 8467/10).

Исходя из предмета и условий договора субподряда №1с/16 от 01.03.2016г., арбитражный суд приходит к выводу о его правовой квалификации как договора подряда, подпадающего в сферу правового регулирования главы 37 Гражданского кодекса РФ.

Согласно статье 758 Гражданского кодекса РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить результат.

В соответствии с пунктом 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 января 2000 г. № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

По существу правовой спор между сторонами возник по поводу приемки работ, предъявленных истцом ответчику на общую сумму 3 814 677,45 руб..

В порядке, предусмотренном статьями 720, 753, 760 Гражданского кодекса РФ и договором, выполненные по договору работы, отраженные в  актах по форме кс-2 и кс-3, направлены ответчику.

Данные действия истца не противоречат положениям статей 720, 753, 760 Гражданского кодекса РФ и условиям договора и являются надлежащим исполнением обязанности по предъявлению результата работ к приемке.

Как следует из пункта 14 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24.01.2000 №51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда», в соответствии с пунктом 4 статьи 753 Гражданского кодекса РФ, сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в том случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Названные нормы защищают интересы подрядчика, если заказчик необоснованно отказался от надлежащего оформления документов, удостоверяющих приемку. В силу изложенного, бремя доказывания наличия уважительных причин отказа от приемки выполненных работ лежит на ответчике.

Ответчик, получив от истца результат выполненных работ, предъявленный последним ответчику к приемке, работы, выполненные истцом по договору,  не принял, указанный акт не подписал. При этом в ходе рассмотрения дела ответчик о наличии недостатков в выполненных истцом работах не заявлял.

Между тем, при оспаривании заказчиком объема и стоимости выполненных работ, то данное обстоятельство, с учетом пункта 5 статьи 720, пункта 6 статьи 753 Гражданского кодекса РФ, может быть установлено только экспертным путем.

Таким образом, в силу указанных норм именно на ответчика возлагается обязанность принять выполненные работы по объему, стоимости и качеству, а в случае наличия разногласий относительно выполненных работ должна быть назначена экспертиза.

При этом определением от 30.04.2019 года ответчику было предложено рассмотреть возможность проведения судебной экспертизы, в том числе на предмет установления фактического выполнения истцом работ, объем таких работ, стоимость и соответствия выполненных работ условиям принятых на себя обязательств. Однако в ходе рассмотрения дела правом, предусмотренном статьей 82 Арбитражного процессуального кодекса РФ, не воспользовался, такого ходатайства не заявил.

В ходе рассмотрения настоящего дела ответчиком в нарушение пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса РФ, статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ не были представлены достаточные и допустимые доказательства наличия у ответчика мотивированных и обоснованных возражений об отказе в приемке выполненных истцом работ.

Учитывая изложенное, оценив имеющиеся в материалах дела доказательства в их совокупности и взаимной связи, с учетом представленных сторонами в материалы дела доказательств арбитражный суд приходит к выводу, что мотивы отказа ответчика от приемки работ, отраженных в спорном акте являются необоснованными и подлежат оплате по оформленным истцом в одностороннем порядке акту приемки выполненных работ.

Как следует из положений раздела 4 договора,  стороны согласовали  порядок приемки выполненных работ. В соответствии с условиями договора истец уведомил ответчика об окончании работ, предпринял меры для комиссионного приема объема выполненных работ, направил акты на подписание ответчику. 

В тоже время  в материалах дела отсутствуют доказательства исполнения ответчиком  указанных обязательств в установленные договором сроки, в том числе обязательства по перечислению авансового платежа, ответчиком таких доказательств суду не представлено, а истец указанные обстоятельства оспаривает и не признает.

Истцом представлена исполнительная документация  на объекты:  Строительство кабельной канализации, линий связи (ВОЛС), ДРС, ДРС КТВ до жилого дома по адресу: г.Н.Челны, Замелекесье, ж.д.22/02, Строительство кабельной канализации, линий связи (ВОЛС), ДРС, ДРС КТВ до жилого дома по адресу: 

<

...> очередь, блок 4, строящийся жилой дом, Строительство кабельной канализации, линий связи (ВОЛС), ДРС, ДРС КТВ до жилого дома по адресу: г. Н.Челны, жилой дом 65/17 , Строительство кабельной канализации, линий связи (ВОЛС), ДРС, ДРС КТВ до жилого дома по адресу: г. Н.Челны, жилой дом 65/18, Строительство кабельной канализации, линий связи (ВОЛС), ДРС до ИП ФИО2 по адресу: г.Н.Челны, п. ГЭС, Д.9/05А стр.",   Строительство кабельной канализации, линий связи (ВОЛС), ДРС, ДРС КТВ до жилого дома по адресу: 

<

...> очередь, блок 7, строящийся жилой дом,   Строительство кабельной канализации, линий связи (ВОЛС), ДРС, ДРС КТВ до жилого дома по адресу: г.Н.Челны, 

<

...>,  Строительство кабельной канализации, линий связи (ВОЛС), ДРС, ДРС КТВ до жилого дома по адресу: г.Н.Челны, ж.д. 51/04 А,  Строительство кабельной канализации, линий связи (ВОЛС), ДРС, ДРС КТВ, абонентской сети до жилого дома по адресу: г.Н.Челны, Новый город, 21 микрорайон, блок Б,  Строительство кабельной канализации, линий связи (BOJ1C), ДРС, ДРС КТВ   до жилого дома по адресу: г.Н.Челны, Замелекесье, 26 микрорайон (Сармановский тракт), д. 1, Строительство кабельной канализации, линий связи (ВОЛС), ДРС, ДРС КТВ, сети эфирного ТВ приема, абонентской сети до жилого дома по адресу: г.Н.Челны. Новый город, 21 микрорайон, блок В,  Строительство кабельной канализации, линии связи (ВОЛС) до ООО ТД «ЦентрЗапчасть» по адресу: г.Н.Челны, Мензелинский тр., д.66,   Строительство кабельной канализации, линий связи (BOJ1C), п. Замелекесьс. ж.д. 20/02, сданная подрядчиком ( ответчиком) заказчику. 

Таким образом, материалами дела подтверждается выполнение истцом работ по договору подряда на общую сумму 3 814 677,45 руб.  и их приемка ответчиком.

В соответствии с пунктом 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 января 2000 г. № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Согласно статье 762 Гражданского кодекса РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан, если иное не предусмотрено договором уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ.

Исходя из содержания дополнительных соглашений, подрядчик не позднее 20 дней после подписания им актов приёмки выполненных работ по форме № КС-2 и справке о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 обязуется оплатить Субподрядчику 90% установленной стоимости работ. Окончательный расчёт за выполненные работы по объекту производится Подрядчиком не позднее 1-го месяца после завершения работ, устранения выявленных дефектов и подписания акта приёмки объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается (статьей 310 Гражданского кодекса РФ).

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (статья 9 Арбитражного процессуального кодекса РФ).

Арбитражным судом Республики Татарстан определением от 30.04.2019 года ответчику было предложено представить надлежащие доказательства исполнения обязательств по договору. Однако в нарушении указанных выше процессуальных норм ответчиком не были представлены допустимые доказательства оплаты истцу задолженности по договору.

В соответствии с частью 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Следовательно, нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументировано со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 06.03.2012 года № 12505/11).

Часть 5 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса РФ предусматривает, что обстоятельства, признанные и удостоверенные сторонами в порядке, установленном этой статьей, в случае их принятия арбитражным судом не проверяются им в ходе дальнейшего производства по делу. 

В соответствии с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, изложенной в постановлении от 15.10.2013 года № 8127/13, положения части 5 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса РФ распространяются на обстоятельства, которые считаются признанными стороной в порядке части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

В силу части 3.1. статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. Ответчик, при его надлежащем уведомлении о начавшемся в отношении него арбитражном процессе, мотивированные возражения относительно предъявленных исковых требований в арбитражный суд не направил, доказательства, опровергающие доводы истца не представил.

С учетом изложенного, принимая во внимание, что выполнение обязательств истцом подтверждается материалами дела и ответчиком доказательств оплаты задолженности не представлено, требование истца о взыскании долга на сумму 3 814 677,45 руб.  правомерно и подлежит удовлетворению.

В соответствии с пунктом 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "КапиталСтрой", юридический адрес: 

<

...> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации 01.12.2015г.) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Мастерстрой", юридический адрес: 

<

...> (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации 12.07.2013г.) 3 814 677,45 руб. долга, возмещение расходов по оплате госпошлины в размере 42 073  руб..

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

СудьяА.Э. Шарипова