Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-103446/2021

14 декабря 2021 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  13 декабря 2021 года.

Полный текст решения изготовлен  14 декабря 2021 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Михайлов П.Л.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Вшивковым А.С., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "Петербургская Строительная Корпорация" (адрес: Россия 191015, Санкт-Петербург, ул. 9-я Советская, д./4-6, литер А, офис 225А, ОГРН: 

<

***>);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "Реновация" (адрес: Россия 194017, Санкт-Петербург, Удельный пр., д.5, литера А, помещ. 16-Н, офис 5, ОГРН:  

<

***>);

о взыскании задолженности 

при участии

- от истца: ФИО1 по доверенности от 09.07.2021,

- от ответчика: не явился (извещен),

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Петербургская Строительная Корпорация" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Реновация" (далее - ответчик) о взыскании основного долга по оплате услуг по Договору субподряда №ОКТ-ОТ-Б, Б1, В2, В3 от 29.07.2019 в размере 1 124 816 рублей 16 копеек; договорной неустойки (пени) за просрочку исполнения обязательств по оплате по Договору субподряда №ОКТ-ОТ-Б, Б1, В2, В3 от 29.07.2019 в размере 113 063 рублей 63 копеек, основного долга по оплате услуг по Договору на оказание услуг №ОКТ-У/ОТ-Б-В от 29.07.2019 в размере 1 795 931 рубль 30 копеек, договорной неустойки (пени) за просрочку исполнения обязательств по оплате по Договору на оказание услуг №ОКТ-У/ОТ-Б-В от 29.07.2019 в размере 957 913 рублей 59 копеек и расходов по оплате государственной пошлины в размере 42 959 рублей.

В судебное заседание явился представитель истца, поддержал заявленные исковые требования.

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв не представил, уведомлен надлежащим образом, дело рассмотрено в его отсутствие в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Занесенным в протокол судебного заседания определением, суд в соответствии с пунктом 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание в первой инстанции.

Исследовав материалы дела, заслушав и оценив доводы лиц, участвующих в деле и представленные ими доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

Между сторонами 29.07.2019 был заключен Договор субподряда №ОКТ-ОТ-Б, Б1, В2, В3 (далее - Договор). В соответствии с предметом Договора Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство в установленный Договором срок выполнить полный комплекс отделочных работ, перечень которых указан в п. 1.2 Договора, на объекте строительства «Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями, встроенно-пристроенными подземными гаражами, объектом дошкольного образования на 190 мест», жилой дом Б, корпус Б1 (секции 1, 2); встроенные помещения жилого дома Б; жилой дом В, корпус В2 (секция 2), жилой дом В, корпус В3 (секция 3), расположенного по адресу: 

<

...> очередь строительства, на земельном участке с кадастровым номером 78:12:0633102:4248 (далее именуемый Объект).

По условиям договора Истец обязался создать Ответчику необходимые условия для выполнения работ и оказать услуги по общей организации и координации работ на Объекте, перечень которых указан в разделе 4 и 9 Договора, а Ответчик обязался принять оказанные услуги и оплатить.

Согласно п. 4.5 Договора Ответчик возмещает Истцу следующие расходы:

- расходы за потребленные электроснабжение, водоснабжение, водоотведение (количество потребленных коммунальных услуг фиксируется ежемесячно в двухсторонних актах согласно показаниям прибора учета, стоимость определяется по тарифу, указанному в бухгалтерских документах поставщика коммунальных услуг (акт, счет-фактура));

- расходы по вывозу отходов в размере стоимости передачи отходов различных классов опасности на использование и размещение. Объемы фиксируются ежемесячно в двухсторонних актах. В случае немотивированного отказа Субподрядчика (Ответчика) в подписании двухстороннего акта, акт подписывается в одностороннем порядке Генподрядчиком (Истцом) и имеет полную юридическую силу. 

Согласно п. 4.6 Договора субподряда Истец оказывает услуги по предоставлению электроэнергии, вырабатываемой от арендуемых Ответчиком и предоставляемых Истцом ДЭС, а также от других источников электроэнергии. Стоимость оплачивается Ответчиком ежемесячно и определяется как произведение количества фактически потребленной Ответчиком электроэнергии и стоимости 1 кВт электроэнергии по тарифам АО «Петербургская сбытовая компания». Количество фактической потребленной электроэнергии фиксируется ежемесячно в двухсторонних актах согласно показаниям прибора учета, а в случае отсутствия электросчетчиков – согласно списку электрооборудования, задействованного при выполнении работ по Договору.

В соответствии с п. 4.7. Договора расходы Истца, оказанные согласно п.п. 4.5.-4.6. оплачиваются в следующем порядке:

- оплата производится в период с даты начала выполнения работ по Договору до подписания Акта о полном выполнении обязательств по Договору;

- оплата производится ежемесячно на основании Актов об оказании услуг, подписанных Сторонами, и счетов, представляемых Истцом Ответчику. Вышеуказанных Акт об оказании услуг должен быть подписан Ответчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения. В случае не подписания Акта и не предоставления мотивированного отказа от подписания Ответчиком Истцу, Акт считается принятым без возражений и подписанным и подлежит оплате.

Оплата производится не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Акта.

Ответчик компенсирует Истцу расходы по использованию механизмов не указанных в подпунктах пункта 4.5. Договоров, а также затраты по оказанию услуг (за исключением услуг, обозначенных в п.п. 9.1.-9.18. Договоров) на основании отдельного договора, заключенного между Истцом и Ответчиком.

Услуги, перечисленные в п.п. 9.1.-9.18., 9.20. Договора, подлежат оплате Ответчиком с момента начала выполнения работ по Договору до даты фактического окончания выполнения работ. Оплата производится ежемесячно, в размере 1,5% от стоимости выполненных работ Ответчиком, указанных в Справках о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 за отчетный месяц (в соответствии с п. 4.8. Договора).

В соответствии с п.п. 9.1-9.18 Договора Истец обязался оказывать следующие услуги:

1. Осуществляет общую организацию всех видов работ по строительству Объекта и координацию выполнения работ привлеченных субподрядных организаций;

2. Обеспечивает Субподрядчика необходимой проектной (технической) документацией;

3. Передает по Акту-допуску строительную площадку;

4. Передает площадки для размещения бытовок;

5. Обеспечивает своевременную передачу строительной площадки для производства работ смежным подрядным организациям;

6. Осуществляет контроль за сроками выполнения полного комплекса работ;

7. Осуществляет контроль за выполнением графика строительства Объекта;

8. Еженедельно согласовывает со всеми Сторонами совмещенный график производства работ между всеми подрядными организациями на Объекте;

9. Проводит вводный инструктаж всех сотрудников Субподрядчика и привлеченных им третьих лиц;

10. Осуществляет контроль за соблюдением технологии производства работ на Объекте;

11. Организовывает рациональное использование территории строительной площадки;

12. Осуществляет контроль за выполнением Субподрядчиком мероприятий по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды и т.д.;

13.Уведомлять о назначении лица, ответственного за оказание услуг на Объекте;

14.Назначить должностных лиц, ответственных за электрохозяйство, пожарную безопасность, производственную санитарию и т.д.;

15. Вести общий журнал производства работ;

16. Предоставлять Подрядчику на утверждение общий журнал производства работ;

17. Согласовать проект производства работ (ППР);

18. Участвовать совместно с Подрядчиком в приемке работ, выполняемых Субподрядчиком;

19. Организовать и контролировать выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов;

20. Производить уборку строительной площадки и примыкающей уличной полосы;

21. Обеспечить контроль выполнения работ в полном соответствии с проектной документацией, рабочими чертежами;

22. Обеспечивает соблюдение порядка ведения работ на строительной площадке в соответствии с требованиями органов государственного надзора;

23. Обеспечить эксплуатацию постов мойки колес и контролировать чистоту выезжающего транспорта;

24.Контролировать привлечение к выполнению работ по Договору только квалифицированных рабочих и специалистов;

25. Контролировать соблюдение правил использования иностранной и иногородней рабочей силы;

26. Обеспечивать возможность проведения представителями Подрядчика технического и авторского надзора и контроля выполнения работ;

27. Обеспечить доступ на Объект лицам, указанным Субподрядчиком и Подрядчиком;

28. Сообщать Подрядчику о необходимости проведения дополнительных работ, не предусмотренных проектной документацией;

29. Обеспечить Субподрядчика электроэнергией, водой от постоянных источников электро- и водоснабжения.

Услуги, оказанные Истцом, перечисленные в п. 9.1-9.18 Договора оплачиваются Ответчиком ежемесячно на основании Актов об оказанных услугах, счетов-фактур и счетов, выставленных генеральным подрядчиком, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней, с даты предоставления Генеральным подрядчиком счета-фактуры и подписания Акта об оказанных услугах, согласно п. 5.2. Договора.

Согласно Акту сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2021 по 31.07.2021 у Ответчика перед Истцом образовалась задолженность, по Договору Субподряда №ОКТ-ОТ-Б, Б1, В2, В3 от 29.07.2019г. за оказанные генподрядные услуги, в размере: 1 124 816 рублей 16 копеек из следующих актов:

- Акт №184 от 31.01.2021 Генподрядные услуги за январь 2021г. по договору №ОКТ-ОТ-Б, Б1, В2, В3 от 29.07.2019г. на объекте строительства: многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями обслуживания, встроенно-пристроенными гаражами, объектом дошкольного образования на 190 мест, расположенном по адресу: г.. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.38, на земельном участке с кадастровым номером 78:12:0633102:4248 (получен 02.03.2021);

- Акт №435 от 30.04.2021 Генподрядные услуги за апрель 2021г. по договору №ОКТ-ОТ-Б, Б1, В2, В3 от 29.07.2019г. на объекте строительства: многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями обслуживания, встроенно-пристроенными гаражами, объектом дошкольного образования на 190 мест, расположенном по адресу: г.. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.38, на земельном участке с кадастровым номером 78:12:0633102:4248 (получен 24.05.2021);

- Акт №1260 от 31.05.2021 Компенсация расходов за поддержание температурно-влажностных характеристик на объекте: СПб, Октябрьская наб. 38, за январь 2021г (исх. №1284 от 08.04.21); Компенсация расходов за поддержание температурно-влажностных характеристик на объекте: СПб, Октябрьская наб. 38, за февраль 2021г (исх №1284 от 08.04.2021) (получен 24.06.2021).

Пунктом 13.2.24 Договора установлена ответственность Субподрядчика за несвоевременную оплату по предоставленным Генеральным подрядчиком услугам в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

В связи с этим истец начислил ответчику неустойку в размере 113 063 рублей 63 копеек за период с 18.03.2021 по 11.10.2021

На основании п. 4.7 трехстороннего Договора субподряда сторонами заключен Договор на оказание услуг №ОКТ-У/ОТ-Б-В от 29.07.2019.

В соответствии с предметом Договора Генподрядчик (Истец) обязуется оказать услуги, указанные в разделе 3 Договора (Полный перечень в Приложении № 1 к Договору), а Субподрядчик (Ответчик) принять эти услуги и оплатить.

Согласно п. 3.1 Договора Истец обязался оказать Ответчику следующие услуги:

1. Изготовление и перекодировка электронных пропусков;

2. Организация сбора, транспортирования, размещения или утилизация бытовых и строительных отходов;

3. Обеспечение водоснабжением;

4. Обеспечение электроэнергией;

5. Обеспечение электроэнергией от ДЭС;

6. Предоставление и обслуживание биотуалетов;

7. Предоставление строительной техники и иных подъемных механизмов, включая башенные краны;

8. Восстановление порядка по ОТ и ТБ;

9. Подготовка мест под бытовой городок;

10. Мойка колес;

11. Устройство временного электроснабжения и электроосвещения строительной площадки;

12. Содержание и текущий ремонт временных электротехнических сетей;

13. Обеспечение строительной площадки системой видеонаблюдения.

Главой 2 Договора на оказание услуг предусмотрен порядок оплаты. Субподрядчик (Ответчик) производит оплату в период с начала выполнения работ на Объекте и до даты подписания Итогового Акта сдачи-приемки выполненных работ по Трехстороннему Договору по ценам, указанном в Приложении № 1 к Договору на основании представленных Генподрядчиком (Истцом) счета, счет-фактуры и Акта об оказанных услугах, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Акта оказания услуг.

Акт оказания услуг подписывается Субподрядчиком (Ответчиком) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения актов приема-сдачи оказанных услуг, а в случае несоответствия сведений Субподрядчик (Ответчик) направляет Генподрядчику (Истцу) мотивированный отказа в подписании Акта. В случае неполучения Генподрядчиком (Истцом) мотивированного отказа в срок, указанный в Договоре, Акт приема-передачи оказанных услуг считается подписанным и подлежит оплате, в соответствии с главой 5 Договора на оказание услуг.

Согласно Акта сверки взаимных расчетов за период 01.01.2021 по 31.07.2021 у Ответчика перед Истцом образовалась задолженность, по Договору на оказание услуг №ОКТ-У/ОТ-Б-В от 29.07.2019 в размере: 1 795 931,30 (один миллион семьсот девяносто пять тысяч девятьсот тридцать один) рубль 30 копеек из следующих актов:

-Акт №185 от 31.01.2021 Организация обращения отходов (бытовые отходы) по договору №ОКТ-У/ОТ-Б-В от 29.07.2019 на объекте: 

<

...>; Уборка мусора на объекте: 

<

...>; Услуги по обслуживанию бытового городка на объекте: 

<

...>; Услуги по договору №ОКТ-У/ОТ-Б-В от 29.07.2019 на объекте расположенном по адресу: 

<

...>, на земельном участке с кадастровым номером 78:12:0633102:4248 (0,3%) (получен 02.03.2021);

-Ак №186 от 31.01.2021 Уборка мусора на объекте: 

<

...> (получен 02.03.2021);

-Акт №187 от 31.01.2021 Возмещение расходов за потребленную электроэнергию по договору №ОКТ-У/ОТ-Б-В от 29.07.2019 на объекте: СПб, Октябрьская наб. 38, на 31.12.2020 года (получен 02.03.2021);

-Акт №432 от 28.02.2021 Организация обращения отходов (бытовые отходы) по договору №ОКТ-У/ОТ-Б-В от 29.07.2019 на объекте: 

<

...>; Услуги по обслуживанию бытового городка на объекте: г. Санкт-Петербург, Октябрьская на., д. 38 (получен 15.03.2021);

-Акт №718 от 31.03.2021 Организация обращения отходов (строительные отходы) по договору №ОКТ-У/ОТ-Б-В от 29.07.2019 на объекте: 

<

...>; Уборка мусора на объекте: 

<

...>; Услуги по обслуживанию бытового городка на объекте: 

<

...> (получен 19.04.2021);

-Акт №708 от 07.04.2021 Подсобные рабочие по договору №ОКТ-У/ОТ-Б-В от 29.07.2019 на объекте: 

<

...> (получен 19.04.2021);

-Акт №709 от 07.04.2021 Подсобные рабочие по договору №ОКТ-У/ОТ-Б-В от 29.07.2019 на объекте: 

<

...> (получен 19.04.2021).

В соответствии с п. 7.2 Договора установлена ответственность за несвоевременную оплату оказанных Генеральным подрядчиком услуг в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате по Договору за каждый день просрочки, а в случае неоплаты более 20 календарных дней – размер пени увеличивается до 0,3% от суммы за каждый день просрочки.

В связи с этим истец начислил ответчику неустойку в размере 957 913 рублей 59 копеек за период с 20.03.2021 по 11.10.2021.

Суд полагает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от обязательств не допускается.

В соответствии со статьей 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. 

Согласно пункту 2 статьи 747 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в случаях и в порядке, предусмотренных договором строительного подряда, оказывать услуги, связанные с обеспечением технической документации для выполнения работ, другие услуги, связанные с координацией работы субподрядчика. Оплата предоставленных заказчиком услуг, указанных в пункте 2 названной статьи, осуществляется в случаях и на условиях, предусмотренных договором строительного подряда.

Отношения оказания услуг генподряда является отношениями возмездного оказания услуг.

В соответствии с пунктом 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В соответствии со статьей 781 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

На основании статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение договорных обязательств истец вправе взыскать с ответчика предусмотренную договором неустойку.

Ответчик не представил доказательств оплаты задолженности и пени.

Расходы по оплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции, вступившей в законную силу с 01.01.2017) решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Реновация" (адрес: Россия 194017, Санкт-Петербург, Удельный пр., д.5, литера А, помещ. 16-Н, офис 5, ОГРН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Петербургская Строительная Корпорация" (адрес: Россия 191015, Санкт-Петербург, ул. 9-я Советская, д./4-6, литер А, офис 225А, ОГРН: 

<

***>) задолженность по оплате услуг по Договору субподряда №ОКТ-ОТ-Б, Б1, В2, В3 от 29.07.2019 в размере 1 124 816 рублей 16 копеек; неустойку за просрочку исполнения обязательств по оплате по Договору субподряда №ОКТ-ОТ-Б, Б1, В2, В3 от 29.07.2019 в размере 113 063 рублей 63 копеек, задолженность по оплате услуг по Договору на оказание услуг №ОКТ-У/ОТ-Б-В от 29.07.2019 в размере 1 795 931 рубль 30 копеек, неустойку за просрочку исполнения обязательств по оплате по Договору на оказание услуг №ОКТ-У/ОТ-Б-В от 29.07.2019 в размере 957 913 рублей 59 копеек и расходы по оплате государственной пошлины в размере 42 959 рублей.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Михайлов П.Л.