102/2019-31892(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; 

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-19593/2018

город Саратов

21 февраля 2019 года

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

РЕШИЛ:

Исковое заявление Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Саратовской области удовлетворить.  

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «ОПТОЙЛ» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 412120, 

<

...>) устранить недостатки работ по  государственным контрактам № 2014.299552, № 2014.299553, № 2014.299554, № 2014.299556,   № 2014.299558, выполнив в течение шести месяцев с момента вступления решения в законную  силу в жилых домах №№ 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, расположенных по адресу: 

<

...> следующие работы:  

по окрашиванию и оштукатуриванию элементов цоколя – 38,4 м² (объем на один дом);  

по установлению гидроизоляции боковой обмазочной битумной в 2 слоя - 33 м² х2  (объем на один дом);  

по установлению кровли из металлочерепицы - 70 м² (объем на один дом);  по установлению чугунных радиаторов – 28 штук;  

по установлению котлов чугунных секционных водогрейных – 14 штук; по установлению чугунных купальных ванн – 14 штук; 

по установлению наружных стен в соответствии с проектной  документацией, которой предусмотрена следующая конструкция:  газосиликатные блоки толщиной 250 мм- 9,6 м³ (объем на один дом); пароизоляция из  полиэтиленовой пленки- 38,4 м² (объем на один дом); утеплитель из минеральной ваты  толщиной 100 мм- 3,84 м³ (объем на один дом); кирпич силикатный облицовочный 120 мм – 4,6  м³ (объем на один дом);  

по установлению вентиляции естественного типа с выходом  загрязненного воздуха через вентиляционные отверстия в кухне и санузле в  подкровельное пространство (чердак) – 5 м.п. из расчета на 1 квартиру;  

по установлению ленточных фундаментов из бетонных блоков типа  ФБМ в смонтированных по высоте в три ряда с вертикальной и  горизонтальной гидроизоляцией – 7 м³ (объем на один дом);  

по установлению кладки стен наружных из легкобетонных стеновых камней с  облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) толщиной 470 мм;  

по установлению изоляции изделиями из волокнистых и зернистых материалов на  битуме холодных поверхностей стен;  

по приведению крылец в соответствие с проектной документацией,  которой предусмотрена следующая конструкция: бетонный ленточный  фундамент, цокольную часть, ограждения, навес, опирающийся на стойки  ограждения.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ОПТОЙЛ» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 412120, 

<

...>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 6000 рублей.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. Копии решения направить лицам, участвующим в деле. 

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со  дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в апелляционную, кассационную  инстанции в порядке, предусмотренном главами 34, 35 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, путем подачи соответствующей жалобы через арбитражный суд первой  инстанции.  

Судья Арбитражного суда Саратовской области ФИО1 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 16.03.2018 10:03:33

 Кому выдана ФИО1