РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

   18 сентября 2024 года    

по делу № А33-10534/2024 Красноярск  

«18» сентября 2024 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить. 

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, г. Красноярск) в течение 10 дней с момента вступления в законную силу  судебного акта по настоящему делу исполнить обязательства по договору об осуществлении  технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.11623.17 от 07.02.2018,  осуществить фактическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих  устройств по адресу: г. Красноярск, Центральный район, ул. Шахтеров - ул. Водянников,  кадастровый номер земельного участка 24:50:0300306:412, а именно:  

- требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих  электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» для  электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии  с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию,  утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со  всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим  законодательством;  

- от ВЛ-10 кВ ф. № 71-11 до границ земельного участка заявителя, запроектировать и  построить КЛ 10 кВ. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом;  

- требования по проектированию и установке: Устройств релейной защиты: в проекте  выполнить расчет релейной защиты и ток короткого замыкания ЛЭП-10 кВ, ф. М ВКЛ 10 кВ  ф. 71-11;  

- осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к  электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при  участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его  ООО «ТемпСтрой».  

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «ТемпСтрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Дивногорск Красноярского края)  

3 911 784,88 руб. неустойки по договору об осуществлении технологического присоединения  к электрическим сетям № 20.2400.11623.17 от 07.02.2018, рассчитанной за период с  08.02.2019 по 19.06.2024, а также 48 559 руб. судебных расходов по уплате госпошлины,  несение которых подтверждается платежными поручениями от 01.04.2024 № 4 и от  19.06.2024 № 16.  

Требование о взыскании судебной неустойки удовлетворить частично.  

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>,  

ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) в пользу общества с ограниченной ответственностью  

«Инфраструктурные решения» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) 

5 000 руб. судебной неустойки за каждый день просрочки исполнения решения суда по день  его фактического исполнения.  

В удовлетворении требования в остальной части отказать. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «ТемпСтрой» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Дивногорск Красноярского края) из федерального  бюджета 3 000 руб. госпошлины, излишне уплаченной платежным поручением от  

19.06.2024 № 16. Выдать справку на возврат госпошлины. 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья Н.А. Варыгина