АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

сайт http://ufa.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-27890/2022

г. Уфа

30 января 2023 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи 

Исхаковой А. А., при ведении протокола судебного заседания секретарем  Рамазановой А.М., рассмотрев дело по иску федерального казенного учреждения  "Федеральное управление автомобильных дорог "Приуралье" федерального  дорожного агентства" (ИНН 0278007048, ОГРН 1020203220212) к обществу с  ограниченной ответственностью "Автодоринжиниринг" (ИНН 6325057547, ОГРН  1136325001284) об обязании устранить недостатки и о взыскании 300 000 руб.  штрафа (с учетом принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) уточнения  исковых требований),  

Руководствуясь ст. 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Автодоринжиниринг»  

(ИНН 6325057547, ОГРН 1136325001284) в течение 30 дней с момента вступления  

судебного акта в законную силу в рамках гарантийных обязательств устранить  

дефекты по объектам 1, 2, 3: 

I) км 178+000-181+293, в рамках исполнения государственного контракта от  

28.06.2019 № 0301100012719000056.2019.6: 1) размыв, разрушение откоса на км 178+100 (правое примыкание); 

2) шелушение, разрушение бетона фундамента шумозащитных экранов с  оголением арматуры;  

3) коррозия панелей шумозащитных экранов, болтовых соединений: 4) продольные и поперечные трещины а/б покрытия; 

5) просадка, разрушение обочин между барьерным ограждением и ШЗЭ;  6) наличие строительного мусора;  

7) нерабочие импульсные дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный  

переход»; 8) коррозия элементов солнечной панели; 9) коррозия болтовых соединений РМП; 10) отслоение маски дорожных знаков; 11) просадка матцев Рено на укреплениях водопропускных труб; 

12) отсутствует вхожесть трав на бермах дорожных знаков, откосах земляного  

полотна; 13) ямочность в местах отбора кернов; 14) просадка, разрушение обочин у фундаментов ШЗЭ; 

км 181+293-191+000, в рамках исполнения Государственного контракта от  

28.06.2019 № 0301100012719000056.2019.6: 

1) продольные и поперечные трещины а/б покрытия;  2) разрушение берм дорожных знаков;  

3) разрушение бетона в местах соединения а/б покрытия и телескопических  лотков;  

4) трещины в местах соединения а/б покрытия и прикромочных лотков; 5) раскрытие стыка прикромочных лотков; 6) просадка прикромочных лотков; 

7) шелушение, разрушение а/б покрытия км 182+650;  8) отсутствует вхожесть трав на откосах земляного полотна;  

9) разрушение бетона в местах соединения б/о и водосбросов;  10) коррозия лестничных сходов;  

11) коррозия распорных втулок на стойках б/о; 12) просадка покрытия км 182+800; 13) разрушение бетона лестничных сходов; 14) разрушение, размыв откоса км 183+850,183+900, 185 в.п. труба; 15) ослабление болтовые соединения б/о; 

16) коррозия креплений дорожных знаков с тыльной стороны;  17) раскрытие стыков ж/б трубы км 185 (примыкание);  

18) разрушение берм дорожных знаков, опор электроосвещения;  19) износ горизонтальной дорожной разметки;  

20) коррозия болтовых соединений пешеходного ограждения, автопавильона; 

21) разрушение обочин в местах установки начальных концевых элементов б/о;  22) нерабочие испульсные дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный  

переход»; 

23) неисправность в работе автономной осветительной системы (АОС) в  

количестве 9 шт. на км 190+200; 

24) неисправность дорожного знака 5.19.1 со световой индикацией в количестве  

1 шт. на км 190+200. 

II) км 223+000 - 228+293, в рамках исполнения государственного контракта  

от 30.07.2019 № 0301100012719000076.2019.6 1) продольные и поперечные трещины; 

2) раскрытие шва между прикормочными лотками а/б покрытия;  

3) разрушение бетона водосбросов;  4) разрушение рассекателя км 228;  5) разрушение гасителя км 228.  

III) км 266+000 - 275+000, в рамках исполнения государственного  контракта от 22.04.2019 № 0301100012719000011.2019.193780:  

1) продольные, поперечные трещины; 2) износ горизонтальной дорожной разметки; 

3) трещины между а/б покрытием проезжей части и укрепленной обочиной;  

4) просадка укрепленной обочины; 5) коррозия консолей б/о; 6) трещины между прикромочных лотков и а/б покрытием; 7) разрушение водосброса; 8) отсутствие всхожести трав; 9) завышение прикормочных лотков относительно укрепленной обочины; 10) разрушение, сползание берм дорожных знаков; 11) размывы, разрушение откосов земляного полотна; 12) шелушение, сегригация а/б покрытия км 267+800 - км 268+500; 13) разрушение блоков Б2 у водосбросов; 

14) разрушение основания ШЗЭ, отклонение от проектного положения в плане;  15) сползание откоса за автобусной остановкой;  

16) занижение обочин между ШЗЭ и а/б покрытием; 

17) начальные и конечные элементы б/о в местах соединения с обочиной  оголены;  

18) коррозия болтовых соединений, км 275+000-280+941, 

в рамках исполнения государственного контракта от 22.04.2019 №  

0301100012719000011.2019.193780 1) занижение, завышение обочин; 2) просадки прикромочных лотков; 

3) трещины в местах соединения а/б покрытия и прикромочных лотков;  4) разрушение гасителя;  

5) просадка а/б покрытия, обочины, прикромочных лотков над 

водопропускными трубами в следствии нарушения геометрических параметров  водопропускных труб на км 278,275;  

6) разрушение бетона водосбросов, блоков Б2; 7) разрушение телескопического лотка; 8) коррозия автобусных остановок; 

9) трещины в местах соединения бортового камня и площадки ожидания а/о;  10) просадки тактильной плитки;  

11) коррозия болтовых соединений; 12) разрушение креплений ШЗЭ к фундаменту; 13) оголение закладных деталей опор электроосвещения; 14) разрушение бермы предусмотренного под ТП; 15) разрушение берм дорожных знаков; 16) разрушение бортового камня тротуаров; 

17) отклонение от проектного положения пешеходных ограждений, коррозия;  18) застой воды на проезжей части км 278;  

19) просадка тротуара; 20) завал барьерного ограждения км 277 справа; 21) колейность 275+150. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Автодоринжиниринг»  

(ИНН 6325057547, ОГРН 1136325001284) в пользу федерального казенного  

учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье»  

федерального дорожного агентства" (ИНН 0278007048, ОГРН 1020203220212) 

300 000 руб. штрафа, 15 000 руб. в возмещение расходов по оплате  

государственной пошлины. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Автодоринжиниринг»  (ИНН 6325057547, ОГРН 1136325001284) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 12 000 руб.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  ходатайству взыскателя.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной  жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со  дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в  полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом  Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд  Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или  кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах  Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или  Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.  

 Судья А.А. Исхакова