АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28  http://yaroslavl.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А82-438/2018

г. Ярославль

20 июля 2018 года

Резолютивная часть решения оглашена  09 июля 2018 года.

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Лапочкиной И.М. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление  общества с ограниченной ответственностью "Проект Инвест" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

к  открытому акционерному обществу "Коммунальные услуги" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

о   взыскании   16112769.81  руб.,

третье лицо: Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области

при участии:

от истца – ФИО2 по доверенности от 04.04.2018

от ответчика – не явились

от третьего лица – не явились

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Проект Инвест" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к  открытому акционерному обществу "Коммунальные услуги" о взыскании 16 112 769,81  руб.

Истец в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме, поддержал возражения третьего лица на отзыв ответчика.

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, представил отзыв на иск, указал, что сумму задолженности не оспаривает.

Третье лицо извещено надлежащим образом, представило возражения со ссылкой на отсутствие отчетов агента, недоказанности реальности исполнения агентского договора.

Заседание проводится в порядке, предусмотренном ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ, в отсутствие ответчика и третьего лица.

В судебном заседании в порядке ст. 163 Арбитражного процессуального кодекса РФ объявлялся перерыв до  09 июля 2018 года  до 15 час. 30 мин.

Информация о перерыве в судебном заседании была размещена на официальном сайте Арбитражного суда Ярославской области и в Картотеке арбитражных дел.

После перерыва заседание продолжено в порядке, предусмотренном ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ, в отсутствие лиц, участвующих в деле.

Заслушав представителя истца до перерыва, исследовав материалы дела, суд установил следующее.

22.01.2014 между открытым акционерным обществом "Коммунальные услуги" /Заказчик/  и обществом с ограниченной ответственностью "Проект Инвест" /Подрядчик/ заключен договор № 2 (далее – Договор № 2), согласно п. 1.2 которого в редакции дополнительного соглашения № 4 от 11.03.2015 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по Адресному перечню (Приложение № 2) и в объемах согласно Технического задания (Приложение № 1), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик, в свою очередь, обязуется принять результат работы и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Сроки окончания выполнения работ  - 01.09.2015 (п. 1.3 Договора № 2 в редакции дополнительного соглашения № 5 от 29.05.2015).

Стоимость работ составляет 11 780 000,00 руб., в т. ч. НДС (18%) 1 796 949,15 руб. Окончательная стоимость работ по договору будет определяться по факту выполненных работ, исходя из фактически понесенных затрат на установку каждого коллективного прибора учета холодной воды. При этом окончательная стоимость работ по договору определяемая по факту, не может быть больше стоимости работ, определенной по результатам запроса предложений (п.2.1 Договора № 2).

Оплата работ по договору начинает производиться Заказчиком через два полных календарных месяцев по факту выполненных работ на каждом объекте равными ежемесячными платежами в течение 60 месяцев, начиная с 1 (первого) числа после подписания Акта ввода в эксплуатацию с потребителем (УК, ТСЖ и т.д.) (п. 2.4 Договора № 2).

22.01.2014 между открытым акционерным обществом "Коммунальные услуги" /Заказчик/  и обществом с ограниченной ответственностью "Проект Инвест" /Подрядчик/ заключен договор № 3 (далее – Договор № 3), согласно п. 1.2 которого в редакции дополнительного соглашения № 4 от 11.03.2015 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по Адресному перечню (Приложение № 2) и в объемах согласно Технического задания (Приложение № 1), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик, в свою очередь, обязуется принять результат работы и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Сроки окончания выполнения работ  - 01.09.2015 (п. 1.3 Договора № 3 в редакции дополнительного соглашения № 5 от 29.05.2015).

Стоимость работ составляет 10 912 000,00 руб., в т. ч. НДС (18%) 1 664 542,37 руб. Окончательная стоимость работ по договору будет определяться по факту выполненных работ, исходя из фактически понесенных затрат на установку каждого коллективного прибора учета холодной воды. При этом окончательная стоимость работ по договору определяемая по факту, не может быть больше стоимости работ, определенной по результатам запроса предложений (п.2.1 Договора № 3).

Оплата работ по договору начинает производиться Заказчиком через два полных календарных месяцев по факту выполненных работ на каждом объекте равными ежемесячными платежами в течение 60 месяцев, начиная с 1 (первого) числа после подписания Акта ввода в эксплуатацию с потребителем (УК, ТСЖ и т.д.) (п. 2.4 Договора № 3).

22.01.2014 между открытым акционерным обществом "Коммунальные услуги" /Заказчик/  и обществом с ограниченной ответственностью "Проект Инвест" /Подрядчик/ заключен договор № 4 (далее – Договор № 4), согласно п. 1.2 которого в редакции дополнительного соглашения № 4 от 11.03.2015 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по Адресному перечню (Приложение № 2) и в объемах согласно Технического задания (Приложение № 1), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик, в свою очередь, обязуется принять результат работы и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Сроки окончания выполнения работ  - 01.09.2015 (п. 1.3 Договора № 4 в редакции дополнительного соглашения № 5 от 29.05.2015).

Стоимость работ составляет 10 295 000,00 руб., в т. ч. НДС (18%) 1 570 423,73 руб. Окончательная стоимость работ по договору будет определяться по факту выполненных работ, исходя из фактически понесенных затрат на установку каждого коллективного прибора учета холодной воды. При этом окончательная стоимость работ по договору определяемая по факту, не может быть больше стоимости работ, определенной по результатам запроса предложений (п.2.1 Договора № 3).

Оплата работ по договору начинает производиться Заказчиком через два полных календарных месяцев по факту выполненных работ на каждом объекте равными ежемесячными платежами в течение 60 месяцев, начиная с 1 (первого) числа после подписания Акта ввода в эксплуатацию с потребителем (УК, ТСЖ и т.д.) (п. 2.4 Договора № 3).

01.11.2016 между обществом с ограниченной ответственностью "Проект Инвест" /Принципал/ и открытым акционерным обществом "Коммунальные услуги" /Агент/ был заключен агентский договор № б/б/н (далее – Агентский договор), согласно п.1.1.1. которого Агент от имени по поручению и за счет Принципала обязуется осуществлять расчет и сбор платежей (оплаты расходов Принципала в соответствии с п. 12 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" – далее Федеральный закон № 261-ФЗ) за установку коллективных (общедомовых) приборов учета холодной воды с собственников (физических лиц/юридических лиц/Российской Федерации/субъектов Российской Федерации/муниципальных образований) многоквартирных домов и/или с лиц, ответственных за содержание многоквартирных домов/исполнителей коммунальных услуг (управляющие компании, товарищества, кооперативы) в соответствии с Адресным перечнем (Приложение № 1); осуществлять расчет и сбор процентов, предусмотренных п. 12 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ, если между Собственниками и/или Управляющими организациями и Принципалом не заключено соглашение об оплате расходов единовременно или с меньшим периодом рассрочки; а также осуществлять последующие расчеты с Принципалом в порядке и на условиях, установленных настоящим договором, а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за оказанные Агентом услуги в размере и в порядке, установленном настоящим договором.

Согласно п.п. 3.1, 3.2 Агентского договора отчетным периодом является календарный месяц. Размер вознаграждения Агента за расчет и сбор платежей за установку коллективных (общедомовых) приборов учета холодной воды составляет 22,46 %, в т. ч. НДС 18% от полученной суммы платежей в отчетном месяце и определяется на основании утвержденного отчета Агента. Ориентировочная сумма агентского вознаграждения за период действия настоящего договора (за 3 месяца) и составляет 430 836,53 руб., в т.ч. НДС (18%) 65 720,83 руб. Общая сумма агентского вознаграждения за период действия договора не должна превышать 500 000,00 руб., в т.ч. НДС 18%.

В силу п.п. 3.2, 3.3 Агентского договора Агент в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет Принципалу Отчет агента (по форме Приложения № 4), с приложением счет-фактуры на агентское вознаграждение. Отчет Агента одновременно является Актом на агентское вознаграждение. Принципал в срок не более двух рабочих дней с даты получения Отчета от Агента, утверждает Отчет либо в тот же срок направляет Агенту письменные мотивированные замечания к Отчету. После устранения замечаний Отчет направляются Агентом Принципалу повторно для утверждения. В случае, если в течение указанного в абзаце первом настоящего пункта срока Агент не получит от Принципала подписанный Отчет или мотивированные возражения к нему, Агент вправе подписать Отчет в одностороннем порядке, после чего такой Отчет считается утвержденным Принципалом, а указанное в нем вознаграждение Агента подлежит оплате.

В связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязанности по договорам № 2, 3, 4 за  ним образовалась задолженность в размере 16 112 769,81  руб.

Претензия от 12.12.2017 об оплате задолженности направлена ответчику 13.12.2017.

Неисполнение ответчиком требований истца послужило поводом для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Оценив в соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд считает требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 310 Гражданского кодекса РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

На основании ст. 702, 711 Гражданского кодекса РФ основанием для оплаты работ является факт сдачи результата работ заказчику.

Согласно ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ каждое лицо, участвующее в деле должно доказать те обстоятельства, на которые ссылается в качестве основания своих требований или возражений.

Факт сдачи результата работ подтверждается документами, представленными истцом в материалы дела, и не оспаривается ответчиком.

По расчету истца за ответчиком числится задолженность в размере 16 112 769,81 руб.

В подтверждение наличия задолженности представлены акты о приемке задолженности, отчеты агента, акты сверки, акт зачета взаимных требований.

Доказательств недействительности сделок суду не представлено.

Доказательств оплаты задолженности либо наличия ее в меньшем размере ответчиком суду не представлено.

Учитывая, что требования истца основаны на законе, подтверждены представленными в материалы дела документами, требования истца в части основного долга подлежат удовлетворению в полном объеме.

В силу ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ госпошлина за подачу искового заявления относится на ответчика.

Руководствуясь статьями 70, 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с  открытого акционерного общества "Коммунальные услуги" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью "Проект Инвест" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) 16 112 769,81 руб. задолженности, 103 563,85 руб. госпошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

 

Судья

Лапочкина И.М.