Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-145209/2021-83-765

25 ноября 2021 г.

г. Москва

 

Резолютивная часть решения изготовлена 25 ноября 2021 г.

Решение в полном объеме изготовлено 25 ноября 2021 г.

Арбитражный суд в составе председательствующего судьи Сорокина В.П. (шифр судьи 83-765), при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ГКУ ИАЦ в сфере здравоохранения города Москвы (ИНН 

<

***>) к ООО "ЮМОС" (ИНН 

<

***>) о взыскании неустойки по государственному контракту № 69-3Р2-084/17 от 31.08.2017 в размере 1 525 139 руб. 18 коп.

при участии:

от истца –  ФИО2 на основании доверенности от 29.07.2021 

от ответчика – не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:

ГКУ ИАЦ в сфере здравоохранения города Москвы (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "ЮМОС" (далее – ответчик) о взыскании неустойки в размере в размере 1 525 139 руб. 18 коп.

Истец явку обеспечил, заявленные требования поддержал в полном объеме, ссылаясь на доводы, изложенные в исковом заявлении.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства в порядке статьи 123 АПК РФ, в судебное заседание не явился, отзыв в порядке статьи 131 АПК РФ не представил, дело подлежит рассмотрению с учетом положений статьи 156 АПК РФ.

Исследовав письменные доказательства, заслушав позицию, обеспечившего явку, полномочного представителя истца, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований, исходя при этом из следующего.

Судом при рассмотрении дела установлено, что 31.08.2017 между истцом (заказчиком) и ответчиком (исполнителем) заключен государственный контракт № 69-3Р2-084/17 от 31.08.2017 на выполнение работ по проектированию информационно-коммуникационной инфраструктуры в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени М.П. Кончаловского Департамента здравоохранения города Москвы» в целях обеспечения функционирования в учреждении информационных систем и ресурсов города Москвы, стоимостью 4 192 000 руб. (пункт 2.1), в срок до 29.11.2017 (пункт 3.2).

Суд, в соответствии с пунктами 3.2, 7.5 договора, руководствуясь положениями статей 8, 9, 64, 65, 67, 68, части 3.1 статьи 70, статьи 75 АПК РФ, абзаца второго пункта 1 статьи 165.1, статьи 307, пункта 1 статьи 309, пункта 1 статьи 310, пункта 1 статьи 328, пункта 1 статьи 329, пункта 1 статьи 330, абзаца первого пункта 1 статьи 331, абзаца 2 пункта 1 статьи 708, статьи 758 ГК РФ, исходит из признаваемой ответчиком, с учетом последующей частичной корректировки истцом расчета неустойки, просрочки исполнения обязательств, составляющей 190 календарных дней, что следует из представленного акта сдачи-приемки выполненных работ от 20.06.2018, а также частичной оплатой неустойки в размере 106 596 руб. 82 коп. платежным поручением № 839 от 08.10.2018, что свидетельствует о бесспорности рассматриваемого требования, учитывая, что представленный в качестве приложений к иску расчет неустойки является арифметически и методологически выполненным верно, ответчиком не оспорен, ходатайство о применении положений статьи 333 ГК РФ не заявлено, контррасчет не представлен, приходит к выводу об удовлетворении заявленного требования в заявленном размере.

Судебные расходы по оплате госпошлины распределяются в соответствии с положениями статьи 110 АПК РФ, главы 25.3 НК РФ.

На основании статей 1, 8, 12, 307, 309, 310, 329, 330, 331, 333, 708, 758 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 2, 4, 8, 9, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 75, 110, 156, 167, 170, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "ЮМОС" (ИНН 7728548540) в пользу ГКУ ИАЦ в сфере здравоохранения города Москвы (ИНН 7714823958) неустойку в размере 1 525 139 руб. 18 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 28 251 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:     В.П. Сорокин