Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-6811/2017

04 сентября 2018 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  30 августа 2018 года.

Полный текст решения изготовлен  04 сентября 2018 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "ПЕТРОИНВЕСТ" (адрес:  Россия 191036, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

<

...>/А/1Н, КОМ.6, ОГРН:  

<

***>);

ответчик: акционерное общество "ГЕНЕРАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ"; Акционерное общество "Управление материально-технического снабжения" (адрес:  Россия 197046, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

<

...>; Россия 197046, Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 22, лит. А, оф. 621, ОГРН:  

<

***>; 1167847308738);

третье лицо: Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по городу Санкт--Петербургу и Ленинградской области  

о взыскании 17 250 629 руб. 00 коп.

 

при участии

- от истца: ФИО2 по доверенности от 09.01.18, ФИО3 по доверенности от 09.01.18,

- от ответчика: ФИО4 по доверенности от 08.02.18,

- от третьего лица: ФИО5 по доверенности от 08.02.17,

установил:

ООО "ПЕТРОИНВЕСТ" после уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ просит взыскать солидарно с АО "ГЕНЕРАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ" и АО "Управление материально-технического снабжения" 16 576 246 руб. 00 коп. задолженности по оплате выполненных работ на основании договора №07/10-РМ от 03.08.07.

Ответчик – АО «ГСК» иск признал частично – в размере 2 786 337 руб. 00 коп., в остальной части отклонил, ссылаясь на неправильный расчет и истечение срока исковой давности по требованию оплаты за перебазирование башенного крана.

Ответчик – АО "Управление материально-технического снабжения" отзыв не представило.

Привлеченное в качестве третьего лица, без самостоятельных требований УФСИН России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области поддержало позицию истца.

Распоряжением заместителя председателя Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области ФИО6 от 20.02.18 дело передано в производство судьи Сергеевой О.Н.

Судом установлено:

Между ООО "ПЕТРОИНВЕСТ" (генсубподрядчик) и ОАО "ГЕНЕРАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ" (генподрядчик) был заключен договор №07/10-РМ от 03.08.07 на строительство зданий и сооружений «под ключ» следственного изолятора на 4 000 мест в городе Санкт-Петербурге. Заказчиком по государственному контракту является ГУФСИН России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Цена договора составляет 5 953 500 000 руб. 00 коп. 

Дополнительными соглашениями к договору стороны уточняли объемы поручаемых работ на календарный год в соответствии с выделенным сметным лимитом.

Письмом от 09.12.16 исх. №232/8 истец известил АО «ГСК» о готовности к сдаче результата работ. АО «ГСК» от приемки работ уклонилось.

В июле 2016 года в результате реорганизации из АО «ГСК» выделено АО «Новые Технологии». 24.01.17 в ЕГРЮЛ внесена запись о переименовании выделенного юридического лица в АО "Управление материально-технического снабжения". Для установления объема и качества выполненных работ по ходатайству ООО «Петроинвест» была назначена и проведена строительно-техническая экспертиза.

Согласно заключению эксперта №536/16-СЗ от 20.03.18 стоимость надлежаще выполненных работ составляет 16 576 246 руб. 00 коп. 

По ходатайству АО «ГСК» эксперт ООО «Центр судебных экспертиз Северо-Западного округа» ФИО7 ответил на дополнительные вопросы генподрядчика (т.13).

Экспертом не обнаружено повторного предъявления к оплате («задвоения» объемов) работ, на что неоднократно указывал генподрядчик в своих возражениях.

Срок исковой давности по требованию о перебазировке башенного крана истцом не пропущен, так как акт на перебазировку башенного крана КБ-401П со стройки на базу №244-14 был предъявлен к оплате в декабре 2016 года, что подтвердил эксперт в своем заключении, а иск предъявлен в суд 07.02.17.

Третье лицо – УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтвердило полную оплату работ генподрядчику.

Поскольку в передаточных актах не указаны договоры, требования по которым переданы АО «ГСК» выделенному из него ООО «Новые Технологии» задолженность в размере 16 576 246 руб. 00 коп. подлежит взысканию с ответчиков в солидарном порядке.

Расходы по государственной пошлине и расходы на проведение экспертизы в размере 510 000 руб. 00 коп. относятся на ответчиков.

В связи с уменьшением суммы иска истцу подлежит возврату государственная пошлина в размере 3 368 руб. 00 коп.

Руководствуясь статьями 309, 310, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с акционерного общества "ГЕНЕРАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ и  акционерного общества  "Управление материально-технического снабжения" в солидарном порядке в пользу общества с ограниченной ответственностью "ПЕТРОИНВЕСТ" 16 576 246 руб. 00 коп. задолженности, 105 881 руб. 23 коп. расходов по государственной пошлине и 510 000 руб. 00 коп. расходов на проведение экспертизы.

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Выдать обществу с ограниченной ответственностью "ПЕТРОИНВЕСТ" справку на возврат государственной пошлины в размере 3 368 руб. 00 коп., уплаченной по платежному поручению №56 от 03.02.17.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Сергеева О.Н.