РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-104845/23-110-862

г. Москва

25 декабря 2023 г.

Резолютивная часть решения объявлена 29 ноября 2023 года 

Решение в полном объеме изготовлено 25 декабря 2023 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи ФИО1 /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО2,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску акционерного общества  "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭНЕРГОАТОМИНВЕНТ" (197022, 

<

...>, ЛИТЕР З, ПОМЕЩЕНИЕ 10Н ЧАСТЬ 16, ОГРН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью  "ГОРИЗОНТЫ РОСТА" (121205, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОЖАЙСКИЙ, СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА ТЕР., БОЛЬШОЙ Б-Р, Д. 42, СТР. 1, ПОМЕЩ. 139, ОГРН: 

<

***>,) о взыскании 1 401 779,06 руб.,

третье лицо: публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" (121353, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОЖАЙСКИЙ, БЕЛОВЕЖСКАЯ УЛ., Д. 4, ОГРН: 

<

***>), акционерное общество "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ" (115201, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>), акционерное общество "НАУЧНЫЕ ПРИБОРЫ" (190020, РОССИЯ, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЕКАТЕРИНГОФСКИЙ, ЛОДЫГИНА ПЕР, Д. 1/28, ЛИТЕРА А, 1Н №89, ОГРН: 

<

***>)

при участии:

от истца – ФИО3 по дов.  от  09.03.2023,

от ответчика- ФИО4 по дов. от  10.07.2023, ФИО5, 

от третьих лиц – не явился,

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество  "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭНЕРГОАТОМИНВЕНТ" обратилось с иском к  обществу с ограниченной ответственностью  "ГОРИЗОНТЫ РОСТА" (с учетом принятых изменений в порядке ст.49 АПК РФ) о взыскании 2 728 532,47 руб. убытков по договору №797 от 06.12.2019.

В порядке ст. 51  АПК РФ к участию в деле  были привлечены публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ", акционерное общество "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ", акционерное общество "НАУЧНЫЕ ПРИБОРЫ",  которые в судебное заседание не явились,  спор рассмотрен в их отсутствие на основании ст.ст. 123,156 АПК РФ.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве.

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, 10.12.2019 года между АО «НПО «Энергоатоминвент» (далее - истец, Лидер коллективного участника) и ООО «Горизонты Роста» (далее - ответчик, исполнитель) был заключен договор № 802 на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, согласно условиям которого исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы по теме: «Разработка и изготовление комплекса технических средств поддержки эксплуатации электрооборудования подстанций с применением технологий радиочастотной идентификации», предусмотренные Техническим заданием, а Лидер коллективного участника обязуется принять работы и оплатить их.

Договор № 802 от 10.12.2019 заключен во исполнение Соглашения о создании Коллективного участника (консорциума) от 22.10.2019, протокола о результатах закупочной процедуры от 22.11.2019 № 41169494 и Договора № 797 от 06.12.2019 г. на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ между ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» и АО «Научно-производственное объединение «Энергоатоминвент».

Договор № 802 от 10.12.2019 содержит в себе условия о правах и обязанностях, а также об ответственности коллективных участников при коллективном исполнении Договора № 797 от 06.12.2019 года на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, заключенного между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НПО «Энергоатоминвент» как Лидером коллективного участника.

В соответствии с п.8.6 договора № 802 от 10.12.2019 Лидер коллективного участника вправе, сверх неустойки предусмотренной договором, требовать возмещения причиненных ему убытков в полном объеме, в том числе упущенную выгоду, при любом неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем своих обязательств по договору.

В соответствии с п.8.7 договора № 802 от 10.12.2019 участники консорциума несут субсидиарную ответственность за своевременное и полное исполнение договора.

Уведомлением от 28.01.2022 № ГГ-336 ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» расторгло договор № 797 от 06.12.2019 г. в связи с нарушением сроков сдачи работ по договору (в частности, 4 этапа работ).

07.12.2021 года в адрес АО «НПО «Энергоатоминвент» поступило от АО «АЛЬФА-БАНК» Уведомление (за исх.№ 80/35885/07.12.21) о получении требования платежа по банковской гарантии от ПАО «ФСК ЕЭС» № ГГ-5009 от 03.12.2021 г. на сумму 4 491 450,00 согласно условиям банковской гарантии № 01MZ6X от 06.12.2019 

В обоснование данного требования ПАО «ФСК ЕЭС» указало неисполнение обязательств по выполнению работ 4 этапа Договора № 797 от 06.12.2019 года на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

Кроме этого, уведомление АО «АЛЬФА-БАНК» содержало требование о необходимости перечислить АО «НПО «Энергоатоминвент» на корреспондентский счет банка денежные средства в размере 4 491 450,00 рублей, а также информацию, что в случае задержки оплаты будут начисляться штрафные санкции согласно п. 6.1. Общих условий договора предоставления банковской гарантии.

Указанное требование платежа по банковской гарантии было исполнено гарантом (АО «АЛЬФА-БАНК») 10 декабря 2021 г.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 05.05.2022 по делу № А40-34792/22-47-212 с АО «НПО «Энергоатоминвент» в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» было взыскано: задолженность в размере 4 491 450 руб., неустойка в размере 467 110, 80 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 47 793 руб.

Таким образом, общий размер убытков АО «НПО «Энергоатоминвент» в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договору № 797 от 06.12.2019 года составляет 5 006 353 (пять миллионов шесть тысяч триста пятьдесят три) руб. 80 коп. (4 491 450 + 467 110,80 + 47 793).

Согласно Приложению № 2 (Календарный план) к Договору № 802 от 10.12.2019 г. доля ООО «Горизонты Роста» в выполнении 4 этапа работ по договору № 797 от 06.12.2019 года на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ определена в размере 28 %.

Порядок расчета доли участия ООО «Горизонты Роста» в выполнении 4 этапа работ:

Общая стоимость выполнения работ (7 этапов, всеми участниками) по договору № 797 от 06.12.2019 = 89 160 000 руб. 00 коп. (п.4.1. договора № 797 от 06.12.2019).

Общая стоимость выполнения работ по 4 этапу (всеми участниками) = 30 000 000 руб. 00 коп. (Приложение № 2 к договору № 797 от 06.12.2019 Календарный план).

Стоимость выполнения работ ООО «Горизонты Роста» по 4 этапу работ (в денежном выражении) = 8 400 000 руб. 00 коп. (Приложение № 2 к договору № 802 от 10.12.2019 Календарный план).

Соответственно, (8 400 000 руб. 00 коп./ЗО 000 000 руб. 00 коп.) * 100 % = 28 % -доля ООО «Горизонты Роста» в выполнении 4 этапа работ в процентном выражении.

В ходе судебного разбирательства истцом заявлено ходатайство об изменении исковых требований в порядке ст.49 АПК РФ.

В качестве основания для обращения в суд истец сослался на следующие судебные акты:

по делу № А40-34792/22-47-212 о взыскании с АО «НПО «Энергоатоминвент» в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» денежных средств по банковской гарантии в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договору № 797 от 06.12.2019 года., в частности, неустойки за нарушение сроков выполнения работ по 4 этапу;

по делу № А40-1003/23-12-11 о взыскании с АО «НПО «Энергоатоминвент» в пользу ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети» (ИНН 

<

***>) пени согласно Договору №797 от 06.12.2019 г. за период с 29.09.2020 г. по 31.01.2022 г. за нарушение сроков предоставления новой банковской гарантии.

Согласно п.3.2 Соглашения о создании Коллективного участника (консорциума) от 22.10.2019 Лидер коллективного участника является Участником консорциума, уполномочным представлять интересы каждой организации, входящей в состав Коллективного участника во взаимоотношениях с Организатором конкурса и Заказчиком.

Согласно п.3.5 Соглашения о создании Коллективного участника (консорциума) от 22.10.2019 участники консорциума несут субсидиарную ответственность по обязательствам, связанным с участием в конкурсе, и солидарную ответственность за своевременное и полное исполнение Договора, заключенного по результатам конкурса в случае присуждения победы.

В соответствии с п.8.7 договора № 802 от 10.12.2019 участники консорциума несут субсидиарную ответственность за своевременное и полное исполнение договора.

Таким образом, общин размер убытков АО «НПО «Энергоатомннвент» в связи с ненадлежащим исполнением солидарных обязательств по договору № 797 от 06.12.2019 года составляет:

5 006 353 руб. 80 коп. (4 491 450 + 467 110,80 + 47 793) - по делу № А40-34792/22-47-212;

4 413 684 руб. 00 коп. (4 368 840 + 44 844) - по делу № А40-1003/23-12-11;

Итого: 9 420 037 (девять миллионов четыреста двадцать тысяч тридцать семь) руб. 80 коп.

Согласно Приложению № 2 (Календарный план) к Договору № 802 от 10.12.2019 г. доля ООО «Горизонты Роста» в выполнении 4 этапа работ по договору № 797 от 06.12.2019 года на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ определена в размере 28 %.

Порядок расчета доли участия ООО «Горизонты Роста» в выполнении 4 этапа работ:

Общая стоимость выполнения работ (7 этапов, всеми участниками) по договору № 797 от 06.12.2019 = 89 160 000 руб. 00 коп. (п.4.1. договора № 797 от 06.12.2019).

Общая стоимость выполнения работ по 4 этапу (всеми участниками) = 30 000 000 руб. 00 коп. (Приложение № 2 к договору № 797 от 06.12.2019 Календарный план).

Стоимость выполнения работ ООО «Горизонты Роста» по 4 этапу работ (в денежном выражении) = 8 400 000 руб. 00 коп. (Приложение № 2 к договору № 802 от 10.12.2019 Календарный план).

Соответственно, (8 400 000 руб. 00 коп./30 000 000 руб. 00 коп.) * 100 % = 28 % -доля ООО «Горизонты Роста» в выполнении 4 этапа работ в процентном выражении.

Размер убытков, причиненных ООО «Горизонты Роста», в связи с ненадлежащим исполнением своих обязательств по договору № 802 от 10.12.2019:

5 006 353 руб. 80 коп. * 28 % = 1 401 779 руб. 06 коп.

Согласно Приложению № 2 (Календарный план) к Договору № 802 от 10.12.2019 г. доля ООО «Горизонты Роста» в выполнении всех этапов работ по договору № 797 от 06.12.2019 года на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ определена в размере 30,06 % (по строке «ИТОГО» и по графе «Стоимость работ (услуг) в % от общей стоимости поставок, работ (услуг)»).

Размер убытков, причиненных ООО «Горизонты Роста», в связи с ненадлежащим исполнением своих обязательств по договору № 802 от 10.12.2019:

4 413 684 руб. 00 коп. * 30,06 % = 1 326 753 руб. 41 коп.

По состоянию на 31.10.2023 года размер убытков, причиненных ООО «Горизонты Роста», в связи с ненадлежащим исполнением своих обязательств по договору № 802 от 10.12.2019, составляет:

1 401 779 руб. 06 коп. + 1 326 753 руб. 41 коп. = 2 728 532 руб. 47 коп.

На основании изложенного истец обратился с настоящим иском в суд.

Вместе с тем,   Договор №797 от 06.12.2019г. был заключен в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Закон о закупках).

В связи с этим для участия в закупке (в открытом одноэтапном конкурсе № 1169494; извещение № 31908407466 от 16.10.2019г.) между АО «НПО «Энергоатоминвет», АО «НТЦ ФСК ЕЭС», ООО «Горизонты роста» и АО «Научные приборы» было подписано 22.10.2019 г. Соглашение о создании Коллективного участника (консорциума), где АО «НПО «Энергоатоминвент» являлось Участником № 1 и наименовал ось «Лидер коллективного участника». В дальнейшем, после объявления результата закупочной процедуры (протокол № 41169494 от 22.11.2019 г.) между коллективными участниками (участниками консорциума) были заключены договоры: - № 801 от 10.12.2019 г. на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ между АО «НПО «Энергоатоминвент» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС»; - № 802 от 10.12.2019 г. на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ между АО «НПО «Энергоатоминвент» и ООО «Горизонты Роста»; -№ 803 от 10.12.2019 г. на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ между АО «НПО «Энергоатоминвент» и АО «Научные приборы», которыми распределялись права и обязанности, а также устанавливалась ответственность при коллективном исполнении Договора №797 от 06.12.2019 года на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, заключенного между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НПО «Энергоатоминвент» как лидером коллективного участника.

31.01.2022 года в адрес АО «НПО «Энергоатоминвент» поступило уведомление от ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» о расторжении согласно п.2 ст.715 ЕК РФ Договора № 797 от 06.12.2019 г., т.е. в связи с просрочкой выполнения работ по данному Договору.

Не согласившись с односторонним отказом от исполнения договора, АО «НПО «Энергоатоминвент» и направило соответствующую претензию (№ 02006 от 07.02.2022 г.) в адрес ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», а затем обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с иском о признании недействительным одностороннего отказа ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» от исполнения Договор № 797 от 06.12.2019 г. на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, оформленный Уведомлением № ГГ-336 от 28.01.2022 г.

Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-124166/22-15-937 в удовлетворении заявленных исковых требований отказано.

Далее АО «НПО «Энергоатоминвет», определяя доли участников, поочередно обращается с исками к АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (дело А40-101850/2023), ООО «Горизонты роста» (дело А40-104845/2023) и АО «Научные приборы» (дело А40-101850/2023) за возмещением убытков связанных с взысканием банковской гарантии и в связи с тем, что каждый коллективный участник несет расходы и убытки пропорционально стоимости вклада в общее дело.

В силу пункта 1 статьи 1046 ГК РФ порядок покрытия расходов и убытков, связанных с совместной деятельностью товарищей, определяется их соглашением. При отсутствии такого соглашения каждый товарищ несет расходы и убытки пропорционально стоимости его вклада в общее дело.

В соответствии с п.8.6 договора №802 от 10.12.2019 Лидер коллективного участника вправе требовать возмещения причиненных ему убытков в полном объеме, при любом не исполнении, или ненадлежащем исполнении Исполнителем своих обязательств по договору.

Ответчик в полном объеме и в установленные Планами сроки выполнял свои обязательства, каких-либо претензий и нареканий в части исполнения объема работ к коллективному участнику ООО «Горизонты роста» со стороны Лидера коллективного участника не имелось, сведений о не исполнении, или ненадлежащем исполнении Исполнителем своих обязательств по договору Истцом не представлено.

Напротив, те задачи и функции по координации общих усилий Исполнителей, по взаимодействию с Заказчиком и продвижению результатов проекта, которые были возложены на АО «НПО «Энергоатоминвент» как на Лидера коллективного участника в соответствии с договором №797 от 06.12.2019 г. и Соглашением о создании Коллективного участника (консорциума) от 22.10.2019 г., выполнялись им некачественно, несвоевременно и без должной ответственности за результат общего дела.

Так, в частности об этом свидетельствует ситуация с продлением сроков выполнения работ, которая была предметом рассмотрения по делу №А-40-124166/22-15-937. По мнению истца, дополнительным соглашением №3 к Договору стороны согласовали новые сроки выполнения работ по Договору путем внесения изменений в п. 3.1 Договора: Начало - 22.11.2019, окончание - 29.12.2023. Как следует из письма АО «НПО «Энергоатоминвент» от 28.04.2021 № 04028 истец направил в адрес ответчика проект дополнительного соглашения № 3 к Договору, с увеличением срока выполнения работ по Договору. Проект Дополнительного соглашения № 3 к Договору действительно поступил в адрес ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (вх. 6-5424 от 29.04.2021), но без подписи уполномоченного лица, в связи с чем, проект Дополнительного соглашения № 3 нельзя было признать предложением (офертой) заключить договор с новыми сроками. В ответ на поступившее письмо сотрудника ПАО ФСК в рабочем порядке поступило предложение в электронном письме адресованное сотруднику истца выслать подписанное со стороны истца упомянутое дополнительное соглашение (скан-копия письма от 20.10.2021), однако данное предложение осталось без исполнения .

Данный факт свидетельствует о виновных действиях со стороны самого Лидера коллективного участника, который в том числе обусловил негативное отношение Заказчика к продолжению сотрудничества и дальнейшему отказу от Договора.

Таким образом,  истец не доказал причинно-следственную связь между действиями ответчика и несением самим истцом убытков

При указанных обстоятельствах иск не подлежит удовлетворению.

На основании  изложенного, руководствуясь ст.ст.   110, 123, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

В  удовлетворении  иска отказать. 

Взыскать с   акционерного общества  "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭНЕРГОАТОМИНВЕНТ" ( ОГРН: 

<

***>) в федеральный бюджет госпошлину в размере 36 643 руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

Судья:

ФИО1