Арбитражный суд Волгоградской области 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ 

 (резолютивная часть)

Дело № А12-30672/2020

04 марта 2021 г.

город Волгоград

 

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Кремс Л.А., при ведении  протокола судебного заседания помощником судьи Дулиной О.А., рассмотрев в открытом  судебном заседании дело по иску государственного бюджетного учреждения  здравоохранения "Волгоградский областной клинический кардиологический центр",  Волгоград (400008, 

<

...>,  ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью  "ТОЛАМ" (400120, 

<

...>,  ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) об обязании исполнить гарантийные  обязательства в рамках контракта № 01.10.2019 г. № 628/297ЭА/19 и устранить все  имеющиеся дефекты по акту комиссии,  

при участии в судебном заседании:  от истца – ФИО1, доверенность от 11.01.2021 г.;  

от ответчика – не явился, извещен.  

 Руководствуясь ст. ст. 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Толам» выполнить  гарантийные обязательства в рамках заключенного контракта от 01.10.2019г.   № 628/297ЭА/19, а именно: выполнить ремонтные работы с целью устранения дефектов,  возникших в процессе эксплуатации объекта:  

1. устранить подтек от воды размером 0,2м2 на потолке комнаты отдыха водителей в  районе пожарного датчика;  

2. устранить подтек от воды на стене размером 0,7м2 в комнате отдыха водителей; 3. устранить подтек от воды на стене размером 0,6м2 в токарном цехе; 

4. устранить подтек от воды на потолке моечного бокса размером 0,4м2 в районе  выхода вентиляции;  

5. устранить подтек от воды размером 0,6м2 на стене в автомобильном боксе  служебных автомашин;  

6. закрепить на крыше гаража (на стене токарного цеха, надстройке гаража) участки  установленных отливов общей длинной 9 м.п.;  

7. закрепить на площадке, над выходом вентиляции (район вытяжных двигателей),  отслоившийся гидроизолирующий материал по швам 2.5м2;  

8. устранить подтек от воды на стене размером 0,7м2, восстановить обвалившуюся  штукатурку на надстройке гаража;  

9. восстановить обрушившиеся отливы длиной Зм.п. на коробе выхода вентиляции  надстройки гаража;  

10. устранить отклеивающуюся гидроизоляцию общей площадью Зм2 на стыках  парапетных плит стен гаража;  

11. устранить подтеки в стыках плит потолка, общей площадью 0,7м2, в боксах для  хранения автотранспорта.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ТОЛАМ" (400120, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в  пользу государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградский  областной клинический кардиологический центр", Волгоград (400008, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) расходы  по оплате госпошлины в сумме 6000 руб.  

 Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в порядке  апелляционного производства в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца после его принятия через арбитражный суд Волгоградской области.  

 Судья Л.А. Кремс