Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-18236/2022

12 мая 2022 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  19 апреля 2022 года.

Полный текст решения изготовлен  12 мая 2022 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Коросташова А.А.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

истец: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" (адрес:  Россия 194044, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ПЕР. НЕЙШЛОТСКИЙ Д.8, ОГРН: 

<

***>);

ответчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (адрес:  Россия 198095, Санкт-Петербург, МИХАЙЛОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 4А, ЛИТЕРА А ПОМЕЩЕНИЕ, 1-Н,2-Н ОФИС 157, ОГРН: 

<

***>);

о взыскании,

установил:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "ДИРЕКЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к Акционерному обществу "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ВОЗРОЖДЕНИЕ" о взыскании 20 000 руб. 00 коп. штрафа.

Определением суда от 02.03.2022 дело принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее  АПК РФ). Ответчику предложено представить отзыв на заявленные требования. Лицам, участвующим в деле, предложено представить доказательства в обоснование своих доводов.

Решением в виде резолютивной части от 19.04.2022 исковые требования удовлетворены.

В суд от Акционерного общества "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ВОЗРОЖДЕНИЕ" поступило заявление о составлении мотивированного решения.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

Между СПБ ГКУ «Дирекция транспортного строительства» (Дирекция, Заказчик) и АО «ПО «Возрождение» (Подрядчик) заключен государственный контракт от 18.10.2021 № ТР-41 на выполнение работ по ремонту объекта «Шлиссельбургское шоссе от Петрозаводского шоссе до ул. Пролетарской Победы» для нужд Санкт-Петербурга (далее -Контракт).

Согласно п. 1.1. Заказчик поручает, обязуется принять и оплатить, а Подрядчик обязуется собственными и привлеченными силами и средствами выполнить работы по ремонту объекта «Шлиссельбургское шоссе от Петрозаводского шоссе до ул. Пролетарской Победы» для нужд Санкт-Петербурга (далее - Объект), в соответствии с техническим заданием, календарным планом производства работ и в объемах и стоимости работ, приведенных в ведомости объемов работ и расчете контрактной цены, сдать объект Заказчику по акту приемочной комиссии и передачи объекта в эксплуатацию в установленный Контрактом срок.

В соответствии с п. 5.2.1. Контракта Подрядчик обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после заключения Контракта представить согласованный с СПб ГБУ «Центр транспортного планирования» календарный план производства работ.

В силу п. 5.2.37. Контракта, Подрядчик обязан в течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения Контракта разработать и согласовать с УГИБДД, СПб ГКУ «ДОДД», СПБ ГБУ «Центр транспортного планирования» и Комитетом по транспорту схему организации дорожного движения на период производства работ на объекте.

По состоянию на 07.12.2021 Подрядчиком допущено ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных п. 5.2.1. и 5.2.37. Контракта.

Факт ненадлежащего исполнения Подрядчиком, предусмотренных п. 5.2.1. и 5.2.37. Контракта обязательств, подтверждается письмом в адрес АО «ПО «Возрождение» от 15.11.2021 № 17001/21-0-1.

Кроме того, факт ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком, подтверждается протоколом совещания по вопросу ремонта

Шлиссельбургского шоссе от Петрозаводского шоссе до ул. Пролетарской победы от 17.11.2021, по которому установлен срок для предоставления разработанной и согласованной схемы дорожного движения на участок Объекта от Петрозаводского шоссе до дома 2, корп. 1Б по Шлиссельбургскому шоссе до 23.11.2021; протоколом совещания по вопросу выполнения ремонтных работ Шлиссельбургского шоссе от Петрозаводского шоссе до ул. Пролетарской победы от 26.11.2021, по которому установлен срок для предоставления календарного плана, согласованного с СПб ГКУ «Центр транспортного планирования» до 01.12.2021.

В силу п. 7.2. Контракта в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

В соответствии с подп. «в» п. 7.2.2. за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

В связи с ненадлежащим исполнением, предусмотренных Контрактом обязательств Дирекция направила в адрес Подрядчика претензию от 17.12.2021 № 09-10603/21-0-0 с требованием об оплате штрафа в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей в течение 20 дней с даты получения претензии.

В адрес Ответчика была направлена претензия, оставление указанной претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения истца с настоящим иском в суд.

Согласно части 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В силу части 2 статьи 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Расчет штрафа, основания начисления судом проверены и признаны обоснованными. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с Акционерного общества "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ВОЗРОЖДЕНИЕ" в пользу Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "ДИРЕКЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" 20 000 руб. 00 коп. штрафа.

Взыскать с Акционерного общества "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ВОЗРОЖДЕНИЕ" в доход федерального бюджета 2 000 руб.00 коп. государственной пошлины по иску. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.

Судья Коросташов А.А.