именем Российской Федерации

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

16. 08. 2017 года.                                             Дело № А40-87040/17-151-826

Резолютивная часть решения объявлена 15. 08. 2017 года.

Решение изготовлено в полном объеме 16. 08. 2017 года.

Арбитражный суд г. Москвы 

в составе председательствующего Чекмарёва Г.С., единолично, 

протокол судебного заседания вёл секретарь судебного заседания Коробков К.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело № А40-87040/17

по иску ООО "НОВЕК И "К" (ИНН 

<

***>)

к ООО "МСУ ГРАД-1" (ИНН 

<

***>)

о взыскании 2 628 851 руб. 02 коп. - долга, 110 510 руб. 27 коп.- процентов,

с участием представителей: от истца – ФИО1, дов. от 01.03.2017 г.;

от ответчика – не явился, извещен.

У  С  Т  А  Н  О  В  И  Л  :

Иск заявлен о взыскании 2 628 851 руб. 02 коп. - долга, 110 510 руб. 27 коп.- процентов (с учетом принятых судом уточнений исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ), на основании статей 309, 310, 702, 711 ГК РФ.

Истец направил в судебное заседание представителя, который поддержал заявленный иск с учетом уточнения, повторив доводы, изложенные в исковом заявлении.

Ответчик не направил представителя в судебное заседание, о котором извещен в установленном порядке; не представил отзыв.

Дело рассмотрено по имеющимся в деле документам, представленным истцом в отсутствие отзыва ответчика  и представителя ответчика.

Между Истцом (Подрядчик)  и Ответчиком (Заказчик) был заключен договор подряда №260-0901-20/16 от 01 сентября 2016 г. на выполнение строительно-монтажных работ на устройство свайного поля при строительстве объекта по строительному адресу: МО, Красногорский район, МортонГрад «Путилково», поз.2

В соответствии с Дополнительным соглашением №1 от 10 января 2017 г. к договору, общая стоимость работ по договору составляет сумму в размере 4 621 886 руб. 46 коп.

Истец  исполнил свои обязанности по договору подряда, о чем свидетельствуют подписанные сторонами без замечаний Акты по форме КС-2 и Справки по форме КС-3 от 31.01.2017 г и от 30.04.2017 г. на сумму 4 621 886  руб. 46 коп. 

В соответствии с Приложением № 3 к договору "Порядок оплаты" оплата работ производятся Подрядчиком в следующем порядке:

- п. 1.1. Сумма авансового платежа в размере 15 % от общей стоимости работ по Договору, что составляет 1 993 034 рубля 99 копеек, в т.ч. НДС 18%, оплачивается  Заказчиком в течение 30 рабочих дней с момента исполнения подрядчиком обязательств в соответствии с пунктом 4.1.31 договора. При этом Подрядчик не позднее 2 дней с момента получения аванса обязан направить в адрес Заказчика счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ на полученный аванс.

- п. 1.2.  По мере подписания Актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 Генподрядчик  оплачивает стоимость работ в размере 85 % от полной стоимости работ, указанной в соответствующей Справке по форме КС-3, в течение 10 дней с момента подписания Сторонами указанных Актов по форме КС-2 и Справок по форме КС-3 и предоставления Подрядчиком счета-фактуры, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.  

Акты по форме КС-2 и КС-3 сторонами были подписаны 31.01.2017 г. на сумму 4 046 384 руб. 27 коп.,  соответственно оплата (с учетом оплаченного аванса) в размере 2 053 349  руб. 28 коп. должна быть произведена в срок до 14 февраля 2017 года.

Акты по форме КС-2 и КС-3 на сумму 575 501 руб. 74 коп.  сторонами подписаны 30.04.2017 г., соответственно оплата должна быть произведена в срок до 10 мая 2017 года.

Ответчик перечислил Истцу аванс 07 октября 2016 года в размере 1 993 034 рубля 99 копеек. После подписания Актов и Справок оплата Ответчиком в полном объеме не произведена.

Таким образом, задолженность по договору составляет 2 628 851 руб. 02 коп.

Ответчик требования истца не оспорил, отзыв не представил, доказательства погашения долга в материалах дела отсутствуют.

Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми

Согласно ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно п.1 ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

Требование истца о взыскании долга в сумме 2 628 851, 02 руб. – законное, обоснованное, подтверждено имеющимися в материалах дела доказательствами, не оспорено и не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению.

В соответствии с п. 8.1. Договора, за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Согласно п. 1 статьи 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующими в месте жительства кредитора или, если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения, опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Требование истца о взыскании процентов за период с 15.02.2017 по 15.08.2017 в сумме 110 510, 27 руб. – законное, обоснованное, подтверждено имеющимися в деле документами, представленными истцом, не оспорено и не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению в соответствии с представленным истцом расчетом.

Расходы  по уплате  госпошлины подлежат распределению в соответствии со ст.ст. 110,112 АПК РФ.

Руководствуясь статьями  4, 41, 49, 65, 66, 71, 75, 81, 102-104, 110, 112, 121-124, 155, 156, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд

Р  Е  Ш  И  Л  :

Взыскать с ООО "МСУ ГРАД-1" (ИНН 

<

***>) в пользу ООО "НОВЕК И "К" (ИНН 

<

***>) 2 628 851 руб. 02 коп. - долга, 110 510 руб. 27 коп.- процентов и расходы по уплате госпошлины в сумме 33 514 руб. 

Взыскать с ООО "МСУ ГРАД-1" (ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета РФ госпошлину по иску в сумме 3 182, 81 руб.

Решение подлежит исполнению после вступления в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

Судья                                              Г.С. Чекмарёв