Арбитражный суд

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ул. Мира, 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-07, сайт http://www.hmao.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А75-22246/2019

18 февраля 2020 г.

г. Ханты-Мансийск

Резолютивная часть решения объявлена 12 февраля 2020 г.

Полный текст решения изготовлен 18 февраля 2020 г.

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи Касумовой С.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску казенного учреждения "Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству" муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Радужный (ОГРН 

<

***> от 19.11.2002, ИНН 

<

***>, место нахождения: 628462, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Радужный, мкр. 6, д. 18, корп. 18/5) к обществу с ограниченной ответственностью "Эко-сервис" (ОГРН 

<

***> от 20.04.2006, ИНН 

<

***>, место нахождения: 628600, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

<

...>) о понуждении к устранению недостатков, без участия представителей сторон, 

установил:

казенное учреждение "Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству" муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Радужный (далее – истец) обратился в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Эко-сервис" (далее - ответчик) об обязании в течение тридцати дней с даты вступления решения суда в законную силу исполнить гарантийные обязательства и устранить строительные недостатки (дефекты) по контрактам от 20.07.2017 № 0187300007817000088-0210350-01, от 07.09.2017 № 0187300007817000126-0210350-02.

Определением суда от 04.12.2019 предварительное и судебное заседания назначены на 12.02.2020.

В отсутствие возражений сторон относительно перехода к рассмотрению дела в судебном заседании непосредственно после окончания  предварительного судебного заседания, арбитражный суд на основании статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пункта 27 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 № 65, завершил подготовку по делу и перешел к рассмотрению дела в судебном заседании.

На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проведено в отсутствие представителей сторон; ходатайство истца о рассмотрении дела в его отсутствие удовлетворено.

Ответчик отзыв на иск не представил, о наличии возражений против предъявленных исковых требований не заявил, самостоятельно распорядившись принадлежащими ему процессуальными правами.

Арбитражный суд, исследовав материалы дела, считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между истцом (заказчик) и ответчиком (исполнитель) заключены два муниципальных контракта от 20.07.2017 № 0187300007817000088-0210350-01 (далее – контракт-1), от 07.09.2017 № 0187300007817000126-0210350-02 (далее – контракт-2).

В соответствии с разделом 1 контракт-1 ответчик обязался выполнить на условиях контракта поставку детского игрового оборудования и малых архитектурных форм с последующим монтажом по адресам: 

<

...> район жилых домов №№ 9, 14, 15; 2 микрорайон, район жилых домов №№ 4, 5, 11.

В соответствии с разделом 1 контракт-1 ответчик обязался выполнить на условиях контракта поставку детского игрового оборудования и малых архитектурных форм с последующим монтажом по адресам: 

<

...> район жилого дома №27; 3 микрорайон, район жилых домов №№ 6, 7, 8.

Контрактами согласованы сроки поставки и выполнения работ (разделы 4), стоимость работ и порядок расчетом (разделы 2), обязанности сторон (разделы 3), порядок сдачи и приемки работ (разделы 5), иные условия договора.

Разделами 6 контрактов стороны согласовали условия о гарантии качества поставленного товара и выполненных работ.

Пунктами 6.2. контракта стороны установили гарантийный срок на товар 36 месяцев с момента подписания отчетных документов, 24 месяца с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

Из анализа фактических правоотношений сторон следует, что они соответствуют в части выполнения работ – обязательствам подряда, регулируемым нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации и условиями контрактов; в части передачи товара – обязательствами поставки, регулируемым соответствующими нормами главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 454 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

Согласно пункту 1 статьи 469 Гражданского кодекса Российской Федерации продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи. При отсутствии в договоре купли-продажи условий о качестве товара продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется (пункт 2 статьи 469 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Частью 2 статьи 475 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) покупатель вправе по своему выбору: отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы; потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда,               а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым                  к работе соответствующего рода.

В соответствии пунктом 1 статьи 724 Гражданского кодекса Российской Федерации если иное не установлено законом или договором подряда, заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при условии, что оно выявлено в сроки, установленные настоящей статьей.

На основании пункта 1 статьи 722 Гражданского кодекса Российской Федерации                  в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора                о качестве (пункт 1 статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации  в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в договоре использования, либо при отсутствии                         в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, потребовать                    от подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

Как следует из материалов дела, товарная накладная и акт выполненных работ по контракту-1 подписаны в августа 2017 года (т. 1 л.д. 64-68), по контракту-2 – в октябре 2017 года (т. 1 л.д. 99-103)

Недостатки работ ответчика по контрактам были выявлены в апреле 2019 года (акт осмотра от 10.04.2019 № 04-131/01-25 (т. 1 л.д. 114-154), то есть недостатки товара и работ обнаружены заказчиком в течение гарантийного срока.

В силу пункта 2 статьи 476 Гражданского кодекса Российской Федерации в отношении товара, на который продавцом предоставлена гарантия качества, продавец отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара возникли после его передачи покупателю вследствие нарушения покупателем правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

По условиям пункта 1 статьи 754 Гражданского кодекса Российской Федерации, подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления                         от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных                              в технической документации показателей объекта строительства.

Подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока (пункт 1 статьи 755 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 2 статьи 755 Гражданского кодекса Российской Федерации  подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Таким образом, бремя доказывания обстоятельств того, что выявленные дефекты                не явились следствием ненадлежащего качества товара и выполненных работ, а появились вследствие нормального износа объектов или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, лежит на подрядчике.

Факт выполнения спорных работ ответчик не оспорил.

При этом, доказательств того, что дефекты не явились следствием ненадлежащего качества товара, выполненных работ, ответчик не представил, доводы истца о ненадлежащем качестве товара и выполненных работ не опроверг.

Также, ответчик не представил доказательств того, что выявленные дефекты возникли в результате ненадлежащей эксплуатации объекта.

О назначении судебной экспертизы ответчик также не заявил.

В силу статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий                            в результате совершения или несовершения ими соответствующих процессуальных действий.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Оценив представленные доказательства в их совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд находит исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Государственная пошлина по настоящему иску в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся судом                           на ответчика.

Учитывая изложенное, руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167, 168, 169, 170, 171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Эко-Сервис" в течении тридцати дней с даты вступления решения суда в законную силу исполнить гарантийные обязательства по муниципальным контрактам от 20.07.2017 № 0187300007817000088-0210350-01, от 07.09.2017 № 0187300007817000126-0210350-02, заключенным между казенным учреждением "Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству" муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Радужный и обществом с ограниченной ответственностью "Эко-сервис" , а именно выполнить работы:

 

- по муниципальному контракту от 20.07.2017 № 0187300007817000088-0210350-01

1

Детский игровой

комплекс

2мкр, ж.д. 4,5,9,11-1шт.

1) установить на альпинистской стенке перекладину с канатом.

2) демонтировать спираль из металлической трубы и установить спираль из металлической трубы с количеством витков в соответствие с эскизом.

3) установить декоративные элементы согласно эскизу.

4) установить недостающий брус под ступенями и полами.

5) демонтировать обшивку моста из фанеры и установить брус.

6) заменить разбухшую и расслоившуюся фанеру на новую влагостойкую фанеру, окрашенную профессиональными двухкомпонентными красками.

7) участки на металлических частях (элементах) комплекса с коррозией зачистить, загрунтовать и покрасить полимерно-порошковой краской.

2

Качели

с гибкой подвеской

1мкр, ж.д. 9 - 1шт

1мкр, ж.д. 14,15 - 1шт

2мкр, ж.д. 4,5,9,11-1шт

На всех качелях:

1) установить пластиковые заглушки на концах (торцах) несущих столбов;

2) демонтировать элементы из фанеры и установить новые с требуемой толщиной 24 мм, окрашенные профессиональными двухкомпонентными красками;

3) участки на металлических балках (перекладин) с коррозией зачистить, загрунтовать и покрасить профессиональными двухкомпонентными красками;

4) выполнить крепления цепей сидушек к балкам (перекладинам) заводского изготовления.

3

Песочный дворик

с горкой

2мкр, ж.д. 4,5,9,11-1шт.

1 ) установить декоративные элементы согласно эскизу.

2) заменить перила согласно эскизу.

3) заменить фанеру полов и боковых стенок на доски толщиной 40мм.

4) заменить разбухшую и расслоившуюся фанеру на новую влагостойкую фанеру, окрашенную профессиональными двухкомпонентными красками.

5) участки на металлических частях (элементах) с коррозией зачистить, загрунтовать и покрасить полимерно-порошковой краской.

4

Качалка-балансир

1мкр, ж.д.14,15 - 1шт

2мкр, ж.д.4,5,9,11 - 2шт

На всех качалках-балансирах:

1) переделать крепление балансира к опорному каркасу и спинок к балансиру согласно эскизу;

2) на балансире заменить фанеру на доску толщиной 40 мм и фанеру толщиной 15 мм, склеенных между собой;

3) переделать опорный каркас из требуемой трубы диаметром 42 мм;

4) заменить элементы с разбухшей фанерой на влагостойкую фанеру.

5

Карусель

2мкр, ж.д.4,5,9,11- 1шт.

1) заменить разбухшую и деформированную фанеру на новую влагостойкую фанеру, окрашенную профессиональными двухкомпонентными красками;

2) сварные стыки и швы отшлифовать и закрасить порошковой краской;

3) участки на металлических частях (элементах) с коррозией зачистить, загрунтовать и покрасить полимерно-порошковой краской.

6

Качалка на пружине

1мкр, ж.д. 14,15 - 1шт.

1) переделать качалку в соответствие с эскизом требованиями к материалам;

2) участки на металлических частях пружины-рессоры с коррозией зачистить, загрунтовать и покрасить полимерно-порошковой краской.

7

Качалка

на двойной пружине

2мкр, ж.д.4,5,9,11- 1шт.

Заменить сломанную конструкцию из двойных пружин и установить качалку обратно.

8

Качалка на пружине

2мкр, ж.д.4,5,9,11- 1шт.

Выполнить качалку согласно эскизу с заменой разбухшей и деформированной фанеры на влагостойкую фанеру.

9

Игровой комплекс

1мкр, ж.д.14,15 - 1шт.

1) переделать элементы комплекса в соответствие с эскизам.

2) переделать поручни лестницы верхней горки выполнить из трубы диаметром 32 мм.

3) заменить разбухшую фанеру на влагостойкую.

4) участки на металлических частях (элементах) с коррозией зачистить, загрунтовать и покрасить профессиональной двухкомпонентной краской.

10

Гимнастический комплекс

1мкр, ж.д.14,15 - 1шт.

1) переделать спираль комплекса с требуемым количеством витков согласно эскизу.

2) перевесить треугольные накладки из фанеры согласно эскиза (должны закрывать углы на стыках несущих конструкций комплекса).

3) участки на металлических частях (элементах) с коррозией зачистить, загрунтовать и покрасить полимерной порошковой краской.

11

Песочница

1мкр, ж.д.9 - 1шт.

1мкр, ж.д.14,15 - 1шт.

1) заменить установленную песочницу по адресу 1 мкр, ж.д. 14,15 на конструкцию песочницы согласно эскизу и требуемым характеристикам.

2) заменить козырек песочницы, установленной по адресу 1 мкр, ж.д. 9, на козырек из влагостойкой фанеры согласно эскизу и требуемым характеристикам.

12

Лавочка

1 мкр, ж.д. 14,15 - 2шт.

На обеих лавочках:

1) заменить материал сиденья из фанеры на деревянный брус сечением 40?90 мм;

2) участки на металлических частях (элементах) с коррозией зачистить, загрунтовать и покрасить полимерной порошковой краской.

13

Лавочка

1 мкр, ж.д. 14,15 - 2шт.

На обеих лавочках:

1)заменить материал сиденья из фанеры на деревянный брус сечением 40?90 мм;

2) заменить проржавевшие метизы на оцинкованные.

14

Скамейка

1 мкр, ж.д. 9 - 1шт.

1) заменить материал сиденья и спинки из фанеры на деревянный брус сечением 40?90 мм в количестве 7 шт.

2) заменить разбухшую фанеру на влагостойкую.

3) участки на металлических частях (элементах) с коррозией зачистить, загрунтовать и покрасить полимерной порошковой краской.

15

Урна уличная

опрокидывающаяся

1мкр, ж.д. 9 - 1шт.

1мкр, ж.д. 14,15 - 2шт.

На всех урнах выполнить усиление верхней внутренней кромки бака металлическим ободком, усиливающий конструкцию урны, согласно требованиям.

16

Детский игровой

комплекс

1 мкр, ж.д. 9 - 1шт.

1) изготовить из влагостойкой фанеры толщиной 15 мм декоративные накладки и установить их согласно эскизу.

2) переделать из фанеры по форме согласно эскизу.

3) заменить разбухшую и деформированную фанеру пола и ступеней на влагостойкую фанеру.

4) участки на металлических частях (элементах) с коррозией зачистить, загрунтовать и покрасить профессиональной двухкомпонентной краской.

 

- по муниципальному контракту от 07.09.2017 № 0187300007817000126-0210350-02

 

1

Спортивный комплекс

7 мкр, ж.д. 27 - 1 шт.

1) установить перекладину из металлической трубы диметром 32 мм с канатом полипропиленовым армированным диаметром 30 мм.

2) выполнить разметку на баскетбольном щите.

3) заменить разбухшую и расслоившуюся фанеру на новую влагостойкую фанеру, окрашенную профессиональными двухкомпонентными красками.

4) участки на металлических частях (элементах) комплекса с коррозией зачистить, загрунтовать и покрасить полимерно-порошковой краской.

2

Спортивный комплекс

7 мкр, ж.д. 27 – 1 шт.

На участках конструкции из металлических труб с коррозией зачистить, загрунтовать и покрасить полимерной порошковой краской.

3

Качели

с гибкой подвеской

7 мкр, ж.д. 27 - 1шт.

1) установить крепление цепей люльки-сидения заводского исполнения.

2) заменить разбухшую и расслоившуюся фанеру на новую влагостойкую фанеру, окрашенную профессиональными двухкомпонентными красками.

3) участки на металлических частях (элементах) с коррозией зачистить, загрунтовать и покрасить профессиональными двухкомпонентными красками.

4

Песочный дворик

с горкой

7 мкр, ж.д. 27 - 1шт.

1) изготовить и установить декоративные накладки из влагостойкой фанеры толщиной 9 мм согласно эскизу и требованиям.

2) заменить элементы с разбухшей фанерой на влагостойкую фанеру.

3) участки на металлических частях (элементах) с коррозией зачистить, загрунтовать и покрасить профессиональными двухкомпонентными красками.

4) заменить покрытие полов из фанеры на доски толщиной 40 мм.

5

Качалка-балансир

7 мкр, ж.д. 27 - 1 шт.

1) переделать крепление балансира к опорному каркасу и спинок к балансиру согласно эскизу;

2) на балансире заменить фанеру на доску толщиной 40 мм и фанеру толщиной 15 мм, склеенных между собой;

3) заменить элементы с разбухшей фанерой на влагостойкую фанеру;

4) участки на металлических частях (элементах) с коррозией зачистить, загрунтовать и покрасить полимерной порошковой краской.

6

Карусель

7 мкр, ж.д. 27 - 1шт.

1) заменить разбухшую и расслоившуюся фанеру на новую влагостойкую фанеру, окрашенную профессиональными двухкомпонентными красками.

2) участки на металлических частях (элементов) с коррозией зачистить, загрунтовать и покрасить порошковой краской.

7

Качалка на пружине

7 мкр, ж.д. 27 - 1шт.

1) переделать качалку в соответствие с эскизом и требованиями к материалам.

2) участки на металлических частях пружины-рессоры с коррозией зачистить, загрунтовать и покрасить полимерной порошковой краской.

3) заменить метизы с коррозией на требуемые оцинкованные метизы.

8

Качалка на пружине

7 мкр, ж.д. 27 - 1шт.

1) выполнить замену разбухшей и деформированной фанеры на влагостойкую фанеру.

2) перекрасить качалку двухкомпонентной краской, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги.

3) металлические элементы со следами коррозии зачистить, загрунтовать и покрасить полимерной порошковой краской.

9

Игровой комплекс

3 мкр, ж.д. 6,7,8 - 1шт.

1) переделать элементы комплекса в соответствие с эскизом.

2) выполнить на верхней площадке защитные поручни шеста.

3) установить перекладину с канатом на полукруглом пандусе.

4) переделать ступени согласно требованиям из деревянного бруса сечением – 40 мм?90 мм, верхняя поверхность которых выполнена из ламинированной противоскользящей фанеры толщиной – 18 мм.

5) переделать полукруглый пандус согласно требованиям из деревянного бруса сечением – 90 мм ? 40 мм, отшлифованного и покрашенного со всех сторон.

6) переделать шест согласно требованиям из трубы диаметром 42 мм.

7) заменить разбухшую фанеру на влагостойкую окрашенную профессиональными двухкомпонентными красками.

8) участки на металлических частях (элементах) с коррозией зачистить, загрунтовать и покрасить полимерной порошковой краской.

10

Гимнастический

комплекс

3 мкр, ж.д. 6,7,8 - 1шт.

Выполнить покраску полимерной порошковой краской всех металлических элементов, деталей и сварных стыков с предварительной зачисткой и грунтовкой окрашиваемой поверхности.

11

Качели

с гибкой подвеской

3 мкр, ж.д. 6,7,8 - 1шт.

Перекрасить все металлические элементы полимерной порошковой краской устойчивой к истиранию и воздействию атмосферных явлений, а фанеру люльки-сидения краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги.

12

Двухместные качели с

гибкой подвеской

3 мкр, ж.д. 6,7,8 - 1шт.

Перекрасить все металлические элементы полимерной порошковой краской устойчивой к истиранию и воздействию атмосферных явлений, а фанеру сиденья заменить на влагостойкую фанеру окрашенную краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги.

13

Ковровыбивалка

3 мкр, ж.д. 6,7,8 - 1шт.

Перекрасить все металлические элементы полимерной порошковой краской устойчивой к истиранию и воздействию атмосферных явлений.

14

Песочница

3 мкр, ж.д. 6,7,8 - 1шт.

1) заменить потертую и расслоившуюся фанеру на влагостойкую фанеру окрашенную краской, специально предназначенную для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги.

2) заменить метизы с коррозией на требуемые оцинкованные метизы.

 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Эко-Сервис" в пользу казенного учреждения "Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству" муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Радужный расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6 000 рублей 00 копеек.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Не вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры разъясняет, что в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения, вынесенного в виде отдельного судебного акта, на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

 

Судья                                                                                                     С.Г. Касумова