1615/2018-5791(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-19687/2017

г. Казань

15 января 2018 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Сотова А.С., 

при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания  

помощником судьи Богдановой Н.Т., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

истца - общества с ограниченной ответственностью "Татпромэко", г.Казань (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к ответчику - обществу с ограниченной ответственностью "Топ-Проект",  

г.Набережные Челны (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

при участии третьего лица – общество с ограниченной ответственностью «АЗС –  

Строй» 

об обязании устранить недостатки и выполненных работ и передать исполнительную  

документацию с участием представителей: от истца – ФИО1, доверенность от 10.07.2017г. 

от ответчика – ФИО2, доверенность от 26.04.2017г.  от третьего лица – ФИО1, доверенность от 30.11.2016г.  

руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169, 174 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л :

иск удовлетворить частично. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Топ-Проект", г.Набережные  Челны (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение 30 (тридцати) календарных дней с  момента вступления в законную силу настоящего решения на объекте – АЗС № 181,  находящегося на 45 км автомобильной дороги Казань – Нижний-Новгород Зеленодольского  района Республики Татарстан:  

- выполнить работы по устройству однорядного одностороннего барьерного  ограждения на переходно-скоростных полосах (торможения и разгона) предусмотрено  ограждение высотой 0,75м (- 11ДО –– 0.75 – 2.0÷1.0) в количестве 530 пм.;  

- выполнить работы по устройству однорядного двухстороннего барьерного  ограждения на зеленом островке (газоне), ограждающем территорию АЗС от автодорожной  магистрали высотой 0,75м (11ДД – ТУ 5216-001-05765820-2007/300- 0.75 – 2.0÷0.95) в  количестве 79 пм;  

- выполнить работы по отсыпке обочин из щебня М800 фр.40-70мм по способу  заклинки ГОСТ 8267-93 h=0,2м шириной 3,00м с уклоном 40‰ в сторону оврага на площади  1445м2 по присыпным обочинам из песка на переходно-скоростных полосах (разгона и  торможения);  

- выполнить работы по устройству дорожной разметки термопластиком (линии,  стрелы и др.обозначения) определенные рабочим проектом 07-ПИР/2015-ПЗУ  «Транспортная схема с расстановкой дорожных знаков М1:500» лист 7, утвержденного ДИ и  ОД № 2 ГИБДД МВД РФ исх. № 15774и от 08.10.15г. на усовершенствованном покрытии  дороги переходно-скоростных полос (разгона и торможения) и на территории АЗС;  

- заменить уличные камеры AKS-1903 V IP POE наружной системы видеонаблюдения  на предусмотренные рабочим проектом 07-ПИР/2015-ИОС3-ВН видеокамеры Polyvision  PN9-IP2-V12PL/PN-M2-V12IRMPA-IP со встроенным блоком грозозащиты;  

- заменить установленные вдоль переходно-скоростных полос торможения и разгона,  на территории АЗС и под навесами ТРК светодиодные светильники неизвестного  производителя неизвестной марки (не проектной) на предусмотренные рабочим проектом 07- ПИР/2015-ИОС1-ЭС лист 17 светодиодные светильники производства «Ферекс» типа ДКУ  01-130-50-Ш на территории АЗС, типа ДКУ 01-208-50-Ш на ПСП и типа ДВУ 02-80-50-Д110  под навесами ТРК.  

- выполнить усовершенствованное асфальтобетонное покрытие дороги в соответствии с  рабочим проектом 07-ПИР/2015-ПЗУ «План благоустройства территории М1:500» с  устройством пандусов высотой 0,2 м на въезде и выезде с территории АЗС и пандусов высотой  0,15 м на въезде и выезде с площадки АЦ, общее количество 53 пм.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Топ-Проект", г.Набережные  Челны (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью "Татпромэко", г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) судебные  расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 рублей.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок.  

Председательствующий судья А.С. Сотов