Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-6322/2022

г. Хабаровск

04 июля 2022 года

Резолютивная часть судебного акта объявлена 27 июня 2022 года.

         Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи С.М. Курносовой,

        при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1 (до перерыва), секретарем судебного заседания ФИО2 (после перерыва), 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Артель старателей «Ниман» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 682086, 

<

...>; почтовый адрес: 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, р. 

<

...>)

к администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, р. 

<

...>)

о взыскании 11 256 064 руб. 42 коп. (с учетом уточнений, принятых в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации),  

В судебное заседание явились: 

от истца (в режиме онлайн) – ФИО3, представитель по доверенности № 31 от 10.07.2021, диплом № 3862 от 11.06.2015; 

от ответчика (в режиме онлайн) – ФИО4, представитель по доверенности от 26.10.2021 № 01-1-24-4380,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Артель старателей «Ниман» (далее – истец, ООО «А/С «Ниман») обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (далее – ответчик, Администрация) о взыскании задолженности по муниципальным  контрактам: 

- № 0122300026621000023 от 30.03.2021 на сумму 4 086 822 руб., 

- № 0122300026621000093 от 22.11.2021 на сумму 614 767 руб., 

- № 0122300026621000091 от 09.11.2021на сумму 628 421 руб., 

- № 0122300026621000090 от 01.11.2021на сумму 610 117 руб., 

- № 9/ЧС от 25.08.2021на сумму 23 474 366 руб.,

- № 17/ЧС от 12.12.2021на сумму 2 565 560 руб. 40 коп., 

- № 1/ЧС от 24.08.2021 на сумму 2 541 693 руб. 60 коп., 

- № 11/ЧС от 26.08.2021на сумму 429 840 руб.,

- № 0122300026621000089 от 22.10.2021на сумму 619 548 руб. 92 коп., 

- № 0122300026621000071 от 17.08.2021 – на сумму 726 293 руб. 28 коп.,  а также процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 434 026 руб. 64 коп., а всего -37 731 455 руб. 84 коп.      

Истец представил уточнения исковых требований в порядке статьи 49 АПК РФ в связи с частичной оплатой ответчиком задолженности, согласно которым просил взыскать с ответчика 11 256 064 руб. 42 коп., из которых: 9 851 529 руб. 60 коп. – задолженность по контрактам, 1 404 534  руб. 82 коп. – проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 02.11.2021 по 31.03.2022.

Судом уточнения исковых требований приняты. 

В судебном заседании представитель истца поддержала уточненные  исковые требования, указав, что между Администрацией Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Артель старателей «Ниман» (подрядчик) заключены муниципальные контракты №№:

- 0122300026621000023 от 30.03.2021 на сумму 4 086 822 руб., 

-0122300026621000093 от 22.11.2021 на сумму 614 767 руб., 

- 0122300026621000091 от 09.11.2021 на сумму 628 421 руб., 

- 0122300026621000090 от 01.11.2021 на сумму 610 117 руб., 

-9/ЧС от 25.08.2021 на сумму 23 474 366 руб.,

-17/ЧС от 12.12.2021 на сумму 2 565 560 руб. 40 коп., 

-1/ЧС от 24.08.2021 на сумму 2 541 693 руб. 60 коп., 

-11/ЧС от 26.08.2021 на сумму 429 840 руб.,

-0122300026621000089 от 22.10.2021 на сумму 619 548 руб. 92 коп., 

-0122300026621000071 от 17.08.2021 на сумму 726 293 руб. 28 коп. 

Факт выполнения работ на сумму 36 297 429 руб. 20 коп. подтверждается представленным в материалы дела актом сверки взаимных расчетов за 2021 год, подписанный обеими сторонами без возражений и замечаний, заверенный оттиском печатей. 

В связи с произведенной ответчиком добровольной оплатой по контракту 9/ЧС от 25.08.2021 на сумму 23 474 366 руб. (п/п от 11.05.2022 №№ 541 800, 541 794, по контракту 1/ЧС от 24.08.2021  на сумму 2 541 693 руб. 60 коп. (п/п от 11.05.2022 № 541795), по контракту 11/ЧС от 26.08.2021 на сумму 429 840 руб. (п/п от 11.05.2022 № 541797) задолженность составляет 9 851 529 руб. 60 коп.

Обращает внимание, что контрактами предусмотрено условие о досрочном выполнении  подрядчиком предусмотренных объемов работ, все работы по контрактам выполнены, приняты и подписаны заказчиком по актам формы КС-2, КС-3 без замечаний.

Представитель Администрации в судебном заседании поддержала отзыв, пояснила, что ответчиком признаются требования истца на сумму 2 584 380 руб. 28 коп. в отношении следующих контрактов:

- №0122300026621000091 от 09.11.2021 на сумму 628 421 руб.,

-  № 0122300026621000090 от 01.11.2021 на сумму 610 117 руб., 

- № 0122300026621000089 от 22.10.2021 на сумму 619 548 руб. 92 коп.,

- № 0122300026621000071 от 17.08.2021 на сумму 726 293 руб. 28 коп. 

Признание ответчиком частично исковых требований судом принято.

В части контрактов № 0122300026621000023 от 30.03.2021 на сумму 4 086 822 руб., №17/ЧС от 12.12.2021 на сумму 2 565 560 руб. 40 коп.,  №0122300026621000093 от 22.11.2021 на сумму 614 767 руб., всего на сумму 7 267 149 руб. 40 коп. администрация исковые требования не признает, указывает, что она сложилась по действующим контрактам, срок исполнения которых истекает 31.12.2022.                     

Заслушав представителей сторон, с учетом представленных отзывов и пояснения, изучив материалы дела, суд пришел к следующему.

Сложившиеся правоотношения сторон регламентируются нормами параграфов 1,3 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), общими нормами Гражданского кодекса об исполнении обязательств. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

Согласно пункту 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. 

Таким образом, подрядчик, требующий оплаты выполненных работ, обязан подтвердить факт их выполнения. 

Пунктом 4 статьи 753 ГК РФ установлено, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. 

На основании статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (пункт 1 статьи 310 ГК РФ). 

Как следует из материалов дела 30.03.2021 между Администрацией Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Артель старателей «Ниман» (подрядчик) заключен муниципальный контракт № 0122300026621000023 от 30.03.2021 на сумму 4 086 822 руб., по  условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы «Содержание автомобильной дороги п. Шахтинский – Софийск» в соответствии с технической частью, являющейся неотъмлемой частью контракта, а заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

Пунктом 2.1 установлена цена контракта, которая составляет 4 086 822 руб. с разбивкой: 2021 год (613 023 руб.), 2022 год (3 473 799 руб.).

Порядок расчетов предусмотрен в течение 30 календарных дней со дня подписания сторонами актов сдачи - приемки выполненных работ форм КС-2, КС-3 и выставления подрядчиком счетов на оплату (пункт 3.2 контракта).

Согласно пункту 5.1 контракта срок выполнения работ определен по 1 этапу  с 01.07.2021 – 31.12.2021, по 2 этапу с 01.01.2022 по 31.11.2022.

В силу пункта 4.3.3 подрядчик вправе завершить работы в более короткий срок, чем это предусмотрено контрактом.

Факт выполнения работ на сумму 4 086 822 руб., подтверждается представленными в материалы дела справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 29.11.2021 № 25, актом приемки выполненных работ от 29.11.2021 № 25, а также актом сверки взаимных расчетов за 2021 год, подписанный обеими сторонами без возражений и замечаний. 

12.10.2021 между Администрацией Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Артель старателей «Ниман» (подрядчик) заключен муниципальный контракт №17/ЧС от 12.12.2021 на сумму 2 565 560 руб. 40 коп., по  условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы «Ремонт моста на 55 км. автомобильной дороги п. Шахтинский - Софийск в соответствии с технической частью, являющейся неотъмлемой частью контракта, а заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

Пунктом 2.1 установлена цена контракта, которая составляет 2 565 560  руб. 40 коп. с разбивкой: 2021 год (307 867 руб. 25 коп.), 2022 год (2 257 693 руб. 15 коп.)

Пунктом 3.2 договора стороны определили порядок расчетов в течение 30 календарных дней со дня подписания сторонами актов сдачи - приемки выполненных работ форм КС-2, КС-3 и выставления подрядчиком счетов на оплату, а также условие, согласно которому подрядчик имеет право на досрочное исполнение обязательств по контракту.

Согласно пункту 5.1 контракта срок выполнения работ определен со дня заключения контракта до 30.11.2022 года.

В силу пункта 4.3.3 подрядчик вправе завершить работы в более короткий срок, чем это предусмотрено контрактом.

Факт выполнения работ на сумму 2 565 560 руб. 40 коп., подтверждается представленной в материалы дела справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 22.10.2021 № 16, а также актом сверки взаимных расчетов за 2021 год, подписанный обеими сторонами без возражений и замечаний. 

22.11.2021 между Администрацией Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Артель старателей «Ниман» (подрядчик) заключен муниципальный контракт №0122300026621000093 от 22.11.2021 на сумму 614 767 руб., по  условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы «Ремонт автомобильной дороги п. Шахтинский - Софийск (4 км.)» в соответствии с технической частью, являющейся неотъмлемой частью контракта, а заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

Пунктом 2.1 установлена цена контракта, которая составляет 614 767 руб. с разбивкой: 2021 год (92 215 руб.), 2022 год (522 552 руб.)

Порядок расчетов предусмотрен в течение 30 календарных дней со дня подписания сторонами актов сдачи - приемки выполненных работ форм КС-2, КС-3 и выставления подрядчиком счетов на оплату (пункт 3.2 контракта).

Согласно пункту 5.1 контракта срок выполнения работ определен по 1 этапу - до 31.12.2021, по 2 этапу - с 01.01.2022 по 30.11.2022, также стороны определили условие о возможном досрочном выполнении подрядчиком предусмотренных контрактом объемов работ.

Факт выполнения работ на сумму 614 767  руб., подтверждается представленными в материалы дела справками о стоимости выполненных работ и затрат от 24.11.2021 № 24, от 24.11.2021 № 23, актами приемки выполненных работ от 24.11.2021 № 24, от 24.11.2021 № 23, а также актом сверки взаимных расчетов за 2021 год, подписанный обеими сторонами без возражений и замечаний, заверенный оттиском печатей. 

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что  материалами дела подтверждается факт выполнения работ в полном объеме по спорным контрактам № 0122300026621000023 от 30.03.2021 на сумму 4 086 822 руб., №17/ЧС от 12.12.2021 на сумму 2 565 560 руб. 40 коп.,  №0122300026621000093 от 22.11.2021 на сумму 614 767 руб., всего на сумму 7 267 149 руб. 40 коп.

Довод администрации, о том, что контракты действующие, в связи с чем задолженность отсутствует, не принимается судом, так как условиями этих контрактов предусмотрено, что подрядчик имеет право на досрочное исполнение обязательств по контракту.

Все работы по контрактам выполнены, приняты и подписаны  заказчиком по актам формы КС-2, КС-3 без замечаний.

Факт выполнения работ также подтверждается актом сверки взаимных расчетов за 2021 год, подписанный обеими сторонами без возражений и замечаний, заверенный оттиском печатей. 

Согласно положениям статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств; каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами; никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы. 

Статья 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ возлагает на каждое лицо, участвующее в деле, обязанность доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Поскольку администрация не представила суду доказательств погашения задолженности по спорным муниципальным контрактам в полном объеме, суд на основе всестороннего исследования и надлежащей оценки доказательств в соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ считает заявленные исковые требования (с учетом признания ответчиком иска на сумму 2 584 380 руб. 28 коп.) подлежащими удовлетворению на сумму 9 851 529 руб. 60 коп. 

Также истцом к ответчику предъявлены требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 404 534 руб. 82 коп. 

В соответствии со статьей 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. 

По своей правовой природе проценты за пользование чужими денежными средствами являются самостоятельной мерой гражданско-правовой ответственности, установленной законом за нарушение денежного обязательства. 

Обязательство по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами возникает в силу неисполнения должником обязанности по уплате денежных средств их владельцу; поскольку основания для наступления указанного вида ответственности прямо предусмотрены ГК РФ, требование об уплате процентов может быть заявлено независимо от того, предусмотрена ли эта обязанность соглашением сторон. 

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). 

Расчет процентов произведен истцом на основании статьи 395 ГК РФ исходя из размера задолженности по каждому муниципальному контракту, периода просрочки оплаты и применением ключевой ставки Банка России действующей в указанный период. 

Представленный истцом расчет процентов судом проверен, является арифметически верным. 

В связи с чем, требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 404 534 руб. 82 коп. также подлежит удовлетворению.

В силу части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края в пользу общества с ограниченной ответственностью «Артель старателей «Ниман» задолженность в размере 9 851 529 руб. 60 коп., проценты за период с 23.11.2021 по 31.03.2022 в размере 1 404 534 руб. 82 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 72 280 руб.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Артель старателей «Ниман» из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину по платежному поручению от 13.04.2022 № 699 в размере 127 720 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

 

 Судья                                                                                       С.М. Курносова