Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-96306/2022

06 мая 2023 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  12 апреля 2023 года.

Полный текст решения изготовлен  06 мая 2023 года.

 

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской областиКурова И.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

Истец: индивидуальный предприниматель ФИО2 (адрес:                          Санкт-Петербург, ОГРНИП 321784700177181, ИНН 

<

***>, Дата присвоения ОГРНИП 16.06.2021), 

Ответчик: публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго» (адрес: 197227,                  Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ озеро Долгое, Гаккелевская ул., д. 21, лит. А, ОГРН 

<

***>, Дата присвоения ОГРН 22.07.2002, ИНН 

<

***>), 

о взыскании денежных средств, 

при участии:

- от истца: ФИО3, доверенность от 25.11.2022;

- от ответчика: ФИО4, доверенность от 29.11.2021;

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее – истец, Предприниматель), обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к публичному акционерному обществу «Россети Ленэнерго» (далее – ответчик, ПАО «Россетти Ленэнерго», Общество), с учетом уточнения исковых требований в порядке статьи 49 АПК РФ, о понуждении исполнении исполнить договор об осуществлении технологического присоединения № ОД-ЮЭС-014701-21/020757-Э-21 (далее – договор), а также взыскании 10 000 руб. судебной неустойки за каждый день неисполнения ответчиком решения суда, судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В судебном заседании, состоявшемся 12.04.2023, представитель истца поддержал уточненные исковые требования.

Представитель ответчика возразил против удовлетворения исковых требований по основаниям письменного отзыва.

В обоснование возражений указал, что по договору сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта – земельного участка с кадастровым номером: 47:14:0302001:17, между тем, в процессе рассмотрения дела установлено, что указанный земельный участок разделен на новые участки с кадастровыми номерами 47:14:0302001:993 и 47:14:0302001:994. Ответчик указал, что с момента разделения земельного участка Предприниматель не может рассматриваться в качестве лица,  обязанного осуществить технологическое присоединение объекта к электросетевому хозяйству организации. Предъявляя требования о понуждении ответчика исполнить договор, истец, между тем,  свою часть технических условий не исполнил.

Суд отказал в приобщении истцом дополнительных документов к материалам дела по причине отсутствия их заверения.

Суд отмечает, что документы, представляемые в арбитражный суд и подтверждающие совершение юридически значимых действий, должны соответствовать требованиям, установленным для данного вида документов. Письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. Если к рассматриваемому делу имеет отношение только часть документа, представляется заверенная выписка из него (пункты 4, 8 статьи 75 АПК РФ).

Арбитражный суд признал дело подготовленным к судебному разбирательству и поскольку от лиц, участвующих в деле, не поступило возражений относительно продолжения рассмотрения дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции, с учетом обстоятельств дела, суд, завершил предварительное судебное заседание в порядке статей 136-137 АПК РФ, перешел к рассмотрению искового заявления по существу. 

Исследовав материалы дела, выслушав доводы и оценив представленные в дело доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

Между ПАО «Россети Ленэнерго» и Предпринимателем 16.06.2021 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям                     № ОД-ЮЭС-014701-21/020757-Э-21, в соответствии с которым ПАО «Россети Ленэнерго» необходимо подключить энергопринимающие устройства расположенные на земельном участке по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район, МО «Низинское сельское поселение», ЗАО «Петродворцовое урочище Симагоны, участок 1, кадастровый номер: 47:14:0302001:17. 

В соответствии с условиями договора, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств  заявителя (далее - технологическое присоединение) фермерское хозяйство (сельхоз. постройки), в   том   числе  по   обеспечению готовности объектов  электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 150 кВт

категория надежности 3;

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ;

Пунктом 5 договора предусмотрен срок выполнения мероприятий – 12 месяцев с даты его заключения.

Акт о выполнении технических условий от 06.07.2022 № 21-020757-УВТУ-1,1/АВ не подписан со стороны Предпринимателя.

Свой отказ Предприниматель обосновывает следующим:

1) на настоящий момент ПАО «Россети Ленэнерго» действительно фактически разместило новую ТП в непосредственной близости от земельного участка заявителя. Но подключение энергоснабжения через новую ТП не произведено (данный факт подтвержден комиссионным актом с фотофиксацией).

2) в нарушение п. 10.1.4 Технических условий узел учёта электрическом энергии не смонтирован. 

3) в нарушение п. 10.1.2 и 10.3.2. Технических условий не учтено мнение ИП ФИО2, как землевладельца относительно точки подключения. 

4) в нарушение п. 10.1.2 и 10.3.2. не учтено мотивированное императивными нормами земельного законодательства о целевом использовании земельного участка мнение ИП ФИО2 как землевладельца относительно способа прокладки кабельных линий. 

Указывая на неисполнение Обществом договорных обязательств, Предприниматель обратился в арбитражный суд с рассматриваемым иском о понуждении ответчика исполнить договор, предъявив ко взысканию в случае неисполнения требований судебную неустойку.

Суд не находит оснований для удовлетворения требований истца ввиду следующего.

В соответствии с положениями ст. ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Согласно п. п. 1, 2 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила технологического присоединения), которые определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения.

К правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются нормы Федерального закона от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 года № 861, положения главы 39 ГК РФ, а также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу п. 1 ст. 26 указанного Закона  технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 года № 861, регламентируют процедуру и порядок присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, а также устанавливают требования к выдаче технических условий.

В соответствии с п. 3 Правил технологического присоединения № 861 Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

В силу подп. "г" п. 10 Правил право на обращение с заявкой для заключения договора на технологическое присоединение имеет лицо, подтвердившего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя.

Соответственно, именно собственник объекта являлся лицом обязанным осуществить его технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации и в дальнейшем заключить договор на поставку электроэнергии с ресурсоснабжающей организацией.

Согласно пунктам 1, 2 указанного договора сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя для электроснабжения объекта - земельного участка по адресу: Ленинградская области. Ломоносовский район, МО «Низинское сельское поселение» ЗАО «Петродворцовое» урочище Симагоны, участок 1, кадастровый номер: 47:14:0302001:17,  в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию), к присоединению энергопринимающих устройств.

Согласно п. 6 договора сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.

В силу п. 8 договора заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.

В ходе судебного заседания установлено и подтверждено представителем истца, что земельный участок с кадастровым номером: 47:14:0302001:17 им разделен 04.07.2022  на новые участки с кадастровыми номерами:  47:14:0302001:993 и 47:14:0302001:994.

АТП от 06.07.2022 выдан на участок с кадастровым номером: 47:14:0302001:17. 

Представитель истца в ходе судебного заседания 14.12.2022 не отрицал, что о  разделении участков  в известность ПАО «Россети Ленэнерго» не ставил.

По указанию суда стороны осуществили выезд на объект и составили совместный акт осмотра от 06.04.2023 № 1, в котором отразили месторасположение электросетей на территории участка с кадастровым номером 47:14:0302001:993. К акту приобщены фотоматериалы. В акте отражено, что в непосредственной близости (5-10м) установлена опора линии электропередач ВЛ-0,4кВ, на которой размещен ящик для технологического присоединения.

Пунктом 3 договора предусмотрено, что точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям и располагается на расстоянии не далее 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются присоединяемые объекты заявителя.

Указанные документы, в совокупности с пояснениями сторон, позволяют сделать вывод о том, что точка присоединения расположена за пределами земельного участка (до его границ).

В письме от 01.06.2022 Предприниматель просил Общество согласовать прокладку кабельных линий 6-10 кВ на глубине не менее 1 метра. 

В судебном заседании представитель ответчика пояснил, что данное требование соблюдено, прокладка кабельных линий осуществляется на глубине более 1 метра, между тем, способ прокладки кабельных линий договором не предусмотрен.

В исковом заявлении Предприниматель, указывая на отсутствие энергоснабжения, между тем, указывает, что Общество действительно фактически разместило новую ТП в непосредственной близости от земельного участка заявителя. Ответчиком в материалы дела приобщен акт допуска прибора учета  № 21-020757 от 06.07.2022.

Суд также отмечает, что в пункте 6 АТП от 06.07.2022 отражено, что заявителю необходимо получить разрешение уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию присоединяемых электроустановок. Аналогичное требование, нашло свое отражение в п. 11.2 Технических условий, являющихся неотъемлемой частью договора технологического присоединения.

Акт допуска электроустановок в рамках рассмотрения истцом не представлялся.

Судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (статьи 9, 65 АПК РФ).

Оценив с соблюдением требований статей 67, 68, 71 АПК РФ, представленные в материалы дела доказательства, суд считает требования истца не подлежащими удовлетворению.

Расходы на уплату госпошлины остаются на истце.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

в удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Курова И.Н.