Арбитражный суд Московской области

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А41-57545/23

23 августа 2024 года

г.Москва

            

Резолютивная часть решения объявлена 18 июня 2024 года

Полный текст решения изготовлен 23 августа 2024 года

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Е.А. Морозовой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.Н. Мухортых,

рассмотрев в открытом судебном заседании  дело по исковому заявлению 

ООО «СР-СТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к ООО «АШ-КА СТРОЙ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании 20 230 160 руб. 84 коп., 

при участии в заседании: согласно протоколу  

 

УСТАНОВИЛ:

ООО "СР-Строй" обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском  к ООО «АШ-КА СТРОЙ» о  взыскании неосновательного обогащения по договору № СРС-252-20 от 10.07.2020 в размере 19 093 256 руб. 61 коп., ущерба в размере 336 904 руб. 23 коп., неосновательного обогащения по договору № СРС-421-20 от 23.11.2020 в размере 800 000 руб. 00 коп., расходов по уплате государственной пошлины в размере  124 121 руб. 00 коп., ссылаясь на ненадлежащее исполнение ответчиком своих обязательств перед истцом в рамках указанных договоров.  

            Представитель истца в судебном заседании заявленные требования поддержал в полном объеме, просил их удовлетворить.

            Представитель ответчика в судебное заседание не явился, извещался судом надлежащим образом, возражений и отзыв на иск не представил. 

            Дело рассмотрено в отсутствие ответчика в порядке ст. ст. 123, 156 АПК РФ. 

            Непосредственно, полно и объективно исследовав представленные истцом доказательства в обоснование заявленных требований, заслушав представителя истца, суд приходит к следующим выводам.  

            По материалам дела судом установлено, что между ООО «СР-Строй» (истец, Генеральный подрядчик) и ООО «Аш-ка Строй» (ответчик, Подрядчик) был заключен Договор подряда № СРС-252-20 от 10.07.2020 (далее - Договор-1) на выполнение комплекса работ по внутренней черновой и чистовой отделке вестибюлей входных групп, лифтовых холлов, межквартирных коридоров 1 этажа, квартир, технических помещений и МОП типовых этажей жилого дома № 1 при осуществлении при осуществлении «Комплексной жилой застройки с объектами социальной и инженерной инфраструктуры. Первая очередь строительства, 1-й этап: Жилые дома №№ 1, 2 по адресу: г. Москва, поселение Рязановское, вблизи д. Алхимово, Новомосковский административный округ» (далее - Объект-1).

            В соответствии с п. 7.1.1 Договора-1, Подрядчик обязался выполнить все Работы в объемах, сроки, за цену и в соответствии с условиями, предусмотренными Договором-1, дополнительными соглашениями, в соответствии с утвержденной Генеральным подрядчиком Рабочей документацией, ГОСТ, СНиП, СП, разработанным Подрядчиком ППР и требованиями нормативных актов субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется строительство Объекта, Российской Федерации в области строительства и сдать результат выполненных Работ Генеральному подрядчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию Объекта капитального строительства.

            В соответствии с п. 4.1. Договора-1, общая стоимость выполняемых Подрядчиком Работ по Договору-1 определена на основании Расчета сметной стоимости (Приложения № 1 к Договору-1 в редакции Дополнительного соглашения от 25.11.2020 № 1) и составила сумму в размере 96 510 549 (девяносто шесть миллионов пятьсот десять тысяч пятьсот сорок девять) рублей 52 копеек, в том числе НДС.

            Руководствуясь п. 5.1 и Приложением № 6 к Договору-1, Генеральный подрядчик перечислил авансовые платежи, оплату за номинированные материалы и выполненные работы сумму в размере 42 295 718 (сорок два миллиона двести девяносто пять тысяч семьсот восемнадцать) рублей 31 копеек, в том числе НДС, о чем свидетельствуют платежные поручения № 43122 от 31.07.2020, № 48393 от 31.08.2020, № 52302 от 21.09.2020, № 52303 от 21.09.2020, № 53181 от 28.09.2020, № 85882 от 25.11.2020, № 61822 от 26.10.2020, № 80615 от 30.10.2020, № 81279 от 03.1.2020, № 81284 от 03.11.2020, № 83034 от 11.11.2020, № 83049 от 11.11.2020, № 83050 от 11.11.2020, № 83421 от 13.11.2020, № 85164 от 20.11.2020, № 90948 от 17.12.2020, № 90949 от 17.12.2020, № 13 от 13.01.2021, № 70 от 20.01.2021, № 243 от 28.01.2021, № 245 от 28.01.2021, № 246 от 28.01.2021, № 247 от 28.01.2021, № 248 от 28.01.2021, № 702 от 19.02.2021, № 750 от 26.02.2021, № 765 от 26.02.2021, № 852 от 04.03.2021, № 945 от 11.03.2021, № 948 от 11.03.2021, № 949 от 11.03.2021, № 1051 от 17.03.2021, № 1107 от 22.03.2021, № 1119 от 22.03.2021, № 1205 от 26.03.2021, № 1206 от 26.03.2021, № 1207 от 26.03.2021, № 1478 от 16.04.2021, № 1479 от 16.04.2021,

            В свою очередь, Подрядчиком выполнены работы по Договору-1 в сумме 23 807 774 (двадцать три миллиона восемьсот семь тысяч семьсот семьдесят четыре) рубля 17 копеек, в том числе НДС, что подтверждается Актами о приемке выполненных работ (по ф. КС-2), Справками о стоимости работ (по ф. КС-3) № 1 от 09.10.2020, № 2 от 23.10.2020, № 3 от 25.11.2020, № 4 от 12.12.2020, № 5 от 02.04.2021.

            Согласно п. 9.4.1. Договора, Генеральный подрядчик ежемесячно производил резервирование денежных средств в размере 5 (Пять) % от стоимости принятых Генеральным подрядчиком работ для формирования резерва качества. Согласно данным бухгалтерского учета сумма Гарантийного удержания по Договору-1 составила - 902 235 (девятьсот две тысячи двести тридцать пять) рублей 72 копеек, в том числе НДС.

            В силу п. 6.1.36 Договора-1 и Приложения № 5 (в редакции Дополнительного соглашения от 01.03.2021), Подрядчик обязан нести расходы за пользование электроэнергией в период проведения Работ за фактически потребленные объемы указанных услуг на основании показаний приборов учета и/или соответствующих расчетов и актов, подписанных Сторонами. Расходы Генерального подрядчика за пользование электроэнергией составили сумму в размере 507 312 (пятьсот семь тысяч триста двенадцать) руб. 47 коп., в том числе НДС, что подтверждается отчетами комитенту.

            Согласно п. 10.12 Договора-1, за каждый факт нарушения требований охраны труда, пожарной безопасности, норм и правил эксплуатации электрических сетей, подъемных сооружений, оборудования работающего под избыточным давлением,

санитарно-эпидемиологических требований Генеральный подрядчик имеет право наложить на Подрядчика штрафы в размере, установленном в Приложении № 4 к Договору-1.

            Размер суммы штрафов за нарушение охраны труда и техники безопасности составил 98 000 (девяносто восемь тысяч) рублей, что подтверждается уведомлениями № 01-05/2722 от 19.04.2021, № 01-05/2721 от 19.04.2021.

            При выполнении Подрядчиком работ был причинен ущерб результату работ третьего лица ООО «Техстрой», выполнявшего комплекс работ по монтажу и пусконаладке внутренних  слаботочных систем по договору № СРС-142-21 от 04.03.2021.

            В соответствии с п. 10.8 договора-1 Генеральным подрядчиком был оформлен акт от 15.07.2022 в котором зафиксирован факт причинения ущерба.

            На составление акта Подрядчик не явился (извещение о вызове для составления акта № 01-05/7272 от 12.07.2022).

            Размер фактически понесенных затрат ООО «СР-Строй» по устранению ущерба, причиненного результату работ третьего лица, составило 336 904,23 руб., что подтверждается договором № СРС-142-22 от 17.08.2022, заключенного с ООО «Техстрой», а также актами выполненных работ и справкой о стоимости выполненных работ № 1 от 06.09.2022.

            В адрес Подрядчика была направлена претензия с требованием о возмещении расходов причиненного ущерба исх. № 01-12/ПР-1082 от 11.11.2022.

            Отказ истца от исполнения договора-1:

            В соответствии с ч. 1 ст. 708 Гражданского кодекса РФ, в договоре подряда указывается начальный и конечные сроки выполнения работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение начального и конечного сроков выполнения работ.        Графиком производства работ (Приложение № 1 к Договору-1) Сторонами определены сроки выполнения работ:

            Дата начала выполнения работ - 01.08.2020

            Дата окончания выполнения работ - 30.01.2021

            Согласно Акту приема-передачи строительной площадки, подписанному представителем Подрядчика, площадка для выполнения работ передана Генеральным подрядчиком и принята Подрядчиком 31.07.2020, а рабочая документация - 15.07.2020.

            Работы, предусмотренные Договором, Подрядчиком на сегодняшний день не выполнены и к установленным Договором срокам Генеральному подрядчику не сданы.

            Таким образом, отставание от даты окончания выполнения работ, установленных Договором, с учетом выполнения встречных обязательств Генеральным подрядчиком, составляет более 2 лет, что говорит о грубом нарушении сроков выполнения работ по Договору.

Для выполнения оставшегося объема работ Генеральный подрядчик вынужден привлечь иные подрядные организации.

            Руководствуясь ч. 2 ст. 715 Гражданского кодекса РФ, Генеральный подрядчик направил в адрес Подрядчика уведомление об отказе от исполнения Договора-1 исх. № 01-12/ПР-480 от 21.04.2022.

            Указанное уведомление 01.06.2022 получено Подрядчиком, что подтверждается отчетом об отправке (трек-номер отправления: 10204970085068).

            Таким образом, договор № СРС-252-20 от 10.07.2020 считается расторгнутым с 01.06.2022.

            Проведение зачета на основании ст. 410 ГК РФ

            В уведомлении об отказе от исполнения договора-1 также содержалось уведомление о зачете. На дату направления уведомления Генеральный подрядчик должен выплатить Подрядчику гарантийное удержание по Договору-1 на сумму 902 235 (девятьсот две тысячи двести тридцать пять) рублей 72 копеек, в том числе НДС.

            Подрядчик имеет задолженность по:

            -возврату неосвоенного аванса в размере 19 390 179 (девятнадцать миллионов триста девяносто тысяч сто семьдесят девять) рублей 86 копеек, в том числе НДС, исходя из расчета:

            42 295 718,31 - (23 807 774,17 - 902 235,72) = 19 390 179,86

Сумма, руб.

Обоснование

42 295 718,31

сумма выплаченных денежных средств

23 807 774,17

сумма работ по КС-2

902 235,72

сумма резерва качества

            - оплате расходов за пользование электроэнергией в размере 507 312 (пятьсот семь тысяч триста двенадцать) рублей 47 копеек, в том числе НДС.

            оплате штрафов за нарушение охраны труда и техники безопасности в размере 98 000 (девяносто восемь тысяч) рублей.

            На основании ст. ст. 410, 421 ГК РФ, Генеральный подрядчик уведомил Подрядчика о зачете взаимных требований на сумму 902 235 (девятьсот две тысячи двести тридцать пять) рублей 72 копеек.

            В результате  произведенного зачета:

            - полностью погашается задолженность Генерального подрядчика перед Подрядчиком по возврату зарезервированных денежных средств по Договору;

            -полностью погашается задолженность Подрядчика перед Генеральным подрядчиком по оплате расходов за пользование электроэнергией в размере 507 312 (пятьсот семь тысяч триста двенадцать) рублей 47 копеек, в том числе НДС;

            -полностью погашается задолженность Подрядчика перед Генеральным подрядчиком по оплате штрафов за нарушение охраны труда и техники безопасности составил 98 000 (девяносто восемь тысяч) рублей;

            - частично погашается задолженность Подрядчика перед Генеральным подрядчиком по возврату неосвоенного аванса на сумму 296 923,25 (двести девяносто шесть тысяч девять сот двадцать три) рубля 25 копеек.

            После зачета долг Подрядчика перед Генеральным подрядчиком в виде неотработанного аванса по Договору-1 составляет 19 093 256 (девятнадцать миллионов девяносто три тысячи двести пятьдесят шесть) рублей 61 копеек, в том числе НДС. Долг Генерального подрядчика перед Подрядчиком по Договору отсутствует.

            Между ООО «СР-Строй» (Генеральным подрядчиком) и ООО «Аш-ка Строй» (Подрядчиком) был заключен Договор подряда № СРС-421-20 от 23.11.2020 (далее - Договор-2) по выполнению комплекса работ по временному закрытию оконных и дверных проемов для организации закрытия теплового контура жилого дома № 1, секции № 1-3 при осуществлении «Комплексной жилой застройки с объектами социальной и инженерной инфраструктуры. Первая очередь строительства, 1 этап, жилые дома № 1, № 2» по адресу: г. Москва, Новомосковский АО, поселение Рязановское, вблизи д. Алхимово (далее - Объект).

            В соответствии с пунктом 4.1.2 Договора-2, Подрядчик обязался выполнить все работы своими и/или привлеченными силами и сдать их Генеральному подрядчику в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, в полном соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется строительство Объекта, требованиями строительных норм и правил.

            В соответствии с пунктом 2.1 Договора-2, общая стоимость выполняемых Подрядчиком Работ по Договору определена на основании Расчета сметной стоимости (Приложения № 1 к Договору) и составила сумму в размере 959 197 (девятьсот пятьдесят девять тысяч сто девяносто семь) рублей 90 копеек, в том числе НДС.

            Руководствуясь пунктом 2.4 и Приложением № 12 к Договору, Генеральный подрядчик перечислил авансовые платежи, оплату за номинированные материалы и выполненные работы сумму в размере 800 000 (восемьсот тысяч) рублей, в том числе НДС, о чем свидетельствуют платежные поручения № 89385 от 10.12.2020.

            Работы по договору-2 Подрядчиком выполнены не были, к приемке результат работ не предъявлялся.

            Отказ истца от исполнения договора-2:

            В соответствии с ч. 1 ст. 708 Гражданского кодекса РФ, в договоре подряда указывается начальный и конечные сроки выполнения работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение начального и конечного сроков выполнения работ.

            Пунктом 3.1 Договора Сторонами определены сроки выполнения работ:

            Дата начала выполнения работ-23.11.2020

            Дата окончания выполнения работ - 07.12.2020

            Согласно Акту приема-передачи строительной площадки, подписанному представителем Подрядчика, площадка для выполнения работ передана Генеральным подрядчиком и принята             Подрядчиком 23.11.2020, а рабочая документация - 23.11.2020.

            Работы, предусмотренные Договором, Подрядчиком на сегодняшний день не выполнены и к установленным Договором срокам Генеральному подрядчику не сданы.

            Таким образом, отставание от даты окончания выполнения работ, установленных Договором, с учетом выполнения встречных обязательств Генеральным подрядчиком, составляет более 1 года, что говорит о грубом нарушении сроков выполнения работ по Договору.

            Для выполнения объема работ Генеральный подрядчик вынужден привлечь иные подрядные организации.

            Положениями ч. 2 ст. 715 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

            В связи с этим, руководствуясь ч. 2 ст. 715 Гражданского кодекса РФ, Генеральный подрядчик направил в адрес Подрядчика уведомление об отказе от исполнения Договора-2 исх. № 01-12/ПР-481 от 21.04.2022.

            Указанное уведомление 01.06.2022 получено Подрядчиком, что подтверждается отчетом об отправке (трек-номер отправления: 10204970085075).

            Таким образом, договор № СРС-421-20 от 23.11.2020 считается расторгнутым с 01.06.2022.

            Поскольку ответчик в добровольном порядке задолженность перед истцом не погасил, истец обратился с настоящим иском в суд. 

            В соответствии с положениями статьей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

            Спорные отношения, возникшие в связи с исполнением контракта, по своей правовой природе являются подрядными, подлежат регулированию общими гражданско-правовыми нормами об обязательствах, специальными положениями главы 37 ГК РФ.

            По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1 статьи 702 ГК РФ). 

         В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

            Пунктом 3 статьи 450 ГК РФ установлено, что в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным.

            Согласно ст. 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

            Статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основании своих требований или возражений.

            Согласно части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. 

            В силу части 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

            Поскольку материалами дела доказано наличие задолженности ответчика перед истцом, ответчик данное обстоятельно не оспорил и не опроверг,  заявленные требования  следует удовлетворить.

            С учетом результатов рассмотрения дела,  расходы по уплате государственной пошлины возлагаются на ответчика на основании ст.ст.106, 110, 112 АПК РФ. Данные расходы подтверждены надлежащими доказательствами.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

            Взыскать с ООО «АШ-КА СТРОЙ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ООО «СР-СТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неосновательное обогащение по договору № СРС-252-20 от 10.07.2020 в размере 19 093 256 руб. 61 коп., ущерб в размере 336 904 руб. 23 коп., неосновательное обогащение по договору № СРС-421-20 от 23.11.2020 в размере 800 000 руб. 00 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере  124 121 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения.

 

Судья                                                                      Е.А. Морозова