АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

656015, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина,76, тел.: (385-2) 61-92-78, факс: (385-2) 61-92-93; 

http://www.altai-krai.arbitr.ru; е-mail: а03.info@arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А03-12386/2019

г. Барнаул

20 июля 2020 года

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Пашковой Е.Н., при ведении  протокола судебного заседания секретарями Сердюченко Г.В., Бутузовой Я.П., рассмотрев в  открытом судебном заседании дело по иску Администрации Новозоринского сельсовета  Павловского района Алтайского края, пос. Новое Зори (ОГРН 

<

***>) к обществу с  ограниченной ответственностью «Мера», г. Новоалтайск (ОГРН 

<

***>) о об  обязании устранить недостатки выполненных работ,  

 с привлечением в качестве третьих лиц: Администрации Павловского района, АКГУП  «Алтайстройзаказчик»,  

при участии представителей сторон: от истца: ФИО1 (паспорт, выписка из ЕГРЮЛ), от ответчика: ФИО2 (паспорт, доверенность), от третьего лица: ФИО3 (доверенность, паспорт),  от третьего лица (Администрация Павловского района): не явился, извещен 

 На основании статей 309, 702, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации,  руководствуясь статьями 27, пунктом 3.1 статьи 70, статьями 110, пунктом 4 статьи 137,  пунктом 2 части 1 статьи 148, пунктом 3 статьи 156, статьями 167-171, 181 Арбитражного  

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Алтайского края  

Р Е Ш И Л :

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Мера», г. Новоалтайск (ОГРН  

<

***>) устранить недостатки в работах, выполненных по муниципальному  контракту № Ф.2018.491733 от 18 октября 2018г. по адресу: 

<

...> в течение 45 календарных дней со дня  вступления решения суда в законную силу, а именно:  

-выполнить разборку нового однослойного кровельного покрытия торговой марки  «ТехноНиколь», установленного с помощью прижимных пластин на площади 1 482,9 кв.м.;  

-выполнить демонтаж новой армированной цементно – песчаной стяжки на площади  

1 482,9 кв.м.; 

-выполнить демонтаж пароизоляции из полиэтиленовой пленки;  

-выполнить разборку старого рубероидного покрытия кровельного покрытия на  

площади 1482,9 кв.м.; -выполнить демонтаж старой цементно – песчаной стяжки на площади 1 482.9 кв.м.; -выполнить армированную цементно –песчанную стяжку на площади 1 482,9 кв.м.; 

-выполнить мягкую рулонную кровлю на площади 1 482,9 кв.м.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Мера», г. Новоалтайск  

(ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 6000 руб. государственной пошлины.  Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в Седьмой  

арбитражный апелляционный суд, г. Томск, в течение месяца со дня принятия решения, либо  

в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня вступления  

решения в законную силу, если такое решение было предметом рассмотрения в арбитражном  

суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции  

отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

Судья Е.Н. Пашкова