Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-65037/2016

28 июня 2018 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  21 июня 2018 года.

Полный текст решения изготовлен  28 июня 2018 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Панюшкиным Н.В.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАНШАФТ" (адрес:  Россия 193230, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, пр-кт ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 13/ОФИС 207, ОГРН:  1123528002080);

ответчик: ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО" (адрес:  Россия 188643, г ВСЕВОЛОЖСК, ЛЕНИНГРАДСКАЯ обл ВСЕВОЛОЖСКИЙ р-н, ш КОЛТУШСКОЕ 138, ОГРН:  1084703000766);

третье лицо: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Ленэнерго" (адрес:  Россия 196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 1, ОГРН:  1027809170300)

о взыскании 

при участии

- от истца: Дуб Н.В. по доверенности от 15.08.17,

- от ответчика: ФИО1 по доверенности от 09.01.18,

- третье лицо: не явился, о времени и месте извещен надлежащим образом,

установил:

ООО "МАНШАФТ" предъявило иск к ЛОКП "ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО" и после уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ просит взыскать с ответчика 10 097 200 руб. 00 коп. задолженности по оплате выполненных работ на основании договора №54/13 от 18.09.13, 4 341 515 руб. 52 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами из расчета на 07.06.18, 2 877 120 руб. 00 коп. задолженности по оплате выполненных работ на основании договора № 69/13 от 25.12.13, 1 212 466 руб. 32 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами из расчета на 07.06.18, 4 011 120 руб. 00 коп. задолженности по оплате выполненных работ на основании договора №70/13 от 25.12.13 и 1 690 352 руб. 82 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 07.06.2018 в соответствии со т. 395 ГК РФ.

Ответчик иск отклонил, ссылаясь на то, что факт выполнения работ истцом не доказан.

Определением от 13.04.17 к участию в деле, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, привлечено ПАО энергетики и электрификации "Ленэнерго", которое отзыв не представило.

Дело передано на новое рассмотрение Постановлением Арбитражного суда Северо-Западаного округа от 01.03.18.

Судом установлено: 

Между сторонами заключено три договора №54/13 от 18.09.13, № 69/13 от 25.12.13, №70/13 от 25.12.13 на оказание услуг по производству комплекса лесохозяйственных работ по расширению воздушных линий электропередач. 

В соответствии с п.2.2 договора исполнитель – истец обязан ежемесячно в срок до 25 числа отчетного/текущего месяца предъявить заказчику-ответчику счет-фактуру, акт выполненных, работ принятых районными электросетями и районным лесничеством по объектам. 

Согласно п.2.3 указанных договоров оплата осуществляется в течении 90 календарных дней на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и трехстороннего (районные лесничества и сети, исполнитель) за вычетом 20% от суммы выполненных работ. Полный расчет производится по окончании выполнения всех работ и подписанных трёхсторонних актов.

Фактически трехсторонних актов по договорам не составлялось.

Документами, подтверждающими принятие работ районными электросетями, являются Технические акты, которые подписываются представителями районных сетей, районных лесничеств, подрядчика и субподрядчика.

Документами, подтверждающими принятие работ районными лесничествами, являются акт смотра мест рубок, которые подписываются представителями районных сетей, районных лесничеств, подрядчика и субподрядчика.

Указанные акты представлены ПАО энергетики и электрификации "Ленэнерго" по всем трем договорам. Акты подписаны всеми участниками их составления без замечаний.

Судом исследованы и иные документы, представленные ПАО энергетики и электрификации "Ленэнерго" по требованию суда от 22.06.17, а именно: письмо филиала ПАО энергетики и электрификации "Ленэнерго" «Санкт-Петербургские высоковольтные сети» за исх. №СПбВС/040/6444-29 от 11.08.17, а также письмо ПАО энергетики и электрификации "Ленэнерго" за исх. №ЛЭ/04-243/180 от 01.06.18. В указанных письмах ПАО энергетики и электрификации "Ленэнерго", являясь конечным заказчиком по договорам №13-9127 от 29.08.13, заключенным ответчиком с филиалом ПАО энергетики и электрификации "Ленэнерго" «Гатчинские электрические сети» и №13-9346 от 05.09.13, заключенным ответчиком с филиалом ПАО энергетики и электрификации "Ленэнерго" «Санкт-Петербургские высоковольтные сети» поясняет, что технические акты осмотра мест проведения работ уничтожены в связи с окончанием гарантийного срока, установленного по договорам №13-9127 от 29.08.13 и №13-9346 от 05.09.13 и в связи с отсутствием претензий со стороны лесничеств и собственников земельных участков. Акты приемки заготовленной древесины подрядная организация ЛОКП «Ленобллесхоз» в адрес филиалов ПАО энергетики и электрификации "Ленэнерго" не передавало в связи с тем, что указанные акты не входят в состав исполнительной документации. Как поясняет ПАО энергетики и электрификации "Ленэнерго", акты осмотра мест рубок относятся к документации со сроком хранения не более трех лет и в архиве ПАО энергетики и электрификации "Ленэнерго" в полном объеме не сохранились.

Также ПАО энергетики и электрификации "Ленэнерго" подтвердило, что работы выполнялись ООО "МАНШАФТ", работникам которого выдавались допуски для проведения работ в зоне ЛЭП.

В материалах дела имеются копии доверенностей на сотрудника ООО "МАНШАФТ" ФИО2. Указанные доверенности выдавались ответчиком с предоставлением полномочий по участию и подписанию Актов приемки лесных участков в охраняемой зоне ЛЭП. Доверителем являлся ЛОКП «Ленобллесхоз» - ответчик по делу.

В связи с отсутствием претензий все расчеты, включая гарантийное удержание, были произведены с ЛОКП «Ленобллесхоз» в полном объеме. Таким образом, работы истом были выполнены в том объеме, который был установлен в договорах с заказчиком – ПАО энергетики и электрификации "Ленэнерго" и для выполнения которых был привлечен истец в качестве исполнителя.

В материалах дела имеются подписанные истцом и ответчиком без возражений двухсторонние акты по трем указанным договорам, свидетельствующие о выполнении истцом всего объема предусмотренных договорами работ без замечаний по качеству выполнения. Ответчиком не было заявлено возражений по объему, качеству и срокам выполнения работ на момент приемки результата работ (т.1, л.д.25,26,38).

Факт частичной оплаты этих актов заказчиком, в размере 25 100 000 руб. 00 коп. также подтверждает принятие работ.

В настоящее время задолженности ответчика по оплате выполненных истцом работ по договору №54/13 от 18.09.13 составляет 10 097 200 руб. 00 коп. 

В соответствии со ст. 395 ГК РФ ответчику начислены проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 02.02.14 по 07.06.18 в размере 4 341 515 руб. 52 коп.

Задолженность ответчика по оплате выполненных истцом работ по договору №69/13 от 25.12.13 составляет 2 877 120 руб. 00 коп. 

В соответствии со ст. 395 ГК РФ ответчику начислены проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 25.03.14 по 07.06.18 в размере 1 212 466 руб. 32 коп.

Задолженность ответчика по оплате выполненных истцом работ по договору №70/13 от 25.12.13 составляет 4 011 120 руб. 00 коп. 

В соответствии со ст. 395 ГК РФ ответчику начислены проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 25.03.14 по 07.06.18 в размере 1 690 352 руб. 82 коп.

Расчеты проверены судом и признаны правильными.

Общая сумма задолженности ответчика по оплате работ составляет 16 985 440 руб. 00 коп. 

Общая сумма процентов за пользование чужими денежными средствами из расчета на 07.06.18 составляет 7 244 334 руб. 66 коп.

Расходы по государственной пошлине в размере 129 854 руб. 00 коп. относятся на ответчика.

В связи с увеличением суммы иска с ответчика подлежит взысканию в доход федерального бюджета 14 295 руб. 00 коп. государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 309, 310, 395, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с Ленинградского областного казенного предприятия "Ленинградское областное лесное хозяйство" в пользу общества с ограниченной ответственностью "МАНШАФТ" 24 229 774 руб. 66 коп., из них: 16 985 440 руб. 00 коп. основного долга и 7 244 334 руб. 66 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, а также 129 854 руб. 00 коп. расходов по государственной пошлине.

Взыскать с Ленинградского областного казенного предприятия "Ленинградское областное лесное хозяйство" в доход федерального бюджета 14 295 руб. 00 коп. государственной пошлины.

Выдать исполнительные листы в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Сергеева О.Н.