Арбитражный суд Липецкой области пл. Петра Великого, 7, г. Липецк, 398019 http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: info@lipetsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А36-12428/2019

г.Липецк

25 февраля 2020 года

Арбитражный суд Липецкой области в составе судьи Коровина А.А.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению 

государственного учреждения здравоохранения «Липецкая областная клиническая  инфекционная больница» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес (место  нахождения): 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Стимул Групп» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес (место нахождения): 

<

...>)  

об обязании исполнить гарантийные обязательства по контракту и взыскании  670 614 руб. 88 коп.,  

при участии в заседании: 

от истца – ФИО2 по доверенности от 22.01.2020,  от ответчика – представитель не явился,  

Руководствуясь статьями 167-171, 180, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Стимул Групп» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) исполнить гарантийные обязательства по  контракту № 166 на проведение капитального ремонта клинико-диагностической  лаборатории государственного учреждения здравоохранения «Липецкая областная  клиническая инфекционная больница» от 26.09.2017, а именно: безвозмездно в  

течение 30 дней с даты вступления в законную силу решения суда устранить  растрескивание и отслоение отделочного слоя стен и потолка в следующих  помещениях клинико-диагностической лаборатории государственного учреждения  здравоохранения «Липецкая областная клиническая инфекционная больница»,  расположенной по адресу: г.Липецк, ул.Космонавтов, д.37а:  

- в помещении № 313 по проекту (помещение № 11 по инвентаризационному  плану строения) три трещины на потолке, от окна вдоль всего помещения;  

- в помещении № 315 и № 315а по проекту (помещение № 16 и № 17  

по инвентаризационному плану строения) одна сквозная трещина на потолке от  окна вдоль двух помещений;  

- в помещении № 316 по проекту (помещение № 19 по инвентаризационному  плану строения) одна трещина на потолке от окна вдоль всего помещения;  

- в помещении № 302 по проекту (помещение № 2 по инвентаризационному  плану строения) одна трещина на потолке между входом в помещение № 314  

по проекту (помещение № 14 по инвентаризационному плану строения) и выходом  на лестничную клетку, а также отслойка штукатурки на потолке между  помещениями № 308 и № 309 по проекту (помещениями № 7 и № 8  

по инвентаризационному плану строения); 

- в помещении № 317 по проекту (помещение № 22 по инвентаризационному  плану строения) одна тещина на потолке перед большим окном;  

- в помещении № 319 по проекту (помещение № 26 по инвентаризационному  плану строения) две трещины на потолке: справа и слева от окон;  

- в помещении № 321 по проекту (помещение № 33 по инвентаризационному  плану строения) одна трещина в углу между стеной и потолком над окном;  

- в помещении № 322 по проекту (помещение № 34 по инвентаризационному  плану строения) отслойка штукатурного слоя на потолке вдоль стены справа от  окна;  

- в помещении № 323 по проекту (помещение № 36 по инвентаризационному  плану строения) отслойка штукатурного слоя на потолке вдоль стены справа от  окна;  

- в помещении № 326 по проекту (помещение № 40 по инвентаризационному  плану строения) одна трещина на потолке от окна;  

- в помещении № 327 по проекту (помещение № 44 по инвентаризационному  плану строения) отслоение плитки в нише справа от входной двери;  

- в помещении № 331 по проекту (помещение № 48 по инвентаризационному  плану строения) одна трещина на потолке от окна на всю длину помещения;  

- в помещении № 334 по проекту (помещение № 52 по инвентаризационному  плану строения) две трещины на потолке вдоль всего помещения от окна;  

- в помещении № 337 по проекту (помещение № 57 по инвентаризационному  плану строения) одна трещина на потолке вдоль всего помещения вдоль окна,  

а также трещина на стене на всю высоту в углу слева от выхода из помещения; 

- в помещении № 338 по проекту (помещение № 59 по инвентаризационному  плану строения) две трещины на потолке: от помещения № 335 по проекту  (помещение № 53 по инвентаризационному плану строения) и вдоль окна около  помещения № 337 по проекту (помещение № 57 по инвентаризационному плану  строения), а также одна трещина на стене слева от входа в помещение № 344  

по проекту (помещение № 71а по инвентаризационному плану строения);  

- в помещении № 339 по проекту (помещение № 61 по инвентаризационному  плану строения) одна трещина на потолке справа от окна;  

- в помещении № 340 по проекту (помещение № 65 по инвентаризационному  плану строения) одна трещина на потолке от окна;  

- в помещении № 342 по проекту (помещение № 70 по инвентаризационному  плану строения) значительное отслоение штукатурки вместе с окрасочным слоем  на стене напротив входа помещение № 341а по проекту (помещение № 68  

по инвентаризационному плану строения); 

- в помещении № 343 по проекту (помещение № 71 по инвентаризационному  плану строения) трещина под окном справа,  

а также заменить деформированный пластиковый уголок в перегородке  между помещениями № 315 и № 315а по проекту (помещение № 16 и № 17  

по инвентаризационному плану строения). 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стимул Групп»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу государственного учреждения  здравоохранения «Липецкая областная клиническая инфекционная больница»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку (штраф) в размере  

670 614 руб. 88 коп., а также судебные расходы по уплате государственной  пошлины в размере 6 000 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стимул Групп»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 16 412 руб.  

 Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в  месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Воронеж)  через Арбитражный суд Липецкой области.  

Судья А.А.Коровин