20/2023-202311(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А06-7996/2023

г. Астрахань

20 ноября 2023 года

Арбитражный суд Астраханской области в составе: судьи: Баскаковой И.Ю. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сагитовой А.Ж. 

Руководствуясь статьями 167-170, 173, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Внести изменения в пункт 2.1 Государственного контракта № 40 от 12.08.2022 г.,  изложив пункт 2.1 в следующей редакции:  

«Цена Контракта составляет 221 080 140 (двести двадцать один миллион  восемьдесят семь тысяч сто сорок) рублей, в том числе НДС по налоговой ставке 20 % в  размере 36 846 690 (тридцать шесть миллионов восемьсот сорок шесть тысяч шестьсот  девяносто) рублей.  

Стоимость работы по подготовке проектной документации, рабочей  документации, выполнение инженерных изыскание и прохождение государственной  экспертизы 16 664 640 (шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи  шестьсот сорок) рублей, в том числе НДС 20%.  

Стоимость работ по строительно-монтажным работам и вводу объекта в  эксплуатацию 165 218 460 (сто шестьдесят пять миллионов двести восемнадцать тысяч  четыреста шестьдесят) рублей, в том числе НДС 20%.  

Стоимость поставки предусмотренного проектной документацией объекта  оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта 39 197 040  (тридцать девять миллионов сто девяносто семь тысяч сорок) рублей, в том числе НДС  20%».  

 Внести изменения в пункт 2.1 Государственного контракта № 40 от 12.08.2022  

г., изложив пункт 2.1 в следующей редакции: «Срок выполнения работ: с даты заключения контракта и до 30.04.2024 г.: 

- срок предоставления заказчику исходных данных для ГО и ЧС и потребных  

нагрузок для ТУ: 15 календарных дней после заключения контракта; 

- срок предоставления заказчиком ТУ по объекту: 20 календарных дней после  

получения потребных нагрузок от исполнителя работ; 

- срок получения проектно-сметной документации с получением положительного  

государственной экспертизы до 20.12.2022 г. 

- срок выполнения строительно-монтажных работ с даты получения  

положительного заключения государственной экспертизы - до 30.04.2024 г. - срок поставки и монтажа оборудования - до 30.04.2024 г.». 

 Взыскать с Государственного казенного учреждения Астраханской области  "Управление по капитальному строительству Астраханской области" в пользу Общества   с ограниченной ответственностью "Италбетон" судебные расходы по уплате  госпошлины в сумме 12 000 руб.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия,  через Арбитражный суд Астраханской области.  

Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет –  сайте Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru»  

Судья И.Ю. Баскакова