ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А40- 40148/19

г. Москва

10 июля 2019г.

резолютивная часть решения  объявлена   05.07.2019г.

полный текст  решения изготовлен    10.07.2019г.             

Арбитражный суд в составе:                                                  

Председательствующего:  Стародуб А.П. ( шифр судьи 116-353)

Членов суда: единолично

Протокол судебного заседания велся  секретарем судебного заседания ФИО1

с участием от истца/заявитель: ФИО2  паспорт, доверенность  от 25.01.2019г.

ответчика/заинтересованное лицо:- не явился

по иску /заявлению    ОАО  « Бамстройпуть»  ( ОГРН  

<

***>)  к  ООО  « Инспецпроект»  ( ОГРН 

<

***>)   о взыскании   неосновательного обогащения и неустойки 

УСТАНОВИЛ:

Истец  обратился в Арбитражный  суд г. Москвы  с иском  о взыскании суммы    неотработанного аванса  и неустойки  по договору №  СФ1/ИСП/РЕК-10/12-01  от 11.04.2017г. 

  Ответчик      отзыв  по существу  спора  не представил, в судебное заседание  не явился, извещен. Дело рассмотрено  в порядке ст. 156 АПК РФ , в отсутствие   ответчика .

Рассмотрев  материалы дела, выслушав доводы  истца, суд  установил, что   требования    подлежат удовлетворению.

Из  материалов дела следует,  что  между ОАО «Бамстройпуть» (далее  – «Генподрядчик») и ООО «Инспецпроект» (далее – «Субподрядчик») заключен договор №  СФ1/ИСП/РЕК-10/12-01 от 11.04.2017г. на выполнение общестроительных работ на Объекте: корпус 10 3 Дома Министерства обороны РФ, расположенного по адресу: 

<

...> (шифр объекта Т-41/16-46).

   В соответствии с п. 5.2. Договора, дата окончания выполнения работ определена Сторонами – не позднее 16.06.2017г. 

   Цена Договора (в соответствии с п. 3.1. Договора) составила сумму в размере 3 556 701,03 рублей. 

   При этом в соответствии с условиями Договора Генподрядчик вправе произвести авансирование Субподрядчика (пункт 4.10. Договора).

   В соответствии с данным условием, Генподрядчик произвел в адрес Субподрядчика авансовый платеж в размере 3 000 000,00 руб.  по   платежному  поручению № 863   от 19.04.2017г. 

 Между Сторонами не подписано ни одного акта, могущего свидетельствовать об исполнении Договора со стороны Субподрядчика.

 

Таким образом, Субподрядчик, не исполнил принятых на себя обязательств в части исполнения Договора в предусмотренные сроки, в связи, с чем Генподрядчик утратил интерес к дальнейшему сотрудничеству с Субподрядчиком в рамках исполнения Договора. 

     В соответствии с пунктом 20.2. Договора: «Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем и внесудебном порядке в любое время». 

   В соответствии с п. 1, 2 ст. 450.1 ГК РФ:

   «Предоставленное  законом или договором право на односторонний отказ от договора может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым».

  Истец направил в адрес Ответчика уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора (включающее в себя предарбитражное требование о возврате неосвоенных авансовых платежей и уплате неустойки). 

   Письмо направлено - 21.11.2018г. Согласно распечатке с сайта, Почта России письмо прибыло в место вручения – 27.11.2018г. Однако Ответчик поступившую в его адрес корреспонденцию не получил с отделения почты (срок хранения корреспонденции составил с 27.11.2018г. по 31.12.2018г. = 35 календарных дней), и данное уведомление было отправлено обратно в адрес Истца. 

    В соответствии с пунктом 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса РФ: «Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним».  Таким образом,  Договор расторгнут  с 27.11.2018г.  

   В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 Гражданского кодекса РФ: «Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). 

В  соответствии с пунктом 18.4. Договора: «В случае нарушения Субподрядчиком сроков окончания работ, предусмотренных Договором, Субподрядчик выплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ, не выполненных в надлежащий срок, за каждый день просрочки до даты фактического завершения выполнения работ».

Расчет неустойки:    

Цена договора составляет сумму в размере – 3 556 701,03 руб.;

Работы по Договору должны были быть завершены до 16.06.2017г. 

Неустойка за один календарный день составляет сумму в размере – 3 556,70 руб.;

Календарный период для расчета неустойки: с 15.06.2017г. по 16.06.2017г. = 1 день

Расчет неустойки за указанный календарный период – 3 556,70 руб.

 

В соответствии  со ст. ст. 309,310  ГК РФ  обязательства  должны  исполняться   надлежащим образом  в соответствии  с условиями  обязательства  и требованиями закона  и односторонний  отказ  от их  исполнения  не допускается  за исключением  случаев , предусмотренных  законом. 

 Поскольку  ответчиком   были  нарушены  условия  обязательства  по договору,  сумма    неосвоенного аванса    в размере 3.000.000   руб.  подлежит   взысканию с ответчика   как неосновательное  обогащение .  Доказательств  обратного суду  не представлено.    Подлежит  взысканию с ответчика и сумма  пени в размере  3.556,70  руб. , расчет  судом  проверен , ответчиком   не оспорен.  В связи с изложенным   требования истца    подлежат удовлетворению. 

Госпошлина   подлежит взысканию с ответчика в соответствии   со ст. 110 АПК РФ.  

На   основании  изложенного, руководствуясь  ст. ст. 110,  167-170, 176, 201 АПК РФ  арбитражный суд

                                                                   РЕШИЛ:

Взыскать  с  ООО  « Инспецпроект»  ( ОГРН 1097746427987)  в пользу ОАО  « Бамстройпуть»  ( ОГРН  1027500562869)  сумму   неотработанного аванса   в размере  3.000.000  руб., неустойку в размере  3.556,70  руб.,   расходы ь по госпошлине  38.018  руб. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятый  арбитражный  апелляционный   суд. 

Судья                                                                                                       А.П. Стародуб