АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru         E-mail: info@crimea.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А83-23241/2021

24 мая 2022 года

город  Симферополь

 

 

Резолютивная часть решения оглашена 17 мая 2022 года.

Решение в полном объеме изготовлено 24 мая 2022 года.

 

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Можаровой М.Е., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело по исковому заявлению

Общества с ограниченной ответственностью «ТоннельГеоСтрой» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «БЭГ ИН» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

 

о взыскании денежных средств

 

в отсутствии представителей сторон. 

 

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «ТоннельГеоСтрой» (далее - «ТоннельГеоСтрой», истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «БЭГ ИН» (далее - «БЭГ ИН», ответчик) о взыскании неосновательного обогащения в размере 16 334 292,19 руб., а также расходов по оплате государственной пошлины.

Определением от 30.11.2021 г. суд принял исковое заявление к производству, назначил предварительное судебное заседание на 20.01.2022 г.

Определением от 20.01.2022 г. суд в порядке, предусмотренном статьей 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту - АПК РФ), перешел к судебному разбирательству и отложил судебное заседание на 22.02.2022 г.

Определением от 22.02.2022 суд отложил судебное заседание на 24.03.2022.

Определением от 24.03.2022 г. суд отложил судебное заседание на 17.05.2022 г.

Истец и ответчик в судебное заседание 17.05.2022 г. явку уполномоченных представителей не обеспечили.

До начала судебного заседания от истца поступили заявление о рассмотрении дела в отсутствии представителя.

Ответчик о причинах неявки суд не уведомил, ходатайств о рассмотрении дела в свое отсутствие не заявлял, о времени и месте проведения судебного заседания извещен надлежащим образом, о чем свидетельствует почтовое извещение, имеющееся в материалах дела.

Суд в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 121 АПК РФ, разместил информацию о совершении процессуальных действий по данному делу на сайте Арбитражного суда Республики Крым - в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.crimea.arbitr.ru.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что стороны надлежащим образом уведомлены о времени и месте судебного заседания.

Согласно части 3 статьи 156 АПК РФ при неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие.

Таким образом, суд, руководствуясь положениями статей 156 АПК РФ, определил рассмотреть дело в отсутствие представителей сторон.

Исследовав и оценив имеющиеся в деле документы, всесторонне и полно выяснив фактические обстоятельства, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме ввиду следующего.

Так, между ООО «ТоннельГеоСтрой» (Генподрядчик) и ООО «БЭГ ИН» (Субподрядчик) были заключены Договоры № 21-20/02/20 от 20.02.2020, № 22-20/02/20 от 20.02.2020, № 23-20/02/20 от 20.02.2020 на выполнение комплекса строительно-монтажных работ на объекте: «Реконструкция разводящих сетей в г. Керчи, Республики Крым» (далее - Договоры).

Согласно п. 1.4 Договоров работы выполняются в рамках исполнения Государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция разводящих сетей в г. Керчи, Республика Крым» №0175200000419000620J20408 от 03.12.2019 г. (ИГК 13918Р55000752190827), Заказчиком по которому является Государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым» (далее - Государственный заказчик).

В соответствии с п. 3.1 Договоров Генподрядчик производит оплату за выполненные работы в пределах цены Договора, в соответствии со Сметой (Приложение № 1 к Договору), в сроки, установленные Договором за фактически выполненные работы на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета, счета-фактуры (при необходимости), но не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания Генподрядчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

Генподрядчик производит выплату авансового платежа Субподрядчику:

- в размере 30 % от цены Договора, указанной в пункте 2Л Договора в сумме 2 788 192,44 (два миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч сто девяносто два) рубля 44 копейки, в следующем порядке:

- в размере 1 000 000 (один миллион) рублей в целях организации перебазировки оборудования в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления счета;

- оставшаяся часть - на основании уведомления о завершении перебазировки оборудования и счета, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их предоставления Генподрядчику (п. 3.5 Договоров).

В соответствии с п. 3.6 Договоров погашение суммы выданного аванса осуществляется пропорционально путем зачета 20% от стоимости выполненных и принятых работ, подлежащих оплате в отчетном периоде, до полного погашения аванса. Документами, подтверждающими использование аванса по его целевому назначению, является представление акта о приемки выполненных работ (форма КС-2), акта смонтированного и (или) не монтируемого оборудования и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанные Генподрядчиком. Данные документы предоставляются Субподрядчиком Генподрядчику в порядке, предусмотренном пунктом 7.2 Договора.

В случае одностороннего отказа Генподрядчика от исполнения Договора, одностороннего отказа Субподрядчика от исполнения Договора Субподрядчик обязан возвратить Генподрядчику сумму неотработанного аванса и уплатить ранее не оплаченные (не удержанные) возвратные суммы (при наличии), оплатить суммы убытков и штрафные санкции (при наличии), не позднее следующего дня после прекращения действия Договора (п. 3.11 Договоров).

Согласно п. 4.1 Договоров работы, предусмотренные Договором, выполняются в сроки в соответствии Графиком производства строительно-монтажных работ (далее - График производства СМР, Приложение № 2 к Договору).

Права и обязанности сторон предусмотрены разделом 5 Договоров. Так согласно п. 5.1, 5.1.5, 5.1.7 Договоров Генподрядчик вправе требовать надлежащего исполнения обязательств по Договору и своевременного устранения выявленных недостатков и принимать решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. А Субподрядчик обязан выполнить предусмотренные Договором Работы согласно пункту 1.1 Договора, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с согласованной технической документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные Договором, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования, установленных на соответствующий год, а также в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области проектирования и строительства (п. 5.4.1 Договоров).

Согласно п. 7.1 Договоров приемка работ по Договору, приемка Объекта осуществляются Сторонами в соответствии с Графиком выполнения работ и Сметой Договора.

В соответствии с п. 7.2 Договоров при завершении выполнения работ по Договору, в том числе отдельных видов и/или этапов строительно-монтажных работ и иных предусмотренных Договором работ, определенных Графиками, Субподрядчик обязан не позднее 20 числа текущего месяца письменно уведомить Генподрядчика, лицо, осуществляющее строительный контроль от имени Генподрядчика, об их завершении (далее - уведомление о завершении работ) с приложением документов, подписанных со своей стороны, в объеме, необходимом для сдачи-приемки выполненных работ, в том числе:

- акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 в 4-х (четырех) экземплярах.

- справку о стоимости выполненных работ по унифицированной форме КС-3 в 4-х (четырех) экземплярах;

- документы, подтверждающие фактическую стоимость материалов, конструкций и оборудования поставки Субподрядчика, принятых в смете по прайс-листам (счет-фактура от поставщика, товарно-транспортная накладная);

- акты на монтируемое и не монтируемое оборудование по утвержденной Генподрядчиком форме в 4-х (четырех) экземплярах;

- комплект исполнительной документации на выполненные работы в составе и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Договором, в том числе на электронном носителе, с приложением перечня входящих в ее состав документов, подписанную всеми участвующими в приемке лицами;

- журнал учета выполненных работ по форме КС-6а, в формате разработки;

- счета на оплату работ, счета-фактуры (при необходимости).

Согласно п. 9.3 Договоров Генподрядчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в следующих случаях:

- при существенном нарушении Договора Субподрядчиком (п. 9.3.1 Договоров);

- в случае просрочки исполнения обязательств по выполнению этана, отдельного вида работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней (п. 9.3.2 Договоров);

- в случае существенного нарушения требований к качеству выполняемых работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) (п. 9.3.3 Договоров);

- в случае отсутствия у Субподрядчика лицензии на осуществление деятельности или членства в саморегулируемой организации, необходимых для исполнения обязательства по договору, в том числе, в случае прекращения их действия (п. 9.3.4 Договоров);

- если Субподрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным (п. 9.3.5 Договоров);

- если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Генподрядчик вправе назначить Субподрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Субподрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Договора (п. 9.3.6 Договоров);

- если отступления от условий Договора или иные недостатки результата работ в установленный Генподрядчиком разумный срок не были устранены Субподрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (п. 9.3.7 Договоров);

- если при нарушении Субподрядчиком конечного срока выполнения работ, указанного в Договоре, исполнение Субподрядчиком Договора утратило для Генподрядчика интерес (п. 9.3.8 Договоров);

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (п. 9.3.9 Договоров).

Согласно п. 13.2 Договоров в случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, то они подлежат разрешению в Арбитражном суде города в соответствии с законодательством РФ.

Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору (п. 16.1 Договоров).

Генподрядчик уведомлением за исх. № 362 от 18.06.2021 отказался в одностороннем порядке от исполнения Договоров с 29.06.2021 (л.д. 132-133, том 1).

Истец указал, что в ходе производства работ, Ответчиком было допущено неоднократное нарушение требований законодательства в части благоустройства территории и безопасности производства работ, а именно:

- отсутствие ограждения по месту производства работ по разрытию, что представляет собой угрозу безопасности, здоровью и жизни граждан. Данные нарушения подтверждаются Постановлениями по делу об административном правонарушении Административной комиссии муниципального образования городского округа Керчь Республики Крым № 765 от 09.12.2020, № 152 от 03.03.2021, № 153 от 03.03.2021, № 154 от 03.03.2021, 278 от 14.04.2021, № 415 от 02.06.2021;

- не были исполнены направленные предписания строительного контроля Заказчика;

- представленная Субподрядчиком Исполнительная документация крайне низкого качества и не соответствует предъявленным к ней требованиям нормативно правовых актов и Договоров.

На основании вышеизложенного, Генподрядчик уведомил об одностороннем отказе от исполнения договора по следующим основаниям:

- существенное нарушении Договора Субподрядчиком (п. 9.3.1. Договоров);

- просрочка исполнения обязательств по выполнению этапа, отдельного вида работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней (п. 9.3.2. Договоров);

- существенное нарушение требований к качеству выполняемых работ (п. 9.3.2. Договоров);

- Субподрядчик выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным (п. 9.3.5. Договоров);

- отступления от условий Договора или иные недостатки результата работ являются существенными (п. 9.3.7. Договоров);

- нарушение Субподрядчиком конечного срока выполнения работ, указанного в Договоре, исполнение Субподрядчиком Договора утратило для Генподрядчика интерес (п. 9.3.8. Договоров);

- в соответствии со ст. 717 ГК РФ и п. 9.2.3. Договоров, Генподрядчик вправе в любое время, до сдачи ему результата работ, отказаться от исполнения договора, уплатив Субподрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

По состоянию на дату расторжения, по Договорам за Ответчиком имелась задолженность, составляющая разницу между суммой перечисленных Истцом, в качестве оплаты денежных средств и стоимостью выполненных и принятых работ в размере 16 334 292,19 руб.

Поскольку Договоры расторгнуты в связи с односторонним отказом Истца от их исполнения, и Ответчик не исполнил всех обязательств по ним, то основания для удержания им денежных средств в размере 16 334 292,19 руб. отпали, так как прекратилась обязанность по выполнению подрядных работ.

Претензией за исх. № 842 от 04.10.2021 Истец потребовал произвести возврат денежных средств.

Оставление ответчиком без удовлетворения претензии в полном объеме явилось основание для обращения с настоящим иском в суд.

В силу статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, участвующих в деле, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Договоры, заключенные сторонами, являются договорами строительного подряда.

В соответствии с положениями статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со ст. 706 ГК РФ если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

Согласно статье 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Статьей 309 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. В соответствии со статьей 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Как следует из положений статьи 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

Как указано в статье 715 ГК РФ, заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Договор изменяется или прекращается с момента, когда данное уведомление доставлено или считается доставленным по правилам статьи 165.1 ГК РФ, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или условиями сделки либо не следует из обычая или из практики, установившейся во взаимоотношениях сторон.

Как уже указывалось судом выше, в силу п. 1 ст. 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Согласно пункту 2 статьи 453 ГК РФ при расторжении договора обязательства сторон прекращаются.

Полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала, являются неосновательным обогащением получателя (п. 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении», пункт 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.06.2014 № 35 «О последствиях расторжения договора»).

В соответствии с п. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

В претензии исх. №842 от 04.10.2021 г. истец уведомил Субподрядчика об отказе от исполнения Договоров и потребовал возвратить задолженность.

На основании положений статьей 9, 65 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск несовершения процессуальных действий.

Возражений относительно неправомерности отказа ООО «ТоннельГеоСтрой» от Договоров ответчиком не представлено.

Ответчиком не представлено в материалы дела достаточных, относимых и достоверных доказательств, свидетельствующих о выполнении ответчиком обязательств по договорам.

В статье 65 и 9 АПК РФ указано, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Истцом в материалы дела предоставлены надлежащие доказательства перечисления денежных средств ответчику.

Таким образом, с учетом того, что истец отказался от исполнения Договоров, у ООО «БЭГ ИН» возникла обязанность по возврату денежных средств (аванса) в сумме 16 334 292,19 руб.

Ответчиком суду не представлено также доказательств, что указанная сумма им была возвращена истцу, следовательно, с ООО «БЭГ ИН» в пользу ООО «ТоннельГеоСтрой» подлежат взысканию денежные средства в сумме 16 334 292,19 руб.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Так, истцом оплачена государственная пошлина в размере 104 671,00 руб. согласно квитанции №7714 от 11.11.2021 г. (л.д. 16).

Соответственно, судебные расходы в виде государственной пошлины возлагаются на ответчика в размере 104 671,00 руб.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 110, 167 – 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ:

Исковые требования истца удовлетворить в полном объеме.

Взыскать Общества с ограниченной ответственностью «БЭГ ИН» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ТоннельГеоСтрой» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) неосновательное обогащение в сумме 16 334 292,19 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 104 671,00 руб.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, г. Севастополь, ул. Суворова, 21) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объеме) постановления суда апелляционной инстанции.

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

 

Судья                                                                              М.Е. Можарова