2141/2020-279066(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 294-60-00 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-9624/2020

г. Казань

23 декабря 2020 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе  председательствующего судьи Абульхановой Г.Ф., руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 171  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л :

иск удовлетворить частично. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «ТатГлавИнвест» в 30-дневный  срок после вступления решения в законную силу безвозмездно устранить выявленные  недостатки выполненных подрядных работ по договору от 17 марта 2017 года № 5-1124 на  выполнение подрядных работ по строительству объекта капитального строительства: «72-х  квартирный 9-ти этажный жилой дом по ул.Ютазинская, Московского района г.Казани»:  

- устранить в местах общего пользования на 8 этаже в правом крыле отслоение  штукатурного покрытия на потолке в коридоре;  

- в квартире № 4 устранить обрушение штукатурки потолка в месте прохождения  канализационных труб. В коридоре и жилой комнате на потолке устранить трещины в местах  соединения плит перекрытий. На кухне в месте прохождения стояков устранить обрушение  штукатурки потолка. Выполнить работы по регулировке окон и дверных коробок;  

- в квартире № 17 выполнить работы по: а) регулировке всех окон; б) регулировке  межкомнатных дверей и входной двери; в) утеплению подоконников квартиры; г) устранению  плесени на стыке стены и окна кухни; д) устранению последствий затопления квартиры, а  именно: выполнить ремонтные работы потолка и стен в санузле, ванной комнате, кухне;  выполнить работы по замене линолеума на кухне, в комнатах и прихожей;  

- в квартире № 23 выполнить работы по устранению: трещин на потолке по линии  соединения плит; трещин на потолке кухне и спальной комнаты; трещин в стене у дверного  проема со стороны ванной и санузла;  

- в квартире № 26 выполнить работы: по регулировке всех оконных рам и балконной  двери; по закреплению раковины в ванной комнате; по замене выключателя между ванной  комнатой и санузлом, по установлению декоративной планки для закрытия замка входной  двери; по устранению щели на стыке рамы и откоса в зале; по ремонту порога при входе в  лоджию с зала; по выравниванию стяжки пола в спальной комнате, по ремонту потолков в  квартире; по замене подоконника в спальной комнате; по срезу излишней изоляции в месте  прохождения труб отопления в полы;  

- в квартире № 33 выполнить работы по ремонту потолка в коридоре; устранению  трещин на стенах около балконной двери и на кухне возле окна; восстановлению порога при  входе на балкон;  

- в квартире № 42 выполнить работы: по замене рамы окна в гостиной комнате;  регулировке окна в спальной комнате;  

- в квартире № 47 выполнить работы: по устранению трещины в стене под  подоконником на кухне; по регулировке балконной двери, регулировке окна в спальной  комнате;  

- в квартире № 50 выполнить работы по: устранению трещин над дверью ванной  комнаты; восстановлению штукатурки в санузле и ванной комнате; регулировке дверей в  санузле и ванной комнате; устранению трещин на потолке кухни и коридора;  

- в квартире № 63 выполнить работы по электроосвещению гостиной комнаты; 

- в квартире № 64 выполнить работы на балконе по покраске стен и устранению трещин  на полу; выполнить работы по устранению трещины в стене над входной дверью, выполнить  работы по регулировке кухонного окна;  

- в квартире № 66 выполнить работы по устранению трещин на потолках по всей  квартире; устранению трещины между стеной и подоконником при выходе на лоджию; замене  электрического щитка, установленного в квартире.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ТатГлавИнвест", г.Казань,  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Муниципального унитарного предприятия  "Дирекция муниципальных жилищных программ", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) штраф в размере 514131,20 руб., расходы по оплате госпошлины в размере 19283  руб.  

В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать. Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок.  

ПредседательствуюЭщлиекйт рсоундньаяя  подпись действительна.Г.Ф. Абульханова  Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департаментаДата 26.03.2020 7:10:30Кому выдана Абульханова Галия Фатыховна