Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А40-24775/24-96-173

27 апреля 2024 года

г. Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 16.04.2024

Полный текст решения изготовлен  27.04.2024

Арбитражный суд в составе:

судья Гутник П.С. (единолично), при ведении протокола секретарем судебного заседания Анпиловой Э.Ю., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ГБУ "ДИРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ" 119180, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЯКИМАНКА, БОЛЬШАЯ ПОЛЯНКА УЛ., Д. 52, СТР. 1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 30.01.2003, ИНН: 

<

***> к ООО "ПРОМИНЖИНИРИНГ" 119331, 

<

...>, ЭТ/КМ/ОФ 5/20/3, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 13.04.2011, ИНН: 

<

***>, КПП: 773601001 о взыскании 4 687 603,28 руб.

при участии:

от истца: ФИО1 по дов. от 19.06.23г.; диплом;,

от ответчика: не явился, извещён;

Рассмотрев материалы дела, суд

УСТАНОВИЛ:

ГБУ "ДИРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ" (далее по тексту – Истец) обратилось в арбитражный суд с иском к ООО "ПРОМИНЖИНИРИНГ" (далее по тексту – Ответчик) о взыскании неустойки по гражданско-правовому договору бюджетного учреждения от 27.04.2020 № 102/20(ПСД) в размере 4 687 603,28 (четыре миллиона шестьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот три) рубля 28 копейки.

Представитель истца поддержал заявленные требования в полном объеме по основаниям, изложенным в иске.

Представитель ответчика, надлежащим образом извещённый, в судебное заседание не явился. Дело рассмотрено в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ.

Заслушав представителя истца, исследовав письменные материалы дела, арбитражный суд приходит к следующему.

Рассматривая данный спор по существу, суд исходит из следующего.

Между сторонами заключен договор подряда, к правоотношениям сторон применяются положения гл. 37 ГК РФ.

Согласно п. 1 ст. 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, в том числе с требованием о присуждении ему компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Согласно ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки) (ч. 1 ст. 708 ГК РФ).

Согласно ч. 1 ст. 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.

Как установлено ч. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами (пункт 4 статьи 753 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В силу ст. 331 ГК РФ соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.

27.04.2020 между ГБУЗ «Дирекция развития объектов здравоохранения города Москвы» (переименовано в ГБУ «Дирекция развития объектов здравоохранения города Москвы», далее – Заказчик, Истец) и ООО «ПРОМИНЖИНИРИНГ» (далее – Подрядчик, Ответчик) был заключен гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № 102/20(ПСД) на выполнение комплекса проектно-изыскательских работ по разработке и согласованию проектно-сметной документации на переоборудование помещений под установку медицинского оборудования в лечебных учреждениях города Москвы (лот 4) (далее – Контракт).

Согласно п. 1.1 Контракта, Подрядчик обязался по заданию Заказчика выполнить комплекс проектно-изыскательских работ по разработке и согласованию проектно-сметной документации на переоборудование помещений под установку медицинского оборудования в лечебных учреждениях города Москвы (лот 4) (далее – работы) в объеме, установленном в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее - Техническое задание), а Заказчик обязался принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

В соответствии с п. 3.1 Контракта (в редакции дополнительного соглашения от 16.11.2020 № 2 к Контракту) сроки выполнения работ по Контракту установлены в соответствии с Техническим заданием: 399 дней с момента заключения Контрактов, то есть с 27.04.2020 по 31.05.2021.

Согласно п. 2.1 Контракта, цена Контракта составляет 43 406 795,00 (сорок три миллиона четыреста шесть тысяч семьсот девяносто пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% (далее – Цена Контракта).

Пунктами 12.1 и 12.2 Контракта (в редакции дополнительного соглашения от 16.11.2020 № 2 к Контракту) установлено, что Контракт вступал в силу со дня его подписания Сторонами и действовал по «31» декабря 2021 г. включительно.

Истечение срока действия Контракта влекло прекращение обязательств по Контракту (за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных п. 6.3 Контракта и обязательств Заказчика по оплате работ, выполненных в течение срока действия Контракта).

На основании п. 4.1 Контракта Подрядчик в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после окончания завершения этапа выполнения работ, указанного в Календарном плане, представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием, и Акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанные Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах.

В соответствии с п. 5.4.1 Контракта Подрядчик обязан был своевременно и надлежащим образом выполнить работы в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к Контракту) и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Контракта.

В разделе 2 Технического задания содержится перечень объектов (39 объектов), на которых должен был быть осуществлен комплекс проектно-изыскательских работ по разработке и согласованию проектно-сметной документации на переоборудование помещений под установку медицинского оборудования в лечебных учреждениях города Москвы, в рамках исполнения обязательств по Контракту.

Согласно п. 7.3 Контракта, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

По состоянию на 31.12.2021 работы по Контракту Подрядчиком не выполнены и не сданы, в связи с чем Подрядчик обязан уплатить пени за просрочку выполнения работ по Контракту на 214 (двести четырнадцать) календарных дней за период с 01.06.2021 по 31.12.2021.

Сумма невыполненных работ, по которым возникла просрочка исполнения обязательств по Контракту, составляет 43 406 795,00 (сорок три миллиона четыреста шесть тысяч семьсот девяносто пять) рублей 00 копеек.

Учитывая вышеизложенное, сумма неустойки, подлежащая оплате Подрядчиком за просрочку выполнения обязательств на 214 (двести четырнадцать) календарных дней по Контракту, составляет 2 322 263,53 (Два миллиона триста двадцать две тысячи двести шестьдесят три) рубля 53 копейки, согласно расчету:

Задолженность:

43 406 795,00 руб.

Период просрочки:

с 01.06.2021 по 31.12.2021

Доля от ставки ЦБ:

1/300

Расчёт ставки:

на указанную дату (17.11.2022)

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Формула

Неустойка

с

по

дней

43 406 795,00

01.06.2021

31.12.2021

214

7.5

43 406 795,00 ? 214 ? 1/300 ? 7.5%

2 322 263,53 р.

Сумма неустойки: 2 322 263,53 руб.

Кроме того, пунктом 7.4 Контракта установлено, что за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов Цены Контракта в случае, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно). Цена Контракта составляет 43 406 795,00 (сорок три миллиона четыреста шесть тысяч семьсот девяносто пять) рублей 00 копеек.

Таким образом, в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Контракту размер штрафа, подлежащего уплате Заказчику, составляет 2 170 339,75 (два миллиона сто семьдесят тысяч триста тридцать девять) рублей 75 копеек.

Одновременно с этим п. 4.1 Контракта установлено, что Подрядчик в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после окончания завершения этапа выполнения работ, указанного в Календарном плане, представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием, и Акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанные Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах.

В соответствии с п. 5 раздела 8 Технического задания по завершению работ по Контракту, Подрядчик обязан предоставить Заказчику полный комплект технической, проектной и рабочей документации, предусмотренный Техническим заданием. Проектная и рабочая документация, откорректированная по результатам прохождения экспертизы и согласованная в соответствии с п. 5 Технического задания, предоставляется в форматах, указанных в пп. IV Технического задания.

Подпунктом IV Технического задания предусмотрено, что Заказчику передаются по 4 ед. технического заключения, проектной и рабочей документации на бумажном носителе и по 1 ед. на электронном носителе в следующих форматах, (совместимых с программным обеспечением

- техническое заключение, текстовая часть: формат - doc, графическая часть: формат - dwg, pdf;

- проектная и рабочая документация, текстовая часть: формат - doc, графическая часть: формат - dwg, pdf; сметы: формат - xlsx, Сметная программа, АРПС.

Электронная версия документации передается Заказчику на компакт-диске (дисках) – DVD-R (CD-R). Диск должен быть защищен от записи, иметь этикетку с указанием разделов документации, даты. Каждый физический раздел документации (том, часть, книга) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Электронная версия должна соответствовать бумажному носителю.

Вместе с тем, отчетная документация до настоящего времени в адрес Заказчика ни по одному из 39 (тридцати девяти) объектов по Контракту не поступала.

В соответствии с п. 7.6 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Таким образом, в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательства по Контракту, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа, подлежащего уплате Заказчику, составляет 195 000,00 (Сто девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек (5 000,00 руб. х 39 (объектов)).

Учитывая вышеизложенное, общий размер неустойки составляет 4 687 603,28 (Четыре миллиона шестьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот три) рубля 28 копеек (2 322 263,53 рублей (пени) + 2 170 339,75 рублей (штраф) + 195 000,00 рублей (штраф)).

Расчет неустойки судом проверен, произведён в соответствии с условиями заключенного сторонами договора, требованиями действующего законодательства, ответчиком контррасчет не представлен. Учитывая установленные судом обстоятельства ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязательств, требования истца в указанной части подлежат удовлетворению.

Истцу была предоставлена отсрочка госпошлины.

Госпошлина распределена на основании ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "ПРОМИНЖИНИРИНГ" (ИНН: 

<

***>) в пользу ГБУ "ДИРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ" (ИНН: 

<

***>) неустойку в размере 4 687 603 руб. 28 коп.

Взыскать с ООО "ПРОМИНЖИНИРИНГ" (ИНН: 

<

***>)  в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 46 438  руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья                                                                                                     П.С. Гутник