АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ 

г. Воронеж 

«06» октября 2022 г. Дело № А14-20672/2021  

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Кострюковой И.В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

Общества с ограниченной ответственностью «Стройтехиндустрия-М», г. Воронеж (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью «Стройинжиниринг», г. Воронеж (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о расторжении договора 

и по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью «Стройинжиниринг», г.  Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью «Стройтехиндустрия-М», г. Воронеж (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании 10 880 545 руб. 03 коп., об обязании представить подписанные акты  выполненных работ КС-2 и справки о стоимости выполненных работ КС-3, счет-фактуру на  сумму 8 469 478 руб. 36 коп. с учетом НДС 20%  

Руководствуясь статьями 167-171 АПК РФ, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Первоначальный иск общества с ограниченной ответственностью  «Стройтехиндустрия-М», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу  с ограниченной ответственностью «Стройинжиниринг», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) о расторжении договора № 210033 на выполнение земляных работ с  использованием машин и механизмов подрядчика от 12.08.2021 оставить без  удовлетворения.  

Встречный иск общества с ограниченной ответственностью «Стройинжиниринг», г.  Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью «Стройтехиндустрия-М», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) о взыскании 10 880 545 руб. 03 коп., в том числе: 6 530 521 руб. 64 коп.  неотработанного аванса; 19 770 руб. 48 коп. процентов за пользование чужими денежными  средствами за период с 26.01.2022 по 07.02.2022, продолжив их начисление по день  фактического возврата суммы неотработанного аванса; 4 330 252 руб. 91 коп. штрафа за  невыполнение обязательств за период с 01.10.2021 по 25.01.2022; об обязании представить  подписанные акты выполненных работ КС-2 и справки о стоимости выполненных работ КС- 3, счет-фактуру на сумму 8 469 478 руб. 36 коп. с учетом НДС 20% удовлетворить в части  взыскания 6 530 521 руб. 64 коп. неотработанного аванса; 19 770 руб. 48 коп. процентов за  

пользование чужими денежными средствами за период с 26.01.2022 по 07.02.2022,  продолжив их начисление по день фактического возврата суммы неотработанного аванса;  4 330 252 руб. 91 коп. штрафа за невыполнение обязательств за период с 01.10.2021 по  25.01.2022.  

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройтехиндустрия-М», г.  Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Стройинжиниринг», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) 6 530 521 руб. 64 коп. неотработанного аванса; 19 770 руб. 48 коп. процентов за  пользование чужими денежными средствами за период с 26.01.2022 по 07.02.2022,  продолжив их начисление по день фактического возврата суммы неотработанного аванса в  размере 6 530 521 руб. 64 коп. исходя из ключевой ставки Банка России, действующей в  соответствующие периоды просрочки, начиная с 08.02.2022, с учетом действия моратория,  введенного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 «О  введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым  кредиторами», до момента фактического исполнения основного обязательства, если  основное обязательство не будет исполнено до окончания действия  моратория; 4 330 252 руб. 91 коп. штрафа за невыполнение обязательств за период с  01.10.2021 по 25.01.2022; 77 403 руб. расходов по госпошлине.  

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать.  

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд  в течение месяца после его принятия через суд, вынесший судебный акт.  

Судья И.В. Кострюкова